УИД 85RS0006-01-2023-000972-90

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

12 января 2024 год п.Усть-Ордынский

Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области в составе судьи Желтухиной Е.Ю., при секретаре Филипповой О.П., с участием истца ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-13/2024 по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о расторжении договора строительного подряда, взыскании убытков по договору строительного подряда, взыскании штрафа в размере 50% от взысканной судом суммы, компенсации расходов на услуги юриста,

установил:

ФИО1 обратилась с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2, в котором просит суд: признать расторгнутым договор строительного подряда, заключенный между ФИО1 и ИП ФИО2 19.06.2023; взыскать с ИП ФИО2 убытки в размере 

<

данные изъяты> взыскать с ИП ФИО2 штраф в размере 50% от взысканной судом суммы в связи с добровольным неисполнением претензии; взыскать с ИП ФИО2 компенсацию расходов на услуги юриста в размере 

<

данные изъяты> в обоснование заявленных требований указала следующее.

19.06.2023 между ней и ИП ФИО2 был заключен договор строительного подряда о строительстве жилого дома из бруса заказчика на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Сведения о возводимом объекте: площадь 66,5 кв.м., фундамент ленточный, крыша двускатная, шиферная, высота потолков 2,9 м. Стоимость строительных работ, в соответствии с п.4.1 Договора составляет 

<

данные изъяты> без учета стоимости бруса. Началом срока исполнения строительных работ, согласноп.1,4 Договора является 15.07. 2023, дата окончания строительных работ – 15.09.2023. Заказчик, в соответствии с п.4.2 Договора оплатил 

<

данные изъяты> 19.06.2023 – 

<

данные изъяты> 01.08.2023 – 

<

данные изъяты> На момент обращения к ответчику 01.09.2023 с претензией о расторжении Договора строительные работы были выполнены только в виде устройства ленточного фундамента. Работы выполнены в ненадлежащем качестве. Требуются мероприятия по устранению кривизны контура фундамента, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Выполненные ответчиком работы истец оценивает в 

<

данные изъяты> Таким образом, размер убытков составляет 

<

данные изъяты> Уведомление о расторжении Договора направлялось Подрядчику по адресу, указанному в договоре строительного подряда от 19.06.2023. 

В судебном заседании ФИО1 заявленные исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик ИП ФИО2, извещенная о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом (судебное извещение, направленное в адрес ответчика возвращено в суд с отметкой почтового отделения «истек срок хранения», что свидетельствует об отказе ответчика получить судебную корреспонденцию, в связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 117 ГПК РФ он считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства) в судебное заседание не явилась, об уважительности причин неявки суд не уведомила, не просила о рассмотрении дела в ее отсутствие, в связи с чем, суд определил о возможности рассмотрения гражданского дела в порядке заочного производства.

Суд, выслушав истца, изучив представленные доказательства, приходит к следующему.

Согласно ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии со ст. 730 Гражданского кодекса РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Судом установлено, что в соответствии с договором строительного подряда от 19.06.2023, стороны в лице истца ФИО1, выступившей по договору в качестве Заказчика с одной стороны, и ответчика ИП ФИО2, выступившей по договору в качестве Подрядчика с другой стороны, заключили договор о следующем.

Подрядчик обязуется своими силами и средствами осуществить строительство жилого дома из бруса заказчика, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. Сведения об объекте: площадь застройки 66,5 кв.м.; фундамент ленточный, крыша двускатная, крытая шифером, высота потолков 2,9 м.; основные материалы для строительства: пиломатериал заказчика, шифер, бетон. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения строительных работ по настоящему Договору (п.1.1, 1.2, 1.3)

Дата начала выполнения строительных работ по Договору 15.07.2023. Дата окончания выполнения строительных работ 15.09.2023 (п. 1.4).

Общая стоимость всех строительных работ по Договору является твердой и составляет сумму в размере 

<

данные изъяты>. (п.4.1). Оплата производится в следующем порядке: 

<

данные изъяты> в день подписания договора, после заливки фундамента – 

<

данные изъяты> в день завершения строительных работ (п. 4.2)

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, 19.06.2023 Истец во исполнение своих обязательств по договору оплатила Ответчику 

<

данные изъяты> день подписания договора, 01.08.2023 - 

<

данные изъяты>

Право заказчика отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному Договором становиться явно невозможным предусмотрено в п.2.2.2 Договора.

01.09.2023 в связи с нарушением подрядчиком условий договора в части сроков выполнения работ Истец направила Ответчику письменную претензию, согласно которой строительные работы выполнены только в виде устройства ленточного фундамента, работы выполнены в ненадлежащем качестве. В связи с чем, уведомляет об отказе от исполнения заключенного между ними договора строительного подряда, причина отказа п.2.2.2 Договора, а также о расторжении договора и предлагает в 5-дневный срок со дня получения Подрядчиком настоящего уведомления возместить Заказчику убытки в размере 

<

данные изъяты>

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

В силу ст. 28 Федерального закона "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В силу п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Положения статьи 450.1 ГК РФ предусматривают, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1).

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2).

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В силу части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит установленным, что обязательства по договору строительного подряда в установленный срок ответчиком не исполнены, работы не выполнены за исключением заливки ленточного фундамента ненадлежащего качества, что также подтверждается представленными фотографиями, в связи с чем у истца, как заказчика возникло право одностороннего отказа от исполнения договора подряда и право требовать возврата уплаченных по договору денежных средств за вычетом стоимости выполненной работы по заливке ленточного фундамента, оцененной истцом в 

<

данные изъяты>

Доказательств, свидетельствующих об обратном, в том числе и иной стоимости выполненной работы, ответчиком не представлено, а потому судом принимается решение по имеющимся в деле письменным доказательствам.

Соответственно, с ответчика подлежат взысканию денежные средства, уплаченные истцом по договору строительного подряда за вычетом стоимости выполненной части работ. 

<

данные изъяты>стоимость работ по устройству ленточного фундамента) = 

<

данные изъяты>

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. В порядке п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в пользу истца штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

В п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Требование истца о взыскании с ответчика штрафа при удовлетворении требований потребителя судом является обоснованным, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Также, Истец просит взыскать с ответчика судебные расходы в размере 

<

данные изъяты>.- расходы на услуги юриста.

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

В подтверждение понесенных истцом в связи с рассмотрением дела судебных расходов на оплату услуг юриста представлены: договор об оказании юридических услуг № от 31.08.2023, заключенный между ФИО1 (заказчик) и ФИО4 (исполнитель). Предмет договора: исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по составлению уведомления (претензии) о расторжении договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и ИП ФИО2, на условиях определенных п. 2 настоящего договора. Стоимость услуг, предусмотренных п.п. 2.1.1 – 2.1.2 настоящего Договора составляет 

<

данные изъяты> Оплачивается в день подписания договора. 13.09.2023 между ФИО1 и ФИО4 заключено дополнительное соглашение к договору об оказании юридических услуг № от 31.08.2023, согласно которому заказчик обязуется оплатить исполнителю 

<

данные изъяты> на расчетный счет или передать наличными денежные средства после подписания настоящего соглашения, в связи с предстоящим обращением Заказчика в Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области и возникшей вследствие этого необходимостью подготовки искового заявления. 

Согласно акту о приемке выполненных работ от 13.09.2023 ФИО1 оказаны следующие услуги: изучение материалов, консультация, подготовка уведомления (претензии) о расторжении договора строительного подряда 31.08.2023 – стоимость составила 

<

данные изъяты> консультация, подготовка искового заявления 13.09.2023 – стоимость услуг – 

<

данные изъяты> Оплата данных услуг подтверждается расписками от 31.08.2023 и 13.09.2023г. 

Таким образом, руководствуясь вышеизложенными нормами права и разъяснениями к ним, с учетом принципа разумности и справедливости, достаточности, цены иска, сложности дела, объема оказанных представителем услуг, результат рассмотрения дела, отсутствия возражений и доказательств чрезмерности взыскиваемых расходов, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного требования и необходимости его полного удовлетворения.

Суд не находит оснований для удовлетворения требования истца о признании спорного договора расторгнутым в судебном порядке, поскольку как уже было указано выше истец воспользовался правом одностороннего отказа от исполнения договора, предусмотренного ст. 715 ГК РФ и п. 2.2.2 договора, и уведомлением (претензией) от 01.09.2023 расторг договор в одностороннем порядке. Спорный договор считается расторгнутым истцом в одностороннем порядке, в связи с чем, требование истца в этой части удовлетворению не подлежит.

В соответствии со ст. 103 ч. 1 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Истец был освобожден от уплаты государственной пошлины в силу Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", в связи с чем, с ИП ФИО2 подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в размере 

<

данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ,

решил:

Исковые требования ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, штраф в размере 

<

данные изъяты> рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, судебные расходы в размере 

<

данные изъяты>.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» сумму государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>

В удовлетворении требования о признании договора строительного подряда расторгнутым, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Эхирит-Булагатский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Е.Ю.Желтухина 

Мотивированное решение составлено 12.01.2023.