УИД 04RS0006-01-2021-000467-09

Дело № 2-117/2021 

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 июля 2021 года с.Сосново-Озерское

Еравнинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Лодоевой Э.О., при секретаре Гончикдоржиевой Р.Ж., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Сибирь» к ФИО о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и взыскании неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Сибирь» обратилось в суд и иском к ФИО о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.0300.2625.16 от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании неустойки в размере 10 037,5 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины. 

В обоснование требований указано, что 12.07.2016 года между ПАО «Россети Сибирь» и ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с условиями заключенного договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика, который, в свою очередь обязался оплатить расходы на технологическое присоединение. По условиям договора заявитель принял на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Также, ответчик обязался уведомить сетевую организацию после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации и др. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению 4 месяца со дня заключения договора. Обязательства по договору ответчиком не исполнены, что в соответствии с абз.2 п.16, раздела 2 договора является основанием для расторжения договора и взыскании неустойки по п.17 договора.

В судебное заседание представитель истца не явился, направил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Ответчик ФИО в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена судом надлежащим образом. Доказательств уважительности причин неявки ответчика суду не представлено, ходатайств о рассмотрении дела в её отсутствие также не поступало. В связи с чем, суд считает возможным, с согласия представителя истца, рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика в порядке заочного производства по правилам главы 22 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со ст.421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правоотношения сторон вытекают из договора возмездного оказания услуг, правовое регулирование которого предусмотрено в главе 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, равно как и заявитель в пределах своих полномочий (которые л ли урегулированы п.2.3.Договора).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технологической возможности технологического присоединения регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.2004 N861 (далее - Правила N 861).

Судом установлено, что 12.07.2016 года между ПАО «Россети Сибирь» (ранее ПАО МРСК Сибири») и ФИО заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с условиями заключенного договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № в точке присоединения, определенной техническими условиями.

В пункте 8 раздела 2 Договора ответчик принял на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика, указанные в технических условиях, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

Также, согласно договору, ответчик обязуется уведомить сетевую организацию после выполнения мероприятий технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организации др.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения настоящего договора.

Техническими условиями №, являющимися приложением к договору определено, какие мероприятия должны быть осуществлены заявителем ФИО, в том числе монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующий требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства № 442 от 04 мая 2012 года, установка отключающего аппарата перед прибором учета и др. 

Ответчиком обязанности по договору не исполнены. Сетевая организация о выполнении ФИО технических условий не уведомлялась, с просьбой о продлении срока ответчик не обращалась.

Абзацем 2 п.16 раздела 5 договора предусмотрено, что нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее данного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Пункт 17 Договора предусматривает, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленную на дату заключения договора и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Судом установлено, что исполнителем ПАО «Россети Сибирь» выполнены обязанности по договору, подготовлены, согласованы и разработаны технические условия. 

В свою очередь, ответчиком обязательства, предусмотренные п.11 Технических условий и п.8 раздела 2 Договора, в том числе по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях, в установленный 4 месячный срок, не исполнены. Доказательств обратного суду не представлено.

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий составил 10 037, 50 руб., которая и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Оснований для применения ст.333 ГК РФ суд не усматривает. 

15.01.2019 года в адрес ответчика почтовой связью направлено уведомление об исполнении обязательств со стороны заявителя с просьбой при отсутствии необходимости подключения подписать соглашение о расторжении, направленное вместе с уведомлением. 

Учитывая, что в соответствии со ст.450 Гражданского кодекса РФ, договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, суд полагает необходимым требования истца в указанной части также удовлетворить, расторгнуть договор, заключенный между сторонами, поскольку установлено, что ответчик не выполнил встречные обязательства по договору.

Согласно ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В связи с чем, суд также взыскивает с ответчика уплаченную истцом государственную пошлину пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 6 401,50 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199,235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Сибирь» к ФИО удовлетворить. 

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 12.07.2016 года, заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО.

Взыскать с ФИО в пользу ПАО «Россети Сибирь» неустойку в размере 10 037,50 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 401,50 руб., всего взыскать 16 439 руб. 

Ответчик в случае несогласия с принятым решением вправе в течение семи дней со дня получения копии решения обратиться с заявлением в Еравнинский районный суд Республики Бурятии об отмене заочного решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Судья Э.О. Лодоева