УИД: 85RS0006-01-2024-000288-24

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п.Усть-Ордынский 19 апреля 2024 года

Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области в составе судьи Альхеева Г.Д., при секретаре Ханхасаевой А.А., с участием истца ФИО1, представителя истца ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-285/2024 по иску ФИО3 к ОАО «Иркутская электросетевая компания» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, 

установил:

ФИО1 обратилась с иском к ОАО «Иркутская электросетевая компания» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, в обоснование заявленных требований указано следующее.

ФИО3 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ОАО «Иркутская электросетевая компания» заключили договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям вышеуказанного дома № № (мощность 15 кВт, 04, кВ), срок исполнения – 04.07.2023. 

Согласно данному договору электросетевая организация - ОАО «Иркутская электросетевая компания» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность энергопринимающих устройств -15 кВт, категория надежности - III, класс напряжения к которым осуществляется присоединение - 0,4 кВ. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 1 год со дня заключения договора.

ДД.ММ.ГГГГ подписаны технические условия для присоединения к электросетям.

С стороны Истца обязательства по оплате за технологическое присоединение были полностью исполнены, что подтверждается чеком об операции от 05.07.2022.

На момент окончания срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению ОАО «ИЭСК» технологическое присоединение жилого дома не осуществило. По истечении этого срока Истец была вынуждена обратиться в Иркутское УФАС России.

12.04.2024 постановлением заместителя руководителя - начальника антимонопольного контроля Иркутского УФАС России ОАО «ИЭСК» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ, выразившееся в повторном нарушении субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электросетям, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Исходя из п. 12 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 сетевая организация обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.

Однако, в нарушение условий договора о техническом присоединении ответчик в установленный срок до 05.07.2023 взятые на себя обязательства не исполнил, в связи с чем нарушил права Истца как потребителя.

Факт нарушения ОАО «ИЭСК» срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению полностью подтверждается Постановлением Иркутского УФАС России от 12.02.2024.

В соответствии с п. 17 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №-ВЭС, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 % общего размера платы за каждый день и обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Во исполнение ст. 426 ГК РФ ОАО «ИЭСК», являясь субъектом естественной монополии, должна оказать услуги по электроснабжению каждому кто к нему обратится.

Электросетевая организация отказывается в добровольном порядке исполнить обязательства по условиям договора, а именно, осуществить технологическое присоединение к жилому дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>.

Отказ ответчика в добровольном порядке исполнить обязательства существенно нарушает права Истца как потребителя, в связи с чем Истец вынуждена обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе жилищных.

Поскольку исполнить договорные обязательства вправе лишь ответчик как субъект естественной монополии, он обязан осуществить технологическое присоединение, в том числе, в принудительном порядке.

В соответствии со ст.28 Закона о защите прав потребителей, еслиисполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - срокиначала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или)промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во времявыполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будетвыполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе назначитьисполнителю новый срок.

На основании изложенного Истец просила обязать Ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №; взыскать с Ответчика в ее пользу неустойку в размере 5% от суммы, уплаченной за технологическое присоединение (

<

данные изъяты> за каждый день просрочки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>, неустойку в размере 5 % от суммы выплаченной за технологическое присоединение, равную 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления решения в законную силу, компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>

Истец ФИО1 и её представитель ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме. Суду пояснили, что оплату по договору произвели, уведомление о выполнении технический условий Ответчику направили. Однако Ответчик осмотр с участием заявителя не произвел.

Относительно размера компенсации морального вреда истец ФИО1 пояснила суду, что в настоящее время проживает с ребенком в доме, принадлежащем её отцу. Построила в 

<

адрес> жилой дом для проживания. Однако до настоящего времени не может переехать в свой дом в связи с отсутствием электрической энергии. При строительстве дома была вынуждена обращаться к соседям за подключением к их электрическим сетям, испытывала неудобства и несла соответствующие расходы. 

Представить ответчик ОАО «Иркутская электросетевая компания» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте его проведения извещены надлежащим образом. 

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ дело рассмотрено без участия представителя Ответчика. 

Суд, выслушав Истца и её представителя, изучив представленные доказательства, приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (пункт 2 статьи 539 ГК РФ).

На основании пункта 3 статьи 539 ГК РФ к отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные права, принятые в соответствии с ними.

Согласно пункту 4 статьи 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанной нормы Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее по тексту - Правила, Правила технологического присоединения).

В судебном заседании установлено, что 05.07.2022 между ОАО «ИЭСК» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: жилой дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопримающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категории надежности: III (третья); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. 

В силу п. 6.1 договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, указанных в технических условиях (п. 8.1 Договора). 

Заявитель также обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, автоматике и телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной) (п. 8.2. Договора).

Пунктом 10 договора предусмотрен, что размер платы за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>

Согласно п. 11 Договора, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета для внесения платы за технологическое присоединение на условии 100 % предоплаты, при этом в квитанции или платежном поручении в графе назначение платежа обязательно указывается номер и дата договора, счета, а также наименование филиала Сетевой организации. 

Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или расчетный счет сетевой организации. 

Из письма АО «ИЭСК» на имя ФИО1 следует, что оплата по договору Истцом произведена и договор вступил в силу с ДД.ММ.ГГГГ

Согласно разделу 17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 

<

данные изъяты>, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 года со дня заключения договора (п. 5 договора). 

Согласно п. 10 Технических условий Сетевая организация осуществляет мероприятия по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенные в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК»: реконструкцию ПС 110 кВ Черноруд с заменой трансформатора Т2 мощностью 4 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА (прирост мощности 12 МВА), монтаж ОРУ 35кВ; выполнение мероприятий «последней мили» (от существующей сети до точки присоединения): строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,347 км.); установку прибора учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) на границе раздела электрических сетей Сетевой организации и Заявителя либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 с составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (в т.ч. подача напряжения) к своим электрическим сетям осуществляется после выполнения условий настоящего договора (п. 10.4 Технических условий). 

Согласно разделу 11 Технических условий, Заявитель осуществляет: монтаж ввода (трехфазного, однофазного) проводом СИП (сечением не более 4x16 м2) от точки присоединения до ВРУ 0,4 кВ энергопринимающего устройства Заявителя. При необходимости установить подставную опору в пределах своего земельного участка. Для крепления провода СИП установить кронштейн (арматуру) на стене здания (сооружения) либо на подставной опоре, расположенной внутри земельного участка заявителя. Расстояние от провода до поверхности земли на ответвлении к вводу должно быть не менее 2,5 м. Монтаж вводного устройства объекта с установкой коммутационного аппарата (номинальным током не более 32 А).

После выполнения строительно-монтажных (монтажных) работ Заявитель предоставляет объем работ по п. 11 настоящих технических условий в Сетевую организацию на проверку путем направления соответствующего Уведомления о выполнении технических условий с приложением необходимых документов (в том числе документов необходимых для заключения положения о взаимоотношениях с потребителем) (п. 11.5 технических условий).

В соответствии с п. 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (Правила N 861) заявитель по выполнении необходимых работ по подготовке объекта к технологическому присоединению к сетям представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов. Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя.

По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий).

Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.

Согласно требованиям вышеуказанного нормативного правового акта обязанность фактического технологического присоединения, выполняемая сетевой организацией, носит последовательный характер по отношению к выполнению сторонами мероприятий по техническим условиям. 

Согласно положениям ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. 

В случае не предоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению. 

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. 

Таким образом, из буквального толкования указанных норм права следует, что применительно к данным правоотношениям, на Ответчика возлагается обязанность по предоставлению доказательств исполнения условий договора, но при исполнении Истцом вышеперечисленных действий. 

Истцом суду представлено уведомление, направленное Ответчику о выполнении технических условий от 28.06.2023 г. 

Таким образом, суд находит установленным исполнение Истцом своих обязательств по договору.

Ответчиком доказательств исполнения своих обязательств по договору, суду не представлено. 

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области от 12.02.2024 г. Ответчик привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ по факту неисполнения Ответчиком договора, заключенного с Истцом. 

Из постановления следует, что представитель Ответчика при рассмотрении дела об административном правонарушении ссылался на обстоятельства неисполнения договора, не связанные с исполнением Истцом своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения. Однако эти обстоятельства были признаны должностным лицом не относящимися к объективным причинам неисполнения договора.

Ответчиком суду, также не представлено каких-либо доказательств невозможности исполнения договора по обстоятельствам непреодолимой силы.

В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, которыми определяется порядок и процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, установлено, что в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, ( в том числе с физическими лицами) стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств. 

Таким образом, Ответчик, заключив договор, порядок исполнения которого предусмотрен императивными нормами публичного права, исходя из статуса сторон, берет на себя все риски его исполнения, исходя из того, что такие риски являются неотъемлемо сопутствующими коммерческой деятельности сетевой организации.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

При таких обстоятельствах, суд находит установленным факт неисполнения своих обязательств Ответчиком по исполнению договора о технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающих устройств Истца, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

С учетом изложенного исковые требования в части возложения на Ответчика обязанности исполнить договор являются обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Обсуждая срок исполнения судебного решения, суд, с учетом отсутствия каких-либо обоснованных возражений со стороны Ответчика, считает необходимым установить срок в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Кроме того, с Ответчика в пользу Истца подлежит взысканию договорная неустойка за период просрочки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляющая 

<

данные изъяты> из расчета 550х5%=27,5 х 240 дней.

А также подлежит взысканию неустойка с 01.03.2024 г. по день вступления решения суда в законную силу из расчета 5% от 

<

данные изъяты> за каждый день просрочки, но не более 

<

данные изъяты>

Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Законодатель установил повышенную ответственность за нарушение обязательств стороной, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и распространил действие Закона РФ "О защите прав потребителей" на отношения, вытекающие из таких договоров, и тем самым, предоставил им право требовать возмещения морального вреда за нарушение соответствующих обязательств.

Таким образом, при разрешении вопроса о взыскании компенсации морального вреда потребителю достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Согласно п. 1 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

При определении компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Степень нравственных и физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий.

Поскольку законом предусмотрена презумпция причинения потребителю морального вреда в связи с нарушением его прав как потребителя, и при установленных судом обстоятельствах того, что права ФИО1, как потребителя оказались нарушенными ответчиком, с учетом требований ст. 1101 ГК РФ, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

решил:

Исковых требований ФИО3 к ОАО «Иркутская электросетевая компания» в об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Обязать АО «Иркутская электросетевая компания» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> исполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1: жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Иркутская электросетевая компания» в пользу ФИО1 неустойку в размере 5% от суммы, уплаченной за технологическое присоединение (

<

данные изъяты>.) за каждый день просрочки за период с 05.07.2023 по 29.02.2024 в размере 

<

данные изъяты> с 01.03.2024 г. по день вступления решения суда в законную силу, но не более 

<

данные изъяты> а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб.

В удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда в большем размере отказать. 

Решение может быть обжаловано через Эхирит-Булагатский районный суд в Иркутский областной суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения. 

Судья Г.Д. Альхеев

Мотивированное решение составлено 19.04.2024 г.