№ 12-256/2023

РЕШЕНИЕ

Красноярский край, г. Ачинск 

ул. Назарова, 28Б 03 июля 2023 года

Судья Ачинского городского суда Красноярского края Насонов С.Г.,

с участием помощника Ачинского городского прокурора Малиновской Р.А., защитников Степановой Е.Г., Путенковой М.Н., представляющих интересы должностного лица, привлеченного к административной ответственности, - генерального директора ООО СПК «Сфера» ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника должностного лица, привлеченного к административной ответственности, генерального директора ООО СПК «СФЕРА» Аллахярова ФИО2 – Степановой Е.Г. на постановление мирового судьи судебного участка № 145 в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского края от 24 апреля 2023 года, 

УСТАНОВИЛ:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 145 в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского края от 21.04.2023 года должностное лицо - генеральный директор ООО СПК «Сфера» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Защитник должностного лица Степанова Е.Г., не согласившись с указанным постановлением, обратилась в суд с жалобой, в которой просит постановление мирового судьи отменить, производство по делу прекратить. Жалоба мотивирована следующим.

11.04.2022 между муниципальным казенным учреждением «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» и обществом с ограниченной ответственностью строительно-производственная компания «Сфера» заключен муниципальный контракт № 0119300000122000098 (далее - Контракт). Согласно пункту 1.1. Контракта, Предметом контракта является выполнение работ по благоустройству территории улицы Кирова (от ул. Льва Толстого до шоссе Нефтяников) г. Ачинска.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 сентября 2022 года (п. 3.2. Контракта).

Согласно пункту 4.1. Контракта, Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии «Техническим заданием» (приложение № 1 к контракту), в полном объеме согласно локального сметного расчета (приложение к контракту № 3). Работы по благоустройству ул. Кирова должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам.

Результаты работ и иные показатели должны соответствовать «Техническому заданию» (приложение к контракту № 1), проектной документации, условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), основным положениям, решению от 17.05.2017 № 21 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. Техническая документация (технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, ТУ, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

В ходе выполнения обязательств по муниципальному контракту Подрядчиком былвыявлен ряд несоответствий в проектно-сметной документации, в адрес муниципальногозаказчика были направлены запросы об устранении несоответствий:

Дата и исх. номердокументацииПодрядчика 

Дата и исх. номердокументации Заказчика 

Предмет обращения 

Срокрассмотренияобращения 

№ 51 от 11.04.2022№ 172 от 24.06.2022(повторно) 

№ 11-11-2824 от 13.07.2022№ 11-11-3292 от 03.08.2022 

- устройство подстилающих слоев - ремонт тротуаров излитого асфальта - устройство плиточныхтротуаров- устройство покрытия остановок- устройство асфальтобетонных тротуаров - замена асфальтобетона слитого на мелкозернистый 

93 дня 

№ 214 от 13.06.2022№ 275 от 02.08.2022(повторно)№ 277 от 03.08.2022(повторно) 

№ 11-11-3261 02.08.2022 

вертикальная планировка на участок № 2 (площадка торгового рынка ул. Фрунзе) 

19 дней 

№ 193 от 01.07.2022 

№ 40 от 11.07.2022 

Устройствоподстилающего и выравнивающего слоев 

11 дней 

№ 35 от 10.07.2022№ 229 от 20.07.2022№ 247 от 26.07.2022(повторно)№ 291 от 03.08.2022(повторно)№ 304 от 05.08.2022(повторно)№ 313 от 09.08.2022(повторно)№ 316 от 11.08.2022№ 342 от 16.08.2022(повторно) № 304 от 05.08.2022 № 317от 11.08.2022 

№ 11-11-3537 от 23.08.2022 

-О демонтаже кабельной линииУведомление о производстве работ по ремонту тепловых сетей третьими лицами в границах производства работ подрядчиком 

36 дней 

№ 241 от 26.07.2022 

№ 11-11-3296 от 

-О предоставлении новых 

№ 291 от 03.08.2022 

05.08.2022 

технических решений под 

(повторно) 

остановочные пункты 

№ 244 от 26.07.2022 

(«Парк 

(не 

№ 315 от 10.08.2022 (о 

Железнодорожников», 

соответствует 

согласовании размеров 

«АЗС «КНП») 

ПСД) 

остановочной 

№ 11-11-3296 от 

-О предоставлении новых 

площадки АЗС «КНП») 

18.08.2022 

технических решений под 

№ 327 от 12.08.2022 (о 

остановочный павильон 

согласовании размеров 

(перед торгово- 

остановочной 

экономическим 

площадки 

№ 11-11-3286 от 

техникумом) 

«Железнодорожников») 

18.08.2022 

№ 330 от 12.08.2022 (о 

-О согласовании схемы 

направлении 

остановочной площадки в 

согласованных схем 

районе парка 

остановочных 

№ 11-11-3556 от 

«Железнодорожников » 

площадок» 

23.08.2022 

№ 340 от 16.08.2022 

-О согласовании схемы 

(повторно) 

остановочной площадки в 

№ 349 от 16.08.2022 (о 

районе АЗС «КНП» 

34 дня 

приостановлении работ 

на участках № 1.3, 4 (о 

-О согласовании 

согласовании схем 

устройства остановочной 

размещения 

площадки в районе 

остановочных 

№ б/н от 

торгово-экономического 

площадок в 

25.08.2022 

техникума 

соответствии с 

требованиями ГИБДД) 

-О согласовании размеров остановочных площадок 

№ 261 от 28.07.2022 

№ 3935 от 

О предоставлении 

7 дней 

29.07.2022 

технического решения в срок до 03.08.2022 (ремонт лестницы) 

№ 257 от 27.07.2022 

21.07.2022 

О демонтаже опалубки, 

34 дня