2-6641/2025

24RS0048-01-2025-001982-77

Р Е Ш Е Н И Е

 (заочное)

Именем Российской Федерации

09 октября 2025 года Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Акимовой И.В.,

при секретаре Березюк Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Жуковой Офелии Дмитриевны к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд с иском /с учетом уточненных требований л.д.61/ к ПАО «Россети Сибирь» об осуществлении технологического присоединения, мотивируя требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» (ответчик) и ФИО1 (истец) заключен договор №, с приложением в виде технических условий №. Договор технологического присоединения заключался для питания электрической энергией строений на земельном участке, расположенном по адресу 

<

адрес>, Емельяновский p-он, 8-й км. автодороги Красноярск-Енисейск (справа) кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:964, который принадлежит на праве собственности ФИО1 В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В силу пункта 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Пунктом 8 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий. В соответствии с пунктом 10 договора технологического присоединения, размер платы устанавливается приказом Министерства тарифной политики 

<

адрес> №-э от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 15 960 рублей. В соответствие с договором об оплате за третье лицо от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Альфа-Т», последнее произвело оплату в размере 6 384 рубля, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Назначение платежа: Технологическое присоединение по договору 20.2400.11786.23/15 960руб. Что в соответствие с п. 11 договора покрывает первый и второй платежи общей суммы договора в 10 % и 30 % соответственно. Кроме того, ФИО1 выполнила все иные обязательства, предусмотренные договором, техническими условиями, необходимые для осуществления подключения объекта потребления к энергоснабжающим сетям. О выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, ФИО1 уведомляла ответчика по телефону и через личный кабинет на сайте ПАО «Россети Сибири». Однако в установленный п. 5 договора срок ПАО «Россети Сибири» не начало работы по технологическому подключению участка к энергосетям и не выполнило условия договора. ФИО1 обращалась к ответчику с письменной претензией, в которой просила исполнить обязательство по подключению к электрическим сетям означенный выше земельный участок. Претензия направлена в ПАО «Россети Сибири» ДД.ММ.ГГГГ, получена адресатом ДД.ММ.ГГГГ, не удовлетворена. Просит обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ. в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу 

<

адрес>, Емельяновский p-он, 8-й км. автодороги Красноярск-Енисейск (справа) кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:964.

В судебном заседании представитель истца ФИО2, действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, уточненные исковые требования поддержал по доводам иска, на их удовлетворении настаивал.

Истец, представитель ответчика, представитель третьего лица ООО «Альфа-Т» в судебное заседание не явились, о дате судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 3 Постановления Пленума от ДД.ММ.ГГГГ N 13 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции", при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства дела решается с учетом требований ст. ст. 167, 233 ГПК РФ. Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие.

Рассматривая вопрос о последствиях неявки в суд ответчика, суд учитывает положения ст. 35 ГПК РФ, предусматривающей обязанность лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

В связи с чем, в соответствии со ст. 233 ГПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие не явившихся участников процесса, в том числе ответчика, в порядке заочного производства. 

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживавшие и т.п.).

Пунктом 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка, расположенного по адресу 

<

адрес>, Емельяновский p-он, 8-й км. автодороги Красноярск-Енисейск (справа), кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:964, что следует из выписки из ЕГРН.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» (ответчик) и ФИО1 (истец) заключен договор №, с приложением в виде технических условий №. Договор технологического присоединения заключался для питания электрической энергией строений на земельном участке, расположенном по адресу 

<

адрес> (справа) кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:964 (л.д.19-21). 

В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. 

Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

В силу пункта 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. 

Пунктом 8 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий. 

В соответствии с пунктом 10 договора технологического присоединения, размер платы устанавливается приказом Министерства тарифной политики 

<

адрес> №-э от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 15 960 рублей. 

В соответствие с договором об оплате за третье лицо от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Альфа-Т», последнее произвело оплату в размере 6 384 рубля, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.24). Платежным поручением № также произведена оплата в размере 9576 рублей (л.д.60). 

Оценивая представленные и исследованные в судебном заседании доказательства, с учетом положений ст. ст. 56, 67 ГПК РФ, суд принимает во внимание следующее.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ, либо одностороннее изменение условий обязательства согласно статье 310 ГК РФ не допускается.В соответствии с п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Таким образом, юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии с п. 1 ст.26 Федерального закона от 26.0З.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В соответствии с п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки установленные настоящими Правилами.

Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения, включающая в себя подачу заявки, заключение договора, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, фактическое присоединение, составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В пункте 16.3 Правил установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» (ответчик) и ФИО1 (истец) заключен договор №, с приложением в виде технических условий №. Договор технологического присоединения заключался для питания электрической энергией строений на земельном участке, расположенном по адресу 

<

адрес>, Емельяновский p-он, 8-й км. автодороги Красноярск-Енисейск (справа) кадастровый номер земельного участка №.

Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора, срок окончания технологического присоединения приходится на ДД.ММ.ГГГГ.

По условиям Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта - складское здание/помещение, расположенный по адресу: 

<

адрес> (справа), кадастровый номер земельного участка №.

строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № технических условий, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП 0.4 кВ;

выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

В судебном заседании достоверно установлено, что работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям не выполнены в срок, доказательств иного, вопреки положениям ст. 56 ГПК РФ, не представлено, материалы дела не содержат, как и не представлено доказательств, наличия обстоятельств освобождающих ответчика от исполнения обязательств по договору. 

В связи с чем, суд находит несостоятельными доводы возражений ответчика, относительно заявленных требований. 

Таким образом, с учетом установленных в ходе судебного заседания обстоятельств, указанных норм права, суд приходит к выводу, что силу требований ст.ст.309-310 ГК РФ на ПАО «Россети Сибирь» подлежит возложению обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по указанному выше адресу.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

С учетом длительного срока неисполнения обязательства, при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ, суд полагает возможным установить срок исполнения обязанности по осуществлению технологического присоединения в течение одного месяца, со дня вступления в силу решения суда.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 3 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Жуковой Офелии Дмитриевны удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, в течение месяца, со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) госпошлину в доход местного бюджета 3 000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: И.В. Акимова

Мотивированное решение изготовлено - 24.10.2025