Дело № 2-683/2018

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации 

13 сентября 2018 года г. Гвардейск

Гвардейский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Салаховой Н.Р., 

при секретаре Григорьевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Янтарьэнерго» о понуждении к исполнению обязательств по договору,

УСТАНОВИЛ :

ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику о понуждении к исполнению обязательств по договору, указав, что 28.06.2017 года между ним и АО «Янтарьэнерго» (сетевая организация) был заключён договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с данным договором АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения электропринимающих устройств заявителя. В соответствии с п. 1 - 5 Договора ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению принадлежащих истцу энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома к электрическим сетям сетевой организации в срок не более 6 месяцев со дня заключения договора. Свои обязательства по оплате технологического присоединения в размере 550 рублей и получению технических условий истцом исполнены, однако технологическое присоединение до настоящего времени ответчиком не осуществлено. В связи с тем, что ответчик не выполняет условия по договору истец не имеет возможности ввести дом в эксплуатацию и вселиться в него. Истец просит суд обязать ответчика исполнить условия договора и взыскать с него в соответствии с действующим законом о защите прав потребителей неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору на день принятия решения судом, компенсацию морального вреда 20000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Истец ФИО1 в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика - ОАО «Янтарьэнерго» в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела был извещен надлежащим образом, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело без его участия.

Выслушав пояснения истца, исследовав материалы дела и дав им оценку, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с положениями ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность приналичии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда закономили договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Как установлено в судебном заседании, 28.06.2017 года между сторонами был заключён договор № об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с договором АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения электропринимающих устройств заявителя. 

В соответствии с п.п. 1 - 5 договора ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению принадлежащих истцу энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома к электрическим сетям сетевой организации в срок не более 6 месяцев со дня заключения договора. 

Обязательство по оплате технологического присоединения в размере 550 рублей истцом исполнено в июне 2017 года, обязательства по получению технических условий истец также выполнил, однако свои обязательства по договору АО «Янтарьэнерго» по технологическому присоединению до настоящего времени ответчиком не исполнило, что препятствует истцу сдать дом в эксплуатацию. 

Неотъемлемой частью договора являются технические условия № от 28.06.2017. 

Как видно из п. 2 Договора об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям: «Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ориентировочно на северо-восток от жилого 

<

адрес> (КН №)».

Согласно п. 6 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. 

Приложением № 1 к договору сторонами согласованы технические условия для при соединения к электрической сети, в соответствии с которыми точкой присоединения к электрической сети определен зажим провода на опоре (№ уточнить при подключении) ВЛИ 0,4 кВ Л-новая от ТП 15-0,4 кВ новая точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО «Янтарьэнерго». 

Согласно пунктам 10.1,10.2 Технических условий № Z-4034/17 в целях присоединения нового заявителя сетевая организация обязалась: построить трансформаторную подстанцию (ТП) 15/0,4 кВ с трансформатором потребной мощности. От ВЛ 15-016 до ТП по п. 10.1 построить ЛЭП 15 кВ с проводом СИП-3 (SAX) (протяженность 950 м), сечением токопроводящих жил соответствующей пропускной способности, на ж/б опорах. Район по ветру - 4, по гололеду - 2. Присоединение выполнить через отключающий пункт. Для варианта КЛ - выполнить расчет емкостных токов на землю. От ТП по п. 10.1 до участка застройки заявителя построить ВЛИ с СИП 0,4 кВ (трассу ВЛИ, марку и сечение определить проектом, протяженность 80 м).

В свою очередь, на заявителя возложена обязанность произвести монтаж электросети от точки присоединения (через ЩУ) до ВРУ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности. На вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью. Установить приборы учёта для расчётов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. 

Материалами дела подтверждается, что истец свои обязательства, установленные как условиями договора, так и техническими условиями, исполнил надлежащим образом, тогда как АО «Янтарьэнерго» мероприятия по осуществлению технологического присоединения не выполнило ни в срок, предусмотренный договором, ни на день вынесения решения суда. 

Фактических данных о том, АО «Янтарьэнерго» окончило выполнение указанных выше работ и направило в адрес истца уведомление о готовности технологического присоединения объекта к электрическим сетям, материалы дела также не содержат. 

Указанные обстоятельства подтверждаются как пояснениями истца, так и письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными выше, а также: сообщением АО «Янтарьэнерго» от 15.12.2017 года о технологическом присоединении; сообщением АО «Янтарьэнерго» от 18.07.2018 года о технологическом присоединении; сообщением АО «Янтарьэнерго» от 22.06.2017 года о заключении договора о технологическом присоединении; выпиской из Росреестра от 27.11.2017 года, из которой видно, что истец является собственником дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>; свидетельством о государственной регистрации права от 18.02.2016 года, согласно которому истец является собственником земельного участка для ИЖД, местоположение: 

<

адрес>, ориентировочно в 300 метрах на северо-восток от жилого дома № 

<

адрес>.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных постановлением исполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим (физическим) лицом. При этом заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

В перечень существенных условий договора, установленный п. 16 Правил, входит, в том числе, указание срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать 6 месяцев -для заявителей, указанных в п. п. пунктах 12(1), 14 и 34 Правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В силу п. 16.3 Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Принимая во внимание установленный договором срок, в течение которого подлежали исполнению обязательства ответчика – 6 месяцев, а также срок неисполнения им мероприятий по осуществлению технологического присоединения, составляющий более года с даты заключения договора, и составляющий более года с момента уведомления истцом сетевой организации о выполнении со своей стороны технических условий, суд приходит к тому, что ответчик, принимая на себя обязанность осуществить технологическое при соединение, обязан создать условия для возможности такого присоединения, в том числе и обеспечить наличие электросетевых объектов, а также все мероприятия, которые необходимо провести исполнителем - подрядчиком, то есть выполнение строительно-монтажных работ. 

При этом доказательств, которые свидетельствовали бы о наличии обстоятельств, объективно препятствовавших ответчику своевременно осуществить технологическое присоединение в соответствии с Правилами технологического присоединения и условиями заключенного договора, суду ответчиком представлено не было.

Таким образом, поскольку просрочка исполнения договора имела место исключительно по вине исполнителя - ответчика по делу, суд находит обоснованными требования истца о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа на основании ст.ст. 15, 16 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии с положениями подп. "в" п. 16 Правил сторона договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Аналогичное положение об ответственности согласовано сторонами и в п. 17 договора. Так, с момента просрочки исполнения договора, т. е. с 29 декабря 2017 года по день принятия решения судом (13 сентября 2018 года) прошло 259 дней, в связи с чем размер неустойки составляет 550 рублей х 7.25% х 0.014 х 259 дней = 144,59 рубля, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Решая вопрос о размере подлежащего взысканию с ответчика морального вреда, причиненного истцу вследствие нарушения исполнителем-ответчиком прав потребителя, суд определяет его в 10000 рублей.

Учитывая, что в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, суд считает необходимым взыскать 5072,30 рублей (50% от 10144,59 рублей). 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в бюджет МО «Гвардейский городской округ» госпошлина в размере 300 рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Обязать акционерное общество энергетики и электрофикации «Янтарьэнерго» исполнить условия договора № от 28.06.2017 года осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, согласно технических условий.

Взыскать с АО «Янтарьэнерго» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда 10 000 рублей, неустойку 144,59 рублей, штраф за нарушение прав потребителя 5072,30 рублей, всего 15216,89 рублей. 

Взыскать с ОАО «Янтарьэнерго» в доход местного бюджета госпошлину 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Гвардейский районный суд Калининградской области в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда.

Мотивированное решение суда изготовлено 18 сентября 2018 года.

Судья Салахова Н.Р.