Гражданское дело № 2-302/24

УИД 24RS0034-01-2024-000320-66

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(мотивированное)

с. Шалинское 06 сентября 2024 г.

Манский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего - судьи Мордвинова А.П.,

при секретаре судебного заседания Тузовой С.С.,

с участием истца представителя истца ФИО1 в лице представителя ФИО2., действующей на основании нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № № с использованием канала видеоконференц-связи с Октябрьским районным судом г. Красноярска,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-302/24 по исковому заявлению ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителей в сфере предоставления коммунальных услуг,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в Манской районный суд Красноярского края с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей в сфере предоставления коммунальных услуг.

Исковые требования ФИО1 аргументированы тем, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор ТП), в соответствии с которым: 1) ПАО «Россети Сибирь» взяло на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающего устройства ФИО1 «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом / садовый / дачный дом)», расположенного на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, Шалинский сельсовет, 

<

адрес> (далее - Спорное строение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует (п. 1.2); 2) ФИО1 взяла на себя обязательство оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 3) договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21); 4) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 06 месяцев со дня заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 произвела оплату соответствующего счета, однако в предусмотренный Договором КП срок (т.е. до ДД.ММ.ГГГГ) технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» не было осуществлено. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 направила в адрес ПАО «Россети Сибирь» претензию путем размещения обращения на сайте «портал-тп.рф», размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и на это обращение из ПАО «Россети Сибирь» дан ответ о невозможности исполнения Договора ТП в 2023 г. ввиду объема мероприятий и стоимости затрат на проведение строительно-монтажных работ с указанием на то, что исполнение указанного Договора ТП предполагается включить в план мероприятий на 2024 г. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в адрес Красноярского УФАС России было направлено заявление вх. № на действия ПАО «Россети Сибирь», выразившееся в нарушении установленного порядка технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Спорного строение, и по данному обращение заместителем руководителя Красноярского УФАС России ФИО3 вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании которого ПАО «Россети Сибирь» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. ПАО «Россети Сибирь», тем не менее, несмотря на направляемые в его адрес претензии и привлечение к административной ответственности за нарушение условий Договора ТП, данную сделку не исполнят. ФИО1 в связи с неправомерным бездействием понесла судебные расходы по оплате юридических услуг по подготовке искового заявления в размере 10 000 руб. 00 коп., которые подлежат взысканию с ПАО «Россети Сибирь».

Основываясь на изложенном, ФИО1, с учетом поступившего уточнения, просит суд: «1) Обязать Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по технологическому присоединению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о технологическом присоединении заключенным с ФИО1 относительно «Малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом / садовый / дачный дом)», расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, Шалинский сельсовет, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, в соответствии с п. 10 технических условий №, являющихся приложением к указанному договору: - произвести действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств; - выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; - запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от точки указанной в п. 7 ТУ до новой ТП 10/0,4кВ. протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом; - запроектировать и построить ТП 10/0,4кВ. тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом; - запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом; - выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. №442); 2) взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. в качестве возмещения судебных расходов связанных с подготовкой и подачей искового заявления в суд; 3) взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 государственную пошлину за обращение в суд 300 руб. 00 коп.; 4) в случае неисполнения судебного решения взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 на основании ст. 308.3 ГК РФ денежные средства в размере 5 000 (пяти тысяч) руб. 00 коп. за один календарный день неисполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств до дня фактического исполнения решения суда.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ судом вынесены определения, на основании которых к участию в рассмотрении дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю (далее - УФАС по Красноярскому краю), Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее - ПАО «Красноярскэнергосбыт»), кадастровый инженер ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании: 1) истец ФИО1 в суд не явилась, однако направила в адрес своего представителя ФИО2., которая с использованием канала видеоконференц-связи с Октябрьским районным судом г. Красноярска, заявленные исковые требования поддержала, просила их удовлетворить по изложенным в иске основаниям, заявила о несогласии на рассмотрение гражданского дела по правилам гл. 22 ГПК РФ, дала объяснения аналогичные содержанию искового заявления, обратила внимание суда на то, что в настоящее время Спорное строение поставлено на государственный кадастровый учет с присвоением кадастрового номера 24:24:0301001:1383, однако к электрическим сетям оно присоединено; 2) представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», а также представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, УФАС по Красноярскому краю, ПАО «Красноярскэнергосбыт», а также третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, кадастровый инженер ФИО4, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения гражданского дела, в судебное заседание не явились, о причинах неявки не сообщили, об отложении заседания не ходатайствовали, каких-либо возражений против заявленных ФИО1 исковых требований не принесли, в связи с чем их неявка признается судом неуважительной.

Разбирательство гражданского дела суд, согласно ст. ст. 113, 153 167 ГПК РФ, проводит: 1) в общем порядке в виде несогласия стороны истца на рассмотрение заявленного спора по правилам гл. 22 ГПК РФ; 2) при имеющейся явке сторон в отсутствие неявившихся участников, которые не пожелали воспользоваться своим правом на личное участие в судебном заседании.

Рассмотрев представленные материалы гражданского дела, проверив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности суд, приходит к выводу о том, что заявленные ФИО1 исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ) в пп. 1- 2, 4 ст. 1 регламентировано, что: 1) гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты; 2) граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе; 3) они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора; 4) никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Правилами пп. 1, 4, 5 ст. 10 ГК РФ установлено, что: 1) не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (п. 1); 2) если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков (п. 4); 3) добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (п. 5).

Положениями ст. 12 ГК РФ определено, что защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем: восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; компенсации морального вреда.

Правилами пп. 1- 4 ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что: 1) граждане и юридические лица свободны в заключении договора; 2) понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством; 3) стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами; 3) стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор); 4) к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора; 4) условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

ГК РФ в ч. 1 ст. 422 установлено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Правилами пп. 1 - 4 ст. 539 ГК РФ закреплено, что: 1) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (п. 1); 2) договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (п. 2); 3) к отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (п. 3); 4) к отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (п. 4).

Положениями п. 1 ст. 779 ГК РФ закреплено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг) (п. 1 ст. 27 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Правилами ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установлено, что: 1) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов; 2) расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Положениями ст. ст. 1, 2, ч. 1 ст. 26 Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», установлено, что: 1) этот Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии; 2) законодательство РФ об электроэнергетике основывается на Конституции РФ и состоит из ГК РФ, данного Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами; 3) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в ст. ст. 3, 38 а также в п. 2 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения) регламентировано, что лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных бытовых и (или производственных) нужд, являются потребителями.

27 декабря 2004 г. Правительством РФ издано Постановление № 861, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения).

Положениями пп. 2, 6 Правил технологического присоединения закреплено, что: 1) эти Правил распространяется на случаи: присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств; присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 01 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2007 г. № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»; предусмотренные п. 41 этих Правил (при присоединении к сетям смежной сетевой организации); 2) технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами; 3) заключение договора является обязательным для сетевой организации; 4) при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Правилами технологического присоединения в подп. Б п. 16 предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 1) 06 месяцев - для заявителей, указанных в пп. 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 этих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более 500 м. в сельской местности; 2) для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 04 лет).

Положениями подп. Д п. 18 Правил технологического присоединения установлено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе и проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX этих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

Правилами технологического присоединения в пп. 84, 85, 89, 90, 102 регламентировано, что: 1) сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно (п. 84); 2) для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением ряда документов, предусмотренных указанными Правилами (п. 85); 3) при невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя; при осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки; повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 03 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению; акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений (п. 89); 4) срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанных со стороны сетевой организации акта осмотра (обследования) электроустановки и акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний (п. 90); 5) срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не должен превышать 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний (п. 102).

04 мая 2012 г. Правительством РФ принято Постановление № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», утверждены «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии».

Правилами п. 36 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии предусмотрено, что документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.

Положениями п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27декабря 2004 г. № 861, определено, что документами о технологическом присоединении, согласно являются документы, составляемые (составленные) в процессе технологического присоединения (после завершения технологического присоединения) энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

ГК РФ в ч. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 регламентировано, что: 1) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.; 2) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. Б п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2004 г. № 861, для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Положениями абзаца 5 п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, назначить исполнителю новый срок.

Правилами ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 68, ч. 3 ст. 196 ГПК РФ установлено: 1) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом; 2) в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны; 3) суд принимает решение по заявленным истцом требованиям; однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

ПАО «Россети Сибирь», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является юридическим лицом (ОГРН 

<

***> от 05 августа 2020 г.), и его основным видом деятельности является: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (л.д. 31 - 34).

ЕГРН, согласно выписке от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения о том, что: 1) по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, Шалинский сельсовет, 

<

адрес>, уч. 126, расположен земельный участок с кадастровым номером №, площадью 800+/-10 кв.м. (далее - Спорный земельный участок), однако сведения о зарегистрированных правах на этот объект недвижимости в этом Реестре отсутствуют, данные об объекте недвижимости внесены в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ; 2) по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, площадью 220 кв.м. (далее - Спорное строение), и данные об этом объекте недвижимости внесены в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ с регистрацией права собственности на него на имя ФИО1 на основании следующих документов: договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, технического плана здания от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ, как установлено судом, от ФИО1 поступила заявка на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) в отношении малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной на Спорном земельном участке.

ПАО «Россети Сибирь» в последующем заключил с ФИО1 договор от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор ТП), в соответствии с которым:

1) ПАО «Россети Сибирь» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует, а ФИО1 обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 1);

2) технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, Шалинский сельсовет, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № (п. 2);

3) срок действия технологических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора (п. 4);

4) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 06 месяцев со дня заключения этого договора (п. 5);

5) ПАО «Россети Сибирь» обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на ПАО «Россети Сибирь» мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ФИО1, указанные в технических условиях; в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления ФИО1 ПАО «Россети Сибирь» о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий ПАО «Россети Сибирь., провести с участием ФИО1 осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств ФИО1; не позднее 03 (трех) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абз. 3 п. 6, с соблюдением срока, установленного п. 5 Договора ТП, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии ФИО1 акт об осуществлении технологического присоединения и направить его ФИО1 (п. 6);

6) ФИО1 обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по Договору ТП, в том числе по выполнению возложенных на ФИО1 мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ФИО1, указанные в технологических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ФИО1, указанные в тезнологических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями, уведомить ПАО «Россети Сибирь» о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств ПАО «Россети Сибирь»; после осуществления ПАО «Россети Сибирь» фактического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 02 (двух) рабочих дней со дня получения указанного акта от ПАО «Россети Сибирь»; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить ПАО «Россети Сибирь» о направлении заявок в иные сетевые организации по технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения (п. 8);

7) размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18 ноября 2022 г. № 82-э, с изменениями внесенными приказами Министерства тарифной политики Красноярского края от 02 декабря 2022 г. № 113-э и составляет 15 960 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% в сумме 2 660 руб. 00 коп. (п. 10); 

8) ФИО1 несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 (п. 13);

9) Договор ТП может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ (п. 15);

10) сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), при этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки (п. 17);

11) Договор дП считается заключенным со дня оплаты ФИО1 счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21) (л.д. 8-10).

Техническими условиями № для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (приложение к Договору ТП) (далее - Спорные технические условия), предусмотрено, что: 1) основным источником питания является: ПС 35/10 кВ № 148 «Шалинская»; 2) срок действия настоящих технических условий составляет 02 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 3) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт; 4) категория надежности: третья; 5) класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,40 кВ; 6) в целях технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» осуществляет: А) организационные мероприятия: подготовку технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; б) выполнение проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством от 16 февраля 2008 г. № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством: строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № настоящих ТУ, до новой ТП 10/0,4-ДВ; протяженность и характеристики ЛЭП уточняются проектом; строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом; строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, протяженность и характеристики ЛЭП уточняются проектом; выполнение монтажа комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442); 7) в целях технологического присоединения заявитель осуществляет: выполнение ввода от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) (л.д. 11 - 13).

ФИО1 предоставлена справка по операции, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ ею произведена оплату по Договору ТП в размере 15 960 руб. 00 коп., в связи с чем суд признает Договор ТП заключенным ДД.ММ.ГГГГ (дата оплаты счета по Договору ТП заявителем), а соответственно срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 06 месяцев со дня заключения этого Договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ включительно (л.д. 6).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через портал электросетевых услуг «РОССЕТИ» обратилась в ПАО «Россети Сибирь» с обращением, согласно которого указывает на то, что срок по Договору ТП на подключение к электросети истекает ДД.ММ.ГГГГ, однако в настоящее время никаких работ не ведется на подключение дома к электросети, и на данное обращение ПАО «Россети Сибирь» направлен ответ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что учитывая объем мероприятий и стоимость затрат на проведение строительно-монтажных работ, технологическое присоединение объекта ФИО1 в 2023 г. не предоставляется возможным, исполнение договора ТП предполагается включить в план мероприятий на 2024 г., о сроках его исполнения ФИО1 будет уведомлена дополнительно в 1 квартале 2024 г. (л.д. 22 - 24).

ФИО1 после этого направляла в адрес ПАО «Россети Сибирь» обращение (вх. №-ЭП/24 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указала на то, что мероприятия по технологическому присоединению в установленный Договором ТП срок ПАО «Россети Сибирь» не выполнены.

ПАО «Россети Сибирь» в УФАС по Красноярскому краю предоставлены письменным документы и сведения (вх. №-ЭП/24 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым: 1) обязательства по Договору ТП перед ФИО1 не были исполнены за недостатком финансирования; 2) убыточность ПАО «Россети Сибирь» подтверждается бухгалтерской отчетностью, размещенной на официальном сайте Общества; 3) Договор ТП находится на исполнении.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в УФАС по Красноярскому краю с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства ПАО «Россети Сибирь», отказывающимся производить технологическое присоединение частного объекта недвижимости по просроченному, заключенному Договору ТП.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем руководителя Красноярского УФАС России ФИО3 вынесено постановление, в соответствии с которым ПАО «Россети Сибирь» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, по факту того, что ПАО «Россети Сибирь» не осуществило технологическое присоединение объекта (Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)») к электрическим сетям в установленный Договором ТП срок, то есть до ДД.ММ.ГГГГ включительно) (л.д. 14 - 21).

Правилами ст. 61 ГПК РФ определено, что: 1) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда; 2) указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных этим Кодексом.

ПАО «Россети Сибирь» в рамках судебного разбирательства каких-либо доказательств исполнения обязательств перед ФИО1 по Договора ТП не представило, равно как и не представило доказательств того, что ФИО1 не осуществила подготовительные мероприятия по технологическому присоединению объекта строительства, расположенного на Спорном земельном участке к электрическим сетям, предусмотренные Договором ТП, а соответственно при таких данных суд признает, что ПАО «Россети Сибирь» в предусмотренный Договором ТП срок - до ДД.ММ.ГГГГ включительно, принятые на себя обязательства по технологическому присоединению объекта строительства, расположенного на Спорном земельном участке не исполнило.

Договором ТП в п. 16 предусмотрено право ФИО1 при нарушении сетевой организацией сроков выполнения технологического присоединения расторгнуть этого договор в одностороннем порядке, однако сведений о направлении ФИО1 уведомления ПАО «Россети Сибирь» об одностороннем расторжении Договора ТП материалы дела не содержат и ПАО «Россети Сибирь» на данное обстоятельство в ходе рассмотрения дела не ссылался, каких-либо доказательств исполнения ПАО «Россети Сибирь» указанных мероприятий в установленный Договором ТП срок материалы дела не содержат.

ФИО1 в рамках заявленных исковых требований просит обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям в соответствии с условиями Договора ТП в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу, и суд в целом соглашается с данным требованием ФИО1, поскольку со стороны ПАО «Россети Сибирь» допущены нарушения сроков исполнения Договора ТП и по заявленному спору ФИО1 не просит о расторжении Договора ТП, в связи с чем на основании ст. ст. 10, 422, 779, п. 1 ст. 27 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», пп. 2, 6 Правил технологического присоединения в рамках заявленных ФИО1 требований, суд, принимая во внимание принципы разумности и справедливости, возлагает на ПАО «Россети Сибирь» обязанность в течение 03 месяцев с момента вступления принимаемого решения в законную силу исполнить обязательства по Договору ТП по технологическому присоединению в отношении объекта «малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом / садовый / дачный дом)», расположенного на Спорном земельном участке, в соответствии с п. 10 технических условий №, являющихся приложением к Договору ТП, а именно: 1) произвести действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств, расположенных на Спорном земельном участке; 2) выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, и согласовать ее со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ; 3) запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от точки указанной в п. 7 технических условий №, являющихся приложением к Договору ТП, до новой ТП 10/0,4кВ., уточнив проектом протяженность и характеристики данной ЛЭП; 4) запроектировать и построить ТП 10/0,4кВ. тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом; 5) запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом; 6) выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. №442.

ГК РФ в п. 1 ст. 308.3 определено, что: 1) в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; 2) суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» в пп. 31, 32 даны разъяснения, согласно которым: 1) судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (п. 4 ст. 1 ГПК РФ); 2) размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ); 3) в результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

ФИО1 заявлено требования о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» денежной компенсации на случай не исполнения решения суда в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 31 дня с момента вступления решения суда в законную силу, однако, принимая во внимание характер спорных правоотношений с участием ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1, связанного с защитой прав потребителя в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, поведение ПАО «Россети Сибирь» в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что размер заявленной ФИО1 судебной неустойки и порядок ее начисления не отвечает принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного недобросовестного поведения обеих сторон спора, в связи с чем суд определяет ко взысканию с ПАО «Россети Сибирь» судебную неустойку в размере 1 500 руб. 00 коп. за первые 14 календарных дней просрочки исполнения решения в части возложения на ПАО «Россети Сибирь» обязанности по исполнению условий Договора ТП, начиная со следующего дня с момента истечения срока, установленного для исполнения принимаемого решения, а затем при дальнейшем неисполнении принимаемого решения, начиная 15 календарного дня и до фактического исполнения этого решения, размер этой неустойки определяется на сумму 2 500 руб. 00 коп.

Правилами п. 6 с. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» определено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в п. 46 даны разъяснения, согласно которым при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 указанного Закона).

ФИО1 заявлены требования неимущественного характера о понуждении сетевой компании к исполнению условий Договору ТП, а поскольку стоимость Договора ТП составляет 15 960 руб. 00 коп., то при таких данных суд взыскивает с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 штраф за отказ добровольно удовлетворить требований потребителя в досудебном порядке, в размере 7 980 руб. 00 коп.

ГПК РФ ч. 1 ст. 88 определено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, а из положений ч. 1 ст. 98 следует, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

ГПК РФ в ч. 1 ст. 98 регламентировано, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, однако в случае, если иск удовлетворен частично, указанные в этой статье ГПК РФ судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Правилами ч. 1 ст. 100 ГПК РФ предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ИП ФИО5 был заключен договор №, в соответствии с актом от ДД.ММ.ГГГГ № ИП ФИО6 оказал ФИО1 услуги по подготовке искового заявления к ПАО «Россети Сибирь», в связи с ненадлежащим исполнением обязательств договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, и стоимость указанных услуг составила 10 000 руб. 00 коп., которая оплачена ФИО1 двумя кассовыми чеками от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 28 - 29).

ФИО1, как установлено судом, в споре с ПАО «Россети Сибирь» понесла расходы на составление искового заявления в размере 10 000 руб. 00 коп., однако, принимая во внимание характер спорных правоотношений с участием ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1, связанного с защитой прав потребителя в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, поведение ПАО «Россети Сибирь» в ходе судебного разбирательства, суд, учитывая принципы разумности и справедливости, взыскивает с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 судебные расходы по составлению искового заявления в размере 5 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при подаче искового заявления к ПАО «Россети Сибирь» уплатила государственную пошлину в размере 300 руб. 00 коп., что подтверждается чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ, а поскольку ФИО1 в рамках рассматриваемого гражданского дела заявлены имущественные требования, не подлежащие оценке, о понуждении к исполнению условий Договора ТП и о взыскании судебной неустойки, по которым общий размер государственной пошлины составляет 600 руб. 00 коп. (по каждому требованию по 300 руб. 00 коп.), и эти требования признаны судом обоснованными, то в силу положений ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, подп. 3 п. 1 ст. 333-19 НК РФ суд дополнительно взыскивает с ПАО «Россети Сибирь»: 1) в пользу ФИО1 возврат государственной пошлины в размере 300 руб. 00 коп.; 2) в пользу бюджета муниципального образования «Шалинский сельсовет 

<

адрес>» неуплаченную государственную пошлину в размере 300 руб. 00 коп.

Основываясь на изложенном и руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1, имеющей паспорт гражданина РФ (серия №, №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №), к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь», имеющему ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, - удовлетворить частично.

Возложить на Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» обязанность в течение 03 месяцем со дня вступления принимаемого решения в законную силу исполнить обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ № о технологическом присоединении, заключенному с ФИО1, в отношении объекта «малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом / садовый / дачный дом)», расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №, в соответствии с п. 10 технических условий №, являющихся приложением к указанному договору, а именно:

1) произвести действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств, расположенных на данном земельном участке;

2) выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, и согласовать ее со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ;

3) запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от точки указанной в п. 7 технических условий №, являющихся приложением к этому договору, до новой ТП 10/0,4кВ., уточнив проектом протяженность и характеристики данной ЛЭП;

4) запроектировать и построить ТП 10/0,4кВ. тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом;

5) запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;

6) выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 судебную неустойку на случай неисполнение принимаемого решения в части возложения на Публичное акционерное общества «Россети Сибири» обязанности по исполнению условий договора от ДД.ММ.ГГГГ № о технологическом присоединении в следующих размерах: 1) 1 500 руб. 00 коп. за первые 14 календарных дней просрочки исполнения принимаемого решения в этой части, исчисляемых со следующего дня с момента истечения срока, установленного для исполнения этого решения; 2) 2 500 руб. 00 коп., начиная с 15 календарного дня просрочки исполнения решения в этой части и до фактического исполнения этого решения.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1: 1) 5 000 руб. 00 коп. в качестве возмещения судебных расходов по составлению искового заявления; 2) 300 руб. 00 коп. в качестве возврата уплаченной государственной пошлины; 3) 7 980 руб. 00 коп. в качестве штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, предусмотренного п. 6 с. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а всего ко взысканию денежную сумму в размере 13 280 руб. 00 коп.

В остальной части исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» - оставить без удовлетворения.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу муниципального образования «Шалинский сельсовет Манского района Красноярского края» неуплаченной государственной пошлины в размере 300 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано участниками процесса в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда путем подачи жалобы через Манский районный суд Красноярского края в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий А.П. Мордвинов

Резолютивная часть решения оглашена 06 сентября 2024

Мотивированное решение изготовлено 14 октября 2024 г.

Копия верна

судья Манского районного суда Красноярского края А.П. Мордвинов