Гражданское дело **

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

**** Железнодорожный районный суд ***

в с о с т а в е :

председательствующего судьи Тарабариной Т.В.

с участием представителя истицы ФИО1

при секретаре Цаца А.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «Аква Сити» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 обратилась в суд с иском к ООО «Аква Сити» о защите прав потребителя, указав, что между ними заключен договор ** участия в долевом строительстве от **** Согласно данному договору ответчик обязуется построить (создать) жилой многоквартирный дом, расположенный по строительному адресу: ***, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать ей соответствующий объект долевого строительства. Согласно п.1.8 вышеуказанного договора, срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома определен 2 **** года, согласно п.1.9 ответчик в течение трех месяцев после сдачи дома в эксплуатацию обязан передать ей объект (квартиру), то есть до ****. Дата ввода в эксплуатацию- ****, **** в 10 часов 45 минут она была приглашена для подписания акта приема- передачи. В связи с чем ФИО2 просила взыскать в ее пользу с ответчика неустойку за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства (квартиры) за период с **** по **** в сумме 84946,40 руб., компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей и штраф в размере 50%.

В судебном заседании представитель ООО «Аква Сити» предложил истице заключить мировое соглашение, по условиям которого ответчик обязуется в срок до **** выплатить ФИО2 путем перечисления на расчетный счет, реквизиты которого будут предоставлены истицей, денежные средства в сумме 45977 рублей, а истица отказывается от всех остальных исковых требований.

Истица ФИО2 в судебном заседании выразила согласие заключить мировое соглашение на вышеуказанных условиях.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания. Судом истице и представителю ответчика были разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ. 

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное ФИО2 и представителем ООО «Аква Сити», не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.ст. 173, ч. 4 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное ФИО2 и представителем ООО «Аква Сити», по которому:

ООО «Аква Сити» обязуется в срок до **** выплатить ФИО2 путем перечисления на расчетный счет, реквизиты которого будут предоставлены ФИО2, денежные средства в сумме 45977 рублей;

ФИО2 отказывается от всех остальных исковых требований.

Производство по делу по иску ФИО2 к ООО «Аква Сити» о защите прав потребителя прекратить.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Новосибирский Областной суд в 15-дневный срок с подачей жалобы через Железнодорожный районный суд ***. 

Судья- подпись