№ 2-206/2020

УИД 75RS0017-01-2020-000357-02

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 октября 2020 года с. Нижний Цасучей

Ононский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Булгакова А.В., при секретаре Середкиной Е.С., с участием помощника прокурора Ононского района Жамбаловой М.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ононского района в интересах неопределенного круга лиц, муниципального района «Ононский район» к ООО «Стройгарант» об обязании устранить недостатки, выявленные при приемке работ по муниципальному контракту, 

установил:

Прокурор Ононского района обратился в суд с названным иском в порядке ст. 45 ГПК РФ, указывая в обоснование, что 28.06.2019 между муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районный центр казачьей культуры «Возрождение» (далее МБУК РЦКК «Возрождение») и ООО «Стройгарант» по итогам электронного аукциона, проведенного в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон № 44-ФЗ), заключен муниципальный контракт № 1, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК РЦКК «Возрождение». Цена контракта составила 5452344 руб. Срок выполнения работ - 10.10.2019 (п. 1.3 контракта). Дополнительным соглашением № 1 от 09.08.2019 цена контракта увеличена на 10% на основании пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ и составила 5997578 руб. 40 коп. Дополнительным соглашением № 1 от 01.11.2019 изменен срок выполнения работ до 30.11.2019 на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ. 25.12.2019 распоряжением Администрации муниципального района «Ононский район» назначена комиссия по приемке работ по муниципальному контракту. Согласно акту приемки выполненных работ от 25.12.2019 работы приняты на сумму муниципального контракта с недоделками (замечаниями): заменить окно со стороны главного входа вверху с левой стороны двери; сделать огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли в теплое время года (весной 2020 года); представить акт обработки деревянных конструкций, сертификаты материалов и допуск на производство работы; заменить качающийся пол в кабинете на 2 этаже (библиотека); покрасить пол и лестницу на 2 этаже библиотеки до 01.05.2020; установить замок на 2 этаже библиотеки; закончить отделку дверных откосов со стороны улицы; установить положенное по смете количество светильников и выключателей. Кроме того, не выполнены следующие виды работ: не установлены светильники в количестве 29 штук; не установлены розетки штепсельные: неутопленного типа при открытой проводке в количестве 32 штук; не осуществлена смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором (нет глиняной стяжки); не произведена облицовка потолков гипсокартонным и гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см. с открытым рустом (должна быть установлена на весь объем потолков); не осуществлено огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» (исполнить по гарантийному письму до 01.05.2020 г.); не установлено устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм. однослойных. Оплата по контракту произведена ответчику в полном объеме. В течение ноября 2019 года - августа 2020 года в адрес ответчика направлялись соответствующие требования об устранении недоделок. Гарантийным письмом ответчик обязался устранить все выявленные замечания 01.05.2020. Несмотря на это, на сегодняшний день остаются не устраненными следующие недостатки: не заменен оконный стеклопакет 1 шт. при входе в актовый зал; не представлен акт обработки деревянных конструкций; не устранена течь трубы системы отопления в зрительном зале у сцены; не установлены светильники и выключатели в количестве 6 шт. Просит обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стройгарант» в целях устранения недостатков, выявленных при приемке работ по муниципальному контракту № 1 от 28.06.2019, выполнить следующие работы: заменить оконный стеклопакет 1 шт. при входе в актовый зал; предоставить акт обработки деревянных конструкций; устранить течь трубы системы отопления в зрительном зале у сцены; установить светильники и выключатели в количестве 6 шт.; решение суда обратить к немедленному исполнению.

В судебном заседании процессуальный истец помощник прокурора Ононского района Жамбалова М.Б., исковые требования уточнила в сторону уменьшения, так как до судебного разбирательства были устранены течь трубы системы отопления в зрительном зале у сцены и установлены светильники и выключатели в количестве 6 шт.

Представитель материального истца директор МБУК РЦКК «Возрождение» ФИО1 в судебное заседание не явилась, представив заявление рассмотрении дела в её отсутствие. В судебном заседании 19.10.2020 просила иск удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «Стройгарант» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. В возражении на исковое заявление директор ООО «Стройгарант» ФИО2 просит в удовлетворении иска отказать, в обоснование указывает, что на сегодняшний день, замечания, связанные с гарантийными обязательствами, подрядчиком исполнены. 

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав процессуального истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как следует из материалов дела, 28 июня 2019 года между МБУК РЦКК «Возрождение» (заказчик) и ООО «Стройгарант» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 1, предметом которого являлся капитальный ремонт здания МБУК РЦКК «Возрождение», в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), локальным сметным расчетом (приложение № 2 к контракту), спецификацией материалов и оборудования, используемых при выполнении работ (приложение № 3) и условиями договора. Срок выполнения работ: со дня подписания до 10 октября 2019 года. 

Согласно разделу 7 указанного контракта, продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации – 36 месяцев на весь объем выполненных подрядчиком работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. 

Дополнительным соглашением от 09 августа 2019 года к муниципальному контракту № 1 цена договора изменена пропорционально дополнительному объему работы до 5997578,40 рублей. 

Дополнительным соглашением от 01 ноября 2019 года к муниципальному контракту № 1 срок исполнения контракта изменен – до 30.11.2019. 

16 декабря 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения подрядных работ, невыполнением работ на сумму 1532717 рублей, МБУК РЦКК «Возрождение» направил ООО «Стройгарант» претензию об уплате неустойки. 

В связи с неисполнением в срок условий муниципального контракта, МБУК РЦКК «Возрождение» направил ООО «Стройгарант»:

- 17.12.2019 требование о предоставлении исполнительной документации, сертификатов, актов скрытых работ т.л. 

- 20.12.2020 претензию, в которой просит в течение 5 дней с даты получения претензии устранить недостатки выполненных работ. Не выполнены следующие виды работ: смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором; не установлены оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горяческатных, холодногнутых профилей и труб; при обработке пропиткой деревянных конструкций чердака представить акт обработки, сертификаты материалов и допуск на производство работ; в кабинете на втором этаже (библиотека) качается пол; не закончена отделка дверных проемов. 

Рабочая комиссия, назначенная распоряжением главы администрации муниципального района «Ононский район», провела осмотр предъявленного к приемке после капитального ремонта здания МБУК РЦКК «Возрождение». В присутствии заказчика и подрядчика были обнаружены следующие недоделки и дефекты: заменить окно со стороны главного входа вверху с левой стороны двери; сделать огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли в теплое время года (весной 2020 года); представить акт обработки деревянных конструкций, сертификаты материалов и допуск на производство работы; заменить качающийся пол в кабинете на 2 этаже (библиотека); покрасить пол и лестницу на 2 этаже библиотеки до 01.05.2020; установить замок на 2 этаже библиотеки; закончить отделку дверных откосов со стороны улицы; установить положенное по смете количество светильников и выключателей. Не выполнены следующие виды работ: не установлены светильники в количестве 29 штук; не установлены розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке в количестве 32 штук; не осуществлена смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором (нет глиняной стяжки); не произведена облицовка потолков гипсокартонным и гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см. с открытым рустом (должна быть установлена на весь объем потолков); не осуществлено огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» (исполнить по гарантийному письму до 01.05.2020 г.); не установлено устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм. однослойных. Замечания должны быть устранены до 1 мая 2020 года. 

Гарантийным письмом (дата не указана) директор ООО «Стройгарант» ФИО2 гарантировал до 01 мая 2020 года выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли, а также выполнить работы на разницу суммы контракта, сумма средств по которым не выполнены работы (взаимозаменяемые работы по усмотрению заказчика) на объекте МБУК РЦКК «Возрождение».

Гарантийным письмом от мая 2020 года директор ООО «Стройгарант» ФИО2 гарантировал до 15 июня 2020 года устранить все замечания по контракту. 

03.06.2020г. МБУК РЦКК «Возрождение» направил претензию ООО «Стройгарант», согласно которой замечания, изложенные в претензии от 16.12.2020г., ими не исполнены. 

Вместе с тем, как следует из акта выявленных замечаний и недоделок по обследованию приемки выполненных работ после капительного ремонта МБУК РЦКК «Возрождение» от 03 августа 2020 года, рабочая комиссия, назначенная распоряжением главы администрации муниципального района «Ононский район», выявила следующие замечания и недоделки: заменить один стеклопакет, произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли составом «Пилар»; представить акт обработки деревянных конструкций; на втором этаже библиотеки окрасить пол и лестницу; закончить отделку деревянных откосов с наружной стороны; устранить течь трубы системы отопления; заменить шесть листов волнового шифера; установить положенное по смете количество светильников и выключателей. Комиссия рекомендовала подрядчику завершить работы до 24 августа 2020 года. 

10 августа 2020 года заказчик направит подрядчику претензию, в которой просил в течение 10 дней со дня получения претензии устранить недостатки по муниципальному контракту. 

На момент рассмотрения дела в суде остались неисполненными следующие работы: заменить оконный стеклопакет 1 шт. при входе в актовый зал; предоставить акт обработки деревянных конструкций. 

Таким образом, установлено, что в гарантийный срок до 15 июня 2020 года подрядчик дефекты, выявленные в ходе приемки выполненных работ после капитального ремонта, не устранил.

Доказательств обратного ответчиком суду не представлено. Его доводы о том, что работы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли огнезащитным составом и последующее представление акта об этом не предусмотрены контрактом, не могут быть приняты судом по следующим основаниям. Работы по монтажу пожарной сигнализации, обработке кровли огнезащитным составом предусмотрены п. 4.6 указанного выше контракта, а также локально-сметным расчетом №02-01-04.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными и достаточными для рассмотрения дела по существу.

С учетом изложенного исковые требования суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Согласно п. 1 ст. 103 ГПК РФ, п. 8 ст. 333.20 НК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Учитывая требования п. 3 ст. 333.19 НК РФ, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000 рублей. 

Руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Ононского района в интересах неопределенного круга лиц, муниципального района «Ононский район» к ООО «Стройгарант» об обязании устранить недостатки, выявленные при приемке работ по муниципальному контракту, удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стройгарант» в целях устранения недостатков, выявленных при приемке работ по муниципальному контракту № 1 от 28.06.2019, заключенному между МБУК РЦКК «Возрождение» и ООО «Стройгарант», выполнить следующие работы: - заменить оконный стеклопакет 1 шт. при входе в актовый зал; 

- предоставить акт обработки деревянных конструкций. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройгарант» в бюджет муниципального района «Ононский район» государственную пошлину в сумме 6000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи жалобы через Ононский районный суд.

Судья А.В. Булгаков

В окончательной форме решение принято 28 октября 2020 года