Дело №2-886/2026

24RS0004-01-2025-004211-87

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 января 2026 года п. Березовка

Березовский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Исаевой Е.А.,

с участием помощника прокурора Березовского района Красноярского края – Лепешова Н.И.,

при секретаре Берестовой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Красноярского края в интересах ФИО2 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес> Красноярского края в интересах ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибири», в котором просит осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир «1200 м. севернее 

<

адрес>, часть контура пашни №, № участок №», почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 24:04:0101002:262, в соответствии с условиями договора №.2400.9994.22 от 

<

дата>, заключенного с ФИО2, в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в свою пользу неустойку за просрочку исполнения обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 17 487 руб., в дальнейшем взыскание неустойки производить по день фактического осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта, в размере 58,29 руб. за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, мотивируя заявленные требования тем, что 

<

дата> между истцом и ПАО «Россети Сибири» (Сетевая организация) заключен Договор №.2400.9994.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условиям, которого Сетевая организация принимает на себя обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. Согласно п.6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения настоящего договора. Размер платы внесен истцом в полном объеме. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил, претензия осталась без удовлетворения, в связи, с чем истец вынужден, обратиться в суд с настоящим исковым заявлением.

В ходе судебного разбирательства к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена ФИО5

Помощник прокурора 

<

адрес> Красноярского края ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме.

Истец ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно, о причинах неявки суду не сообщил, прокурором подтверждено извещение истца.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибири» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно, надлежащим образом, судебное извещение вручено 29.12.2025г., что подтверждается почтовым идентификатором, направил возражения на исковое заявление, в котором просил в удовлетворении исковых требований отказать, дополнительно суду пояснил, что неисполнение договора связано с финансовыми санкциями, в случае удовлетворения заявления просил установить срок осуществления мероприятий технологического присоединения по договору не менее 6 месяцев, в случае удовлетворения исковых требований просит снизить размер неустойки и морального вреда.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО5 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена своевременно, о причинах неявки суду не сообщила.

По смыслу гражданского процессуального законодательства лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд полагает возможным рассмотреть заявленные требования в отсутствие не явившихся лиц в соответствие со ст. 167 ГПК РФ.

Согласно положениям п.1 ст.26 Федерального закона от 

<

дата> №-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В соответствии с абз.3, 4, 7 ч.1 ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Порядок технологического присоединения устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (п.15 Правил).

Из п. 3 Правил технологического присоединения следует, что независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п.12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения, которая включает в себя:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в п.12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в п.п.12 (1), 13 и 14 настоящих Правил);

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1 (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме согласно приложению N 1(1), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).

Согласно ч.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч.2 ст.307 ГК).

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с положениями ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как установлено судом, ФИО2, на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 24:04:0101002:262, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир «1200 м. севернее 

<

адрес>, часть контура пашни №, № участок №», почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

<

адрес>, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

<

дата> между ПАО «Россети Сибири» (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель) был заключен Договор №.2400.9994.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которых сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир «1200 м. севернее 

<

адрес>, часть контура пашни №, № участок №», почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 24:04:0101002:262, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, третья категория мощности, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Согласно п.6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.7 договоров ПАО «Россети Сибири» обязалось: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности, разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в предыдущем абзаце, с соблюдением срока осуществления технологического присоединения, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п.8 договоров сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.

Согласно п.9 договоров заявитель, в свою очередь, должен надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятия по технологическому соединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанные в технических условиях; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п.11 Договора №.2400.9994.22 размер платы определяется в соответствии с решением Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.12.2021г №-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 04.02.2022г №-э, от 25.02.2022г №-э, от 

<

дата> №-э и составляет 23 318,97 руб., в том числе НДС 20% в сумме 3 886,49 руб.

В соответствии с п.10 Технических условий №, являющихся Приложением № к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.9994.22, сетевая организация осуществляет организационные мероприятия по подготовке технический условий на технологическое присоединение, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов Заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п.13 технических условий).

Дополнительным соглашением № к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.9994.22 от 

<

дата> срок исполнения договора продлен до 

<

дата>.

ФИО2 оплатил ПАО «Россети Сибири» денежные средства в сумме 25 510,96 руб., что подтверждается платежным поручениям ПАО Сбербанк от 

<

дата> №, от 

<

дата> №, от 

<

дата> №, от 

<

дата> №, от 

<

дата> №, от 

<

дата> №.

<

дата> ФИО2 в своих интересах и интересах супруги ФИО5, которая является инвали

<

адрес> гр., несовершеннолетних детей, обратился с заявлением к прокурору Берёзовского района Красноярского края о проведении проверки и защите прав нарушенных бездействием ПАО «Россети Сибири».

Прокурором направлено в адрес ответчика представление об устранении нарушений законодательство об электроэнергетике, в ответ на которое было указано, что по договору выполняются мероприятия.

Оценив представленные доказательства по правилам ст.67 ГПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд, удовлетворяя исковые требования истца в части обязания ПАО «Россети Сибири» осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, руководствуется положениями п.п.1,2 ст.401 ГК РФ, п.1 ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> №, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, приходит к выводу о том, что ответчик не исполнил обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, заключенного с истцом 

<

дата>, доказательств отсутствия вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств ПАО «Россети Сибири» суду не представлено, также как и отсутствуют доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств в установленный договором срок. При вышеизложенных обстоятельствах, в отсутствие доказательств обратного, суд находит установленным в судебном заседании, что ПАО «Россети Сибири» нарушило условия заключенных с истцом договоров, в течение одного года не выполнило работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир «1200 м. севернее 

<

адрес>, часть контура пашни №, № участок №», почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 24:04:0101002:262.

При таких обстоятельствах, учитывая, что установленный срок является предельным, его продление не допустимо, а также то, что бездействие ответчика не было обусловлено объективными причинами, с учетом того, что ПАО «Россети Сибири» не выполнило определенный объем работ по исполнению принятых на себя обязательств по договору от 

<

дата> суд находит требования истца подлежащими удовлетворению, с учетом разумности, объема выполнения обязательных технические и согласовательных процедур, соблюдения баланса интересов сторон договора, полагает возможным установить срок два месяца для исполнения ПАО «Россети Сибири» обязательства по Договору №.2400.9994.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 

<

дата>, заключенного между ПАО «Россети Сибири» и ФИО2 заключающиеся в электроснабжении объектов принадлежащих на праве собственности истцу по адресу: Красноярский край, кадастровый номер земельного участка №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир «1200 м. севернее 

<

адрес>, часть контура пашни №, № участок №», почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

<

адрес> и осуществить технологическое присоединение принадлежащего истцу энергопринимающего устройства в течении двух месяцев со дня вступления решения в законную силу и направления в адрес истца уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Рассматривая исковые требования о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору по день исполнения обязательств, начиная с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 17 487 руб., продолжая начисление неустойки по день фактического осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в размере 58,29 руб. за каждый день просрочки суд приходит к следующему.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с абз.2 п.20 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения №.2400.9994.22 сторона договора, нарушавшая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб. обязана уплатить другой стороне неустойку равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Совокупный размер неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Размер платы по договору за технологическое присоединение составляет 23 318,97 руб. (п. 13 договора).

Срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты оплаты договора, дополнительным соглашением срок исполнения Договора продлен до 

<

дата>.

Учитывая, что предусмотренный договором №.2400.9994.22 от 

<

дата> и дополнительным соглашением срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, однако ответчиком принятые на себя обязательства по технологическому присоединению не исполнены, при этом, доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в силу ст. 56 ГПК РФ не представлено, суд считает возможным взыскать с ответчика неустойку. Поскольку оплата по договору истцом произведена в полном объёме, по условиям договора и дополнительного соглашения договор должен быть выполнен до 

<

дата>, следовательно размер неустойки составляет 21 917,04 рублей из расчета 23 318,97 руб. х 0,25 % х 376 дня за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

Пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

дата> N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, установлено, что истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна.

Таким образом, в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 

<

дата> за каждый день неисполнения обязательств.

Ответчиком каких-либо доказательств, подтверждающих несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, в материалы дела не представлено, исключительные случаи для снижения неустойки судом не установлены, в связи, с чем суд не усматривает правовых оснований для ее снижения на основании ст. 333 ГК РФ.

В соответствии со ст.15 Закона РФ от 

<

дата> № «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком прав истца ввиду ненадлежащего исполнения договорных обязательств и вина ответчика в нарушении прав, учитывая положения Закона РФ от 

<

дата> № «О защите прав потребителей», ст.ст.151, 1101 ГК РФ, исходя из принципа разумности и справедливости, суд определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 2 000 рублей.

В силу п.6 ст.13 Закона РФ от 

<

дата> № «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как разъяснено в п.46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей). При удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование, таким образом, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 11 958,52 руб., исходя из расчета: 21 917,04 рублей + 2 000 рублей х 50%.

В силу ч.1 ст.103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика госпошлину в размере, в котором истец в силу закона освобожден от ее уплаты при подаче иска, в размере 7 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> Красноярского края в интересах ФИО2 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей - удовлетворить частично.

Возложить на ПАО "Россети Сибирь" (ИНН: 

<

***>) обязанность по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир «1200 м. севернее 

<

адрес>, часть контура пашни №, № участок №», почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 24:04:0101002:262, в соответствии с условиями договора №.2400.9994.22 от 

<

дата>, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в срок не позднее двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПАО "Россети-Сибирь" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО2 (

<

дата> года рождения, паспорт 0421 №) неустойку в размере 21 917 рублей 04 коп., продолжая начисление неустойки в размере 58 рублей 29 коп. за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемую с 

<

дата> по день фактического исполнения решения суда, компенсацию морального вреда 2 000 рублей, штраф в размере 11 958 рублей 52 коп., всего 35 875 рублей 56 коп.

Взыскать с ПАО "Россети-Сибирь" (ИНН: 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7 000 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Березовский районный суд Красноярского края в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Председательствующий: Е.А. Исаева

Копия верна судья Исаева Е.А.

Дата изготовления мотивированного текста решения – 

<

дата>.