К делу № 2-1141-17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения.

19 мая 2017 года г. Новороссийск

Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе

судьи Полякова Д.Ю.,

при секретаре Блитовой С.В.,

с участием представителя истца администрации МО г. Новороссийск по доверенности ФИО1, представителя ответчика по доверенности ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению администрации МО г. Новороссийск в интересах неопределенного круга лиц к ООО ПМК-4 «Южводопровод» о сносе самовольно возводимого капитального объекта,

УСТАНОВИЛ:

Администрация МО г. Новороссийск обратилась в суд к обществу с ограниченной ответственностью ПМК-4 «Южводопровод» о сносе (демонтаже) самовольно возводимого капитального объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>.

В судебном заседании от сторон поступило ходатайство о прекращении производства по делу и утверждении мирового соглашения, по условиям которого:

1. Истец отказывается в полном объеме от своих исковых требований к Ответчику и обязуется в срок до 1 июня 2017 года ввести в эксплуатацию построенный объект «Волнозащитная набережная в Урочище Широкая Балка» в соответствии с техническим паспортом на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>. 

2. Ответчик обязуется до 18 июня 2017 года дополнительно произвести укладку тротуарной плитки волнозащитной набережной длиною (триста двадцать) метров, произвести отделку парапета набережной протяжностью 320 метров декоративной штукатуркой бежевого цвета толщиной не менее 5 миллиметров, а также до 31 декабря 2018 года возвести пандус для обеспечения доступа на пляж маломобильных групп населения в соответствии с ГОСТ и СНиП, согласно схеме, являющейся неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения. 

3. В случае неисполнения, взятых на себя обязательств по настоящему мировому соглашению, ответчик признает исковые требования истца по настоящему делу в полном объеме, настоящее мировое соглашение утрачивает силу и дает право истцу приступить к незамедлительному сносу данного строения своими силами, с привлечением третьих лиц, с последующей взысканием понесенных расходов с ответчика. 

4. При заключении настоящего мирового соглашения стороны друг к другу никаких финансовых и иных претензий не имеют, кроме того, что указано в самом мировом соглашении. Стороны самостоятельно несут все расходы, понесенные по настоящему мировому соглашению. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

5. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его подписания сторонами и утверждения судом и является основанием для прекращения производства по вышеуказанному делу, а также отмене принятых судом обеспечительных мер по данному делу.

6. Последствия утверждения судом мирового соглашения, указанные в ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд находит мировое соглашение подлежащим утверждению, так как оно заключено в интересах сторон, не противоречит закону и не нарушает прав и интересов других лиц.

Последствия утверждения судом мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ, судом разъяснены и сторонам понятны.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 173, 220-221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Мировое соглашение, заключенное между представителем истца администрации МО г. Новороссийск по доверенности – ФИО3 и представителем ответчика ООО ПМК-4 «Южводопровод» по доверенности ФИО2, утвердить на следующих условиях:

1. Истец отказывается в полном объеме от своих исковых требований к Ответчику и обязуется в срок до 1 июня 2017 года ввести в эксплуатацию построенный объект «Волнозащитная набережная в Урочище Широкая Балка» в соответствии с техническим паспортом на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>. 

2. Ответчик обязуется до 18 июня 2017 года дополнительно произвести укладку тротуарной плитки волнозащитной набережной длиною (триста двадцать) метров, произвести отделку парапета набережной протяжностью 320 метров декоративной штукатуркой бежевого цвета толщиной не менее 5 миллиметров, а также до 31 декабря 2018 года возвести пандус для обеспечения доступа на пляж маломобильных групп населения в соответствии с ГОСТ и СНиП, согласно схеме, являющейся неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения. 

3. В случае неисполнения, взятых на себя обязательств по настоящему мировому соглашению, ответчик признает исковые требования истца по настоящему делу в полном объеме, настоящее мировое соглашение утрачивает силу и дает право истцу приступить к незамедлительному сносу данного строения своими силами, с привлечением третьих лиц, с последующей взысканием понесенных расходов с ответчика. 

4. При заключении настоящего мирового соглашения стороны друг к другу никаких финансовых и иных претензий не имеют, кроме того, что указано в самом мировом соглашении. Стороны самостоятельно несут все расходы, понесенные по настоящему мировому соглашению. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

5. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его подписания сторонами и утверждения судом и является основанием для прекращения производства по вышеуказанному делу, а также отмене принятых судом обеспечительных мер по данному делу.

6. Последствия утверждения судом мирового соглашения, указанные в ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийска в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.

Определение вступило в законную силу «____» «___________» 2017 г.

Судья Д.Ю. Поляков