Дело № 2-608/2026 (2-6321/2025)

УИД: 59RS0№-37

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

27 января 2026 года Свердловский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Пономаревой Н.А.,

при ведении протокола секретарями Антипиной Д.А., Чагиной Т.И.,

с участием представителя истцов – адвоката ФИО8, действующего на основании ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2, ФИО3 к индивидуальному предпринимателю ФИО4 о взыскании денежных средств по договору подряда, штрафа, судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО3 обратились в суд с иском к ИП ФИО4 о взыскании в равных долях неустойки в размере 752 425,38 руб., штрафа согласно п.9 дополнительного соглашения в размере 10 % от стоимости невыполненных работ - 74 868,2 руб., затрат, понесенных по устранению недостатков выполненной работы, в сумме 343 504 руб., предусмотренного п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей штрафа, расходов по уплате государственной пошлины.

В обоснование иска указано, что между ФИО4 (Подрядчик) и ФИО2, ФИО3 (Заказчики), ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор №, согласно которого, ФИО4 , действуя в качестве Подрядчика, обязался выполнить работы строительного подряда в виде возведения жилого дома по индивидуальному проекту общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м, на земельном участке кад. №, по адресу Турбасовская, 4 (Объект), а Заказчики обязались оплатить выполненную работу по строительству Объекта в сумме 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (ФИО1 миллионов пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 коп. Указанная сумма оплаты производилась в рассрочку: 

<

данные изъяты>. за счёт собственных средств в виде аванса (п. 2.3. 4 договора) 

<

данные изъяты> руб. за счёт кредитных ресурсов банка по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ и безотзывному аккредитиву по этапам выполненных работ: 

<

данные изъяты> руб. Оплата произведена в следующем порядке: п/п № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб. п/п № от ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>. п/п № от ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> руб. Итого: 

<

данные изъяты>. Срок исполнения договора подряда был предусмотрен не позднее ДД.ММ.ГГГГ Однако, срок окончания выполнения работ неоднократно переносился. Согласно дополнительного соглашения к договору от ДД.ММ.ГГГГ срок завершения работ был сторонами изменён и установлен не позднее ДД.ММ.ГГГГ Однако, Подрядчиком, указанные сроки соблюдены не были, а обязательства по договору исполнены не в полном объёме. Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ, Подрядчику предписывалось завершить все строительные работы и сдать объект Заказчику до ДД.ММ.ГГГГ, а также уплатить неустойку согласно дополнительного соглашения к договору от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ Размер неустойки согласно п. 9 дополнительного соглашения составил 0,3 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки согласно графика (п.2 дополнительного соглашения новый срок окончания работ предусмотрен ДД.ММ.ГГГГ). На ДД.ММ.ГГГГ (момент составления расписки), были не выполнены работы: устройство кровли, настил полов крыльца, установка окон и замена канализационного люка. Стоимость указанных работ согласно сметы (Приложение № к дополнительному соглашению №, Акт №) составляет: устройство кровли - 

<

данные изъяты> руб., установка окон - 

<

данные изъяты> руб., устройство крыльца - 

<

данные изъяты> руб. Расчёт размера неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (244 дня): 

<

данные изъяты>. Неустойка не была уплачена, с учётом просрочки (на дату ДД.ММ.ГГГГ) размер неустойки составляет (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 91 день) = 

<

данные изъяты> руб. Всего, размер неустойки составляет: 

<

данные изъяты> руб. Штраф согласно п. 9 дополнительного соглашения к договору составляет 10% от стоимости невыполненных работ. Частично, данные работы были в последующем выполнены. Однако, часть работ осталась невыполненной. Окончание работ оформляется актом (приложение № к договору). На ДД.ММ.ГГГГ невыполненными Подрядчиком согласно Акта осмотра и итогового акта выполненных работ по договору, подписанными с обеих сторон, являются работы на сумму 343 504 руб. Поскольку работы выполнены Заказчиком своими силами, заказчик предъявляет требование о возмещении понесённых затрат на сумму 343 504 руб. Таким образом, общая сумма задолженности подрядчика составляет: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, а также штраф (10%) в размере 

<

данные изъяты> руб. Претензия, направленная ответчику ДД.ММ.ГГГГ, осталась без ответа.

Истцы ФИО2, ФИО3 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Представитель истцов адвокат ФИО8 в судебном заседании на исковых требованиях настаивал по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ИП ФИО4 в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом.

Суд, выслушав представителя истцов, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п.2 ст. 702 ГК РФ).

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п.1 ст. 703 ГК РФ).

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику (п.2 ст. 703 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (п.1 ст. 704 ГК РФ).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (п.2 ст. 704 ГК РФ).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (п.1 ст.708 ГК РФ).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (п.1 ст.709 ГК РФ).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (п.1 ст. 711 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 3ащите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует считывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрел или заказал товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предпринимало (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Как установлено п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Как следует из материалов дела и установлено судом ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО3 (заказчики), ИП ФИО4 (подрядчик) заключен договор подряда №.

Согласно п.1.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить своими или привлеченными силами и средствами, и сдать Заказчику работы по возведению (строительству) индивидуального жилого дома (далее по тексту - «Объект») в соответствии с перечнем выполняемых работ (либо сметой строительства объекта индивидуального жилищного строительства и/или основных характеристик (описанием) выполняемых работ по объекту индивидуального жилищного строительства), являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № к Договору) и техническим заданием Заказчика (приложение № к Договору), на земельном участке, принадлежащем Заказчику на праве общей совместной собственности. Предметом настоящего договора является возведение жилого дома по индивидуальному проекту (размерами 

<

данные изъяты> м общей площадью 

<

данные изъяты>, этажность - 2, с круглогодичным проживанием и доступом на земельном участке, площадью № кв.м.

Земельный участок, на котором осуществляется строительство Объекта, находится по адресу: 

<

адрес> кад. № участка: №. (п.1.2. Договора).

Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, и оплатить обусловленную Договором цену согласно Приложению № к Договору. Инженерные коммуникации: Электричество - центральное, Вода центральная или скважина с автоматизированной подачей воды, Отопление, Канализация локальная. Возведение коммуникаций на Объекте лежит на стороне Подрядчика (п.1.3. Договора).

Перечень, стоимость и сроки выполнения работ указываются в перечне выполняемых работ, техническом задании Заказчика, являющимися приложениями к Договору (приложение №, приложение №) (п.2.1. Договора).

Стоимость работ по строительству Объекта составляет 

<

данные изъяты> (ФИО1 миллионов пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 коп., без НДС (п.2.2. Договора).

Согласно п.2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3 договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Цена Договора уплачивается Заказчиком в следующем порядке:

Сумма в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей 00 копеек уплачивается за счет собственных средств Заказчика.

Сумма в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> 00 копеек уплачивается Заказчиком за счет кредитных средств (далее - Кредитные средства), предоставляемых по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО2 и АО «Банк ДОМ.РФ» (универсальная лицензия на осуществление банковских операций от «19» декабря 2018 года №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, ИНН №, КПП №, К/с № в ГУ Банка России по ЦФО).

Сумма в размере 

<

данные изъяты>) рублей 00 копеек уплачивается Заказчиком в качестве аванса путем перевода на расчетный счет Подрядчика в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора.

Сумма части заемных средств в размере 

<

данные изъяты>, уплачиваются в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Банком следующих документов:

- Оригинал и/или нотариально удостоверенная копия зарегистрированного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним следующего договора: Договор об ипотеке земельного участка от «ДД.ММ.ГГГГ г., земельный участок по адресу: 

<

адрес> кад. № участка: № (далее - Земельный участок), заключенный между ФИО2, ФИО3 и АО «Банк ДОМ.РФ», зарегистрированного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на котором имеется специальная регистрационная надпись/ штамп органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая (-ий) произведенную, государственную регистрацию залога (ипотеки) на имущественные права на Земельный участок в пользу Банка, и оттиск его гербовой печати (оригинал передается на обозрение работнику Банка для снятия копии с оригинала с последующим заверением копии, оригинал подлежит возврату, копия оригинала остается в Банке/ нотариально удостоверенная копия остается в Банке). Под Банком понимается АО «Банк ДОМ.РФ»;

Оплата за счет Заемных средств Заказчиком Подрядчику производится в безналичном порядке в форме расчетов по покрытому безотзывному аккредитиву, открываемому Заказчиком на следующих условиях:

Аккредитив 1:

1) банком-эмитентом и исполняющим банком выступает: Акционерное общество «Банк ДОМ. РФ», адрес: 

<

адрес>

2) получатель средств: Индивидуальный предприниматель ФИО4 , ИНН: №, ОГРНИП: №;

3) аккредитив открывается на сумму: 

<

данные изъяты> рубля 00 копеек, без НДС.

4) Срок действия аккредитива: 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) календарных дней с даты открытия аккредитива.

5) исполнение аккредитива осуществляется при условии предоставления получателем денежных средств по аккредитиву следующих документов:

- Оригинал Акта выполненных работ по возведению фундамента, перекрытий, наружных стен, кровли по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего подписи Заказчика и Подрядчика, в котором отсутствуют замечания Заказчика относительно результатов выполненных работ Подрядчиком;

Аккредитив 2:

1) банком-эмитентом и исполняющим банком выступает: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», адрес: 125009, 

<

адрес>

2) получатель средств: Индивидуальный предприниматель

ФИО4 , ИНН: №, ОГРНИП: №

Р/с № в филиале ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

К/с №

3) аккредитив открывается на сумму: 1 

<

данные изъяты>) рублей 00 копеек, без НДС.

4) Срок действия аккредитива: 

<

данные изъяты> аккредитива.

5) исполнение аккредитива осуществляется при условии предоставления получателем денежных средств по аккредитиву следующих документов:

- Оригинал Акта выполненных работ по завершению строительства по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего подписи Заказчика и Подрядчика, в котором отсутствуют замечания Заказчика относительно результатов выполненных работ Подрядчиком содержащего подписи Заказчика и Подрядчика;

Перечень документов указываются в заявлениях об открытии аккредитивов, Заказчиком по согласованию с Подрядчиком.

В течение срока действия аккредитивов плательщик по аккредитивам с письменного согласия получателя денежных средств по аккредитивам вправе изменить условия аккредитива.

Сведения, в том числе, сведения о возникновении залога (ипотеки) в пользу Кредитора, указанные в документе, предоставляемом получателем денежных средств по аккредитиву (далее - Документ получателя денежных средств по аккредитиву), в обязательном порядке подлежат проверке Кредитором со сведениями, содержащимися в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), полученной Кредитором на бумажном носителе, или в Выписке из ЕГРН, сформированной Кредитором через электронный сервис с наличием электронной подписи органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Выписка из ЕГРН). В случае несоответствия или противоречия сведений, указанных в Документе получателя денежных средств по аккредитиву, со сведениями в Выписке из ЕГРН требования по представлению документов считаются не соблюденными и аккредитив не подлежит исполнению

Сумма Договора может быть изменена в случае внесения Заказчиком изменений в перечень выполняемых работ и/или содержание работ, что фиксируется дополнительным соглашением Сторон (п.3.2 Договора).

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 7 (ФИО1) рабочих дней с момента согласования Заказчиком всех приложений к Договору и поступления первого транша на расчетный счет или в кассу Подрядчика (п.4.2 Договора).

Оплата истцами произведена в следующем порядке: п/п № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты>

Всего истцами во исполнение обязательств по оплате по договору подряда оплачено денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб.

Согласно приложению № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ «Перечень выполняемых работ» устанавливает стоимость материалов в размере 

<

данные изъяты>

Согласно приложению № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ график выполнения работ устанавливает следующее. Проектирование, комплектация объекта, подготовка стройплощадки начало ДД.ММ.ГГГГ окончание ДД.ММ.ГГГГ; возведение стен 1 этажа, устройство перекрытия начала ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ, возведение стен 2 этажа, устройство крыши начало ДД.ММ.ГГГГ окончание ДД.ММ.ГГГГ; отделка фасада, устройство полов, перегородок начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ, монтаж коммуникаций начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ сторонами согласована новая редакция Приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Перечень выполняемых работ».

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок завершения работ предусмотренных договором, согласован сторонами - не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Так же в силу п. 9 Дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подрядчик по требованию заказчика выплачивает единовременный штраф в размере 10% процентов от стоимости невыполненных работ, а также оплачивает заказчику неустойку в размере 0,3% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки согласно графика.

ДД.ММ.ГГГГ ответчиком была составлена расписка, согласно которой ИП ФИО4 обязуется завершить работы по установке кровли, настилу полов, крыльца, установки окон и замены канализационного люка в срок до ДД.ММ.ГГГГ и оплатить неустойку согласно дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

На ДД.ММ.ГГГГ (момент составления расписки) стоимость невыполненных работ согласно сметы (Приложение № к дополнительному соглашению №, Акт №) составляет: устройство кровли - 

<

данные изъяты>

Согласно акту осмотра от ДД.ММ.ГГГГ при визуальном осмотре были выявлены недостатки, стоимость которых (в ценах на 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ сторонами был подписан итоговый акт выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма устранения выявленных недостатков составляет 

<

данные изъяты>

В соответствии с п.1 ст.29 Закона о защите прав потребителей потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

В связи с изложенным, принимая во внимание, что невыполненные работы согласно акту осмотра и итоговому акту выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены истцами своими силами, исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истцов, в равных долях, стоимости устранения недостатков в размере 

<

данные изъяты>. являются обоснованными и подлежат удовлетворению: в пользу ФИО2 – в размере 

<

данные изъяты> руб., в пользу ФИО3 – в размере 

<

данные изъяты>

Разрешая требования истцов о взыскании с ответчика договорных неустойки и штрафа, суд исходит из следующего.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п.1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) (п. 60 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчику предписывалось завершить все строительные работы и сдать объект Заказчику до ДД.ММ.ГГГГ, а также уплатить неустойку согласно дополнительного соглашения к договору от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ Размер неустойки согласно п. 9 дополнительного соглашения составил 0,3 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки согласно графика (пунктом 2 дополнительного соглашения новый срок окончания работ предусмотрен ДД.ММ.ГГГГ).

На ДД.ММ.ГГГГ (момент составления расписки), были не выполнены работы: Устройство кровли, настил полов крыльца, установка окон и замена канализационного люка. Стоимость указанных работ согласно сметы (Приложение № к дополнительному соглашению №, Акт №) составляет: устройство кровли - 

<

данные изъяты>., установка окон - 

<

данные изъяты>

Расчёт размера неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (244 дня): 

<

данные изъяты>

Неустойка не была уплачена, с учётом просрочки (на дату ДД.ММ.ГГГГ) размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (91 день) = 

<

данные изъяты>

Всего размер неустойки составляет: 

<

данные изъяты>

Таким образом, в пользу каждого из истцов подлежит взысканию с ответчика неустойка в размере по 

<

данные изъяты>

Штраф согласно п. 9 дополнительного соглашения к договору составляет 10% от стоимости невыполненных работ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть 

<

данные изъяты>

Таким образом, в пользу каждого из истцов с ответчика подлежит взысканию штраф в размере по 

<

данные изъяты>

Как следует из п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Исходя из анализа действующего законодательства, штраф представляет собой меру ответственности за нарушение прав потребителей, носит воспитательный и карательный характер для одной стороны и одновременно, компенсационный, то есть, является средством возмещения потерь, вызванных нарушением обязательств, для другой стороны, и не может являться способом обогащения одной из сторон.

Так как ответчик в добровольном порядке требования истцов-потребителей не удовлетворил, судом исковые требования удовлетворены на общую сумму 

<

данные изъяты>., с учетом положений п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» суд приходит к выводу о взыскании с ответчика штрафа в пользу каждого из истцов в общем размере 

<

данные изъяты>

В соответствии с п.3 ст.17 Закона о защите прав потребителей потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подп. 4 п. 2, п. 3 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 

<

данные изъяты> рублей. В случае, если цена иска превышает 

<

данные изъяты> рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 Кодекса и уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 

<

данные изъяты> рублей.

Истцом ФИО2 при подаче иска произведена уплата государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты> руб., что подтверждается чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ.

Размер государственной пошлины по требованиям имущественного характера от цены иска 1 

<

данные изъяты>. (подп.3 п.1 ст.333.19 Налогового кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей уплате истцом государственной пошлины составляет 

<

данные изъяты>

В соответствии со ст.93 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подп.1 п.1 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено настоящей главой.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что истцом ФИО2 уплачена государственная пошлина в большем размере, чем было необходимо при подаче искового заявления, истцу подлежит возврату государственная пошлина в размере 4 

<

данные изъяты>.), уплаченная по чеку по операции от ДД.ММ.ГГГГ (СУИП: №).

Учитывая, что требования истцов удовлетворены, с ответчика в пользу истца ФИО2 подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>.

В соответствии с ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

С учетом изложенного, поскольку заявленные истцом требования имущественного характера удовлетворены судом, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 

<

данные изъяты> руб.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2, ФИО3 удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН №) в пользу ФИО2 (паспорт №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) неустойку в размере 376 212 рублей 69 копеек, штраф в размере 37 434 рубля 10 копеек, стоимость устранения недостатков в размере 171 752 рубля, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 292 699 рублей 40 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 708 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН №) в пользу ФИО3 (паспорт №, выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) неустойку в размере 376 212 рублей 69 копеек, штраф в размере 37 434 рубля 10 копеек, стоимость устранения недостатков в размере 171 752 рубля, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 292 699 рублей 39 копеек.

Возвратить ФИО2 (паспорт №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ИНН №) государственную пошлину в размере 4 415 рублей 19 копеек, уплаченную по чеку по операции от ДД.ММ.ГГГГ (СУИП: №).

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 25 000 рублей.

Решение в течение месяца со дня принятия в окончательной форме может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Свердловский районный суд 

<

адрес>.

Судья Н.А. Пономарева

Мотивированное решение составлено 07.04.2026.