РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 10 мая 2018г.

Судья Ленинского районного суда г. Красноярска Иноземцева Е.А.,

при секретаре Хохловой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителя, 

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителей, мотивируя требования тем, что 14.05.2015г. между истцом и «МРСК Сибири» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с условиями договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома 

<

адрес>, кадастровый № и должно быть осуществлено в течении 6 мес. со дня заключения договора. До настоящего времени ответчик не исполнил технологического присоединения к электрическим сетям, договор не расторгнут, сроки исполнения договора не продлены. В результате бездействия ПАО «МРСК Сибири» истец понес убытки выраженные в приобретении бензогенератора. В связи с чем просит возложить на ПАО «МРСК Сибири» обязанность исполнить договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.05.2015г. в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1, обеспечив энергоснабжение жилого дома 

<

адрес>, кадастровый №; взыскать с ПАО «МРСК Сибири» убытки 12 999 руб., неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору 620 руб. 34 коп., штраф в размере 50% от суммы присужденной судом, за юридическую помощь 5000 руб. 

В судебном заседании истец ФИО1 заявленные требования поддержал в полном объеме, по основаниям изложенным в исковом заявлении, настаивал на их удовлетворении.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» в судебное заседание не явился, о дате судебного заседания извещены своевременно и надлежащим образом в соответствии с нормами ГПК РФ. К тому же препятствий к получению информации у ответчика со стороны суда не имеется, так как в соответствии с требованием Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» в целях обеспечения открытости и прозрачности судебной системы на официальном Интернет сайте Ленинского районного суда г.Красноярска была размещена информация о движении дела - назначение дат судебных заседаний.

Дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц на основании ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд находит заявленные исковые требования обоснованными, подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям ст.309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно п. 1 ст. 26 ФЗ №35 от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Согласно п. 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

Согласно п. 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно п. 30 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861, в случае, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

Согласно абз. 15 ст. 26 ФЗ РФ "Об электроэнергетике", по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством РФ об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Судом установлено, что 14.05.2015г. между ФИО1 и ОАО «МРСК Сибири» (в настоящее время ПАО «МРСК Сибири») заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства в течение 6 мес. со дня заключения договора осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения садового дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом установленных договором характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт; категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,22 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Согласно п. 2 Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта заявителя - жилого дома 

<

адрес>, кадастровый №.

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не более 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается присоединяемый объект. Пунктами 10 и 11 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 руб., в том числе НДС 18% в сумме 83,90 руб., подлежащих оплате в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора.

В соответствии с п. 6 договора, ОАО «МРСК Сибири» обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий, осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Исходя из Технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора, сетевая организация должна была осуществить: подготовку и выдачу технических условий, проверку выполнения технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ, подключенной от РУ 0,4 кВ тп №44-4-24 10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (характеристики, протяженность, трассу ВЛ 0,4 кВ уточнить проектом).

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п. 12). 

Заявитель исполнил свои обязательства по оплате услуг сетевой организации в соответствии с условиями договора, что подтверждается чеком от 15.05.2015г. на сумму 550 руб.

ПАО «МРСК Сибири» не представило суду доказательств, подтверждающих выполнение всех исчерпывающих и необходимых мер, предусмотренных действующим законодательством, предпринятых для исполнения договора, и невозможности исполнения обязательств перед ответчиком, в то время как обязанность в т.ч. урегулирования отношений с иными (третьими) лицами организации мероприятий по технологическому присоединению возложена на основании п. 6 договора на ответчика.

Поскольку принятые на себя по договору обязательства ПАО «МРСК Сибири» не выполнило, технологическое присоединение земельного участка ответчика к электрическим сетям не осуществило, в соответствии с п. 17 договора, требования истца о взыскании неустойки за период с 14.11.2015г. по 28.02.2018г. в размере 620 руб. 34 коп. подлежат удовлетворению.

Период просрочки 

Задолженность 

с 

по 

дней 

Ставка 

Формула 

Неустойка 

550,00 

14.11.2015 

Новая задолженность на 550,00 руб. 

550,00 

14.11.2015 

31.12.2015 

48 

8.25 

550,00 х 48 х 0.014 х 8.25% 

30,49 р. 

550,00 

01.01.2016 

13.06.2016 

165 

11 

550,00 х 165 х 0.014 х 11% 

139,76 р. 

550,00 

14.06.2016 

18.09.2016 

97 

10.5 

550,00 х 97 х 0.014 х 10.5% 

78,42 р. 

550,00 

19.09.2016 

25.03.2017 

189 

10 

550,00 х 189 х 0.014 х 10% 

145,53 р. 

550,00 

27.03.2017 

01.05.2017 

36 

9.75 

550,00 х 36 х 0.014 х 9.75% 

27,03 р. 

550,00 

02.05.2017 

18.06.2017 

48 

9.25 

550,00 х 48 х 0.014 х 9.25% 

34,19 р. 

550.00 

19.06.2017 

17.09.2017 

91 

9 

550,00 х 91 х 0.014 х 9% 

63,06 р. 

550,00 

18.09.2017 

29,10.2017 

42 

8.5 

550,00 х 42 х 0.014 х 8.5% 

27,49 р. 

550,00 

30.10.2017 

17.12.2017 

49 

8.25 

550,00 х 49 х 0.014 х 8.25% 

31,13 р. 

550,00 

18.12.2017 

11.02.2018 

6 

.75 

550,00 х 56 х 0.014 х 7.75% 

33,42 р. 

550,00 

12.02.2018 

28.02.2018 

7 

.5 

550.00 х 17x0.014x7.5% 

9,82 р. 

Согласно п. 6 ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда от 28.06.2012г. №17, при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Таким образом, наличие нарушения прав потребителя дают основания для взыскания штрафа в соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", при этом размер штрафа составит 310 руб. 17 коп. (620,34/2).

Вместе с тем в удовлетворении требований ФИО1 о взыскании с ПАО «МРСК Сибири» убытков 12 999 руб. на приобретение бензогенератора ООО «Дровосек» 20.02.2017г. надлежит отказать, поскольку истцом не представлено доказательств, что убытки понесены вследствие вины ответчика ПАО «МРСК Сибири».

В удовлетворении исковых требований ФИО1 о взыскании 5000 руб. за юридическую помощь также надлежит отказать, поскольку не представлено доказательств обращения истца за юридической помощью и предоставлению ему юридических услуг.

Таким образом, исковые требования ФИО1 к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителя подлежат частичному удовлетворению.

Согласно ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если эти действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено. 

С учетом приведенной нормы, характера спорных правоотношений, суд считает возможным применить запрашиваемый истцом срок исполнения решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать ПАО «МРСК Сибири» исполнить договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.05.2015г. в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1, обеспечив энергоснабжение жилого дома 

<

адрес> кадастровый №,

Взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору № от 14.05.2015г. 620 руб. 34 коп., штраф 310 руб. 17 коп., а всего 930 руб. 51 коп.

В удовлетворении требований ФИО1 к ПАО «МРСК Сибири» о взыскании убытков 12 999 руб. на приобретение бензогенератора, о взыскании 5000 руб. за юридическую помощь отказать.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Красноярска в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения.

Судья Е.А. Иноземцева