Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Павловский Посад 02 октября 2023 года

резолютивная часть объявлена 02.10.2023 

мотивированное решение составлено 09.10.2023

Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Соколова И.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО6.,

с участием:

истца ФИО1,

представителя ответчика АО "Мособлгаз" ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № № по исковому заявлению ФИО1 к АО "Мособлгаз" о защите прав потребителей,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО "Мособлгаз"в котором просил о:

- назначении АО "Мособлгаз" нового срока выполнения работ согласно договору № № из материала и оборудования АО "Мособлгаз" - 30 рабочих дней после вынесения решения суда;

-взыскании с АО "Мособлгаз" компенсации морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- взыскании с АО "Мособлгаз" неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работ в сумме 

<

данные изъяты> коп.;

- возмещении ущерба, принесенного АО "Мособлгаз" неисполнением своих обязательств, в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- взыскании штрафа с АО "Мособлгаз" за отказ от добровольного исполнения исковых требований в размере 50% от взысканной судом суммы.

Свои требования истец обосновывает ненадлежащим выполнением ответчиком своих договорных обязательств.

Истец ФИО1 в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме и просил удовлетворить.

Представитель ответчика АО "Мособлгаз" ФИО2 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований.

Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, суд находит исковые требования необоснованными и неподлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил) (п.61). Заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа (п.12).

Исходя из ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее-Закон) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

В силу ч. 1 ст. 13 Закона за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

На основании ст. 28 Закона если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе назначить исполнителю новый срок (ч.1). В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) (ч.5).

В силу ч.1 ст. 14 Закона вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.

В соответствии со ст. 15 Закона моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно ч.6 ст. 13 Закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штрафв размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Входе рассмотрения дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО "Мособлгаз" заключен договор № № "О подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее- Договор).Согласно Договору АО "Мособлгаз" обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО1, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без внимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного п. 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, расположенного по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером №, №,а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (п.1.1). Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определен до ДД.ММ.ГГГГ (п.1.3). Заявитель обязан надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства (п.3.3). Плата за подключение (технологическое присоединение) состоит в том числе из платы за проектирование сети газопотребления и определена в размере 

<

данные изъяты> коп. (п.5.1- 5.2).

Приложением к Договору являются «Технические условия № № на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации» (далее-Технические условия), согласно п. 11 которых заявитель осуществляет в том числе предоставление схемы расположения газопотребления с указанием диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования; строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования по адресу: 

<

адрес>

Истцом определенные Договором условия выполнены не были, а именно, не была произведена оплата и не исполнены Технические условия, в связи с чем подключение его домовладения к сети газораспределения не состоялось и он был вынужден нести расходы на отопление иным способом.

Доводы истца о том, что им не была произведена оплата по Договору, поскольку его не устроили указанные в платежном документе реквизиты, судом отклоняются, поскольку они не свидетельствуют об объективной невозможности исполнения своего обязательства истцом по Договору.

К доводам истца о том, что согласно Договору его домовладение подлежало подключению ответчиком к сети газораспределения за указанные денежные средства суд также относится критически, поскольку указанная сумма это плата за проектно-изыскательские, но не строительно-монтажные работы, определенные Техническими условиями, которые истцом выполнены не были.

Таким образом, требования истца основываются на неверном толковании положений Договора.

При таких обстоятельствах суд не усматривает фактов нарушения прав истца как потребителя в связи с чем в удовлетворении исковых требований должно быть отказано.

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к АО "Мособлгаз" о:

- назначении АО "Мособлгаз" нового срока выполнения работ согласно договору № № из материала и оборудования АО "Мособлгаз" - 30 рабочих дней после вынесения решения суда;

-взыскании с АО "Мособлгаз" компенсации морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- взыскании с АО "Мособлгаз" неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работ в сумме 

<

данные изъяты> коп.;

- возмещении ущерба, принесенного АО "Мособлгаз" неисполнением своих обязательств, в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- взыскании штрафа с АО "Мособлгаз" за отказ от добровольного исполнения исковых требований в размере 50% от взысканной судом суммы - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий И.А. Соколов