К делу №2-1736/2020

УИД:23RS0003-01-2020-003065-31

Р Е Ш Е НИЕ

Именем Российской Федерации

(заочное)

06 июля 2020 года г.-к.Анапа

Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Карпенко О.Н.,

при секретаре Мосоян М.М..,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратился в суд с иском к ФИО2 о защите прав потребителей.

Свои требования мотивировал тем, что 19.06.2019г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязался своими силами из своего материала поставить на земельном участке истца сруб из оцилиндрованного бревна, а истец обязался оплатить данную работу в сумме 485000 рублей. Пунктом 5.1 договора определены сроки работ: срок начала работа 01.08.2019г., срок окончания всех работ 10.08.2019г. 29.05.2019г. истец оплатил ответчику аванс в сумме 160000 рублей. Однако, ответчик до настоящего времени взятые на себя обязательства не исполнил, сруб из оцилиндрованного бревна не поставил на участок истца. 29.11.2019г. в адрес ответчика была направлена претензия о возврате денежных средств по договору. Однако ответчик проигнорировал данную претензию. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском, в котором он просит взыскать с ФИО2 денежные средства по договору подряда от 19.07.2019г. в сумме 160000 рублей, неустойку в сумме 160000 рублей, судебные расходы на представителя в сумме 40 000 рублей.

В судебное заседание истец ФИО3 не явился, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, на удовлетворении требований настаивал по основаниям, указанным в иске. 

Ответчик ФИО2 надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, о причинах неявки не сообщил, ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие, либо об отложении судебного заседания в суд не представил.

В силу ст. 155 ГПК РФ разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания. Судебные вызовы и извещения производятся в порядке, установленном ст.ст.113 – 118 ГПК РФ.

Лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату (ч. 1 ст. 113 ГПК РФ).

Указанные нормы процессуального права судом соблюдены. Ответчик извещалась о рассмотрении настоящего дела надлежащим образом заказным письмом по адресу места регистрации в соответствии с паспортными данными (по месту жительства). Суд, направив судебное извещение по известному адресу нахождения ответчика, принял все возможные меры по надлежащему его извещению.

В соответствии со ст.165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

В соответствии с п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008г. №13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса РФ при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства решается с учетом требований ст.ст.167 и 233 ГПК РФ. Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии с ч.4 ст.167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Согласно ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. 

Учитывая неявку в судебное заседание ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не сообщивших суду о причинах неявки и не просивших о разрешении спора в его отсутствие, суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства в соответствии с положениями ст.ст.233 – 234 ГПК РФ.

Исследовав и оценив представленные письменные доказательства, суд находит заявленные ФИО3 исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела 19.06.2019г. между ФИО2 (Подрядчик) и ФИО3 (Заказчик) заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязался своими силами и из своего материала, поставить на участке заказчика сруб из оцилиндрованного бревна, диаметр 200 мм, размер 8 X 9, включая террасу 2 метра, общим объемом 29,3 м3, согласно прилагаемого проекта. Заказчик в свою очередь обязался оплатить указанные услуги. Стоимость услуг составила 485000 рублей.

Пунктом 1.3 договора установлено, что оплата производится в следующем порядке: предоплата в размере 160000 рублей путем перечисления денежных средств на карту СБ РФ № в день подписания договора, следующие 235000 рублей перечисляются в день поставки сруба на участок, оставшиеся 90000 рублей в день окончания всех работ по данному договору и подписания акта сдачи-приемки.

Пунктом 5.1 установлены сроки работ: начало работ 01.08.2019 г., срок окончания работ 10.08.2019г. 

Согласно ст.420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Статьей 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Пунктом 1 ст. 740 ГК РФ установлено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (пункт 3 статьи 740 ГК РФ).

В соответствии со ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований.

В соответствии со ст. ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статьей 314 ГК РФ установлено, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

По смыслу ч.2 ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В ходе судебного разбирательства установлено, что истец свои обязательства по договору исполнил, перечислил на счет, указанный ответчиком в договоре денежные средства в размере 160000 рублей, что подтверждается чеками по операции Сбербанк Онлайн. 

Вместе с тем ответчик взятые на себя по договору подряда обязательства не исполнил, до настоящего времени не приступил к выполнению работ, доказательства обратного материалы дела не содержат. 

В виду чего истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 29.11.2019г. с требованием возвратить уплаченные при заключении договора денежные средства в сумме 160000 рублей. Однако, указанная претензия была оставлена без удовлетворения.

Оценив доказательства в их совокупности суд приходит к выводу, что неисполнение ответчиком принятых на себя обязательств по договору расценивается как существенное нарушение условий договора и соответственно нарушение прав и законных интересов истца, в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства уплаченные последним по договору в размере 160 000 рублей.

Истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки в сумме 160 000 рублей, которая подлежит взысканию ввиду следующего.

Возникающие правоотношения между потребителем и лицом, оказывающим услуги, также регулируются главой 3 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1.

Пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» установлено, что исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.

Таким образом, сам по себе факт отсутствия регистрации исполнителя в качестве индивидуального предпринимателя не может влиять на применение или не применение к данным правоотношениям Закона о защите прав потребителей. Существенное значение для применения данного закона является характер спорных правоотношений, т.е. то на что они направлены. В данном случае правоотношения направлены на оказание ответчиком услуг по строительству индивидуального жилого дома, следовательно гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований закона, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

Согласно п.5 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Из представленного истцом расчета следует, что с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 160000 рублей из расчета по формуле: задолженность 160000 рублей, период неустойки с 29.11.2019 года до 20.05.2020 года составляет 174 дня, 160000 х 174 х 3% = 835 200.00 р., но не более 100 % = 160000 рублей.

Данный расчет проверен судом и признан правильным.

На основании п.5 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», требования истца о взыскании с ответчика неустойки в сумме - 160000 рублей основаны на законе и подлежат удовлетворению.

По смыслу ч.1 ст.48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

По общему правилу, предусмотренному ч.1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно ч.ч.1, 3 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу абз.5 ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителей.

В соответствии с правилами ч. 1 ст. 100 ГПК РФ возмещение расходов на оплату услуг представителя производится по письменному заявлению стороны, в пользу которой состоялось решение суда, в разумных пределах.

Истец, не обладая специальными познаниями в области юриспруденции, для защиты своих прав и законных интересов заключил соглашение на оказание правовой помощи от 28.11.2019г. с адвокатом Т.Д.Э., стоимость юридических услуг в соответствии с соглашением составила 40 000 рублей, что подтверждается соглашением и квитанцией к приходному кассовому ордеру от 14.01.2020г.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования ч.3 ст.17 Конституции РФ.

С учетом принципа разумности и справедливости, а также с учетом количества судебных заседаний и сложности дела, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы на представителя в сумме 15 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителей – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства по договору подряда от 19.07.2019г в размере 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, неустойку в размере 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, а также судебные расходы на представителя в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий:

Мотивированное решение суда изготовлено 13 июля 2020 года.