Дело № 2-1254/17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

14 апреля 2017 года город Ульяновск

Заволжский районный суд города Ульяновска в составе: 

председательствующего судьи Киреевой Е.В.,

при секретаре Полторацкой О.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Запад-2» о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Запад-2»» (далее по тексту ООО «Запад-2») о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, указав следующее.

28.12.2015 между истцом, ФИО2 и ответчиком был заключен договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 6 со встроенными помещениями в строительном квартале «Центральный» в Заволжском районе г.Ульяновска, в соответствии с которым ответчик обязался осуществить строительство многоквартирного жилого дома, сдать в эксплуатацию и передать в собственность участников после окончания строительства двухкомнатную квартиру, общей площадью 53,19 кв.м, проектный номер 169, расположенную на 8 этаже пятого подъезда, в срок не позднее 18 ноября 2016 года.

Фактически квартира передана согласно акту приема-передачи 17 января 2017 года. 31 января 2017 года в адрес ответчика была направлена претензия с требованием выплаты неустойки, претензия была получена ответчиком 09.02.2017.

Просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока передачи квартиры в размере 62637,30 руб., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., судебные расходы, расходы за услуги представителя в размере 8500 руб., штраф.

В судебном заседании истцом ФИО1 и представителем ответчика ООО «Запад-2» ФИО3 было заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного на следующих условиях: 

ООО «Запад-2» в срок до 11.05.2017 обязуется выплатить ФИО1 неустойку в размере 59000 руб., моральный вред в сумме 3000 руб., судебные расходы в сумме 4000 руб., а ФИО1 отказывается от остальных своих требований. 

Производство по делу просили прекратить.

Истцу ФИО1 и представителю ответчика ООО «Запад-2» ФИО3 разъяснены и понятны смысл и последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. ст. 173 ГПК РФ, 220 ГПК РФ, а также последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.

Проверив материалы дела, суд считает, что мировое соглашение подлежит утверждению, поскольку условия мирового соглашения закону не противоречат, права и охраняемые законом интересы других лиц не нарушают.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 224-225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО1 и представителем ответчика общества с ограниченной ответственностью «Запад-2» ФИО3 на следующих условиях: 

Общество с ограниченной ответственностью «Запад-2» в срок до 11.05.2017 обязуется выплатить ФИО1 неустойку в размере 59000 руб., моральный вред в сумме 3000 руб., судебные расходы в сумме 4000 руб. ФИО1 отказывается от остальных своих требований. 

Производство по гражданскому делу по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Запад-2» о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 15 дней.

Судья Е.В. Киреева