Дело №

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 сентября 2017 года г. Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего (судьи) Галеевой Л.П.,

при секретаре Щепетовой Е.П., 

с участием представителя ответчика ФИО6, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО3 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2) о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании денежных средств по договору в размере 224000 руб., расходов на проведение экспертизы в размере 69795 руб., неустойки в размере 100000 руб., компенсации морального вреда в размере 50000 руб., судебных расходов в размере 21700 руб., штрафа.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком был заключен договор № на выполнение работ по установлению одиннадцати оконных блоков из ПВХ, а также по выполнению отделочных работ. Цена, указанного договора составила 224000 руб. В качестве предоплаты истцом ответчику была оплачена сумма в размере 100000 руб. Ответчик гарантировал качество выполненных работ. Вместе с тем, своих обязательств по договору ответчик не выполнил. Работы проведены не качественно, что выяснилось во время обильных атмосферных осадков. Акт приемки выполненных работ до сих пор не подписан. Не однократные обращения к ответчику с претензиями об устранении недостатков в работе ни к чему не привели. Истцом была организована независимая экспертиза, в ходе которой было установлено, что работы выполнены в нарушение требований ГОСТов. 

Просил суд расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика денежные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 224000 руб., расходы на проведение экспертизы в размере 69795 руб., неустойку в размере 100000 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., судебные расходы в размере 21700 руб., штраф.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ принят отказ от иска к ответчику ИП ФИО2 в части: расторжения договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между истцом и ответчиком, на выполнение работ по установке одиннадцати оконных блоков из ПВХ, а также по выполнению отделочных работ; взыскания с ответчика в пользу истца денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 224000 руб.; взыскания с ответчика расходов на проведение экспертизы по строительно-техническому исследованию оконных блоков в размере 69795 руб. производство по делу в данной части прекращено.

Окончательно определив исковые требования, истец просил суд: 1.Возложить обязанность на ответчика ИП ФИО5 в 10-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, безвозмездно выполнить гарантийное обслуживание, устранить выявленные дефекты в оконных блоках, установленных по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, на объекте «Заказчика» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес>, а именно:

1.1.В помещении кухни на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 2360 х 1370 мм):

а) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

б) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

в) произвести замену монтажной пены (пенного утеплителя) по всему периметру монтажного шва оконного блока, с устройством внутреннего пароизоляционного слоя, путем проклеивания периметра окна специальной пароизоляционной лентой;

г) установить заглушки с обоих торцов подоконной доски;

д) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

е) отрегулировать конструкцию запирающих приборов и петель, обеспечив плотный и равномерный обжим прокладок по всему периметру поворотно-откидной створки;

ж) заменить правый блок стеклопакета;

з) устранить фрагменты защитной пленки;

и) установить накладки на петли.

1.2. В помещении гардеробной на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1840 х 1350 мм):

а) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов;

б) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) произвести замену поворотно-откидной створки;

д) произвести замену резинового уплотнителя;

е) отрегулировать конструкцию запирающих приборов и петель, обеспечив

плотный и равномерный обжим прокладок по всему периметру поворотно-откидной створки;

ж) установить накладки на петли;

з) произвести выравнивание неровно установленной подоконной доски;

и) установить заглушки с обоих торцов подоконной доски;

к) устранить царапины на левом блоке ПВХ-рамы.

1.3. В помещении гардеробной на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1450 х 1350 мм):

а) произвести очистку стеклопакета от черных следов;

б) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) установить заглушки с обоих торцов подоконной доски;

г) произвести замену подоконной доски;

д) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

е) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

ж) произвести замену штапиков;

з) устранить трещины в ПВХ-раме;

и) установить накладки на петли.

1.4. В помещении коридора на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон», с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 780 х 1150 мм):

а) произвести замену подоконной доски;

б) произвести замену поворотно-откидной створки;

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

д) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски;

е) установить накладки на петли;

ж) заменить стеклопакет.

1.5. В помещении бойлерной комнаты на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 590 х 140 мм):

а) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

б) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

в) произвести замену штапиков;

г) установить накладки на петли;

д) установить заглушки с обоих торцов подоконной доски;

е) устранить фрагменты защитной пленки.

1.6. В помещении ванной комнаты на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1320 х 410 мм):

а) установить накладки на петли;

б) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

д) произвести очистку стеклопакета от черных следов;

е) произвести замену уголка на внутренних оконных откосах;

ж) произвести демонтаж установленного оконного блока и монтаж нового оконного блока из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами;

з) устранить фрагменты защитной пленки.

1.7. В помещении дальней от входа комнаты (спальни) на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1470 х 1370 мм):

а) произвести замену подоконной доски;

б) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) произвести очистку стеклопакета от черных следов;

г) заменить правый блок стеклопакета;

д) произвести замену главного запирающего механизма;

е) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

ж) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

з) установить накладки на петли;

и) устранить фрагменты защитной пленки.

1.8.В помещении дальней от входа комнаты (спальни) на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 2420x1370 мм):

а) произвести замену подоконной доски;

б) установить накладки на петли;

в) устранить дефект на раме (левый блок);

г) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

д) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

е) устранить фрагменты защитной пленки;

ж) заменить правый блок стеклопакета;

з) произвести замену штапиков.

1.9.В помещении ванной комнаты на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 2420 х 1370 мм):

а) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

б) устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) устранить фрагменты защитной пленки.

г) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

д) произвести чистку рамы внутри помещения;

е) отрегулировать конструкцию запирающих приборов и петель, обеспечив плотный и равномерный обжим прокладок по всему периметру откидной створки;

ж) произвести замену подоконной доски;

з) заменить стеклопакет.

1.10. В помещении ближней от входа комнаты (детской) на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1870 х 1380 мм):

а) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

б) произвести чистку рамы внутри помещения;

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) устранить фрагменты защитной пленки;

д) установить накладки на петли;

е) произвести замену подоконной доски;

ж) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

з) произвести замену среднего блока стеклопакета.

1.11. В помещении ближней от входа комнаты (детской) на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер1485 х 1380 мм):

а) произвести замену подоконной доски;

б) произвести замену стеклопакета (оба блока);

в) установить накладки на петли;

г) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

д) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

е) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

ж) устранить фрагменты защитной пленки.

1.12. В помещении комнаты на третьем этаже левое окно (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1140 х 1200 мм):

а) устранить защитную пленку с подоконной доски;

б) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

д) устранить фрагменты защитной пленки.

1.13. В помещении комнаты на третьем этаже правое окно (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1140 х 1200 мм):

а) устранить защитную пленку с подоконной доски;

б) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

д) устранить фрагменты защитной пленки;

е) произвести замену левого блока стеклопакета; обязать ответчика установить на выполненные работы по устранению выявленных дефектов гарантийный срок 1 год момента приема-сдачи указанных работ, взыскать с ответчика неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, компенсацию морального вреда в размер 50000 рублей, судебные расходы размере 21700 рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.

В судебном заседании истец ФИО3 участия не принимал, согласно заявлению, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик ИП ФИО2 в судебном заседании участия не принимал.

Представитель ответчика ФИО6, действующий на основании доверенности, исковые требования не признал, указав их необоснованными и не подлежащими удовлетворению. 

Выслушав пояснения представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с абз. 1 пунктов 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения данного требования закона суд может отказать лицу в защите прав.

Правоотношения сторон носят характер обязательственных и складывались в рамках договора подряда, нормы о котором содержит глава 37 ГК РФ.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон.

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В статье 703 ГК РФ прямо указывается, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Статья 708 ГК РФ предусматривает, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ч. 1 ст. 722 ГК РФ, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

В силу ч. 3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Согласно ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 730 ГК РФ).

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) заключен Договор на выполнение работ №, согласно условиям, которого исполнитель обязался выполнить работы по установке на объекте заказчика, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес> оконные блоки из ПВХ (цвет махагон) в количестве 11 штук, выполнить внешнюю отделку окон металлическим уголком, внутреннюю отделку панелями МДФ.

Цена работ по договору составляет 224000 руб., в день подписания договора заказчиком внесен аванс в размере 100000 руб.

В соответствии с п. 4.2 договора работы должны быть начаты до ДД.ММ.ГГГГ.

Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания заказчиком акта приема-передачи выполненных работ либо 8 день с даты почтового отправления заказчику акта приема-передачи выполненных работ, в случае отклонения заказчика от его подписания.

Согласно пунктам 6.1.1, 6.1.4, 6.2.1 договора, подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1 настоящего договора в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать выполненные работы заказчику, в то же время заказчик обязуется оплатить работы по цене, в порядке и сроки установленные настоящим договором.

Как следует из материалов дела, работы, предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ, были выполнены подрядчиком в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается материалами дела, а также не оспаривалось сторонами в ходе его рассмотрения. Однако заказчик от подписания акта приема-передачи выполненных работ отказался, двусторонний претензионный акт в день окончания работ сторонами не составлялся.

В соответствии с п. 5.1, 5.2 договора в день фактического завершения работ по настоящему договору подрядчик и заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации. В случае наличия замечаний заказчик и подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ. Срок устранения недостатков не может превышать 15 рабочих дней с момента подписания сторонами двустороннего претензионного акта.

Согласно п. 5.3 договора, заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приема-сдачи были оговорены эти недостатки, либо возможности последующего предъявления требований об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) (п. 5.4 договора).

Как следует из п. 8.1 договора, подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему договору в течение трех лет со дня подписания со дня подписания Акта приёма-передачи выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации изделий. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранить за свой счет неполадки, возникшие по его вине (п. 8.2 договора). По истечении гарантийного периода заказчик может обратиться к подрядчику за платным обслуживанием (п. 8.3 договора). В случае выполнения подрядчиком гарантийного и платного послегарантийного обслуживания, стороны обязаны подписать Акт приема-передачи работ (п. 8.4 Договора).

Из докладной монтажника предприятия ИП ФИО2 ФИО7 следует, что по окончанию работ по установке оконных блоков по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес> от подписания Акта приемы выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отказался, замечаний и недостатков выполненной работы не указал (л.д.102).

В период действия гарантийного срока по договору на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ после обнаружения дефектов и с целью их устраненияДД.ММ.ГГГГ истцом была направлена претензия в адрес ответчика.

В связи с поступившей претензии истца, подрядчик провел перечень работ по устранению недостатков выполненных изделий (оконный блок – 11 штук), укомплектованных фурнитурой, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес>, что подтверждается Актами устранения недостатков выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при этом представленные акты не содержат подписи истца о принятии работ.

Таким образом, судом установлено, что заказчик от подписания акта приема-передачи выполненных работ и акта устранения выявленных недостатков отказался, двусторонний претензионный акт в день окончания работ сторонами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ не составлялся. 

Каких-либо иных замечаний, относительно выполненных по договору от ДД.ММ.ГГГГ работ в течение его гарантийного периода, который, согласно п.8.1 договора, составляет 3 года со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ, истцом в адрес ответчика направлено не было.

Данные обстоятельства также установлены вступившим в законную силу решением Петропавловск-Камчатского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по иску ИП ФИО2 к ФИО3 о взыскании суммы долга по договору выполненных работ. 

Согласно части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

В Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ N 30-П Конституционный Суд Российской Федерации указал, что признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Введение же института преюдиции требует соблюдения баланса между такими конституционно защищаемыми ценностями, как общеобязательность и непротиворечивость судебных решений, с одной стороны, и независимость суда и состязательность судопроизводства - с другой. Такой баланс обеспечивается посредством установления пределов действия преюдициальности, а также порядка ее опровержения.

Применительно к указанному толкованию и применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела, пределы действия преюдициальности судебного акта распространяются на установленные и имеющие значение для разрешения дела факты и на круг лиц, которые уже были участником при разбирательстве этих фактов.

Таким образом, установив, что ФИО3 фактически принял выполненные ответчиком работы, но от подписания Акта о принятии работ отказался, суд полагает, что при установленных обстоятельствах по делу, а также в соответствии с условиями договора, а также, непредставление истом суду доказательств обнаружения в выполненных ответчиком работах недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре подряда цели, которые не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, ответчик вправе был подписать акт о выполненных работах в одностороннем порядке.

Обстоятельства того, что договор на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ истец подписывал собственноручно, а, соответственно, был ознакомлен со всеми его условиями, которые были сторонами согласованы, в ходе рассмотрения дела последним не оспаривалось. 

Согласно ст. 431 ГК РФ, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Каких-либо доказательств предъявления истцом в предусмотренном п. п. 5.2, 5.3 договоре порядке, претензий к подрядчику по выполненным работам в момент их фактического принятия, не представлено, а материалах дела также отсутствуют.

В силу ст.ст. 12, 56, 57 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Доказательств того, что сумма займа, в том числе частично, ответчиком выплачена, суду не представлено, в материалах дела также не имеется.

В случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, в силу ст. 68 ГПК РФ, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

В силу ч. 2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Документальных подтверждений того, что выполненная ответчиком работа была произведена некачественно, равно как и доказательств, предъявления истцом к ответчику обоснованного перечня замечаний, как то предусмотрено договором на выполнение работ, материалы дела не содержат. В силу чего утверждения о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по договору являются голословными и не могут быть приняты во внимание.

Ссылаясь в исковом заявлении на несоблюдение ответчиком условий договора по сдаче выполненных работ, а также на несоответствие их гарантийному качеству, в обоснование своей позиции, а именно, подтверждая обстоятельства того, что выявленные недостатки работ по договору имели производственный характер, истец представил в материалы дела заключение специалиста по строительно-техническому исследованию №/И от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное ООО «Камчатский Центр Сертификации».

Вместе с тем, данное экспертное заключение таковым доказательством служить не может, поскольку произведено с нарушениями, установленными Заключением специалиста №-Э от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Камчатского центра независимой оценки», из которого следует: при производстве исследования были допущены нарушения трактовки требований ГОСТов; при выявлении дефектов не проведен анализ возможных причин их появления, а сделанные выводы являются необоснованными; в целом выводы, сделанные специалистом, являются умозрительными, декларативными и не подкрепляются результатами инструментальных исследований; заключение специалиста является неясным и неполным и не принимается судом.

Кроме того, выводы, изложенные в заключении специалиста по строительно-техническому исследованию №/И от ДД.ММ.ГГГГ, выполненном ООО «Камчатский Центр Сертификации» полностью противоречат результатам полученной, согласно определению суда от ДД.ММ.ГГГГ, судебной экспертизы. 

Так, в порядке ст. 79 ГПК РФ судом была назначена экспертиза, проведение которой поручено ООО «Камчатского центра независимой оценки», согласно Заключению эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что изготовитель выполнил задачу по выполнению требований, предъявляемых к монтажу оконных блоков и монтажным швам в ГОСТ 23166-99. Из указанных дефектов, установленных при проведении экспертизы, проникновение в помещение холодного воздуха и атмосферной влаги вызывает дефект – «регулировка запирающих приборов и петель поворотно-откидных створок не обеспечивают плотного обжима по всему контуру створок». Данный дефект появился в процессе эксплуатации оконных блоков. Для устранения данного дефекта необходимо заменить уплотнительные прокладки и произвести регулировку запирающих приборов и петель. Установленные недостатки не являются существенными или критическими и устраняются без ущерба для установленных оконных блоков и отделки (демонтаж оконных блоков и отделки, за исключением деталей, имеющих механические повреждения, не требуется).

Заключение экспертизы, как средство доказывания в гражданском процессе, было получено судом в соответствии с нормами материального и процессуального права.

Вышеприведенное экспертное заключение отражает действительное состояние предмета исследования, недостатки которого указаны в претензии от ДД.ММ.ГГГГ, наличие и характер повреждений, причины их возникновения, рыночную стоимость суммы расходов на восстановление указанных дефектов, стоимости деталей в соответствии с материалами, использованными экспертом при проведении судебной экспертизы, а потому сомнений в его объективности у суда не имеется.

Каких-либо сомнений данное доказательство у суда не вызывает и принимается судом. 

На основании п. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.

Представленная истцом в материалы дела претензия, направленная в адрес ответчика и датированная ДД.ММ.ГГГГ, не может являться подтверждением выявленных ФИО3 в период гарантийного срока по договору недостатков, поскольку, согласно п.8.1 договора, гарантийный трехлетний срок истек ДД.ММ.ГГГГ.

Доводы истца о том, что гарантийный срок по договору выполнения работ № от ДД.ММ.ГГГГ должен исчисляться с момента составления акта об устранении недостатков выполненных работ, то есть пролонгироваться автоматически, являются несостоятельными и противоречат условиям заключенного между сторонами договора, в том числе п. 9.2 и п. 9.3 договора.

Какие-либо дополнительные соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между сторонами не заключались, в материалах дела также отсутствуют.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца о возложении обязанности на ответчика безвозмездно выполнить гарантийное обслуживание, установить новый гарантийный срок и устранить выявленные дефекты в оконных блоках, установленных по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, на объекте «Заказчика» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес>.

П. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Согласно абз. 3 вышеуказанной статьи неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

В судебном заедании факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не нашел своего подтверждения в связи с чем, суд также не находит оснований для взыскания с ответчика в пользу истца неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 руб., рассчитанной, согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Защите прав потребителей». 

Доводы, изложенные истцом в обоснование данного требования полностью опровергаются материалами дела, в том числе, актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и признаны судом как несостоятельные.

В соответствии со ст. 15 Закона ФЗ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Из разъяснений, содержащихся в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» следует, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Так, согласно п. 6 ст. 13 Закона ФЗ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Принимая во внимание, что заявленные требования истца ФИО3 о взыскании с ИП ФИО2 о взыскании компенсации морального вреда в размере 50000 руб., судебных расходов в общем размере 21700 руб., штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, - является производными от основных, при этом факт нарушения прав потребителя не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу оснований для их удовлетворения у суда также не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований к ИП ФИО2 о возложении обязанности в 10-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, безвозмездно выполнить гарантийное обслуживание, устранить выявленные дефекты в оконных блоках, установленных по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, на объекте «Заказчика» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес>, а именно:

1.1.В помещении кухни на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 2360 х 1370 мм):

а) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

б) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

в) произвести замену монтажной пены (пенного утеплителя) по всему периметру монтажного шва оконного блока, с устройством внутреннего пароизоляционного слоя, путем проклеивания периметра окна специальной пароизоляционной лентой;

г) установить заглушки с обоих торцов подоконной доски;

д) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

е) отрегулировать конструкцию запирающих приборов и петель, обеспечив плотный и равномерный обжим прокладок по всему периметру поворотно-откидной створки;

ж) заменить правый блок стеклопакета;

з) устранить фрагменты защитной пленки;

и) установить накладки на петли.

1.2. В помещении гардеробной на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1840 х 1350 мм):

а) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов;

б) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) произвести замену поворотно-откидной створки;

д) произвести замену резинового уплотнителя;

е) отрегулировать конструкцию запирающих приборов и петель, обеспечив

плотный и равномерный обжим прокладок по всему периметру поворотно-откидной створки;

ж) установить накладки на петли;

з) произвести выравнивание неровно установленной подоконной доски;

и) установить заглушки с обоих торцов подоконной доски;

к) устранить царапины на левом блоке ПВХ-рамы.

1.3. В помещении гардеробной на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1450 х 1350 мм):

а) произвести очистку стеклопакета от черных следов;

б) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) установить заглушки с обоих торцов подоконной доски;

г) произвести замену подоконной доски;

д) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

е) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

ж) произвести замену штапиков;

з) устранить трещины в ПВХ-раме;

и) установить накладки на петли.

1.4. В помещении коридора на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон», с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 780 х 1150 мм):

а) произвести замену подоконной доски;

б) произвести замену поворотно-откидной створки;

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

д) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски;

е) установить накладки на петли;

ж) заменить стеклопакет.

1.5. В помещении бойлерной комнаты на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 590 х 140 мм):

а) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

б) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

в) произвести замену штапиков;

г) установить накладки на петли;

д) установить заглушки с обоих торцов подоконной доски;

е) устранить фрагменты защитной пленки.

1.6. В помещении ванной комнаты на первом этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1320 х 410 мм):

а) установить накладки на петли;

б) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

д) произвести очистку стеклопакета от черных следов;

е) произвести замену уголка на внутренних оконных откосах;

ж) произвести демонтаж установленного оконного блока и монтаж нового оконного блока из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами;

з) устранить фрагменты защитной пленки.

1.7. В помещении дальней от входа комнаты (спальни) на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1470 х 1370 мм):

а) произвести замену подоконной доски;

б) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) произвести очистку стеклопакета от черных следов;

г) заменить правый блок стеклопакета;

д) произвести замену главного запирающего механизма;

е) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

ж) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

з) установить накладки на петли;

и) устранить фрагменты защитной пленки.

1.8.В помещении дальней от входа комнаты (спальни) на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 2420x1370 мм):

а) произвести замену подоконной доски;

б) установить накладки на петли;

в) устранить дефект на раме (левый блок);

г) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

д) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

е) устранить фрагменты защитной пленки;

ж) заменить правый блок стеклопакета;

з) произвести замену штапиков.

1.9.В помещении ванной комнаты на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 2420 х 1370 мм):

а) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

б) устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) устранить фрагменты защитной пленки.

г) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

д) произвести чистку рамы внутри помещения;

е) отрегулировать конструкцию запирающих приборов и петель, обеспечив плотный и равномерный обжим прокладок по всему периметру откидной створки;

ж) произвести замену подоконной доски;

з) заменить стеклопакет.

1.10. В помещении ближней от входа комнаты (детской) на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1870 х 1380 мм):

а) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

б) произвести чистку рамы внутри помещения;

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) устранить фрагменты защитной пленки;

д) установить накладки на петли;

е) произвести замену подоконной доски;

ж) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

з) произвести замену среднего блока стеклопакета.

1.11. В помещении ближней от входа комнаты (детской) на втором этаже (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер1485 х 1380 мм):

а) произвести замену подоконной доски;

б) произвести замену стеклопакета (оба блока);

в) установить накладки на петли;

г) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

д) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

е) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

ж) устранить фрагменты защитной пленки.

1.12. В помещении комнаты на третьем этаже левое окно (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1140 х 1200 мм):

а) устранить защитную пленку с подоконной доски;

б) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

д) устранить фрагменты защитной пленки.

1.13. В помещении комнаты на третьем этаже правое окно (оконный блок из ПВХ профиля цвет «махагон» с одной поворотно-откидной створкой, укомплектованный двухкамерными тонированными стеклопакетами, наружный размер 1140 х 1200 мм):

а) устранить защитную пленку с подоконной доски;

б) устранить протекание шва, в месте примыкания оконного блока и подоконной доски; устранить проникновение в помещение наружного воздуха, путем герметизации швов и замены резинового уплотнителя;

в) произвести замену наружной отделки (металлического уголка облицовывающего наружные оконные откосы); произвести обработку швов;

г) произвести замену внутренней отделки (МДФ панелей, облицовывающих внутренние оконные откосы);

д) устранить фрагменты защитной пленки;

е) произвести замену левого блока стеклопакета; обязать ИП ФИО2 установить на выполненные работы по устранению выявленных дефектов гарантийный срок 1 год момента приема-сдачи указанных работ; взыскать с ИП ФИО1 неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, компенсацию морального вреда в размер 50000 рублей, судебные расходы в размере 21700 рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом ФИО3 - отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в течение месяца, со дня изготовления решения в окончательной форме. 

Председательствующий подпись Л.П. Галеева

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ. 

Судья подпись Л.П. Галеева

Копия верна.

Судья Л.П. Галеева