Дело № 2-1695/2021

УИД: 55RS0026-01-2021-002231-45

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Омский районный суд Омской области

в составе судьи Дьяченко Т.А.,

при секретаре Конопелько Р.И.,

помощнике судьи Лисицыной Е.В.,

рассмотрел в г. Омске в открытом судебном заседании 29 июня 2021 года гражданское дело по иску Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» к ФИО1 о расторжении договора технического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Сибирь» обратилось в суд с требованиями к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, заключённого между публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» и ФИО1; взыскании неустойки в размере 10037,50 рублей за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №.№ за период с 03.12.2019 по 01.12.2020; взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 6402 рубля. 

В обоснование заявленных требований указано, что между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.№. Согласно штампу центра обслуживания клиентов, проставленного на первом листе договора, подписанный заявителем экземпляр поступил в сетевую организацию ДД.ММ.ГГГГ, что является датой заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации изменения наименования Истца: с ПАО «МРСК Сибири» на ПАО «Россети Сибирь». В соответствии с условиями заключённого договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, необходимых для электроснабжения жилого дома, расположенного ( либо который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №. Согласно пункту 8 Договора Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий. Перечень конкретных мероприятий, подлежащих выполнению со стороны Заявителя, указан в пункте 11 Технических условий (Приложение № к Договору). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с п. 16 Правил № 861, пунктом 5 Договора составляет 4 месяца со дня заключения договора, то есть до 01.12.2019 включительно. Однако мероприятия по технологическому присоединению, а также последующему извещению сетевой организации об их выполнении не исполнены Ответчиком до настоящего времени. На момент обращения Истца в суд с заявленными требованиями просрочка в выполнении Заявителем мероприятий по технологическому присоединению составила свыше 1 года. Мероприятия в части подготовки технических условий на технологическое присоединение, срок осуществления которых наступает ранее срока выполнения заявителем мероприятий по технологическому присоединению, исполнены ПАО «Россети Сибирь» в полном объеме, что подтверждается изготовленными Техническими условиями, являющимися Приложением № 1 к Договору. Фактическое технологическое присоединение по договору сетевая организация не может осуществить ранее выполнения заявителем его части мероприятий, которые так и не выполнены. На основании изложенного, поскольку до настоящего времени от Ответчика в адрес сетевой организации уведомление о выполнении технических условий не поступило, у ПАО «Россети Сибирь» с учётом положений закона и условий договора имеются правовые основания для расторжения договора.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённый за год просрочки. Согласно пункту 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 550 рублей, в том числе НДС 20 %. В связи с невыполнением Заявителем мероприятий по технологическому присоединению, ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с условиями договора начислило ФИО1 неустойку за период, не превышающий один год (с 03.12.2019 по 01.12.2020), в размере 10 037,50 рублей по следующей формуле: 5 % * 550 руб. * 365 = 10 037,50 рублей. Расчёт суммы неустойки прилагается к настоящему исковому заявлению. В целях досудебного урегулирования спора Истец направил по адресу регистрации и фактическому адресу проживания Ответчика претензии от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № с требованием об уплате неустойки за нарушение обязательств по договору, а также с предложением выполнить возложенные на заявителя мероприятия по технологическому присоединению либо в случае отсутствия необходимости осуществления технологического присоединения подписать и направить в адрес ПАО «Россети Сибирь» соглашение о расторжении договора. Проект соглашения о расторжении договора был приложен к тексту претензии от ДД.ММ.ГГГГ №. Однако подписанное заявителем соглашение о расторжении договора в адрес ПАО «Россети Сибирь» так и не поступило, требование об уплате неустойки также оставлено без исполнения.

В судебное заседание представитель истца ПАО «Россети Сибирь» не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещался надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие (л.д. 91-92).

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила, возражений относительно заявленных требований не представила.

Согласно адресной справке, выданной 05.06.2021 отделом адресно-справочной работы УВМ УМВД по Омской области ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес> (л.д. 63).

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствии, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного производства по представленным доказательствам.

Исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с п. 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО1 был заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.№, согласно которому Стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, необходимых для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № (л.д. 22-24).Пунктом 15 Правил № 861, а также пунктом 21 Договора предусмотрено, что договор считается заключённым с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию.

Согласно штампу центра обслуживания клиентов, проставленному на первом листе договора, подписанный заявителем экземпляр поступил в сетевую организацию 31.07.2019, что является датой заключения договора.

05.08.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации изменения наименования Истца: с ПАО «МРСК Сибири» на ПАО «Россети Сибирь». С указанной даты полное наименование Истца - Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (сокращённое наименование - ПАО «Россети Сибирь») (л.д. 45, 46-47, 48-51).

Согласно пункту 8 Договора Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

Перечень конкретных мероприятий, подлежащих выполнению со стороны Заявителя, указан в пункте 11 Технических условий (Приложение № 1 к Договору) (л.д. 25-26).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с п. 16 Правил № 861, пунктом 5 Договора составляет 4 месяца со дня заключения договора, то есть до 01.12.2019 включительно.

Однако мероприятия по технологическому присоединению, а также последующему извещению сетевой организации об их выполнении не исполнены Ответчиком до настоящего времени.

В соответствии с пунктом 16 (5) Правил № 861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объёме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятии по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Аналогичное право сетевой организации закреплено в пункте 16 Договора.

В силу пункта 16 (6) Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомлениео выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями,в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатампроверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения техническихусловий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающегоустройства после доставки сетевой организации направленного заявителемуведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверкивыполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведенияпроверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесениюплаты за технологическое присоединение.

Таким образом, законодательством определён период просрочки неисполнения обязательств со стороны заявителя, который признаётся существенным, являющимся самостоятельным основанием для расторжения договора сетевой организацией, а именно нарушение заявителем срока осуществления мероприятий на 12 и более месяцев. Именно данный срок признан законодателем длительным неисполнением обязательств заявителем и, в свою очередь, достаточным для реализации сетевой организацией права на расторжение такого договора.

В настоящее время просрочка в выполнении ФИО1 мероприятий по технологическому присоединению составила свыше 1 года.

Мероприятия в части подготовки технических условий на технологическое присоединение, срок осуществления которых наступает ранее срока выполнения заявителем мероприятий по технологическому присоединению, исполнены ПАО «Россети Сибирь» в полном объеме, что подтверждается изготовленными Техническими условиями, являющимися Приложением № 1 к Договору (25-26).

Фактическое технологическое присоединение по договору сетевая организация не может осуществить ранее выполнения заявителем его части мероприятий, которые так и не выполнены.

Ответчиком доказательств не выполнения Сетевой организацией условий договора технологического присоединения, суду не представлено. 

Статьей 450 ГК РФ предусмотрено, что ззменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

На основании изложенного, в связи с не выполнением ответчиком условий договора об осуществлении технологического присоединения к электросетям, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «МРСК Сибири» и ФИО1 подлежит расторжению. 

Согласно пункту 17 Договора Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённый за год просрочки.

Согласно пункту 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от 27.12.2018 № 668/95, от 05.02.2019 № 6/5 и составляет 550 рублей, в том числе НДС 20 %.

В соответствии с расчетом суммы неустойки, произведенным истцом на основании условий Договора, неустойка за период, не превышающий один год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) составила 10037,50 рублей: 5 % * 550 руб. * 365 = 10037,50 рублей (л.д. 19).

Проверив данный расчет, суд находит его верным.

В целях досудебного урегулирования спора Истцом в адрес Ответчика были направлены претензии от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 27), от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 31) с требованием об уплате неустойки за нарушение обязательств по договору, а также с предложением выполнить возложенные на заявителя мероприятия по технологическому присоединению либо в случае отсутствия необходимости осуществления технологического присоединения подписать и направить в адрес ПАО «Россети Сибирь» соглашение о расторжении договора. Проект соглашения о расторжении договора был приложен к тексту претензии от ДД.ММ.ГГГГ №

Подписанное заявителем соглашение о расторжении договора в адрес ПАО «Россети Сибирь» до настоящего времени не поступило, требование об уплате неустойки также оставлено без удовлетворения. 

На основании изложенного с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № за период с 03.12.2019 по 01.12.2020 в размере 10037,50 рублей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, с ответчика подлежат взысканию в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления, в размере 6402 рубля (л.д. 3).

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 235-237 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключённый ДД.ММ.ГГГГ между Публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 03.12.2019 по 01.12.2020 в размере 10037 рублей 50 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6402 рубля.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд через Омский районный суд Омской области в течение 1 месяца с момента принятия решения в окончательной форме, а не явившимся ответчиком в Омский районный суд Омской области в течение 7 дней с момента получения копии решения может быть подано заявление об отмене данного решения. 

Судья Т.А. Дьяченко

Решение в окончательной форме изготовлено: 06.07.2021.