дело № 44 г-14

строка № 6

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

президиума Воронежского областного суда

05 июня 2019 года президиум Воронежского областного суда в составе:

председательствующего: Калюжной В.А.,

членов президиума: Анисимова В.Ф., Сыроватского В.П., Храпина Ю.В., Чернышева П.С.,

при секретаре Гусевой Т.А.,

рассмотрев по докладу судьи Трофимовой М.В. гражданское дело по исковому заявлению Воронежской региональной общественной организации инвалидов «Импульс» к ФИО1 о взыскании части стоимости работ по договору подряда по восстановлению и усилению конструкций жилого дома, по кассационной жалобе ФИО2 на решение мирового судьи судебного участка № 3 в Аннинском судебном районе Воронежской области от 06 июля 2017 года, апелляционное определение Аннинского районного суда Воронежской области от 11 февраля 2019 года,

установил:

Воронежская региональная общественная организация инвалидов «Импульс» (далее - ВРООИ «Импульс») обратилась к мировому судье с иском к ФИО1 о взыскании части стоимости работ по восстановлению и усилению конструкции жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в размере 49 000 руб.

Решением мирового судьи судебного участка № 3 в Аннинском судебном районе Воронежской области от 06 июля 2017 года исковые требования ВРООИ «Импульс» удовлетворены. С ФИО1 в пользу ВРООИ «Импульс» в счет возмещения части стоимости работ по договору подряда по восстановлению и усилению конструкций жилого дома взыскано 49 000 руб. С ФИО1 в доход бюджета взыскана госпошлина в сумме 1670 руб.

Апелляционным определением Аннинского районного суда Воронежской области от 11 февраля 2019 года вышеуказанное решение мирового судьи оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФИО2 – без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поступившей в Воронежский областной суд 13 марта 2019 года, ФИО2 выражает несогласие с вынесенными по делу судебными актами. 

По запросу судьи Воронежского областного суда от 29 марта 2019 года для проверки доводов, изложенных в кассационной жалобе, гражданское дело было истребовано и поступило в областной суд 12 апреля 2019 года.

Определением судьи Воронежского областного суда от 16 мая 2019 года кассационная жалоба ФИО2 с делом передана для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции – президиума Воронежского областного суда.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, письменных возражениях, выслушав ФИО2, поддержавшую доводы кассационной жалобы, ФИО3 и представителя ВРООИ «Импульс» ФИО4, возражавших против удовлетворения кассационной жалобы, президиум находит жалобу подлежащей удовлетворению.

В силу статьи 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ? ГПК РФ) основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Установлено и подтверждено материалами дела, что жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежит на праве общей долевой собственности ФИО3 3/14 доли и ФИО1 11/14 долей.

Согласно экспертному исследованию ООО экспертное учреждение «Воронежский центр экспертизы» № 1000/16 от 05 августа 2016 года, основанием для проведения которого послужило заявление ФИО3, техническое состояние несущих и ограждающих конструкций жилого дома (литер А), расположенного по адресу: 

<

адрес>, находится в ограниченно-работоспособном состоянии, средневзвешенный физический износ всего жилого дома в целом составляет 55%, несущие конструкции здания имеют определенный запас прочности, отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания; техническое состояние несущих и ограждающих конструкций холодной пристройки дома находятся в неудовлетворительном состоянии, степень физического износа фундаментов и стен холодной пристройки (литер а), составляет 70% и 60% соответственно. Стоимость работ по восстановлению и усилению конструкций вышеуказанного жилого дома на момент производства исследования с учетом НДС составляет 406 628,66 руб.

07 августа 2016 года между ФИО3 и ФИО5 заключен договор подряда на выполнение работ по восстановлению и усилению конструкций жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которому цена подлежащей выполнению работы определена в локальном сметном расчете № 1 (в приложении № 1 к договору), и составит 406 628,66 руб.

07 ноября 2016 года между сторонами договора подряда составлен акт сдачи-приемки работ по восстановлению и усилению конструкций вышеуказанного жилого дома, согласно которому подрядчик сдал, а заказчик принял работы по договору подряда от 07 августа 2016 года, указанные в локальном сметном расчете № 1, за исключением работ, указанных в п. п. 19 - 24 раздела 2. Жилой дом (литер А) (устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов), стоимость выполненных работ стороны согласовали в размере 300 000 руб., которые были оплачены ФИО3

Право требования по взысканию с ФИО1 стоимости работ по восстановлению и усилению конструкций жилого дома по адресу: 

<

адрес>, уступлено ФИО3 по договору уступки права требования от 15 ноября 2016 года № 15/11/01 ВРООИ «Импульс».

Разрешая настоящий спор и удовлетворяя исковые требования ВРООИ «Импульс» к ФИО1, руководствуясь положениями статей 15, 210, 247, 249, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), указав, что ФИО16 произведены затраты на восстановление и усиление конструкций жилого дома по адресу: 

<

адрес> в сумме 300 000 pyб., мировой судья пришел к выводу о том, что если отсутствует соглашение между собственниками помещений относительно содержания имущества, находящегося в общей долевой собственности, к отношениям таких собственников применяются положения о неосновательном обогащении, и другой сособственник обязан возвратить собственнику, который понес расходы, неосновательно сбереженное за его счет имущество, при этом величина неосновательного обогащения, подлежащего взысканию с собственника, определяется пропорционально соотношению его доли в общем имуществе.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу наследника по закону после смерти ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 –ФИО2, согласился с выводами, изложенными в решении, и их правовым обоснованием.

Президиум считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на неправильном применении норм материального права к спорным отношениям и сделаны с нарушением норм процессуального права.На основании статьи 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

Статьей 249 ГК РФ предусмотрено, что каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

Исходя из приведенных положений гражданского законодательства, юридически значимыми обстоятельствами для правильного разрешения исковых требований о взыскании произведенных расходов на ремонт жилого дома являлись достижение между сособственниками соглашения относительно данных расходов, а при недостижении согласия, необходимость осуществления расходов на ремонт жилого дома для сохранения имущества, а также определение разумности стоимости выполненных работ, которые носили бы необходимый и обязательный характер как для истца, так и для ответчика.

От выяснения данных обстоятельств зависело правильное разрешение судом настоящего спора по заявленным требованиям.

Между тем в нарушение части 2 статьи 56 и части 1 статьи 196 ГПК РФ суд не определил юридически значимые для правильного разрешения спора обстоятельства разумного и необходимого размера стоимости ремонта, требующегося для сохранения жилого дома как объекта долевой собственности, а также обстоятельства, связанные с установлением факта несения ФИО3 этих расходов.

Кроме того, в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» разъяснено, что заявленные требования рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным судом на обсуждение в соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ.

Заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу не являются исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ). Оценка судом заключения должна быть полно отражена в решении. При этом суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ (пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении»).

Исходя из положений статей 67, 71, 195-198 ГПК РФ выводы суда о фактах, имеющих юридическое значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они должны быть указаны в судебном постановлении убедительным образом со ссылками на нормативные правовые акты и доказательства, отвечающим требованиям относимости и допустимости (статьи 59, 60 ГПК РФ). В противном случае нарушаются задачи и смысл гражданского судопроизводства, установленные статьей 2 ГПК РФ.

В подтверждение необходимости выполнения работ в целях сохранения жилого дома суд положил в основу решения экспертное исследование ООО экспертное учреждение «Воронежский центр экспертизы» № 1000/16 от 05 августа 2016 года, выполненное во внесудебном порядке по инициативе истца, однако при этом не разрешил вопрос о допустимости данного доказательства.

Частью 1 статьи 79 ГПК РФ установлено, что при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. 

Однако в нарушение приведенных норм процессуального права суд не поставил на обсуждение сторон вопрос о назначении соответствующей судебной экспертизы для обеспечения сторонам возможности реализовать права, предусмотренные процессуальным законом, несмотря на то, что представитель ФИО1 в суде оспаривал внесудебное экспертное исследование.

Не устранил указанные нарушения закона и суд апелляционной инстанции.

В абзаце первом пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13) разъяснено, что, по смыслу статьи 327 ГПК РФ, повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 1 части 1 статьи 330 ГПК РФ), то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им содействие в собирании и истребовании таких доказательств. Суду апелляционной инстанции также следует предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные (новые) доказательства, если в суде первой инстанции не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 2 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), в том числе по причине неправильного распределения обязанности доказывания (часть 2 статьи 56 ГПК РФ) (пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13).

При вынесении определения судом апелляционной инстанции указанные выше требования закона соблюдены не были, допущенные судом первой инстанции нарушения норм права не были устранены. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 ГПК РФ), президиум Воронежского областного суда полагает необходимым отменить апелляционное определение Аннинского районного суда Воронежской области от 11 февраля 2019 года и направить дело на новое апелляционное рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует в соответствии с требованиями части 3 статьи 390 ГПК РФ учесть изложенное в настоящем постановлении, определить обстоятельства, имеющие юридическое значение для правильного разрешения спора, дать надлежащую правовую оценку и принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 389, 390 ГПК РФ, президиум 

постановил:

апелляционное определение Аннинского районного суда Воронежской области от 11 февраля 2019 года отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции - Аннинский районный суд Воронежской области.

Председательствующий: Калюжная В.А.

В рассмотрении дела участвовали:

в суде первой инстанции – мировой судья Кругова С.А.

в суде апелляционной инстанции – судья Сафонов В.В.