РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 сентября 2018 года г.Красноярск

Судья Ленинского районного суда г. Красноярска Волгаева И.Ю.

при секретаре ФИО4 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителя

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась с иском в суд к ПАО «МРСК Сибири», в котором просит обязать ПАО «МРСК - Сибири» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 02.06.2017г. в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома по адресу: Россия, 

<

адрес>, СНТ «Солнечный, участок №, кадастровый номер земельного участка №; взыскать с ответчика денежную сумму в размере 48 107 руб. 50 коп., в том числе: стоимость юридических услуг в размере 25 000 руб., неустойку в размере 3 107 руб. 50 коп., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб.

Свои требования мотивировала тем, что 02.06.2017г. между ФИО2 и ответчиком был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в целях электроснабжения жилого дома по адресу: Россия, 

<

адрес>, СНТ «Солнечный», участок №, кадастровый номер земельного участка № Приложением № к данному договору являются технические условия №. Договор был заключен истцом как собственником жилого дома по адресу: Россия, 

<

адрес>, СНТ «Солнечный», 

<

адрес>, 1 и земельного участка по адресу: Россия, 

<

адрес>, СНТ «Солнечный», участок №. В соответствие с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы сетевой организации. Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий ответчиком должен был составлять 6 месяцев с даты заключения договора между сторонами. В силу п. 6 договора сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства истца, указанные в технических условиях. Размер платы за технологическое присоединение был определен в п. 10 договора и составлял 550 руб. Оплата была произведена в указанной сумме по реквизитам истца 02.06.2017г. 10.11.2017г. истец обратилась к ответчику с заявлением о вызове специалиста для проверки выполнения мероприятий по техническим условиям договора со стороны истца. Заявление было принято ответчиком в тот же день (вх. № от 10.11.2017г.), однако осталось без ответа. Ответчик не выполнил свои обязательства по договору без объяснения причин. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № были утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (далее Правила). Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и потребителем, в сроки, установленные Правилами. Пунктом 15 Правил установлено, что договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. В соответствие с подпунктом «б» пункта 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется с даты договора и не может превышать шесть месяцев для заявителей, указанных в п. 12.1, 14 и 34 Правил. К заявителям, указанным в п. 14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. Истец относится к данной категории потребителей. Исходя из изложенного, работы по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору должны были быть выполнены в срок до 02.12.2017г. Пунктом 18 Правил предусмотрено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий. По состоянию на 29.03.2018г. просрочка составляет 113 дней, а размер неустойки за 1 день просрочки составляет 27,5 руб. Общая сумма неустойки на дату подачи искового заявления составляет 3 107 руб. 50 коп. Полагает, что права потребителя ФИО2 были нарушены тем, что ответчик не выполнил свои обязательства по договору до настоящего времени несмотря на значительную просрочку. Моральный вред, причиненный ФИО2, заключается в нравственных страданиях и составляет 20 000 руб. За юридические услуги по подготовке искового заявления и представлению интересов в суде истцом было заплачено 25 000 руб. 

Впоследствии представитель истца ФИО7 уточнил исковые требования, в связи с частичным добровольным удовлетворением исковых требований, просил взыскать с ответчика судебные расходы в размере 25 000 рублей, неустойку в размере 5 417 руб. 50 коп., компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, 15 000 руб. 

Истец ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежаще и своевременно, доверила защиту своих интересов своему представителю.

Представитель истца ФИО7, полномочия проверены, в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования. Дополнительно пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ответчиком осуществлено технологическое присоединение жилого дома истца к электрическим сетям с целях электроснабжения, но просрочкой были нарушены права истца. 

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» ФИО5 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика поступило уведомление истца о выполнении ею технических условий по установлению приборов учета электроэнергии, однако, сертификаты энергопринимающего устройства приложены не было. ДД.ММ.ГГГГ обязательства об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в целях электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Солнечный», участок №, к.н. № было исполнено. Полагал, что выполнение своих обязательств ответчик осуществил после получения сертификатов на энергопринимающее устройство, однако, когда они были представлены, пояснить не смог. Просил снизить размер неустойки, судебных расходов и компенсации морального вреда. Ранее представителем ответчика ФИО6 был направлен отзыв на исковое заявление мотивированный следующим. Согласно пункту 6 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил (в том числе, с гражданами, мощность энергопринимающих устройств которых до 15 кВт), обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено правосетевой организации отказать в заключении договора об осуществлениитехнологического присоединения заявителю, относящемуся к пунктам 12.1, 14 или34 Правил (гражданину, требуемая мощность энергопринимающих устройствкоторого - до 15 кВт).

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № заключен на основании заявки ФИО2 на технологическое присоединение электроустановки жилого дома, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, Ленинский, 

<

адрес>, СНТ «Солнечный», участок №, кадастровый номер земельного участка №, мощностью 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности III.

Согласно техническим условиям, являющимся неотъемлемым приложением к Договору, для осуществления технологического присоединения электроустановки объекта ответчика сетевая организация должна выполнить строительство ЛЭП-6 кВ от ВКЛ 6 кВ ф. «Причал» РП122-КТП629 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, установить ТП-6/0,4 кВ.

При выполнении подобных мероприятий сетевой организации необходимо разработать проект для строительства новых объектов, оформить правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, получить разрешительные документов на строительство и реконструкцию, изыскать денежные средства, необходимые для строительства и другие.

Согласно п. 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, одним из этапов технологического присоединения является выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

Исходя из п. 16 Правил договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Пункт 18 Правил устанавливает, что одними из мероприятий по технологическому присоединению являются (п.п. б, г):

разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренными техническими условиями;

выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.

Исходя из требований п. 18 Правил по указанным мероприятиям сетевая организация должна разработать проектную документацию и выполнить технические условия.

Таким образом, п. 18 Правил в качестве первого мероприятия, которое выполняется для осуществления технологического присоединения (за исключением подготовки и выдачи технических условий) предусматривает разработку проектной документации.

В настоящее время мероприятия сторонами исполнены, подписаны акты, подтверждающие надлежащее исполнение мероприятий по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, нарушение срока осуществления технологического присоединения вызвано действиями самого заявителя. ФИО1 организацией нарушений сроков не допущено.

Истец также требует взыскать компенсацию морального вреда в размере 25 000,00 руб. Вина ПАО «МРСК Сибири» в причинении морального вреда истцу, отсутствует в силу действующего законодательства. Истец не представил в дело документов, обосновывающих степень его физических и нравственных страданий, и, соответственно, суммы компенсации морального вреда.

Истцом подано заявление о возмещении судебных расходов. Сумма 25 000 руб. за участие в деле данной категории сложности считает завышенной и подлежащей снижению. Кроме того, не представлена калькуляция судебных расходов, с учетом трудозатрат на выполнение каждых действий. Не понятно чем обоснованы доводы представителя о сложности подготовки данного дела. Нет сведений, что представитель имеет статус адвоката, также нет документов, обосновывающих уровень профессиональной квалификации.

Кроме того, считал не подлежащим удовлетворению расходов за оказание услуг консультационного характера, ввиду того, что договор технологического присоединения является типовым договором и строго регламентирован Постановлением Правительства №861. Просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Судом принято решение о рассмотрении дела в отсутствии не явившихся участников процесса в соответствии со ст.167 ГПК РФ.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В силу п. 3 и 6 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению и заключить договор об осуществлении технологического присоединения. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно ч.1 ст. 730 ГК РФ, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. 

Судом установлено, что 02.06.2017г. между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (Сетевая организация) и ФИО2 (Заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (л.д.9-10), в соответствии с которым Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического Присоединения энергопринимающих устройств Заявителя жилой дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 к.В; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. (п.1). Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилой дом, расположенных (которые будут располагаться) по адресу: Россия, Красноярский край, Ленинский, г Красноярск, СНГ "Солнечный", участок №, кадастровый номер земельного участка №. (п.2) Точка (и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя. (п.3) 

Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора. (п. 4) Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. (п.6). Сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заявителем ФИО1 организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых, энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю. (п.6). Сетевая организаций при невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. (п. 7). 

Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательств, по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течении 2 рабочих дней со дня получения указанных актов от ФИО1 организации (п. 8). Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (п.9). Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п и составляет 550 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 83,90 руб. (п. 10). Согласно п. 13 раздела IV настоящего договора, заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, Сетевая организация – до границ участка заявителя. 

В соответствии с п.10 Технологических условий №, являющихся Приложением № к договору об осуществлении технологического присоединения от 02.06.2017г. № (л.д.10-11) Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Организационные мероприятия:

Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях, к их содержанию, утвержденный постановлением Правительством РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

10.2.1. Запроектировать и построить ТП-6/0,4 кВ. Тип и мощность трансформатора определить проектом; 

10.2.2. От ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 -КТП629 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ. Запроектировать и построить ВЛ- 6 кВ. Способ прокладки, марку и сечение определить проектом; 

10.2.3. От проектируемой ТП-6/0,4 кВ (п. 10.2.1.) до границ земельного участка заявителя запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; 

10.2.4. Определить проектом необходимость установки подкоса на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП629.

10.2.5. Перед проектируемой ТП (п. 10.2,1.) установить линейный разъединитель. Тип разъединителя и место установки определить проектом 

11. Заявитель осуществляет:

11.а. Монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

11.б. Перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;

11.в. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки Присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

11.2 Требования к организации учета электрической энергии: выполнить в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от. ДД.ММ.ГГГГ №);

11.3 Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.

11.4 Требования но согласованию проектной документации с ФИО1 организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору; при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения, технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю ФИО1 организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии. 

Истцом в полном объеме была произведена оплата за технологическое присоединение по договору в размере 550 руб., что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.16).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направила в адрес ответчика заявление о выполнении технических условий по технологическому присоединению к электрическим сетям о направлении специалиста для проверки выполнения мероприятия со стороны заявителя по техническим условиям договора технологического присоединения. На данном заявлении стоит отметка о получении его заявления ответчиком (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (л.д. 17). Доказательств того, что истец ранее обращалась к ответчику с предусмотренным уведомлением суду не предоставлено, в связи с чем, учитывая требования п.6 договора, ответчик имел право не исполнять свои обязательства по договору до получения уведомления.

Таким образом, поскольку уведомление ответчика об исполнении ФИО2 условий договора произведено лишь 10.11.2017г. в соответствии с п.6. ответчик был обязан осуществить проверку выполнения ТУ Заявителем не позднее 17.11.2017г., в соответствии с п.6 не позднее 24.11.2017г. составить и направить Заявителю акт о выполнении ТУ, Акт об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии, и не позднее 24.11.2017г. осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя. 

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО2 подписан акт о выполнении технических условий № АТУ № (л.д.38), согласно которому, в ходе проверки произведено рассмотрение технических условий (приложение№ 1 к договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.№), паспорт на прибор учета. Проведен осмотр электроустановок заявителя жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленинский, 

<

адрес>, СНТ «Солнечный», участок №, кадастровый №. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию № № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО2 подписан акт об осуществлении технологического присоединения № №, согласно которому сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.(л.д.39-40).

Также сторонами подписан расчет потерь №.17 (л.д. 41), который выполнен согласно Инструкции по определению потерь электроэнергии в трансформаторах и линиях электропередачи, учитываемых при финансовых расчетах за электроэнергию между энергосистемами и энергоснабжающей организацией и потребителем, утвержденных Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР в 1986 г. и Порядка расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям утвержденного Приказом от ДД.ММ.ГГГГ № Министерство промышленности энергетики РФ. Согласно расчету потерь, объектом является жилой дом по адресу: 

<

адрес>, Ленинский, 

<

адрес>, СНТ «Солнечный», участок №, кадастровый №, счетчик №. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» исполнило свои обязательства в полном объеме по технологическому присоединению перед ФИО2

В связи с тем, что ответчиком во время не исполнена своевременно обязанность по технологическому присоединению, ответчиком допускалась просрочка исполнения обязательств по договору. 

В соответствии с п.17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

При этом в соответствии с ч.5 ст.28 Закона сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 5 417 руб. 50 коп. с 03.12.2017г. по 20.06.2017г. – 199 дней. Истец просит взыскать за 197 дней. Проверив представленный истцом расчет суд считает его верным, таким образом, неустойка составляет 5 417 руб. 50 коп., данная неустойка подлежит взысканию в пользу истца с ответчика.

Статья 15 ФЗ «О защите прав потребителей» предусматривает, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

В соответствии с п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам связанных о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая, что в судебном заседании нашел подтверждение факт того, что права ФИО2 как потребителя нарушаются, суд с учетом принципа разумности и справедливости, характера и степени причиненного вреда, степени вины ответчика, полагает возможным взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда в пользу истца 1 000 руб.

Согласно разъяснениям, данным в п.2 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», с учетом положений статьи 39 Закона «О защите прав потребителей» к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона «О защите прав потребителей», в частности об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13).

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, штраф в размере 50% от взысканной суммы составит 3 208 руб. 75 коп. (5 417 руб. 50 коп. + 1 000 руб.) : 2. 

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с положениями ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО2 (Клиент) и ФИО7 (Исполнитель) заключен договор на оказание юридических услуг (л.д.18), в соответствии с которым клиент поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказать клиенту юридическую помощь по вопросу проведения претензионной работы взыскания в судебном порядке денежной суммы по договору №.№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также других сумм по закону о защите прав потребителей Филиала ПАО «МРСК Сибири» Красноярскэнерго, а также об оказании в судебном порядке должника исполнить обязательство по договору. В рамках договора исполнитель обязуется: изучить представленные клиентом документы и проинформировать клиента о возможным вариантах решения проблемы. Подготовить и подать необходимые документы в Ленинский районный суд г. Красноярска (или любой другой согласно правилам подсудности) и осуществить представительство интересов клиента при рассмотрении дела. Стоимость услуг по договору определяется в сумме 25 000 рублей. Оплата производится передачей денежных средств в момент составления договора, удостоверяется распиской. Стоимость услуг определяется следующим образом: 10 000 рублей изучение представленных клиентом документов, консультация клиента, подготовка искового заявления, с расчетом требований и со всем пакетом необходимым документов, при необходимости подготовка уточнений, изменений исковых требований, ходатайств. 15 000 рублей участие в судебных заседаниях первой инстанции независимо от количества судодней. 

Факт оплаты выполненных работ по настоящему договору подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.19).

С учетом объема выполненных представителем истца работ по рассмотрению гражданского дела по иску ФИО2 к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителя: составления искового заявления (л.д.3-6), составление изменения исковых требований от ДД.ММ.ГГГГ.(л.д.37), составление ходатайства о переносе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ от 27.08.20018 г. (л.д.61), участия в подготовке к рассмотрению гражданского дела ДД.ММ.ГГГГ (л.д.28-29), в судебных заседаниях ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.42-43), ДД.ММ.ГГГГ, суд считает, что учитывая характер и сложность спора, судебные расходы в сумме 13 000 руб. соответствуют критерию разумности и справедливости и подлежат взысканию в пользу истца.

На основании п.8 ст.333.20 НК РФ в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина уплачивается ответчиком пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. Следовательно, с ответчика подлежит взыскать 700 рублей (400 рублей - за требования имущественного характера и 300 рублей - за требование о компенсации морального вреда), от уплаты которой истец освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу ФИО2 неустойку в размере 5 417 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, судебные расходы в размере 13 000 рублей, штраф в размере 3 208 рублей 75 копеек, а всего 22 626 рублей 25 копеек. 

Взыскать с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 700 рублей.

В удовлетворении остальных исковых требований требования ФИО2 к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о взыскании компенсации морального вреда отказать.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий И.Ю. Волгаева