РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 мая 2024 года город Киров

Ленинский районный суд г. ФИО2 в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Н.А.,

при секретаре Отмаховой С.А.,

с участием представителя истца Наймушиной О.С.,

представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2586/2024 (43RS0001-01-2024-002478-07) по иску Прокурора Первомайского района г. ФИО2 в интересах неопределенного круга лиц к Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» о возложении обязанности по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Первомайского района г. ФИО2 в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» о возложении обязанности по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту, указав, что Постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 №254/210 утверждена областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в целях реализации которой распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 27.11.2017 № 10/1 утвержден краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области на 2020-2022 годы». Региональный оператор в лице НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» обязан был обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов по адресам: 

<

...> (крыша, фасад); ул. Труда, д. 22А (крыша, фасад); ул. Герцена, д. 5 (крыша, фасад, фундамент); ул. Ленина, д. 119 (крыша, фасад, фундамент). В запланированный срок капитального ремонта элементов общего имущества указанных многоквартирных домов в период краткосрочного плана, утвержденного при реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области на 2020-2022 годы» в региональным оператором не обеспечено. Также не обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2021-2023 года, а именно планового периода 2023 года в отношении следующих домов на территории 

<

...> (крыша, подвал, фундамент); ул. Карла Маркса 118; крыша, фасад, фундамент); ул. Карла Маркса 48 (подвал, фасад, фундамент); ул. Карла Маркса, д. 68 (газоснабжение), ул. Карла Маркса, д. 80 (подвал, фундамент), ул. Клубная 4 (крыша, фасад), ул. Мопра 48 (крыша, фасад, подвал, фундамент), ул. Московская 1А (крыша, фундамент), ул. Московская 1Б (фасад, фундамент), ул. Преображенская 19А (фасад), ул. Преображенская 9 (крыша, подвал, фасад, фундамент), ул. Пролетарская, д. 16 (крыша, фасад), ул. Свободы 103 (фасад, фундамент), ул. Свободы, 118 корп.1 (крыша, фундамент), ул. Свободы, 48 (подвал фундамент), Советская 17 (ГВС, отопление, ХВС), ул. Спасская 12 (крыша, подвал, фасад, фундамент). Срок проведения указанных работ истек 31.12.2023 с завершением календарного года. В настоящее время по состоянию на февраль 2024 года региональным оператором договоры на проведение ремонтных работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов по адресам: 

<

...> л 77 (крыша, фасад); ул. Труда, д. 22А (крыша, фасад); ул. Герцена, д. 5 крыша, фасад, фундамент); ул. Ленина, д. 119 (крыша, фасад, фундамент), ул. Воровского 31 (крыша, подвал, фундамент); ул. Карла Маркса 118 крыша, фасад, фундамент); ул. Карла Маркса 48 (подвал, фасад, фундамент); ул. Карла Маркса, д. 68 (газоснабжение), ул. Карла Маркса, д. 80 (подвал, фундамент), ул. Клубная 4 (крыша, фасад), ул. Мопра 48 (крыша, фасад, подвал, фундамент), ул. Московская 1А (крыша, фундамент), ул. Московская 1Б (фасад, фундамент), ул. Преображенская 19 А (фасад), ул. Преображенская 9 (крыша, подвал, фасад, фундамент), ул. Пролетарская, д. 26 (крыша, фасад), ул. Свободы 103 (фасад, фундамент), ул. Свободы, 118 корп.1 (крыша, фундамент), ул. Свободы, 48 (подвал фундамент), Советская 17 (ГВС, отопление, ХВС), ул. Спасская 12 (крыша, подвал, фасад, фундамент) не заключены, мероприятия по перерасчету сметной стоимости выполнения работ не начаты, аукционы на проведение ремонтных работ не объявлены, что может повлечь повторное неисполнение плана капитального ремонта в отношении вышеуказанных домов, срок капитального ремонта которых неоднократно переносился из-за ненадлежащей организации работы регионального оператора. Длительное бездействие и ненадлежащая организация исполнения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области нарушают состояние муниципального имущества, архитектурный облик города ФИО2 жилищные права граждан на благоприятные и безопасные условия их проживания, создает угрозу срыва сроков капитального ремонта многоквартирных домов в преддверии празднования 650-летия города ФИО2. Просят обязать НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> I. 18, ул. Карла Маркса 48; ул. Карла Маркса, д.68; ул. Карла Маркса, 

<

...> I 26; ул. Свободы, д.103; ул. Свободы, 

<

...> в соответствии с условиями областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, а именно: по капитальному ремонту крыши, подвала, фасада, фундамента дома № 5 по ул. Герцена, г. ФИО2; по капитальному крыши, фасада, фундамента дома № 119 по ул. Ленина г. ФИО2; по капитальному ремонту крыши, засада дома № 77 по улице Свободы г. ФИО2; по капитальному ремонту фасада дома 

<

...>; по капитальному ремонту крыши, подвала, фундамента дома № 31 по ул. Воровского, д. 31 г. ФИО2; по капитальному ремонту крыши, засада, фундамента дома № 118 по улице Карла Маркса г.ФИО2; по капитальному ремонту подвала, фасада, фундамента дома № 48 по улице Карла Маркса г.ФИО2; по капитальному ремонту системы газоснабжения дома № 68 по улице Карла Маркса г.ФИО2; по капитальному ремонту подвала, фундамента дома № 80 по улице Карла Маркса г.ФИО2; по капитальному ремонту крыши, фасада дома № 4 по улице Клубная г. ФИО2; по капитальному ремонту крыши, фасада, подвала, фундамента дома № 48 по улице Мопра г. ФИО2; по капитальному ремонту фасад, фундамента дома № 1Б по улице Московская г. ФИО2; по капитальному ремонту фасада дома» 19А по улице Преображенская, д. 19А г. ФИО2; по капитальному ремонту крыши, подвала, фасада, фундамента дома № 9 по улице Преображенская г. ФИО2; по капитальному ремонту крыши, фасада дома № 26 по улице Пролетарская г.ФИО2; по капитальному ремонту фасада, фундамента дома № 103 по улице Свободы г.ФИО2; по капитальному ремонту дома крыша, фундамента № 118 корп.1 по улице Свободы г.ФИО2; по капитальному ремонту подвала, фундамента дома №48 по улице Свободы г. ФИО2; по капитальному ремонту ГСВ, отопление ХВС дома № 17 по улице Советская г. ФИО2; по капитальному ремонту крыши, подвала, фасада, фундамента дома № 12 по улице Спасская г. ФИО2.

В судебном заседании помощник прокурора Первомайского района г. ФИО2 Наймушина О.С. поддержала изложенные в исковом заявлении доводы, на удовлетворении требований настаивала. 

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился по доводам письменного отзыва.

Представители третьих лиц МО «Город Киров», ООО «Городское обслуживающее предприятие», ООО «УК «Продвижение», ООО УК «Кипрей» в судебное заседание не явились, извещены.

Представитель Администрации г. ФИО2 в письменном отзыве просила о рассмотрении дела в её отсутствие, поддержав исковые требования.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «УК Мегаполис», представитель которого в судебное заседание не явился, представил письменный отзыв, просил о рассмотрении дела в его отсутствие.

Суд с учетом мнений сторон на основании ст. 167 ГПК РФ пришел к выводу о рассмотрении дела в отсутствие неявившихся представителей третьих лиц.

Заслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Согласно ч. 1 ст. 166 ЖК РФ перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.

В соответствии с ч. 1 ст. 168 ЖК РФ региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта), контроля своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Частью 7 указанной статьи предусмотрено, что в целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти субъекта РФ обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока. 

Согласно положениям ст. ст. 178, 180, 182 ЖК РФ региональный оператор - это юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме фонда, и осуществляющее функции по подготовке многоквартирного дома к капитальному ремонту, подготовке проектной документации, привлечению подрядных организаций и заключению с ними от своего имени договоров на выполнение работ капитального характера, по контролю качества и сроков выполнения работ подрядными организациями, приемке выполненных работ, их оплате за счет средств, поступивших от собственников многоквартирного дома, а также выполняющее иные обязанности, предусмотренные законом. 

Выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме производится на основании региональной программы, утвержденной высшим исполнительным органом власти субъекта РФ для всех многоквартирных домов в конкретном субъекте РФ, за счет фонда капитального ремонта, формируемого путем перечисления собственниками помещений в многоквартирном доме соответствующих взносов на счет регионального оператора (ст. ст. 168, 170, 174 ЖК РФ). 

В судебном заседании установлено, что НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (региональный оператор) создан на основании распоряжения Правительства Кировской области от 26.08.2013 № 263, как некоммерческая организация в форме фонда, в целях осуществления деятельности в качестве регионального оператора, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области.

На территории Кировской области реализуется региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210. 

В целях реализации Программы распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 27.11.2017 № 10/1 утвержден краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области на 2020-2022 годы». 

Также утвержден краткосрочный план на 2021-2023 годы.

05.02.2024 года собственник жилого помещения в многоквартирном доме 77 по ул. Свободы обратился к прокурору Первомайского района г. ФИО2 с заявлением, в котором просил обязать выполнить запланированный капитальный ремонт данного дома.

Аналогичные обращения поступили от собственников помещений в доме № 12 по ул. Спасской г. ФИО2 (28.02.2024 года), в доме № 22 а по ул. Труда г. ФИО2 (07.02.2024).

Из ответов руководителя НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» от 29.02.2024 г., от 22.01.2024 года следует, что в настоящее время подрядными организациями не обеспечено выполнение работ следующих домов из плана 2023 года: Воровского д. 31 (крыша, подвал, фундамент); Карла Маркса д. 18 (крыша, фасад, фундамент); Карла Маркса д. 48 (подвал, фундамент); Карла Маркса 68 (газоснабжение); Карла Маркса 80 (подвал, фундамент); Клубная 4 (крыша, фасад); Мопра 48 (крыша, фасад, подвал, фундамент); Московская 1А (крыша, фундамент); Московская 1Б (фасад, фундамент); Преображенская 19А (фасад); Преображенская 9 (крыша, подвал, фасад, фундамент); Пролетарская 26 (крыша, фасад); Свободы 103 (фасад, фундамент); Свободы 118, корп. 1 (крыша, фундамент); Советская 17 (ГВС, отопление, ХВС); Спасская 12 (крыша, подвал, фасад, фундамент); ул. Герцена, д. 5 (крыша, подвал, фасад, фундамент); ул. Ленина, д. 119 (крыша, фасад, фундамент); ул. Свободы, д. 77 (крыша, фасад); ул. Труда, д. 22а (фасад).

24.01.2024 года прокурором Первомайского района г. ФИО2 в адрес Врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

В ответе от 28.02.2024 года на указанное представление Прокурора ответчик сообщил о выполненных мероприятиях по его исполнению с приложением документов о выполнении работ.

В судебном заседании установлено, что в запланированный срок капитального ремонта элементов общего имущества указанных в иске многоквартирных домов в период краткосрочных планов, утвержденных при реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области на 2020-2022 годы, на 2021-2023 годы» региональным оператором не обеспечено, а именно не обеспечено выполнение капитального ремонта в 21 доме, включенном в план. 

Помимо указанного, региональным оператором, выступающим в роли заказчика при заключении договоров на капитальный ремонт и осуществлении контроля за качеством и сроками выполнения работ, вопреки требованиям ст. 308 ГК РФ, ст. 182, 188 ЖК РФ допущено бездействия по факту исполнения подрядчиками работ по капитальному ремонту по договорам, срок исполнения которых истек.

Приказами руководителя НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» от 19.02.2024 №22/1-К и №22/2-К за нарушение п. 3.2.1 трудового договора начальнику управления капитального ремонта и строительного контроля фонда ФИО3 и генеральному директору ФИО4 применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

14.10.2022 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «Аккорд» заключен договор №10-2022/ЕППР на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на объектах, расположенных по адресу: 

<

...> (крыша, фасад, подвал, фундамент), 

<

...> (фундамент, крыша, фасад, подвал), 

<

...> (крыша, фасад, подвал, фундамент). Дата окончания ремонтных работ – 28 декабря 2024 г.

29.12.2022 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «Феникс» заключен договор №39-2022/ЕППР на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на объекте, расположенном по адресу: 

<

...> (система водоснабжения и водоотведения). Дата окончания ремонтных работ – 01 сентября 2023 года. 

05.03.2024 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «СМР №1» заключен договор №37-2024/ЕППР на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>. Дата окончания ремонтных работ – 28 декабря 2024 г.

07.03.2024 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «МосЖилСтрой» заключен договор №24-2024/ЕППР на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на объектах, расположенных по адресам: 

<

...> (фундамента, крыши, фасада), дата окончания ремонтных работ – 28 декабря 2024 г.; 

<

...>, срок до 01.09.2024 года.

11.03.2024 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «МосЖилСтрой» заключен договор №28-2024/ЕППР на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, срок окончания работ – до 28.12.2024 года. 

04.03.2024 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «СМР №1» заключен договор №34-2024/ЕППР на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>. Дата окончания ремонтных работ – 30 декабря 2024 г.

17.11.2022 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «Авто Коррида» заключен договор №53-2022/ЕППР на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

<

...>. Дата окончания – 01 сентября 2023 г.

14.03.2024 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «Модуль» заключен договор №6-2024/ЕППР на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>. Дата окончания ремонтных работ – 01 сентября 2024 г.; крыша – 21 июня 2024 г.

27.09.2023 года между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «Импульс» заключен договор №134-2023/ЕППР на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на объекте, расположенном по адресу: 

<

...> (фасада, крыша). Дата окончания ремонтных работ – 01 июня 2024 г.

Работы по капитальному ремонту в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...> (крыши, фасада) выполнены, что подтверждается актами промежуточной приемки в эксплуатацию капитальным ремонтом видов работ многоквартирного дома от 20.10.2023 года и от 25.03.2024 года. 

Актами об открытии работ подтверждается факт открытия работ на следующих объектах: 

<

...> – 18.11.2022 г.; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> ул. Пролетарской г. ФИО2.

Между тем, заключение договоров на выполнение подрядных работ по ремонту домов со сроком их исполнения в 2024 году не свидетельствует о надлежащем исполнении ответчиком обязанности по проведению ремонта в запланированные Программой сроки. 

Однако сроки исполнения работ по договорам учитываются судом при определении срока выполнения ответчиком возложенной на него обязанности.

Факт выполнения работ подрядчиком подтверждается актами приема-сдачи работ.

Объявление электронных аукционов на проведение капитального ремонта МКД само по себе не свидетельствует о надлежащем исполнении ответчиком возложенных на него обязанностей, какие-либо доказательства, подтверждающие факт исполнения возложенной законом обязанности в установленные Программой сроки ответчиком представлены.

Отсутствие требований к периодичности проведения аукционов не освобождает ответчика от обязанности предпринимать все меры для организации проведения капитального ремонта в установленный срок.

Доказательств, указывающих на наличие причин, препятствующих своевременному исполнению обязанностей по проведению капитального ремонта спорных многоквартирных домов, ответчиком в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлено.

Между тем, ответчиком в судебном заседании доказан факт выполнения работ по ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> – представлен акт выполненных работ. 

В указанной части требования прокурора удовлетворению не подлежат.

В остальной части, доказательств, указывающих на наличие причин, препятствующих своевременному исполнению обязанностей по проведению капитального ремонта спорных многоквартирных домов, ответчиком в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлено.

Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что ответчик не исполняет возложенные на него действующим законодательством обязанности в части организации проведения работ по капитальному ремонту общего имущества МКД по адресам 

<

...> Преображенская, д.19 А; ул. Преображенская, 

<

...> выполненная НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» работа по организации ремонта общего имущества вышеуказанных многоквартирных домов не отвечает целям и задачам адресной программы капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исковые требования Прокурора подлежат частичному удовлетворению.

Доводы стороны ответчика о выполнении необходимых мероприятий по проведению капитального ремонта подлежат отклонению как несостоятельные, поскольку результат по организации выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества вышеуказанных домов отсутствует. 

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что ответчиком не принято надлежащих мер по организации проведения капитального ремонта общего имущества указанных многоквартирных домов, что влечет нарушение прав собственников помещений в указанных домах.

Не проведение капитального ремонта имущества в указанных выше многоквартирных домах, финансирование которых осуществляется за счет целевых средств собственников помещений, существенно нарушает их жилищные права, гарантированные Конституцией РФ. 

Ссылки ответчика на несостоятельность подрядчиков не являются основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку сроки выполнения в 2020-2022, 2021-2023 годах региональной программы в части капитального ремонта указанных многоквартирных домов не изменялись. 

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

На основании ст. 206 ГПК РФ, с учетом заключенных договоров на выполнение работ, срока проведения работ, их сезонности суд считает возможным установить ответчику срок для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов №5 по ул. Герцена, №119 по ул. Ленина, №77 по ул. Свободы г. ФИО2 - до 28.12.2024; № 22А по ул. Труда, № 118 по ул. Карла Маркса, № 68 и № 80 по ул. Карла Маркса, № 4 по ул. Клубной, № 48 по ул. Мопра - до 30.12.2024; № 26 по ул. Пролетарской – до 01.06.2024 года; по остальным домам - до 01.09.2024. Вышеуказанные сроки суд считает достаточными и разумными. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в доход бюджета муниципального образования «Город Киров» подлежит взысканию госпошлина в размере 300 руб.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокурора Первомайского района г. ФИО2 в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить частично.

Обязать Некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН 

<

***>) обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> Преображенская, д.19 А; ул. Преображенская, 

<

...> в соответствии с условиями областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, а именно обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту:

- крыши, подвала, фасада, фундамента дома № 5 по ул. Герцена г. ФИО2 в срок до 28.12.2024 года;

- крыши, фасада, фундамента дома № 119 по ул. Ленина г. ФИО2 в срок до 28.12.2024 года;

- крыши, фасада дома № 77 по улице Свободы г. ФИО2 в срок до 28.12.2024 года;

- фасада дома № 22А по улице Труда г. ФИО2 в срок до 30.12.2024 года;

- крыши, подвала, фундамента дома № 31 по ул. Воровского г. ФИО2 в срок до 30.12.2024 года;

- крыши, фасада, фундамента дома № 118 по улице Карла Маркса г. ФИО2 в срок до 30.12.2024 года;

- подвала, фасада, фундамента дома № 48 по улице Карла Маркса г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года;

- системы газоснабжения дома № 68 по улице Карла Маркса г. ФИО2 в срок до 30.12.2024 года;

- подвала, фундамента дома № 80 по улице Карла Маркса г. ФИО2 в срок до 30.12.2024 года;

- крыши, фасада дома № 4 по улице Клубной г. ФИО2 в срок до 30.12.2024 года;

- крыши, фасада, подвала, фундамента дома № 48 по улице Мопра г. ФИО2 в срок до 30.12.2024 года;

- фасада, фундамента дома № 1Б по улице Московской г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года;

- фасада дома № 19А по улице Преображенской г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года;

- крыши, подвала, фасада, фундамента дома № 9 по улице Преображенской г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года;

- крыши, фасада дома № 26 по улице Пролетарской г. ФИО2 в срок до 01.06.2024 года;

- фундамента дома № 103 по улице Свободы г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года;

- крыши, фундамента в доме № 118 корп.1 по улице Карла Маркса г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года;

- подвала, фундамента дома № 48 по улице Свободы г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года;

- систем ГВС, отопления, ХВС дома № 17 по улице Советской г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года;

- крыши, подвала, фасада, фундамента дома № 12 по улице Спасской г. ФИО2 в срок до 01.09.2024 года.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН 

<

***>) в доход бюджета муниципального образования «Город Киров» государственную пошлину в размере 300 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд через Ленинский районный суд г. ФИО2 в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Н.А. Кузнецова 

Мотивированное решение изготовлено 20 мая 2024 года