Дело № 2-3308/2023

24RS0017-01-2023-002754-51

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 ноября 2023 года г.Красноярск 

Железнодорожный районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего судьи Науджус О.С.,

при секретаре Васильевой О.А.,

с участием представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности по исполнению договора и осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что истец является собственником земельного участка по адресу: 

<

адрес>.05.2022 стороны заключили договор №20.2400.5283.22, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя малоэтажной жилой застройки по указанному выше адресу, кадастровый номер участка 24:46:0401001:1635. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора, который считается заключенным со дня оплаты. Акт об осуществлении ТП составлен ответчиком в соответствующей системе под №12000637328 от 07.04.2023. В момент его составления ответчик выполнил часть обязательств по монтажу оборудования, указав на необходимость получения лицевого счета в ПАО «Красноярскэнергосбыт», после чего ответчик закончит работы по фактическому присоединению объектов заявителя к электрическим сетям. 03.05.2023 указанный договор истец заключил с ПАО «Красноярскэнергосбыт». Вместе с тем фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям не осуществлено.

Просил обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.5283.22 и осуществить фактическое технологическое присоединение земельного участка к электрическим сетям в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу, взыскать с ответчика неустойку в размере 7535 руб. за период с 08.07.2022 по 07.04.2023, в счет компенсации морального вреда 100 000 руб.

Истец ФИО2, будучи своевременно и надлежащим образом уведомленным о дне и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие, посредством передачи телефонограммы пояснил об исполнении ответчиком после предъявления иска в суд требований, изложенных в пункте 1 просительной части иска.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО1 (доверенность №24/82 от 05.06.2023 сроком по 28.04.2025), не оспаривая факт заключения с истцом договора об осуществлении технологического присоединения, факт внесения последним оплаты по договору в размере 550 рублей и нарушение сетевой организацией сроков исполнения приведенного договора, указала на осуществление ответчиком всех предусмотренных договором мероприятий в соответствии с ТУ. 07.04.2023 ответчиком составлен акт допуска прибора учета в эксплуатацию №СВ-11-395, который признан пригодным и допущен к эксплуатации. В указанную дату подготовлены и подписаны акт о выполнении ТУ и акт об осуществлении ТП №12000637328, которые размещены в личном кабинете заявителя. При таких обстоятельствах, учитывая, что договор исполнен в полном объеме, требования о возложении на ответчика обязанности осуществить ТП в соответствии с условиями договора, а также производные требования о взыскании неустойки и компенсации морального вреда полагала не подлежащими удовлетворению. В случае удовлетворения требований о взыскании неустойки просила учесть, что дополнительным соглашением №1 от 13.10.2022 срок выполнения мероприятий по ТП продлен сторонами до 31.01.2023, возможный период начисления неустойки состоит во взаимосвязи с дополнительным соглашением и исчисляется с 01.02.2023 по 06.04.2023, в случае удовлетворения требований просила применить положения ст.333 ГК РФ и снизить неустойку. Также указала, что требования истца о компенсации морального вреда являются недоказанными и необоснованными, кроме того, определенный истцом размер компенсации морального вреда существенно завышен.

Представитель привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица ПАО «Красноярскэнергосбыт» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил.

Выслушав представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно п. 1 ст. 26 приведенного Федерального закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения (в редакции на момент заключения договора), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Как следует из п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Таким образом, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании.

Положениями п. 16.3 Правил технологического присоединения определен порядок выполнения сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 309, 310 ГК РФ).

Согласно ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 25.05.2022 между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.5283.22, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15кВт; категория надежности третья; класс напряженности электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: городской округ 

<

адрес> Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Как следует из пункта 5 приведенного договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с пунктом 7 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; обеспечить установку и допуск приборов учета энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технологических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности: составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения. 

В письме от 12.09.2022 ответчик определял плановый срок проведения работ – 4 квартал 2022 года.

13.10.2022 между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель) заключено дополнительное соглашение №1 к вышеуказанному договору, которым срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению установлен до 31.01.2023.

07.04.2023 составлен акт №СВ-11-395 допуска прибора учета в эксплуатацию по адресу: городской округ 

<

адрес> а также акт о выполнении технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ и акт об осуществлении технологического присоединения №12000637328 от 07.04.2023.

Собственником вышеуказанного земельного участка является ФИО2 с 30.03.2020, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Обращаясь в суд с иском о защите прав потребителя, ФИО2 ссылался на неисполнение сетевой организацией обязанностей, возложенных на нее договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.5283.22 от 25.05.2022.

Плата за технологическое присоединение в размере 550 руб. (п.11 договора об осуществлении технологического присоединения) оплачена истцом в полном объеме 25.05.2022, что подтверждается кассовым чеком.

Исходя из условий договора на технологическое присоединение от 25.05.2022, с учетом заключенного дополнительного соглашения от 13.10.2022, срок исполнения обязательств ответчиком установлен до 31.01.2023.

Между тем, ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в установленный договором срок не выполнены, присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям произведено лишь 07.04.2023, что подтверждается представленным в материалы дела актом допуска прибора учета в эксплуатацию №СВ-11-395, актом о выполнении технических условий №12000637327 от 07.04.2023 и актом об осуществлении технологического присоединения №12000637328 от 07.04.2023.

При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения требований истца о возложении на ответчика обязанности по исполнению договора и осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям не имеется.

Вместе с тем, учитывая, что ответчик выполнил мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца лишь 07.04.2023 - с нарушением срока выполнения своих обязательств, установленного с учетом дополнительного соглашения (до 31.01.2023), суд приходит к выводу о том, что ответчик должен нести ответственность в виде уплаты неустойки.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 20 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.5283.22 от 25.05.2022 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Заявляя требования о взыскании неустойки в размере 7535 руб., истец произвел ее расчет за период с 08.07.2022 по 07.04.2023, без учета заключенного сторонами дополнительного соглашения от 13.10.2022 о продлении срока выполнения мероприятий до 31.01.2023.

При таких обстоятельствах расчет неустойки, предусмотренной п. 20 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения, следует произвести за период с 01.02.2023 по 07.04.2023, размер неустойки составит 1815 руб. (550 руб. х 5% х 66 дней).

Установленный судом размер неустойки является разумным, отвечает требованиям соразмерности последствиям нарушения обязательства, в связи с чем суд не усматривает оснований для его снижения на основании ст. 333 ГК РФ.

В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Согласно п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, который нашел подтверждение при рассмотрении судом настоящего дела.

Судом установлено, что действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя на своевременное получение услуг по договору от 28.04.2021, истцу причинены нравственные страдания. 

Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушением его прав потребителя со стороны ответчика, личности истца, суд признает заявленную истцом сумму компенсации морального вреда в размере 100 000 руб. завышенной и определяет размер компенсации морального вреда с учетом требований разумности и справедливости в сумме 2 000 руб.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также согласно п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

С учетом установленных по делу обстоятельств, имеются основания для определения с ответчика штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от присужденной судом в размере 1907,50 руб. (3815 руб. (1815 руб. + 2000 руб.) х 50%).

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика госпошлину в доход местного бюджета в размере, в котором истец в силу закона был освобожден от ее уплаты при подаче иска, в соответствии с п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ в размере 400 руб. 

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии №) неустойку в размере 1815 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф в размере 1907 рублей 50 копеек, а всего 5 722 рубля 50 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО2 отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 400 руб.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца с момента его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г.Красноярска.

Судья О.С. Науджус 

Мотивированное решение изготовлено 24 ноября 2023 года.