Дело № 2-2361/2019 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

12 сентября 2019г. 

Тракторозаводский районный суд г.Волгограда в составе: 

председательствующего судьи Севериной Н.А.

при секретаре Асташевой И.А.

с участием представителя истцов – адвоката Беспалова С.В.

представителя ответчика – ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2, ФИО3 к ООО «Регионстройинвест-ИК» о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО3 обратились к ООО «Регионстройинвест-ИК» с иском, в котором просили взыскать:

- неустойку за период с 29.03.2019г. по 07.08.2019г. в размере по 61067руб. 02коп. в пользу каждого, 

- компенсацию морального вреда в размере по 10000руб. в пользу каждого, 

- штраф в размере по 35533руб. 51коп. в пользу каждого.

В обоснование своих требований истцы сослались на следующие обстоятельства.

26.02.2016г. между ними и ООО «Регионстройинвест-ИК» заключен Договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в соответствии с п.2.1 которого ответчик обязан исполнить обязательства по передаче однокомнатной квартиры ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ площадью 49,46кв.м, расположенной на ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ этаже, в соответствии с п.2.5 договора - окончить строительство и ввести дом в эксплуатацию в срок до истечения 4 квартала 2017г. Обязательство по договору участниками долевого строительства выполнены ими в полном объеме: оплачено строительство объекта в размере 1928940руб., однако Застройщик - ООО «Регионстройинвест-ИК» свои обязательства до настоящего времени не исполнил и не передал им квартиру.

В настоящем судебном заседании представитель истцов – адвокат Беспалов С.В., действующий на основании доверенности, поддержал исковые требования ФИО2 и ФИО3 и просил их удовлетворить. Кроме того, суду пояснил, что истцы не приняли у ответчика однокомнатную квартиру ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ площадью 49,46кв.м, поскольку в ней, в том числе не произведена цементно-песчаная стяжка, производство которой предусмотрено Перечнем работ, подлежащих выполнению в жилых помещениях Объекта, являющимся Приложением № 2 к договору, в разделе 3 - «Отделочные работы».

Представитель ответчика ООО «Регионстройинвест-ИК» - ФИО1, действующая на основании доверенности, не признала исковые требования ФИО2 и ФИО3 и просила отказать им в иске. 

Кроме того, суду пояснила, что между ООО «Регионстройинвест-ИК» и истцами заключен договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от 26.02.2016г. участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по адресу АДРЕС ИЗЪЯТ на земельном участке с кадастровым номером ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. ООО «РИК» (Застройщик) и истцами (Участник долевого строительства), как сторонами Договора, было согласовано, что передача Объекта долевого строительства осуществляется не ранее, чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (п. 7.2), при этом Застройщик передает Объект долевого строительства участнику долевого строительства в течение 30 дней после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию в установленном порядке (п.7.3).

В соответствии с п.2.5. Договора срок окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию - 4 квартал 2017 года. Продление сроков строительства вызвано объективными причинами, не зависящими от ответчика: Застройщик не имел возможности приступить началу строительства многоквартирного дома в ноябре 2013 года по причине того, что земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома, в том числе земельный участок, предоставленный для размещения строительной площадки, длительное время (по июнь 2014 года) незаконно использовался ООО «Орион-Трейд» для размещения стоянки автомобилей. Данный факт установлен решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.02.2014г.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что нормативный срок строительства многоквартирного дома в соответствии с проектом организации строительства, в котором находится объект долевого строительства, составляет 60 месяцев (5 лет), нормативный срок окончания строительства многоквартирного дома составляет июль 2019 года. Несмотря на это, многоквартирный дом сдан в эксплуатацию ООО «РИК» 29.12.2018г 

29.01.2019г. в адрес истцов были направлены уведомления о завершении строительства и предложение в течении 7 рабочих дней получить объект долевого строительства по акту приема передачи. 

Ответчик со своей стороны исполнил обязательства по Договору участия в долевом строительстве, завершил строительство объекта долевого строительства, уведомил истцов о возможности подписания акта приема передачи объекта долевого строительства. В связи с неполучением истцами объекта долевого строительства в установленный договором срок, ответчик воспользовался своим правом и составил односторонний акт приема передачи от 30.05.2019г. По мнению представителя ответчика, цементно-песчаная стяжка предусмотрена Перечнем работ, подлежащих выполнению НЕ в ЖИЛЫХ помещениях Объекта, а в ОБЩИХ.

Строительство Объекта осуществлялось на денежные средства, привлекаемые Застройщиком по договорам участия в долевом строительстве, любое отвлечение денежных средств, не связанное со строительством Объекта, в том числе выплата неустойки, может привести к нарушению Застройщиком срока ввода Объекта в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства. Выплата неустойки в пользу истцов до завершения строительства Объекта и выплата ее за счет денежных средств, направленных на строительство Объекта, приведет к нарушению прав еще 450 участников долевого строительства, денежные средства которых привлечены Застройщиком для строительства Объекта. 

Полагает, что заявленный истцами размер неустойки несоразмерен последствиям нарушения обязательств. В настоящее время ввиду массовости обращения участников долевого строительства за выплатой неустойки и штрафных санкций, неустойка, взыскиваемая в большом размере, до завершения строительства жилых домов приведёт к банкротству застройщика и нарушению прав 450 дольщиков жилищного комплекса. Учитывая отсутствие умышленных действий со стороны ответчика по затягиванию сроков строительства многоквартирного дома и передачи квартир участникам долевого строительства, своевременное информирование участника долевого строительства относительно этапов строительства, в силу положений ст. 333 ГК РФ ответчик заявляет о снижении размера неустойки и штрафа до минимального размера.

По этим основаниям просит отказать ФИО2 и ФИО3 в иске. В случае удовлетворения исковых требований, в силу положений ст. 333 ГК РФ просит снизить размер неустойки, штрафа, компенсации морального вреда до минимального размера

Выслушав доводы представителя истцов, возражения представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд признает исковые требования ФИО2 и ФИО3 обоснованными, основанными на законе, однако подлежащими частичному удовлетворению.

В силу ст.ст.309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В судебном заседании установлено следующее.

26.02.2016г. между ФИО2 и ФИО3 с одной с стороны и ООО «Регионстройинвест-ИК» с другой стороны заключен Договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ на земельном участке с кадастровым номером ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Согласно пунктам 2.1 и 2.5 договора застройщик обязуется в предусмотренные сроки своими силами или с привлечением других лиц построить объект на отведенном под застройку земельном участке, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение: однокомнатную квартиру ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ площадью 49,46кв.м, расположенную на ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ этаже жилого дома после ввода дома в эксплуатацию в 4 квартале 2017г.

Пунктом 3.1. договора установлено, что цена настоящего договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате Участником для строительства объекта долевого строительства составляет 1928940руб. Представленными суду доказательствами подтверждается, что ФИО2 и ФИО3 исполнили условия договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 26.02.2016г. и уплатили ответчику деньги в сумме 1928940руб. 

Вместе с тем, обязательства, принятые по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 26.02.2016г. ООО «Регионстройинвест-ИК» в предусмотренный договором срок не исполнило. Квартира ФИО2 и ФИО3 не передана до настоящего времени.

Поскольку досудебная претензия истцов от 01.02.2019г. оставлена ответчиком без удовлетворения, ФИО2 и ФИО3 обратились в суд с иском к ответчику. 

Вступившим в законную силу решением Тракторозаводского районного суда г.Волгограда от 28.03.2019г. с ООО «РИК» в пользу ФИО2 и ФИО3 взыскана, в том числе неустойка за период с 31.01.2018г. по 28.03.2019г. 

30.05.2019г. ООО «РИК» составило Односторонний Акт о передаче истцам спорной квартиры, который подписан только Застройщиком – ООО «РИК». 

Оценивая указанный Односторонний Акт, суд не принимает его во внимание и не признает допустимым доказательством исполнения ответчиком условий договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от 26.02.2016г., поскольку Перечнем работ, подлежащих выполнению в ЖИЛЫХ помещениях Объекта, являющимся Приложением ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ к договору, в разделе 3 - «Отделочные работы» предусмотрена, в том числе цементно-песчаная стяжка (по проекту), однако в однокомнатной квартире ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ площадью 49,46кв.м цементно-песчаная стяжка не произведена, что не оспаривается представителем ответчика. 

Ссылаясь на то, что до настоящего времени ООО «РИК» не выполнил свои обязательства по договору и не передал им в установленный договором срок однокомнатную квартиру, в том числе не выполнил цементно-песчаную стяжку в квартире, что является существенным недостатком, 07.08.2019г. ФИО2 и ФИО3 обратились в суд с настоящим иском. Доводы истцов судом проверены и нашли своё подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

На основании статьи 6 указанного Федерального закона, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи (часть первая).

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (часть вторая) (части первая и вторая в ред. от 18.07.2006 №111-ФЗ).

В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем, за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья).

Данная позиция согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п.21 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013), согласно которой неустойка, уплачивается при нарушении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи объекта недвижимости в соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", является законной, в связи с чем ее размер не может быть уменьшен соглашением сторон.

Пунктом 5.2. указанного договора установлено, что сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, обязана уплатить другой стороне неустойку (штраф, пени), а также возместить другой стороне причиненные этим нарушением убытки и расходы. 

Принимая во внимание, что истцы оплатили обусловленную договором цену, однако ответчик не исполнил свои обязательства по своевременной сдаче объекта в эксплуатацию и передаче квартиры инвестору, суд приходит к выводу, что права ФИО2 и ФИО3 нарушены по вине ООО «Регионстройинвест-ИК». 

Поэтому требования истца о взыскании с ООО «Регионстройинвест-ИК» неустойки, предусмотренной частью 2 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за период с 29.03.2019г. по 07.08.2019г. правомерны.

Учитывая, что участником долевого строительства в данном случае является физическое лицо, размер неустойки за просрочку исполнения ответчиком обязательства за период с 29.03.2019г. по 07.08.2019г. составил 122134руб. 05коп. 

По правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить размер неустойки, так как он явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства. При этом суд принимает во внимание степень выполнения обязательств ответчиком, степень разумности и справедливости, а также не только имущественный, но и всякий иной, заслуживающий внимания интерес ответчика.

С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 21.12.2000 №263-О, положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае её чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Признавая, что неустойка в размере 122134руб. 05коп. явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств ООО «Регионстройинвест-ИК», принимая во внимание ходатайство представителя ответчика о снижении размера неустойки, суд приходит к выводу необходимости снизить размер неустойки.

Поскольку ООО «Регионстройинвест-ИК» нарушило свои обязательства по договору участия в долевом строительстве ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от 26.02.2016г., в связи с чем обязано уплатить другой стороне неустойку, и оснований для освобождения ответчика от обязанности по уплате истцу законной неустойки не установлено, суд удовлетворяет исковые требования ФИО2 и ФИО3 и взыскивает с ООО «Регионстройинвест-ИК» в их пользу неустойку за просрочку за период с 29.03.2019г. по 07.08.2019г. в размере 50000руб.: по 25000руб. в пользу каждого, отказывая во взыскании неустойки в размере, превышающем 50000руб.

Доводы представителя ответчика о том, что дом не введен в эксплуатацию по вине третьих лиц, не является основанием для освобождения ООО «Регионстройинвест-ИК» от уплаты неустойки, предусмотренной договором и Законом, поскольку в силу ст.2 ГК Российской Федерации является предпринимательскими рисками ООО «Регионстройинвест-ИК».

Удовлетворяя исковые требования, суд компенсирует истцам моральный вред. 

На основании ст.15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своём постановлении от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны, и организацией либо индивидуальным предпринимателем, производящими товары для реализации потребителям, реализующими товары потребителям по договору купли-продажи, выполняющими работы или оказывающими услуги потребителям по возмездному договору - с другой.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3 ст. 401ГК РФ).

Таким образом, законодатель установил повышенную ответственность за нарушение обязательств стороной, осуществляющей предпринимательскую, в том числе строительную, деятельность, распространил действие Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» на отношения по участию граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и тем самым предоставил им право требовать компенсации морального вреда и возмещения штрафа за нарушение соответствующих обязательств.

Поскольку в настоящем судебном заседании нашел подтверждение факт нарушения прав потребителей ФИО2 и ФИО3 действиями (бездействием) ответчика, суд возлагает на ООО «Регионстройинвест-ИК» обязанность по компенсации морального вреда и, исходя из принципа разумности и справедливости, взыскивает с ООО «Регионстройинвест-ИК» в пользу ФИО2 и ФИО3 компенсацию морального вреда в размере 6000руб.: по 3000руб. в пользу каждого и отказывает в компенсации морального вреда в сумме, превышающей указанную.

Поскольку судом установлено нарушение прав потребителя ФИО2 и ФИО3, имеются основания для взыскания с ответчика штрафа.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Как следует из правовой позиции, изложенной в пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Как следует из материалов дела, истцом принимались меры к урегулированию спора во внесудебном порядке. 01.02.2019г. ФИО2 и ФИО3 обращались в ООО «Регионстройинвест-ИК» с претензией о выплате причитающейся им законной неустойки. Однако данная претензия ответчиком была оставлена без удовлетворения. В период нахождения настоящего дела в производстве суда мер к урегулированию возникшего спора со стороны ответчика принято не было, как и не было принято мер к выплате причитающейся истцам неустойки в неоспариваемой части.

Принимая во внимание длящийся характер нарушения прав истцов, и, поскольку с момента поступления искового заявления в суд – с 07.08.2019г. до рассмотрения дела по существу – 12.09.2019г. прошло достаточно времени для удовлетворения ответчиком требований в добровольном порядке, однако ответчик не совершил никаких действий для выплаты истцам денежных средств, суд взыскивает с ООО «Регионстройинвест-ИК» в пользу ФИО2 и ФИО3 штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 28000руб.: по 14000руб. в пользу каждого (50000руб. + 6000руб.)/50%)/2 и отказывает в остальной части иска в размере, превышающем указанный.

Возмещению государству подлежат судебные издержки.

На основании ст.103 ГПК Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Поскольку на основании ч.3 ст.17 Закона «О защите прав потребителей» истец освобожден от уплаты государственной пошлины, и решение состоялось в пользу истца, государственная пошлина в размере 1700руб. подлежит взысканию с ответчика в доход местного бюджета.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «Регионстройинвест-ИК» в пользу ФИО2:

- неустойку за период с 29.03.2019г. по 07.08.2019г. в размере 25000руб.,

- компенсацию морального вреда в размере 3000руб., 

- штраф в размере 14000руб.,

всего 42000руб., в остальной части иска в сумме, превышающей 42000руб., отказать.

Взыскать с ООО «Регионстройинвест-ИК» в пользу ФИО3:

- неустойку за период с 29.03.2019г. по 07.08.2019г. в размере 25000руб.,

- компенсацию морального вреда в размере 3000руб., 

- штраф в размере 14000руб.,

всего 42000руб., в остальной части иска в сумме, превышающей 42000руб., отказать.

Взыскать с ООО «Регионстройинвест-ИК» в доход бюджета муниципального образования – городской округ город-герой Волгоград государственную пошлину в размере 1700руб.

Решение может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в месячный срок через Тракторозаводский районный суд г.Волгограда.

Судья – Н.А.Северина