47RS0004-01-2023-000086-21

Дело № 2-5085/2023

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Всеволожск 10 октября 2023 года

Всеволожский городской суд Ленинградской области

в составе: председательствующего судьи Валькевич Л.В.

при помощнике судьи: Лябзине М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Ленэнерго» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании задолженности, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Ленэнерго» (далее истец, Общество, Сетевая организация) обратилось с исковым заявлением ФИО1, в котором просит расторгнуть договор №ОД-№Э от 27.12.2019г., взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков внесения платежа № за период с 11.01.2020г. по 24.01.2020г. в размере 187, 79 руб., неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с 28.12.2020г. по 24.05.2022г. в размере 105 448, 50 руб., расходов по оплате государственной пошлины, мотивируя требования тем, что 27.12.2019г. между истцом и ФИО1 (далее ответчик, Заявитель) был заключен договор № №-Э об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого Сетевая организация обязалась осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, расположенных по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, массив «Мокрый луг», кадастровый №.

Согласно п.8 Договора Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

В соответствии с пунктами 10 и 11 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п и составляет 115 560 руб., в том числе НДС 20% - 19 260 руб. и уплачивается в следующем порядке: 

- 5% платы за технологическое присоединение в сумме размере 5 778 руб., в том числе НДС 20% в течение 15 дней со дня заключения договора; 

- 95% платы за технологическое присоединение в сумме 109 782 руб., в том числе НДС 20% в течение 3 лет со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения равными долями ежеквартально.

Условия договора Сетевой организацией были выполнены, однако ее услуги оплачены Заявителем не полностью.

Обязанность ответчика по внесению платежа № исполнена не своевременно. 

Размер неустойки за несвоевременное внесение платежа, рассчитанной в соответствии с п.16 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № за период с 11.01.2020г. по 24.01.2020г. составляет 187, 79 руб., где 13 - количество дней просрочки х0,0025х5 778 (размер платы за технологическое присоединение).

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 28.12.2020г. по 24.05.2022г. составляет: 512 (количество дней просрочки)х0,0025х115560, 00 (размер платы за технологическое присоединение)= 105 448, 50 руб. 

В связи с неисполнением обязательств по договору истцом в адрес ответчика 11.03.2022г. направлена претензия от ДД.ММ.ГГГГ № №, в которой предлагалось в досудебном порядке исполнить обязательства по договору, однако, ответ на указанную претензию получен не был, в связи с чем, истец вынужден обратиться в суд.

В судебное заседание истец не явился, о рассмотрении дела извещен, просил о слушании дела в свое отсутствие, возражений относительно вынесения заочного решения не представил.

Ответчик ФИО1 о рассмотрении дела извещена, в судебное заседание не явилась, возражений по иску не направила, об уважительных причинах неявки суду не сообщила, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просила.

В соответствии с положениями ст.233 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Проверив представленные материалы, суд приходит к следующему. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно п. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Установлено и подтверждается материалами дела, что 27.12.2019г. между ПАО «Россети Ленэнерго» и ФИО1 (был заключен договор № №-Э об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого Сетевая организация обязалась осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, расположенных по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, массив «Мокрый луг», кадастровый №.

На основании п.8 Договора ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Согласно пунктам 10 и 11 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п и составляет 115 560 руб., в том числе НДС 20% - 19 260 руб. и уплачивается в следующем порядке: 

- 5% платы за технологическое присоединение в сумме размере 5 778 руб., в том числе НДС 20% в течение 15 дней со дня заключения договора; 

- 95% платы за технологическое присоединение в сумме 109 782 руб., в том числе НДС 20% в течение 3 лет со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения равными долями ежеквартально.

Обязанность ответчика по внесению платежа № исполнена не своевременно. 

Подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила ТП) и пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае, если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки (115 560,00 * 0,0025 105 448,50 рублей). 

Размер неустойки за несвоевременное внесение платежа, рассчитанной в соответствии с п.16 Правил ТП, за период с 11.01.2020г. по 24.01.2020г. составляет 187, 79 руб., где 13 - количество дней просрочки х),0025х5 778 (размер платы за технологическое присоединение).

Согласно п.18 Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы следующих обстоятельств: a) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; 

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; 

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Сетевой организацией были в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению объекта Заявителя, в связи с чем, в адрес ответчика направлено соответствующее уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № №

Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с пп. «в» п. 16 Правил ТП размер неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки. 

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет: 512 (количество дней просрочки) * 0,0025 * 115 560,00 (размер платы за технологическое присоединение) = 147 916,80 рублей, но не более размера неустойки за год просрочки, т.е. 105 448,50 рублей.

В связи с неисполнением обязательств по Договору, в целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора в адрес ответчика направлена досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ № №, в которой Заявителю предлагалось в добровольном досудебном порядке исполнить свои обязательства. Ответ на указанную претензию получен не был.

Согласно п.16 (5) Правил ТП, нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

Учитывая тот факт, что денежные средства ответчиком не внесены в полном объеме, в связи с чем, истец лишается того на, что он мог рассчитывать при заключении договора, мероприятия по технологическому присоединению не выполнены, требования истца о расторжении договора технологического присоединения, взыскании неустойки суд находит законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению. 

Поскольку требования истца удовлетворены, с ответчика следует взыскать в пользу ПАО «Россети Ленэнерго» государственную пошлину в размере 10 169 руб., уплаченную при подаче иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194, 199, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Ленэнерго» удовлетворить.

Расторгнуть договор №№Э от 27.12.2019г., взыскать с ФИО1, ИНН №, в пользу ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН №, неустойку за нарушение сроков внесения платежа № за период с 11.01.2020г. по 24.01.2020г. в размере 187, 79 руб., неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с 28.12.2020г. по 24.05.2022г. в размере 105 448, 50 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 169 руб.

Ответчик вправе подать во Всеволожский городской суд Ленинградской области заявление об отмене решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Судья 

Мотивированное решение изготовлено 17.10.2023г.