Дело № 2-4660/2025

УИД 50RS0052-01-2025-004559-20

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 сентября 2025 года г.о. Щелково Московской области

Щелковский городской суд Московской области в составе:

председательствующего Стариковой М.Н., 

при помощнике судьи Кузнецовой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому ФИО1 ФИО7 к АО «Мособлгаз» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился с иском в суд к ответчику АО «Мособлгаз» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда.

В обоснование требований указал, что между ФИО1 и АО «Мособлгаз» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическим присоединением) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения дома по адресу: 

<

адрес>, уч. с кадастровым номером №. Размер платы по договору составляет 1 241 638,91 руб. В соответствии с п. 2 Договора, АО «Мособлгаз» приняло на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения установленной максимальной нагрузки (часового расхода газа), а заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по проектированию в размере 783 729,86 руб., произвести подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования на своем участке.

Принятые истцом обязательства по договору исполнены, истцом заключен договор с компанией ООО «Реал Газ» № от ДД.ММ.ГГГГ «По разработке проектной документации и монтажу газопровода от точки присоединения к котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>, уч. с кадастровым номером №» стоимостью 2 500 000 руб. ООО «Реал Газ» услуги по договору исполнила в полном объеме, произвела подготовку оборудования к подключению, составлен Акт об исправности и работоспособности оборудования. Данное оборудование из-за простоя приходит в негодность, для возобновления работоспособности оборудования требуются дополнительные финансовые затраты. 

Согласно п. 6 Технический условий Договора, общий срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства составляет 730 дней с даты заключения договора. 

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Мособлгаз» заключено дополнительное соглашение к Договору, в соответствии с п. 13 Технических условий № (Приложение №) Договора и Дополнительного соглашения, стороны согласовали срок подключения 135 дней, который начинает действовать с даты заключения настоящего договора. 

Поскольку ответчик не исполнил обязательства надлежащим образом, ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес АО «Мособлгаз-Восток» направлена жалоба, в ответе на которую указано, что филиал АО «Мособлгаз-Восток» намерен осуществить подключение в установленный договором срок. 

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес АО «Мособлгаз» направлена претензия, в ответ на которую сообщило, что осуществляется согласование проекта.

ДД.ММ.ГГГГ истцом направлена жалоба в Прокуратуру Московской области о неисполнении ответчиком договора, о привлечении должностных лиц к ответственности. 

Просрочка исполнения обязательств по договору составляет 831 день, в связи с чем на стоимость неуказанных услуг подлежит начислению неустойка, на основании п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, в соответствии с п. 16 Договора о газификации, согласно которому в случае нарушения исполнителем и заявителем, установленных договором сроков исполнения мероприятий по подключению, нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку как произведение 0,014 от ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на день заключения договора, и оплаты, определенной в соответствии с разделом III настоящего Договора, за каждый день просрочки. Ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения договора ДД.ММ.ГГГГ составляла 7,5% годовых, соответственно размер неустойки составляет 1 083 392,03 руб. (1 241 638,91 руб. х 0,014% х 7,5% / 100 х 831 день). За период с 24.12.2022 года по 31.03.2023 года, с 01.11.2023 года по 31.03.2024 года, с 01.11.2024 года по 21.03.2025 года участок истца отапливался электричеством, в связи с чем истцом понесены убытки в размере 338 993,94 руб., 416 639,81 руб., 378 789,14 руб. соответственно. 

На основании изложенного истец просит обязать ответчика исполнить договор о подключении к системе газоснабжения; взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по подключению в размере 1 083 392,03 руб.; взыскать за причиненный материальный вред, выразившийся в утрате оборудования, установленного компанией ООО «Реал Газ», согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ «По разработке проектной документации и монтажу газопровода от точки присоединения к котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>, уч. с кадастровым номером №» сумму 2 500 000 руб.; за понесенные финансовые убытки, затраченные на электроэнергию для отопления помещений на участке в размере 1 134 422,89 руб.; компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 59 180 руб.

Истец ФИО1, извещенный надлежащим образом о слушании дела, в судебное заседание не явился, направил своего представителя ФИО4, который исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Представитель ответчика АО «Мособлгаз» ФИО5 в судебном заседании исковые требования не признала, просила отказать в удовлетворении требований, по доводам, изложенным в возражениях, указав, что основания для возложения обязанностей по договору на АО «Мособлгаз» отсутствуют, поскольку ответчик не отказывается от исполнения договора, предпринимает меры по урегулированию обстоятельств, препятствующих осуществлению подключения.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив материалы гражданского дела, представленные доказательства, считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

Порядок подключения объектов к сети газораспределения установлен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержд. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547.

В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (пункт 6).

В соответствии с пунктом 53 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 настоящих Правил): 135 дней - для заявителей первой категории; 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; 2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

Пунктом 121 Правил установлено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Согласно п. 122 Правил, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем:

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности;

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Пунктом 123 Правил предусмотрено, что в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

В силу абзаца 8 статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты нарушенных гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Судом установлено и следует из материалов дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Мособлгаз» заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическим присоединением) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – Договор).

В соответствии с п. 1 Договора, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства административно-бытового корпуса к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, уч. с кадастровым номером № и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению №, являющиеся неотъемлемой частью договора (п. 2 Договора).

В силу п. 3 Договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуска газа составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Предварительный расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения определяется согласно приложению №, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, исходя из предварительных технических параметров и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капительного строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры и составляет 1 241 638,91 руб. Стоимость работ по разработке проектной документации и проведению ее экспертизы включается в состав платы и составляет 670 829,86 руб. (п. 9 Договора).

В соответствии с п. 4 Договора ответчик принял на себя обязательства:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору;

- осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) по постановке газоиспользующего оборудования, и (или) строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по постановке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа;

- осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства и составить акт о подключении;

- нести эксплуатационную ответственность в соответствии с актом о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п. 6 Договора заявитель обязан, в том числе осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка;

разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством РФ) о создании сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования;

обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования;

внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки установленные договором;

подписать акт о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению.

В соответствии с п. 11 Технических условий ответчик принял на себя обязательство осуществить: проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения – газопровода низкого давления до точки подключения; получить разрешение на строительство газопроводов и определение охранных зон газапроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

Согласно п. 6 Технический условий Договора, общий срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения составляет 730 дней.

На основании заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Мособлгаз» подготовлено и сторонами подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым внесены изменения в приложение № к договору, в связи с изменением расхода газа и изменением наименования объекта газификации.

Так в соответствии с внесенными изменениями в Технические условия, срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения составил 135 дней.

Истец со своей стороны, принятые по договору обязательства исполнил.

В соответствии с условиями договора ФИО1 внесена плата за разработку проектной документации в размере 670 829,86 руб.

Истцом заключен договор с ООО «Реал Газ» № от ДД.ММ.ГГГГ «По разработке проектной документации и монтажу газопровода от точки присоединения к котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>, уч. с кадастровым номером №» стоимостью 2 500 000 руб.

ООО «Реал Газ» услуги по договору исполнило в полном объеме, произвело подготовку оборудования к подключению, составлен Акт об исправности и работоспособности оборудования.

Поскольку ответчик не исполнил обязательства надлежащим образом, ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес АО «Мособлгаз-Восток» направлена жалоба, в ответ на которую АО «Мособлгаз-Восток» указал, что филиал АО «Мособлгаз-Восток» намерен осуществить подключение в установленный договором срок.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес АО «Мособлгаз» направлена претензия, в ответ на которую АО «Мособлгаз» сообщило, что осуществляется согласование проекта.

ДД.ММ.ГГГГ истцом направлена жалоба в Прокуратуру Московской области о неисполнении ответчиком договора, о привлечении должностных лиц к ответственности.

В своем отзыве ответчик указывает на то, что при поступлении заявки прокладка газопровода планировалась открытым способом, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации городского округа Щелково Московской области направлен соответствующий запрос. 

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ № администрация городского округа Щелково Московской области сообщило, что прокладка газопровода по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером № возможна только при условии пересечения дороги методом горизонтально-направленного бурения. 

ДД.ММ.ГГГГ администрацией принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего отдела присоединения АО «Мособлгаз» «Восток» ДД.ММ.ГГГГ составлен акт осмотра территории лесного участка.

На обращение АО «Мособлгаз» по вопросу предоставления информации вхождения земельного участка, на котором планируется строительство газопровода, в границы лесничеств Министерства обороны Российской Федерации, ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России ДД.ММ.ГГГГ сообщило, что считает возможным исключение спорного земельного участка из границ Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России в случае принятия соответствующего решения Департаментом Военного имущества Министерства обороны РФ.

В связи с полученным ответом, ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента Военного имущества Министерства обороны РФ направлено письмо с предложением рассмотреть возможность исключения земельного участка из границ Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России с внесением сведений в ЕГРН. До настоящего времени ответ из Департамента в АО «Мособлгаз» не поступил. После исключения земельного участка под размещение газопровода из границ Монинского лесничества АО «Мособлгаз» будет направлено обращение в администрацию городского округа Щелково на получение разрешения на размещение.

АО «Мособлгаз» предпринимаются меры к урегулированию земельных вопросов, возникших, в связи с исполнением договора о подключении (технологическом присоединении), с момента поступления заявки о подключении до настоящего времени.

Возможность осуществления подключения возникнет после исключения земельного участка под размещение газопровода из границ Монинского лесничества и получения разрешения на размещение.

Ответчик ссылался на то, что исполнение обществом договоров находится в зависимости от воли и действий третьих лиц, что явилось препятствием для исполнения условий договора в сроки, согласованные с истцом, и невозможность их исполнения в срок, указанный в просительной части.

Между тем, судом установлено, что спорный земельный участок под размещение газопровода из границ Монинского лесничества исключен решением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

При этом доказательств, достоверно свидетельствующих о совершении ответчиком действий по получению разрешения на размещение объекта газопровода не представлено.

Со своей стороны истец исполнил условия по договору в полном объеме, что ответчиком не оспаривается, однако ответчик в установленные сроки действий по подключению газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства истца к сети газораспределения не совершил, до настоящего времени акты не подписаны, равно как и новые сроки исполнения не согласованы. В ходе рассмотрения дела представитель ответчика также не смог указать сроки окончания работ по договору.

Таким образом, не исполнив обязательство по технологическому присоединению объекта капитального строительства к сети газоснабжения, ответчик не исполняет обязательства в соответствии с условиями договора.

Как указано выше, истец обращался к ответчику с требованием о добровольном урегулировании спора, однако данное требование до настоящего времени не удовлетворено. 

Доказательств того, что АО «Мособлгаз» приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства по договору либо не исполнило обязательство вследствие непреодолимой силы, ответчиком не предоставлено, соответственно оснований для освобождения ответчика от ответственности судом не установлено.

Поскольку ответчиком не исполнены в установленный Правилами и договором срок обязательства по подключению газоиспользующего оборудования к сети газораспределения и пуску газа, то имеются основания для возложения на ответчика выполнения данной обязанности в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 16 Договора о газификации, в случае нарушения исполнителем и заявителем, установленных договором сроков исполнения мероприятий по подключению, нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку как произведение 0,014 от ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на день заключения договора, и оплаты, определенной в соответствии с разделом III настоящего Договора, за каждый день просрочки.

Таким образом, принятые ответчиком обязательства не исполнены надлежащим образом в полном объеме, в то время как истец со своей стороны исполнил условия, предусмотренные договором, услуги по подключению к сети газоснабжения истцом оплачены в размере 670 829,86 руб., произведена подготовка оборудования к подключению.

Срок исполнения договора - ДД.ММ.ГГГГ.

Просрочка исполнения обязательств ответчиком по договору составляет период с 11.08.2024 года по 31.03.2025 года.

Согласно расчету истца, размер неустойки за период с 24.12.2022 по 31.03.2025 составляет 1 083 392,03 руб. (1 241 638,91 руб. х 0,014% х 7,5% / 100 х 831 день), исходя из ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора ДД.ММ.ГГГГ - 7,5% годовых.

Согласно расчету ответчика, размер неустойки составляет 285 505,18 руб. (670 829,86 руб. х 0,014% х 8% / 100 х 380 дней), исходя из ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора ДД.ММ.ГГГГ - 8% годовых.

Суд, проверяя расчеты, представленные сторонами, приходит к выводу, что период неустойки составляет с 11.08.2024 года по 31.03.2025 года, в связи с чем полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 324 018,18 руб. (1 241 638,91 руб. х 0,014% х 8% / 100 х 233 дня).

Требования истца о взыскании материального ущерба, в виде утраты оборудования, установленного компанией ООО «Реал Газ», согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ «По разработке проектной документации и монтажу газопровода от точки присоединения к котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>, уч. с кадастровым номером №» на сумму 2 500 000 руб. удовлетворению не подлежат, поскольку истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что газоиспользующее оборудование находится в непригодном состоянии. Денежные средства в размере 2 500 000 руб. были затрачены истцом в связи с исполнением условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическим присоединением) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения дома по адресу: 

<

адрес>, уч. с кадастровым номером №.

Истцом указано, что за период с 24.12.2022 года по 31.03.2023 года, с 01.11.2023 года по 31.03.2024 года, с 01.11.2024 года по 21.03.2025 года участок истца отапливался электричеством, в связи с чем истцом были понесены убытки в размере 338 993,94 руб., 416 639,81 руб., 378 789,14 руб. соответственно.

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления его нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

На основании пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

К юридически значимым обстоятельствам, подлежащим установлению по делу относятся: выполнение или невыполнение в предусмотренный договором или законом срок ответчиком предусмотренного договором обязательства, виновность ответчика в неисполнении договорного обязательства, в частности принятие ответчиком при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, исчерпывающих мер для надлежащего исполнения обязательства по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора и закона; факт несения убытков истцом; наличие причинно-следственной связи между возникшим вредом и поведением ответчика в рамках договорных отношений по технологическому присоединению; размер вреда. 

Сам по себе факт неисполнения договора ответчиком не свидетельствует о совокупности условий, влекущих обязанность по возмещению истцу убытков, таким образом, требования истца о взыскании убытков, затраченных на электроэнергию для отопления помещений на участке в размере 1 134 422,89 руб., не подлежат удовлетворению, поскольку доказательств несения расходов в указанном размере и их необходимость истцом не представлены, учитывая, что срок исполнения обязательств по договору согласован сторонами до ДД.ММ.ГГГГ.

Также суд приходит к выводу, о том, что требования истца о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 000 руб. подлежат отклонению, поскольку земельный участок истца имеет вид разрешенного использования «под размещение автобазы ЗАО «Мега Транс», то есть используется истцом в коммерческих целях, в связи с чем, положения ст. 15 Закона о защите прав потребителей в данном случае не применяются. По этим же основаниям не подлежит взысканию штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. 

Согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика в свою пользу судебных расходов в размере 59 180 руб., однако, суд полагает данные требования подлежащими частичному удовлетворению.

Так при подаче иска истцом оплачена государственная пошлина в размере 59 180 руб., что подтверждается представленным в материалы дела чеком по операции, в связи с чем указанная сумма в силу статьи 98 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 13 600 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 ФИО8 к АО «Мособлгаз» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда – удовлетворить частично.

Обязать АО «Мособлгаз» исполнить договор о подключении (технологическим присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №№ от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АО «Мособлгаз» и ФИО1 ФИО9 в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с АО «Мособлгаз» в пользу ФИО1 ФИО10 неустойку за период с 11.08.2024г. по 31.03.2025г. в размере 324 018 руб. 08 коп., расходы по оплате государственной пошлины 13 600 руб.,

в остальной части превышающей взысканные суммы, а также в части требований о взыскании убытков, материального вреда, выразившегося в утрате оборудования, компенсации морального вреда - отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи жалобы в Московский областной суд через Щелковский городской суд Московской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Судья М.Н. Старикова

Мотивированное решение суда изготовлено 17 сентября 2025 года.