...

УИД 04RS0...-25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

*** 

<

адрес>

Железнодорожный районный суд 

<

адрес> в составе судьи Урбашкиевой Э.К., при секретаре судебного заседания ФИО2, рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, 

установил:

Обращаясь в суд, истец просит обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ***. ... в течение 1 месяца с момента вынесения решения, обеспечив электроснабжение строящегося жилого дома по адресу 

<

адрес>, кадастровый № земельного участка ... договорную неустойку за нарушение срока исполнения обязательств в размере 145,75 руб. за период с 21.03.2023г. по 05.07.2023г. и неустойку с последующим начислением, начиная с *** по день фактического исполнения обязательства.

В судебном заседании истец ФИО1 с учетом того, что ответчик произвел подключение, уточнил требования, просил только взыскать с ответчика договорную неустойку.

Представитель ответчика по доверенности ФИО3 в судебном заседании пояснила суду, что ***. договор исполнен.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд находит уточненный иск подлежащим удовлетворению на основании следующего.

Судом установлено, что между истцом и ответчиком ***. был заключен договор об осуществлении технологического присоединения ..., согласно которому ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта - «жилой дом», местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РБ, 

<

адрес>, кадастровый № земельного участка ...

Со стороны истца обязательства по оплате 30 000 руб. за техприсоединение исполнены.

Согласно условиям договора (п.6 договора) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до *** 

Установлено, что фактически указанный договор исполнен ***., что подтверждается представленным суду Актом об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 17 Договора об осуществлении технологического присоединения предусмотрена неустойка в размере 0,25 % от общего размера платы по договору за каждый день просрочки, то есть 75 руб. за каждый день просрочки.

Соответственно, неустойка за период с *** составляет 9 825 руб., из расчета: 75 руб. x 131 день.

Таким образом, уточненные исковые требования истца о взыскании неустойки, предусмотренной договором, суд находит обоснованными. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК с ПАО «Россети Сибирь» подлежит взысканию в доход муниципального образования «

<

адрес>» государственная пошлина в размере 400 руб..

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

р е ш и л :

Исковые требования ФИО1 удовлетворить. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (

<

данные изъяты>) неустойку за период с ***. в сумме 9 825 руб..

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход муниципального образования «

<

адрес>» государственную пошлину в размере 400 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение месяца с момента его принятия судом в окончательной форме. 

Решение суда в окончательной форме изготовлено 24.08.2023г.

Судья Урбашкиева Э.К.