Дело № 2-854/2023 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 ноября 2023 года

с.Улаган

Улаганский районный суд Республики Алтай в составе председательствующего Аймановой Е.В., при секретаре Тыпаевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании выполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» об обязании в течение одного месяца со дня вступления решения в силу выполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Исковые требования мотивированы тем, что 17.02.2022 года между истцом и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.0400.3098.21. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора. Истец внесла оплату по договору в размере 550 руб. Ответчик не выполнил мероприятия по технологическому присоединению.

Из отзыва представителя ответчика следует, что ПАО «Россети Сибирь» выполнены мероприятия по подготовке и выдаче технических условий, проектная документация согласована с заинтересованными лицами. Истец ставит невыполнимые условия в части исполнения решения суда, что приведет к нарушению прав и законных интересов потребителей других районов. Заявителем не исполнены обязательства по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.

Истец ФИО1 просила о рассмотрении дела без ее участия. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», о времени и месте судебного заседания извещен, направив отзыв, в суд не явился, причины неявки неизвестны. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от их исполнения не допускается.

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с абз. 3 п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п.6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

На основании п. 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в п. 16 Правил № 861 для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Согласно части 1 статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Как следует из материалов дела и установлено судом, что 17.02.2022 года между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор № 20.0400.3098.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения объекта «магазин», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

ФИО1 приняла обязательство оплатить расходы сетевой организации на технологическое присоединение в размере 550 руб. (пункт 10), а также выполнить мероприятия по технологическому присоединению от точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (пункт 8).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п.5 договора).

Сторонами не оспаривалось, что ФИО1 оплатила установленную договором плату за технологические присоединения в размере 550 руб.

В соответствии с п.6 договора сетевая организация обязуется в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий, провести осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности. 

Судом установлено, что до настоящего времени ответчиком не выполнены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям. Доказательства надлежащего исполнения обязательств суду не представлены. 

Доводы ответчика об отсутствии уведомления о выполнении технических условий не принимаются во внимание, поскольку исполнение обязанности со стороны ответчика не поставлено в зависимость от исполнения обязанностей со стороны истца.

Принимая во внимание, что ответчик нарушил обязательства по договору, а доводы о нарушении прав и законных интересов потребителей других районов не являются основанием для освобождения ответчика от исполнения принятых на себя обязательств по договору технологического присоединения, то исковые требования в части возложения обязанности исполнить условия договора подлежат удовлетворению. 

Как следует из положений ч.2 ст.206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Принимая во внимание требования разумности, заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 17.02.2022 года, длительность неисполнения ответчиком принятых обязательств, местоположение земельного участка в черте села Чибиля, наличие соответствующей энергетической инфраструктуры, сложность подлежащих выполнению работ (строительство ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ), отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика исключительных обстоятельств, затрудняющих или делающих невозможным выполнение мероприятий по технологическому присоединению, суд полагает возможным установить срок для исполнения решения суда два месяца со дня вступления в законную силу. 

При распределении судебных расходов, суд учитывает, что при обращении в суд истец освобожден от уплаты государственной пошлины, что является основанием для возвращения излишне уплаченной государственной пошлины в размере 300 руб. Поскольку решение состоялось в пользу истца, то в силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлины в размере 300 руб. в доход местного бюджета. 

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление ФИО1 (паспорт №) к ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) об обязании выполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.0400.3098.21 от 17.02.2022года. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход бюджета МО «Улаганский район» государственную пошлину в сумме 300 руб. 

Возвратить ФИО1 государственную пошлину в размере 300 руб. 00 коп., уплаченную согласно чека по операции ПАО Сбербанк от 18.10.2023 года, идентификатор платежа 526639236603НFDW.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Алтай в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи жалобы через Улаганский районный суд Республики Алтай.

Решение суда в окончательной форме принято 06 декабря 2023 года.

Председательствующий Е.В. Айманова