Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 декабря 2017 г. 

<

адрес>

<

адрес>

Красногорский городской суд в составе:

председательствующего – Губина Я.Ю. 

при секретаре – ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1, ФИО2 к ООО «Саб-Урбан» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа 

у с т а н о в и л:

Истцы обратились в суд с исковым заявлением к ООО «Саб-Урбан» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа указав, что на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ № ДУ-17-314, заключенного между истцами и ответчиком, истцы стали участниками в строительстве многоэтажного дома, с правом получения в собственность квартиры в указанном доме. По условиям п. 3.1. договора, цена квартиры составляет 3 665 600 руб. В соответствии с п. 3.1. договора об инвестировании строительства, срок передачи квартиры истцам предусмотрен до ДД.ММ.ГГГГ. За просрочку исполнения обязательства по передаче квартиры инвесторам, с ответчика подлежит взысканию неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 056 914 руб. Указанными действиями ответчика истцам причинен моральный вред. В соответствии с п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию штраф в размере 50 % от присужденной суммы. На основании изложенного, истцы в пользу каждого просят суд взыскать с ответчика неустойку по договору в размере половины суммы от 1 056 917 руб., компенсацию морального вреда по 25 000 руб. в пользу каждого и штраф в размере 50 % от присужденной суммы. 

В судебном заседании представитель истцов ФИО4 исковые требования поддержал и просил суд их удовлетворить. 

Представитель ООО «Саб-Урбан» ФИО5 просила суд снизить размер неустойки, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

На основании п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

На основании п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ № ДУ-17-314, заключенного между истцами и ответчиком, истцы стали участниками в строительстве многоэтажного дома, с правом получения в собственность квартиры в указанном доме. По условиям п. 3.1. договора, цена квартиры составляет 3 665 600 руб. В соответствии с п. 3.1. договора об инвестировании строительства, срок передачи квартиры истцам предусмотрен до ДД.ММ.ГГГГ. За просрочку исполнения обязательства по передаче квартиры инвесторам, с ответчика подлежит взысканию неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 056 914 руб.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно разъяснений данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

Между тем, размер взыскиваемой истцами неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения ответчиком взятых на себя обязательствам.

При таких обстоятельствах, взыскиваемую в пользу каждого истца неустойки, суд находит возможность уменьшить, снизив размер неустойки до 125 000 руб.

С учетом обстоятельств дела, суд находит возможным уменьшить взыскиваемый в пользу каждого из истцов размер компенсации морального вреда до 5 000 руб.

Размер подлежащего взысканию с ответчика в пользу каждого из истцов штрафа составляет 65 000 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение су-да, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Между тем, дело не представляет сложности, ввиду чего, судебные расходы за услуги представителя, суд находит возможным снизить до 5 000 руб. в пользу каждого. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд - 

р е ш и л:

Взыскать с ООО «Саб-Урбан» пользу ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустойку в размере 125 000 руб., штраф в сумме 65 000 руб. и компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб. 

Взыскать с ООО «Саб-Урбан» пользу ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустойку в размере 125 000 руб., штраф в сумме 65 000 руб. и компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

Взыскать с ООО «Саб-Урбан» в пользу ФИО1, ФИО2 судебные расходы за услуги представителя в сумме 5 000 руб. в пользу каждого и за нотариальную доверенность по 1 050 руб. в пользу каждого. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Красногорский городской суд в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий Я.Ю. Губин