62RS0001-01-2023-001340-20

2-366/2024

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 марта 2024 года г. Рязань

Железнодорожный районный суд г. Рязани в составе судьи Шереметьевой Н.Ю.,

с участием представителя истца ПАО «Россети Центр и Приволжье» в лице 

филиала «Рязаньэнерго» – ФИО6,

ответчика ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда дело по иску Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, затрат сетевой организации,

установил:

ПАО «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, затрат сетевой организации.

В обоснование заявленных исковых требований указано, что ФИО1 обратился в адрес филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» с заявкой № № от ДД.ММ.ГГГГ на технологическое присоединение объекта жилого дома, расположенного (будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>.

Подписанный экземпляр договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ возвращен ответчиком в адрес истца ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с условиями Договора истец принял на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ответчика максимальной мощностью 12 кВт, для электроснабжения объекта жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а ответчик принял на себя обязательство по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению определен техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ, являющихся приложением № к Договору.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий составляет 4 месяца со дня заключения Договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Истец мероприятия по технологическому присоединению, возложенные на него и указанные в технических условиях, выполнил в полном объеме.

При этом ответчик принятые на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в границах своего участка ни в установленные в Договоре сроки (то есть до ДД.ММ.ГГГГ), ни до настоящего момента не исполнил, о чем истцом составлен акт проверки выполнения мероприятий по технологическому присоединению от ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 17 Договора сторонами согласовано, что сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору не превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 % процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Кроме того, Правилами, а именно п. 16 установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору не превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

В соответствии с п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Таким образом, в связи с нарушением ответчиком обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, истцом произведен расчет неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно).

До настоящего момента образовавшаяся задолженность ответчика по оплате неустойки в размере 10 037, 50 руб. перед истцом не погашена.

В связи с тем, что сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению по Договору истекли, истец направил в адрес ответчика соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

В адрес истца ни подписанное соглашение о расторжении Договора, ни отказ от его подписания до настоящего времени не поступил. Кроме того, ответчиком не выражено намерения осуществить технологическое присоединение по Договору.

Ответчиком возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению не выполнены, уведомления о выполнении технических условий от ответчика в адрес истца не поступало, тем самым истец лишен возможности осуществить подключение энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям истца в целях исполнения Договора. Доказательств о выполнении ответчиком технических условий 070-3-20/P3-182 от ДД.ММ.ГГГГ у Истца не имеется. 

Таким образом, неисполнение ответчиком мероприятий по технологическому присоединению в установленные п. 16 Правил и п. 5 Договора сроки, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, не направление в адрес истца уведомления о выполнении обязательств по Договору являются существенным нарушением договорных обязательств со стороны ответчика и основанием для расторжения Договора.

Неисполнение условий договора ответчиком влечет невозможность для истца исполнить договор в целом.

При этом у истца как у публичной стороны возникает риск наступления негативных последствий в виде гражданско-правовой, административной и иной ответственности за неисполнение договоров технологического присоединения в целом.

Просит суд расторгнуть заключенный между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго»: 550 рублей – расходы на подготовку и выдачу технических условий, 6 423 рублей 50 копеек – расходы на оплату государственной пошлины, 10 037 рублей 50 копеек – неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В судебном заседании представитель истца ПАО «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» – ФИО6, действующая на основании доверенности, заявленные исковые требования поддержала в полном объеме по указанным основаниям.

Ответчик ФИО1 заявленные исковые требования не признал, просил в иске отказать.

Выслушав представителя истца ПАО «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» – ФИО6, ответчика ФИО1, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в адрес филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» с заявкой № № на технологическое присоединение объекта жилого дома, расположенного (будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор).

В силу п.1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) энергопринимающие устройства жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 12 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 3 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта жилой дом, расположенного (который будут располагаться): 

<

адрес>

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя ( п. 3 Договора).

Согласно п. 4, п.5 Договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Пунктом 6 Договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (п. 7 Договора).

Пунктом 8 Договора предусмотрено, что заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (п.9 Договора).

В соответствии с п.10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Рязанской области № от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. Постановления Главного Управления Региональной энергетической комиссии Рязанской области от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №) и составляет 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 20% – 91 (Девяносто один) рубль 67 копеек).

Согласно п.п. 14-17 Договора настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В рамках заключенного договора сетевая организация выдала ответчику технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ.

Истец мероприятия по технологическому присоединению, возложенные на него и указанные в технических условиях, выполнил в полном объеме.

Судом установлено и не оспаривается сторонами, что ответчик обязательства по договору установленные п. 8 не выполнил и не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил в адрес ответчика претензию исх. № № о выполнении договорных обязательств либо о расторжении договора, в связи с просрочкой выполнения ответчиком мероприятий, предусмотренных техническими условиями, более чем на 12 месяцев, к которой приложил соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик соглашение о расторжении договора не подписал, обязательства, принятые на себя по договору до настоящего времени не исполнил.

На основании пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (далее - Правила).

Пунктом 16(5) Правил N 861 предусмотрено, что нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Пунктом 16(6) указанных Правил предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Таким образом, невыполнение ФИО1 длительное время Технических условий влечет невозможность осуществить фактическое присоединение объекта заявителя к сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья»К» и в силу п.2 ст. 450 ГПК РФ является основанием для расторжения договора в судебном порядке по инициативе сетевой организации, в связи с чем, заявленные требования о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1, подлежат удовлетворению.

В силу статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Для применения гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков на основании статьи 15 ГК РФ необходимо доказать противоправность действий ответчика, факт несения убытков и их размер, наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившими у истца неблагоприятными последствиями.

Особенности заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регулируются положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который предусматривает, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

В силу пункта 4 статьи 23.1 указанного закона затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение.

При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Порядок и размер платы за технологическое присоединение регулируется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Из пункта 87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», следует, что в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с осуществлением технологического присоединения, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 7 и подпунктах "а" и "д" пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 861, расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение в соответствии с особенностями, предусмотренными методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), объектов микрогенерации, устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Расходы сетевой организации на выполнение организационно-технических мероприятий, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 7 и подпунктах "а" и "д" пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, расходы, связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не более 550 рублей, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт, и расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, не включаемые в соответствии с методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, в состав платы за технологическое присоединение, составляют выпадающие доходы сетевой организации, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям.

Сетевая организация рассчитывает размер указанных выпадающих доходов в соответствии с методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.

При таких обстоятельствах по общему правилу расходы сетевой организации при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 15 кВт ограничиваются тарифным органом до экономически обоснованной величины - платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

При этом с учетом положений законодательства, расходы сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не учитываемые в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Из пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 следует, что плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВт включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Оценив представленные сторонами доказательства, судом установлено, что ответчик относится к категории потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не более чем 15 кВт, в связи с этим размер платы за технологическое присоединение для ответчика не может составлять более 550 рублей.

Материалами дела подтверждается, что ответчик в полном объеме внес плату по договору в указанном размере, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 рублей, назначение платежа – технологическое присоединение по договору № №.

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрена обязанность заказчика по оплате стоимости услуг сетевой организации свыше стоимости услуг, рассчитанной с применением ставки тарифа, в размере фактически понесенных затрат по проектированию и созданию объектов для организации энергоснабжения заявителя, при том что ответчиком плата за технологическое присоединение внесена в полном объеме, в связи с чем, в силу ст. 56 ГПК РФ истцом не представлено доказательств факта возникновения убытков, в связи с неисполнением ответчиком обязанностей по договору.

При таких обстоятельствах, отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. ст. 15, 393 ГК РФ, для удовлетворения заявленных требований о взыскании с ответчика расходов на подготовку и выдачу технических условий в размере 550 рублей, неустойки в размере в размере 10 037 рублей 50 копеек.

На основании ст. 98 ГПК РФ суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 6 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

решил:

Исковые требования Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, затрат сетевой организации – удовлетворить частично.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» (ОГРН №; ИНН №) расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

В удовлетворении исковых требований Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 037 (Десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек, расходов на подготовку и выдачу технических условий в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей, судебных расходов по оплате госпошлины в большем размере – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Рязанский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Рязани в течение одного месяца с момента изготовления его мотивированной части.

Судья