№12302320037000021

42RS0029-01-2024-000898-87

Дело № 1-6/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п.г.т. Ижморский 24 июля 2025 г.

Ижморский районный суд Кемеровской области

в составе председательствующего – судьи Гритчиной Т.П., 

при секретаре Коршуновой Н.В., 

с участием государственных обвинителей - Бебишева В.Ю., Фомченко А.А., Симоновой Н.В.,

представителя потерпевшего Д.А., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката НО «Центральная коллегия адвокатов г. Кемерово Кемеровской области № 1» Крешталь О.Н., действующей на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ №,

подсудимого ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца п.г.т. 

<

адрес>, гражданина РФ, владеющего русским языком, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, не работающего, проживающего по адресу: 

<

адрес> на специальных учетах у нарколога, психиатра не состоящего, инвалидности не имеющего, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, содержавшегося по данному делу под стражей с 17.10.2023 по 12.08.2024 года, находившегося под домашним арестом с 13.08.2024 по 30.04.2025, с 01.05.2025 избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь действующим главой Яйского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, то есть выборным должностным лицом органа местного самоуправления и одновременно главой администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса (далее – Администрация), постоянно осуществляющий функции представителя власти, то есть наделенный распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, постоянно выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления, являясь в силу этого высшим должностным лицом Яйского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, избранный на данную должность Решением Совета народных депутатов Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса № от ДД.ММ.ГГГГ и вступивший в данную должность с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением № от ДД.ММ.ГГГГ Совета народных депутатов Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, обязанный в своей деятельности соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, а также Устав муниципального образования «Яйский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса», принятый Решением Совета народных депутатов Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым в его полномочия входило:

- представлять Яйский муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени муниципального образования (пункт 1 часть 1 статьи 48);

- издавать в пределах своих полномочий правовые акты (пункт 3 часть 1 статьи 33);

- обеспечивать осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области – Кузбасса (пункт 5 часть 1 статьи 33);

- руководить деятельностью администрации Яйского муниципального округа (пункт 7 часть 1 статьи 33);

- от имени Яйского муниципального округа своими действиями осуществлять имущественные права и обязанности (пункт 12 часть 1 статьи 33);

- разрабатывать и вносить на рассмотрение Совета народных депутатов Яйского муниципального округа проект бюджета Яйского муниципального округа, программы и планы социального развития Яйского муниципального округа, организовывать их исполнение (пункт 13 часть 1 статьи 33);

- распоряжаться средствами администрации Яйского муниципального округа, подписывать финансовые документы (пункт 19 часть 1 статьи 33);

- заключать от имени администрации Яйского муниципального округа договоры, муниципальные контракты в пределах своей компетенции (пункт 21 часть 1 статьи 33),

в период времени не позднее 20.10.2021 по 16.08.2022, находясь в помещении Администрации по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, совершил злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь должностным лицом, главой органа местного самоуправления, в период не позднее 20.10.2021 по 12.07.2022, в дневное время, находясь в помещении Администрации по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением путем совершения неправомерных действий получить для других лиц выгоду имущественного характера за счет расходования бюджетных средств в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интеграл-Т», а также из иной личной заинтересованности, обусловленной стремлением извлечь для себя выгоду неимущественного характера, вызванным желанием повысить свой авторитет перед администрацией Кемеровской области - Кузбасса, зарекомендовать себя опытным и компетентным руководителем, соответствующим занимаемой должности и способным решать в установленные сроки поставленные задачи по поощрению жилищного строительства, созданию условий для осуществления права на жилище, предоставлению жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, для создания видимости надлежащего исполнения им своих служебных обязанностей по целевому и рациональному использованию лимитов финансирования на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство, а также средств бюджета Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы в нарушение: 

- части 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности;

- части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, согласно которой органы местного самоуправления, должностные лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы;

- статьи 40 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища; органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище; малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами;

- статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);

- статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которой, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

- части 2 статьи 32 Устава Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, согласно которой глава Яйского муниципального округа, должен осуществлять данные ему полномочия исключительно в интересах населения округа, всей своей деятельностью способствовать его экономическому, социальному и культурному развитию, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, Устав Яйского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности главы Яйского муниципального округа;

- статьи 62 Устава Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, в соответствии с которой экономическую основу местного самоуправления в муниципальном округе составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права Яйского муниципального округа; муниципальная собственность, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, признается и защищается государством наравне с иными формами собственности, 

заведомо зная об отсутствии у ООО «Интеграл-Т» достаточных финансовых средств для обеспечения исполнения муниципальных контрактов в соответствии с требованием статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с целью приобретения Администрацией у ООО «Интеграл-Т» жилых помещений (благоустроенных квартир) в подлежащих строительству двух многоквартирных жилых домах по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Яйский муниципальный район, п.г.т. Яя, в границах ул. Авиационная – ул. Болотная - ул.Новый городок – ул. Гвардейская (микрорайон «Новый городок»)», дал незаконные указания подчиненным ему сотрудникам Администрации, включая заместителя главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., организовать проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса, с условием в нарушение требования статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» возможности авансирования в объеме более 30 % от общей цены контракта и обеспечения исполнения каждого контракта банковской гарантией в размере 1 % от его цены.

Далее, заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя во исполнение незаконных указаний последнего, в период не позднее 20.10.2021 по 13.07.2022, в дневное время, находясь в помещении Администрации по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, организовала путем дачи указаний сотрудникам отдела по ЖКХ и строительству администрации Яйского муниципального округа подготовку последними аукционной документации, включающей техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект муниципального контракта с приложениями к нему, и заявок на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги с приложениями к ним, включающими техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект муниципального контракта с приложениями к нему, по следующим 17 электронным аукционам на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса, предусматривающих в нарушение требования статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» возможность заключения муниципального контракта с условием авансирования в объеме более 30 % от общей цены контракта и обеспечения исполнения контракта банковской гарантией в размере 1 % от его цены:

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 169,8 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 20.10.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 20.10.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 169,8 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 20.10.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 20.10.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 169,8 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 20.10.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 20.10.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 152,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 20.10.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 20.10.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 152,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 20.10.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 20.10.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 152,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 20.10.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 20.10.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 152,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 20.10.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 20.10.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 128,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений», по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 11.11.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 11.11.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 162,46 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 09.11.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 177,9 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 09.11.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 153,86 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 09.11.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 161,7 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 09.11.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 172,56 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 09.11.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 173,8 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 09.11.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 173,4 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 29.11.2021, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., начальник юридического отдела администрации Яйского муниципального округа Н.М.А. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 29.11.2021;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 137,0 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 24.06.2022, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., исполняющий обязанности начальника юридического отдела администрации Яйского муниципального округа П.А.В. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 27.06.2022;

- №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенной квартиры), общей площадью 28,4 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, по заявке на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 12.07.2022, которую подписали не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 сотрудники Администрации: ответственная за лимиты бюджетных обязательств К.Г.А., заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., первый заместитель – заместитель главы Яйского муниципального округа по экономическому развитию Ж.М., исполняющий обязанности начальника юридического отдела администрации Яйского муниципального округа П.А.В. и консультант-советник по муниципальным закупкам и прогнозированию отдела экономического развития территории администрации Яйского муниципального округа П.Е.В., принявшая и зарегистрировавшая данную заявку 12.07.2022.

Кроме того, ФИО1 в период не позднее 20.10.2021 по 12.07.2022, в дневное время, находясь в помещении Администрации по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, в целях реализации своего преступного умысла, подписал по указанным электронным аукционам на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса, с условием в нарушение требования статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» возможности авансирования в объеме более 30 % от общей цены контракта и обеспечения исполнения каждого контракта банковской гарантией в размере 1 % от его цены, подготовленные аукционную документацию, подписанную заместителем главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В., и заявки на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги, подписанные указанными сотрудниками Администрации, чем обеспечил проведение 17 электронных аукционов:

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 21.10.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 09.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 21.10.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 09.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 22.10.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 09.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 22.10.2021 и 26.10.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 09.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 22.10.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 09.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 22.10.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 09.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 22.10.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 09.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 12.11.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 26.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 12.11.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 26.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 12.11.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 26.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 12.11.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 26.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 12.11.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 26.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 12.11.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 26.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 12.11.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 26.11.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 30.11.2021 и 06.12.2021 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 15.12.2021, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 29.06.2022 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 08.07.2022, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов У.Н.М., П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка (ООО «Интеграл-Т»), и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона (ООО «Интеграл-Т»);

- №, идентификационный код закупки: №, извещение о проведении которого и иная аукционная документация данной закупки размещена П.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 13.07.2022 в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от 22.07.2022, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее члена П.Е.В., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка (ООО «Интеграл-Т»), и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона (ООО «Интеграл-Т»).

Кроме того, ФИО1 в период с 22.11.2021 по 29.09.2022, в дневное время, находясь в помещении Администрации по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением путем совершения неправомерных действий получить для других лиц выгоду имущественного характера за счет расходования бюджетных средств в пользу ООО «Интеграл-Т», а также из иной личной заинтересованности, обусловленной стремлением извлечь для себя выгоду неимущественного характера, вызванным желанием повысить свой авторитет перед администрацией Кемеровской области - Кузбасса, зарекомендовать себя опытным и компетентным руководителем, соответствующим занимаемой должности и способным решать в установленные сроки поставленные задачи по поощрению жилищного строительства, созданию условий для осуществления права на жилище, предоставлению жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, для создания видимости надлежащего исполнения им своих служебных обязанностей по целевому и рациональному использованию лимитов финансирования на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство, а также средств бюджета Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушении вышеуказанных норм закона, осознавая, что в результате его неправомерных действий могут быть существенно нарушены установленное статьей 40 Конституции Российской Федерации право проживающих на территории Яйского муниципального округа граждан, нуждающихся в жилище, иметь жилище, для реализации которого Администрация распоряжалась лимитами финансирования для приобретения жилых помещений в количестве 78 благоустроенных квартир, охраняемые законом интересы общества и государства, установленные статьей 40 Конституции Российской Федерации, поощрять жилищное строительство, создавать условия для осуществления права на жилище, предоставлять жилище малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, а также может быть причинены тяжкие последствия Администрации в виде значительного материального ущерба, и относясь безразлично к этим последствиям, заключил от имени Администрации в своем лице с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 17 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство с дополнительными соглашениями к ним на общую сумму 144 660 988 рублей 11 копеек (далее – муниципальные контракты): 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретенные жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в пгт. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 9 445 040 рублей 10 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 94 450 рублей 40 копеек, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия № ЭГ-№/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 9 445 040 рублей 10 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 94 450 рублей 40 копеек, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия № ЭГ-№/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 9 445 040 рублей 10 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 94 450 рублей 40 копеек, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия № ЭГ-№/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 8 482 736 рублей 25 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 84 827 рублей 36 копеек, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия № ЭГ-№/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам проведения электронного аукциона №: идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого с учетом подписанных им дополнительных соглашений, включая дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, к данному муниципальному контракту установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 8 482 736 рублей 25 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 84 827 рублей 36 копеек, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия № ЭГ-№/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого с учетом подписанных им дополнительных соглашений, включая дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, к данному муниципальному контракту установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 8 482 736 рублей 25 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 84 827 рублей 36 копеек, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия № ЭГ-№/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого с учетом подписанных им дополнительных соглашений, включая дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, к данному муниципальному контракту установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 8 482 736 рублей 25 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 84 827 рублей 36 копеек, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия № ЭГ-№/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений», по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого с учетом подписанных им дополнительных соглашений, включая дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, к данному муниципальному контракту установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 7 147 748 рублей 25 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия №ЭГ-№/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 9 036 756 рублей 27 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, которому соответствует выданная АО КБ «Модульбанк» банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 6 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 9 895 598 рублей 55 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, которому соответствует выданная АО КБ «Модульбанк» банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 8 558 385 рублей 57 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, которому соответствует выданная АО «Экспобанк» банковская гарантия № ЭГ-384633/21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 8 994 481 рублей 65 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, которому соответствует выданная АО КБ «Модульбанк» банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 6 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 9 598 563 рублей 72 копейки, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, которому соответствует выданная АО КБ «Модульбанк» банковская гарантия № от 09.12.20214;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 6 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 9 667 538 рублей 10 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, которому соответствует выданная АО КБ «Модульбанк» банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 9 645 288 рублей 30 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, которому соответствует выданная АО КБ «Модульбанк» банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительства многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, по результатам проведения электронного аукциона №, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого с учетом подписанного им дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, к данному муниципальному контракту установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 8 159 172 рубля 00 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 81 591 рубль 72 копейки, которому соответствует выданная ПАО «Совкомбанк» независимая (банковская) гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенная квартира) гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, по результатам проведения электронного аукционас№, идентификационный код закупки: №, согласно условиям которого с учетом подписанного им дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, к данному муниципальному контракту установлены аванс (авансовый платеж) в размере 90 % от цены контракта – 1 691 390 рублей 40 копеек, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии - в размере 1 % его цены, что составляет 16 913 рублей 90 копеек, которому соответствует выданная ПАО «Совкомбанк» независимая (банковская) гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ, чем совершил входящие в круг его должностных полномочий действия по организации и обеспечению заключения муниципальных контрактов при отсутствии обязательных условий для их совершения - обеспечения исполнения контракта в размере аванса, а именно, в объеме 100 % от его цены.

Кроме того, ФИО1 в период не позднее 16.12.2021 по 03.10.2022, в дневное время, находясь в помещении Администрации по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно, в целях реализации своего преступного умысла, организовал и обеспечил перечисление из бюджета Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса на счет ООО «Интеграл-Т» денежных средств по указанным муниципальным контрактам путем подписания распоряжений «О перечислении денежных средств», в том числе от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, а также указанных ниже заявок на кассовый расход.

В результате действий ФИО1 в период с 17.12.2021 по 03.10.2022 Администрация перечислила денежные средства на расчетный счет ООО «Интеграл-Т» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>,

с казначейского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ финансовому управлению Яйского муниципального округа в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу (далее - УФК по Кемеровской области – Кузбассу), расположенном по адресу: 

<

адрес>, через единый казначейский счет УФК по Кемеровской области – Кузбассу №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении Кемерово Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 115 988 655 рублей 75 копеек, а именно: 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 исполняющей обязанности начальника отдела учета и отчетности Администрации С.А.П., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 778 016 рублей 07 копеек, а всего на общую сумму 8 500 536 рублей 09 копеек, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 исполняющей обязанности начальника отдела учета и отчетности Администрации С.А.П., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 778 016 рублей 07 копеек, а всего на общую сумму 8 500 536 рублей 09 копеек, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 787 086 рублей 67 копеек; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 исполняющей обязанности начальника отдела учета и отчетности Администрации С.А.П., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 778 016 рублей 07 копеек, а всего на общую сумму 8 500 536 рублей 09 копеек, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 исполняющей обязанности начальника отдела учета и отчетности Администрации С.А.П., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 393 094 рубля 53 копейки, а всего на общую сумму 7 634 462 рубля 63 копейки, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 848 273 рубля 62 копейки; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 исполняющей обязанности начальника отдела учета и отчетности Администрации С.А.П., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 393 094 рубля 53 копейки, а всего на общую сумму 7 634 462 рубля 63 копейки, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 448 959 рублей 39 копеек; ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 264 136 рублей 24 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 264 136 рублей 24 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 264 136 рублей 24 копейки; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации С.А.П., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 393 094 рубля 52 копейки, а всего на общую сумму 7 634 462 рубля 63 копейки, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 807 052 рубля 03 копейки; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 827 410 рублей 58 копеек, а всего на общую сумму 7 634 462 рубля 61 копейка, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 811 800 рублей 00 копеек, а также ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 621 173 рубля 43 копейки, а всего на общую сумму 6 432 973 рубля 43 копейки, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 889 088 рублей 22 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 243 992 рубля 42 копейки, а всего на общую сумму 8 133 080 рублей 64 копейки, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 426 126 рублей 45 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 034 рубля 81 копейка; ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 206 рублей 38 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 737 265 рублей 23 копейки; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 598 405 рублей 82 копеек, а всего на общую сумму 8 906 038 рублей 69 копеек, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 040 147 рублей 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 186 808 рублей 67 копеек, а всего на общую сумму 6 226 955 рублей 76 копеек, то есть, денежные средства в объеме 72,8 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 717 рублей 71 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 099 539 рублей 23 копейки, а всего на общую сумму 5 257 256 рублей 94 копейки, то есть, денежные средства в объеме 58,4 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121 244 рубля 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 920 246 рублей 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 784 495 рублей 44 копейки, а всего на общую сумму 7 825 986 рублей 42 копейки, то есть, денежные средства в объеме 81,5 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 308 336 рублей 47 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 144 920 рублей 60 копеек, а всего на общую сумму 2 453 257 рублей 07 копеек, то есть, денежные средства в объеме 25,4 % от общей цены контракта;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленным не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 начальником отдела учета и отчетности Администрации К.Г.А., подписанным последней и ФИО1, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 672 697 рублей 61 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 444 рубля 26 копеек, а всего на общую сумму 5 848 141 рубль 87 копеек, то есть, денежные средства в объеме 60,6 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 исполняющей обязанности начальника отдела учета и отчетности Администрации С.А.П., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 343 254 рубля 80 копеек, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта; 

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 исполняющей обязанности начальника отдела учета и отчетности Администрации С.А.П., подписанной последней и ФИО1, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 522 251 рубль 36 копеек, то есть, денежные средства в объеме 90 % от общей цены контракта. 

Однако ООО «Интеграл-Т» не осуществило в полном объеме строительство двух многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Яйский муниципальный район, п.г.т. Яя, в границах ул. Авиационная – ул. Болотная - ул. Новый городок – ул. Гвардейская (микрорайон «Новый городок»)», ввод в эксплуатацию которых условиями указанных муниципальных контрактов установлен не позднее 01.10.2022, не передало жилые помещения (благоустроенные квартиры) в многоквартирных жилых домах на территории Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса в муниципальную собственность, то есть не исполнило свои обязательства по указанным муниципальным контрактам, не осуществило возврат Администрации денежных средств, полученных в качестве аванса по указанным муниципальным контрактам, и выплаты по банковским гарантиям, выданным по данным муниципальным контрактам, Администрацией не были получены.

Незаконные действия ФИО1 повлекли существенное нарушение установленного статьей 40 Конституции Российской Федерации права проживающих на территории Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса граждан, нуждающихся в жилище, иметь жилище, для реализации которого Администрация утратила выделенные лимиты финансирования для приобретения жилых помещений в количестве 78 благоустроенных квартир, существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, установленных статьей 40 Конституции Российской Федерации, поощрять жилищное строительство, создавать условия для осуществления права на жилище, предоставлять жилище малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, дискредитировали и подорвали авторитет органов местного самоуправления Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, должностных лиц данного муниципального образования в целом, а также причинили тяжкие последствия бюджетному юридическому лицу – администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, в виде значительного материального ущерба на сумму 115988655 рублей 75 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению не признал, но не отрицал факт подписания заявок на извещения о проведении электронного аукциона и муниципальных контрактов. Пояснил, что он работал главой Яйского муниципального образования с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, в 2019 г. проходил курсы «Теория и практика стратегирования», получил удостоверение «О контрактной системе» в системе в сфере закупок для руководителей государственных и муниципальных учреждений, в 2022 г. прошел еще раз курсы «Теория и практика стратегирования». Его полномочия, как главы регламентировались уставом, для планирования и осуществления покупок для муниципальных и государственных нужд в администрации Яйского муниципального округа существует контрактная служба, работники которой тоже проходят обучение по 44 ФЗ, он, как руководитель контрактной службы распределяет обязанности между работниками контрактной службы, назначает и освобождает от должности работников контрактной службы. Как глава муниципального образования он подписывает муниципальные контракты, распоряжения, заявки, но он не участвует при проведении аукционов, не готовит заявки, договора, муниципальные контракты, как правило этим занимается контрактная служба, работники контрактной службы действуют в рамках полномочий, предусмотренных положением «О контрактной службе», документы, которые предоставляют ему на подпись уже согласованные, подписанные профильными специалистами, каждый из которых несет ответственность за свою часть работы, он подписывал, как правило, все документы последним, когда стоят подписи всех профильных специалистов и согласовавших. У него, как у главы, каких либо обязанностей при проведении аукционов, при заключении муниципальных контрактов нет, есть перечень документов необходимых для подачи на аукцион, комиссия по закупкам проверяет у участников аукциона соответствие документов из необходимого перечня, при этом, наличие финансовых ресурсов у претендентов для исполнения контракта не должно выясняться. Инициатором закупки по 17 муниципальным контрактам была администрация Яйского муниципального округа, в частности отдел ЖКХ и строительства. Указаний провести аукцион на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений путем инвестирования по своей личной инициативе он не мог и не давал, решение о проведении аукциона обсуждается на совместном совещании, при этом, период проведения, условия закупки определяется инициатором закупки - отделом ЖКХ, который взаимодействует с другими отделами, проводит электронные закупки, его вмешательство в принятии этих решений, относительно проведения аукционов отделом ЖКХ не предусмотрено, если какие-либо вопросы возникают, то они обсуждаются между работниками профильных отделов, к нему никто не обращался. Условия муниципальных контрактов, которые прилагались к заключению и размещались на электронных площадках ним не согласовывались, проекты контрактов для ознакомления, изучения, согласования тех контрактов, которые предлагались к подписанию и размещались на электронной площадке ему на электронную почту, посредством локальной сети не направлялись, и ни кем не передавались. Содержание проекта муниципального контракта с сотрудниками контрактной службы он не обсуждал, сотрудники юридического отдела Н.М.А. и П.А.В. информацию о том, что в проектах муниципальных контрактов имеются какие-то несоответствия 44-ФЗ ему не доводили, замечаний, которые с их слов они внесли в проект, выделив желтым цветом, и направили в отдел ЖКХ он не видел, о том, что условия муниципальных контрактов содержат условия не соответствующие требованиям 44 ФЗ, а именно то, что банковская гарантия не соответствует, он узнал в конце 2022 года из акта проверки федерального казначейства. Кто конкретно готовил проекты муниципальных контрактов, ему не известно, аукционное заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений путем инвестирования проводили работники контрактной службы. Каких-либо подробностей, как проходили аукционы на заключение 17 муниципальных контрактов по результатам которых победителем стал ООО «Интеграл Т» ему не докладывали. При заключении этих 17 муниципальных контрактов, предоставленные ему на подпись заявки на размещение извещений об осуществлении закупки были уже согласованы, содержали подписи тех лиц, которые должны их согласовывать и подписывать, он подписывал их последним. О том, что ООО «Интеграл Т» заявится на участие в аукционе он не знал, ему было известно, что данная организация занимается проектированием, строительством, оказывают другие услуги, так как ранее они занимались проектированием прокладки трубопровода на территории Яйского района, а также участвовали в аукционе комплексного развития территории в 2020-2021 г. С К. он познакомился после аукциона, перед заключением контракта о комплексном развитии территорий, к нему лично из сотрудников ООО «Интеграл-Т» К. Ан.В., К.В.Н. по вопросу участия в аукционах проводимых администрацией не обращались, о материальном положении данной организации ему было неизвестно. В 2020 г. с ООО «Интеграл-Т» были заключены контракты в рамках освоения территорий, комплексное развитие территорий, ООО «Интеграл-Т» выполнял свои обязательства по строительству жилых домов по тем контрактам, строительство велось, строительство прекратилось по решению Арбитражного суда по иску прокуратуры о том, что найдены нарушения в правилах землепользования градостроительного плана. После того, как были устранены выявленные нарушения, исполнено решение суда, потом был вновь проведен аукцион, заключены контракты. Каких-либо договоренностей с ООО «Интеграл-Т» у него не было. Указание установить размер аванса 90% и размер обеспечения этого аванса муниципальных контрактов 1% он никому не давал, работникам администрации какие-либо указания, касающиеся заключения 17 муниципальных контрактов до аукциона, до его проведения, при проведении аукционов он также не давал. Перечисление денег было произведено согласно условиям контракта. У него, как у главы, есть обязанность выполнять поставленные задачи по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, однако деятельность администрации Яйского муниципального округа по вводу в эксплуатацию квадратных метров нового жилья не является одним из основных направлений, имеется целый ряд иных важных направлений деятельности администрации. Эффективность, как руководителя оценивается в совокупности с выполнением других, не менее важных задач, показатели ввода жилья в эксплуатацию и обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем одна из текущих задач, и не является определяющей. Желания повысить свой авторитет не было, его работа, не для повышения авторитета должности. По заключенным с ООО «Интеграл-Т» контрактам должно было быть введено в эксплуатацию 2400 кв. м. жилья, однако это не давало ему возможность значительно улучшить свои показатели, так как общий план был 12000 кв. м. Поскольку до этого аукционы они проводили на достаточно высоком уровне, он не предполагал, что могут быть какие либо недоработки, он был уверен в том, что в электронной документации у них было все сделано без нарушений, у него не было оснований сомневаться в своих работниках. Исковые требования не признает.

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего Д.А. в судебном заседании пояснил, что ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года был главой Яйского муниципального района, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года главой Яйского муниципального округа, глава руководит деятельностью Яйского муниципального округа, заключает от администрации Яйского муниципального круга договоры, муниципальные контракты в рамках своей компетенции. В ноябре и декабре 2021 года администрацией Яйского муниципального округа было заключено 15 муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений - благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирного дома. В июле и августе 2022 года было заключено еще 2 муниципальных контракта, всего было заключено 17 муниципальных контрактов на сумму 144660988 рублей 11 копеек. В декабре 2021 года и в марте, сентябре 2022 года по этим контрактам была произведена оплата аванса в общей сумме 115988655 рублей 75 коп. Инициатор закупки - отдел ЖКХ и строительства подготавливал заявки на проведение аукциона, администрация Яйского муниципального округа проводила аукцион, подал заявку только ООО «Интеграл Т» и с ним были заключены 17 муниципальных контрактов. Срок сдачи дома 01.10.2022 г., согласно п. 4.3 застройщик ООО «Интеграл Т» должен был в течение 60 дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать инвестору, то есть администрации Яйского муниципального округа квартиры и необходимые документы, то есть не позднее 01.12.2022 г. В связи с тем, что в установленные сроки и при проведении проверок было выявлено, что дома не строятся и не достоятся скорей всего, в августе и в сентябре 2023 года в одностороннем порядке администрацией Яйского муниципального округа расторгнуто 17 контрактов, администрацией в адрес ООО «Интеграл-Т» были выставлены требования о возврате авансового платежа перечисленного по 17-ти расторгнутым контрактам, из них по 17-ти контрактам в установленный срок аванс не вернули. Также 17 муниципальных контрактов были заключены в нарушение положений статьи 44 Федерального закона, в случае если аванс по муниципальному контракту был выше 30%, то обеспечение муниципального контракта должно было быть 100% авансирования по контракту. Всего было 2 объекта, дома никто не достаивает, они стоят, как объекты незавершенного строительства, объекты недостроенные в связи с неисполнением со стороны ООО «Интеграл-Т» взятых на себя обязательств, администрация на баланс эти дома не ставила, сейчас они законсервированы по решению суда, стоят, никто ими не интересуется. Ущерб причинен администрации Яйского муниципального округа в размере авансового платежа по 17 муниципальным контрактам 115988655 рублей 75 коп. Они обращались с иском в арбитражный суд к ООО «Интеграл-Т», иск удовлетворен в полном объеме. Нарушение со стороны Мяленко заключается в нарушении 44 ФЗ, авансовые платежи были установлены 90%, и соответственно обеспечение муниципального контракта должно было быть 100% от авансового платежа, а 17 муниципальных контрактов были заключены с обеспечением муниципального контракта в размере 1%, что является недопустимым и нарушением федерального закона. Исходя из материалов уголовного дела, а именно из допроса свидетелей, свои замечания юрист и еще один специалист писал о том, что нельзя было заключать такие контракты, однако муниципальные контракты были заключены, несмотря на их указание, на ошибки. Решение по подписанию, о проведении аукционов по заключению муниципальных контрактов, о перечислении денежных средств по заключенным муниципальным контрактам принимает глава администрации. На строгом наказании подсудимого не настаивал, исковые требования поддержал.

Свидетель Ш.О.В. в судебном заседании пояснила, что в администрации Яйского муниципального округа она работала ДД.ММ.ГГГГ года начальником отдела по ЖКХ и строительству, ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работала заместителем главы по ЖКХ, связи и строительству, непосредственно подчинялась главе администрации. Вопросы финансирования объектов строительства осуществляет финансовое управление, контроль за заместителем главы по финансовым вопросам. Аукционную документацию готовят несколько отделов, их отдел и юридический отдел. Была подготовлена заявка, которая передана в экономический отдел, который размещает на сайте документацию, были объявлены электронные аукционы, выиграл «Интеграл Т» с ним заключили 17 муниципальных контрактов на приобретение готового жилья, всего 72 квартиры, в рамках 44 ФЗ. За подготовку муниципальных контрактов отвечает юридический отдел, ее отдел может внести только те разделы, которые относятся именно к ним, техническая документация, то есть техническое задание, обоснование начальной максимальной цены контракта, срок исполнения. Юридический отдел проводит правовую оценку муниципальных контрактов. В 2-х домах нужно было обеспечить квартирами 33 переселение с аварийного жилья, 19 квартир детям-сиротам, 7 квартир по социальной категории граждан, и оставалось 3 квартиры пустых. Муниципальными контрактами, был предусмотрен аванс 50% или 90%, администрация проавансировала чуть больше 115 миллионов рублей. Контракты подписаны электронной подписью главы, доводили ли юристы ей, либо главе свои записи о том, что контракты противоречат требованиям 44-ФЗ, ей не известно. Банковскую гарантию ООО «Интеграл Т» она не проверяла, так как не входило в ее компетенцию, о том, что банковская гарантия должна быть обеспечена в объеме аванса ни ей, ни главе было неизвестно, они взяли для образца контракты, которые были так заключены у всей области, риски того, что дома не будут построены с главой они не обсуждали. Контроль строительных работ они не осуществляли, проводили технические совещания, когда были какие-то вопросы. В марте - апреле 2023 году ей стало известно, что «Интеграл Т» не исполняет взятые на себя обязательства в установленный срок, стройка приостановилась, вызвали на совещание. О какой-то предварительной договоренности между главой администрации и руководителем ООО «Интеграл-Т» в лице К. проавансировать строительство почти на 100% ей не известно, на нее К., представители «Интеграл Т» с просьбой поговорить, чтобы авансирование было почти 100%, не выходили. Ежегодно со стороны правительства Кузбасса устанавливался план ввода жилья, на это выделялись денежные средства, но не в полном объеме, критерием оценки, сколько нужно построить жилья, сколько освоить бюджетных средств, это не являлось. Она общалась с главой, видела, что глава переживает по поводу того, что все сроки были нарушены, ничего не делается, в 2023 году глава приглашал представителей «Интерал Т» к себе, предлагал им помощь. В апреле 2023 года дома перестали строиться, планировалось забрать данные дома в муниципальную собственность у застройщика, чтобы их достраивать, но документацию на эти объекты К. не сделали. Глава принял решение, что нужно сделать оценку и забрать эти дома в муниципальную собственность, дальше их достаивать. Ей известно, что глава давал задание юристам расторгнуть контракты. От членов комиссии она не слышала о том, что недопустимо в таких условиях заключать эти контракты, также от работников администрации ей не поступали замечания о несоответствии муниципальных контрактов в части авансирования. Ее Мяленко не просил оказать ему какую-либо помощь, финансовую, моральную, также не просил быть посредником между ним и «Интеграл-Т».

Дополнительно допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.О.В. пояснила, что лимиты для приобретения жилых помещений, благоустроенных квартир нуждающимся гражданам выделяются на финансовый год, и должны быть освоены, если они не освоены, они автоматически возвращаются в бюджет Кемеровской области. В ее практике каких либо санкции со стороны администрации Кемеровской области в связи с неосвоением лимитов денежных средств к ним не применялись, но они понимали, что если лимиты не будут использованы, не построено жилье, то они понесут ответственность. Указаний на проведение аукционов, связанных с заключением контрактов ни кто не давал, в администрации есть технические советы, собираются все специалисты, выделен определенный лимит, посмотрели, что хватает, сообща решили. Банковская гарантия должна быть в том объеме, в котором предусмотрена сумма аванса, об этом ей стало известно после проверки федерального казначейства по 185-ФЗ в 2022 году. После проверки им написали о том, что в муниципальных контрактах неверно указана банковская гарантия, до этого она не знала, на момент заключения муниципальных контрактов работники администрации ей не говорили о том, что гарантия, которая указана в муниципальных контрактах, противоречит требованиям 44-ФЗ. Указание по поводу заключения муниципальных контрактов с гарантией 1% Мяленко ей не давал. Контрактная служба разрабатывает всю конкурсную документацию, профильные специалисты ее проверяют, каждый специалист смотрит свое направление, и пропускают, из каждого отдела специалист подписывает конкурсную документацию, потом она попадает к главе. Думает, что Мяленко посмотрел, что все специалисты расписались, значит все нормально. Все контракты они взяли на сайте госзакупок, сами их не придумывали, смотрели практику других муниципалитетов, в проект занесли только свои технические требования. Она участвовала на совещаниях при губернаторе Кемеровской области, когда стало затягиваться строительство, у них спрашивали, когда они сдадут жилье, они отвечали, что жилье невозможно сдать, потому что когда началось строительство пошел рост цен, они проводили работу по изъятию этих домов у подрядчика, сделали оценку, готовилась техническая документация, юристам было дано задание расторгать контракты с подрядчиком, они понимали, что подрядчик не достоит эти дома, так как у него не хватает денег.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.О.В., которые она подтвердила в судебном заседании (т. 20 л.д. 102-107) следует, что ООО «Интеграл-Т» является застройщиком 2-х многоквартирных домов в 

<

...> «Новый городок», до настоящего времени не достроены, выполнение работ прекратилось в марте 2023 г. Примерно в 2019-2020 г. руководитель компании ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 и К.В.Н. заинтересовались возможностью строительства жилья по муниципальным контрактам и в ходе неоднократных обсуждений с главой Яйского МО ФИО1 и с ее участием выразили готовность выступить застройщиком жилых домов в ходе комплексного развития территории Яйского МО. На вопрос ФИО1 о наличии финансовых средств, К. говорили, что у них имеются собственные финансовые средства. Позднее главой Яйского МО ФИО1 с ООО «Интеграл-Т» были заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство двух указанных объектов недвижимости, предусматривающих условия авансирования в объеме, которые позволяли обеспечить выделенные на эти цели лимиты Яйского МО. Им попадает, когда лимиты довели, но они не могут их освоить. Проекты муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений готовились юридическим отделом администрации Яйского МО. 

Свидетель П.А.В. в судебном заседании пояснила, что в ее должностные обязанности как начальника юридического отдела входит, в том числе правовое сопровождение всей деятельности администрации Яйского муниципального округа, подготовка проектов муниципальных контрактов, заказчиком по которым выступает администрация Яйского муниципального округа, правовая экспертиза данных муниципальных контрактов. Когда проводится аукцион, в юридический отдел поступает заявка от инициатора закупки структурного подразделения администрации, которая отвечает за эту закупку и юридическая служба проверяет представленный проект контракта в соответствии с условиями заявки и действующим законодательством. Когда она исполняла обязанности начальника юридического отдела с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за это время с ООО «Интеграл Т» было заключено два муниципальных контракта, был объявлен электронный аукцион по инициативе отдела ЖКХ и строительства администрации Яйского МО. Контракты заключенные с «Интеграл Т» были на инвестирование в строительство, они должны были предоставить в муниципальную собственность 72 квартиры для предоставления в будущем по договорам социального или специализированного найма, общая цена по 17 муниципальным контрактам 144660580,11 рублей. В июле 2022 года из отдела ЖКХ была предоставлена заявка с проектом контракта с обоснованием цены контракта на проверку, по сложившимся правилам юридической службы, либо других ответственных лиц, которые проверяют данную заявку, все пометки выделяются желтым цветом и пишутся замечания, и данная заявка отправляется на обработку к профильному отделу, который был инициатором закупки. Кто готовил изначально проект муниципального контракта, ей не известно. Она проверила проекты муниципальных контрактов, выделила желтым цветом несоответствия, что не устраивает в муниципальном контракте, со ссылками, если это было нарушение какого-либо пункта 44 ФЗ с пометкой, затем позвонила в отдел ЖКХ и строительства, сказала, что контракт проверен, необходимы доработки, они забирали его из сети, с кем из отдела ЖКХ разговаривала, она не помнит, кто конкретно из отдела ЖКХ разрабатывал заявку она не знает. Письменных замечаний и докладных записок на имя главы администрации о выявленных нарушениях не было. Были ли в проект контракта в последствии по ее замечаниям внесены исправления, она не интересовалась. Наличие 90% аванса муниципальными контрактами допускается, при наличии соответствующего обеспечения, по данным контрактам инвестор выбрал способ защиты в виде банковской гарантии, по этим двум муниципальным контрактам не было соблюдено условие по обеспечению контракта, представленными проектами он был предусмотрен 1%. Заявка подписывалась представителем инициатора закупки, в данном случае это был зам. главы по ЖКХ, транспорту, связи и строительству, юристом, начальником бухгалтерии, отделом учета и отчетности, первым заместителем - заместителем по экономике, являющимся руководителем контрактной службы и главой администрации Яйского муниципального округа - Мяленко. Каждая служба проверяла контракты в соответствии со своими должностными полномочиями. Муниципальные контракты подписываются главой Яйского муниципального округа, его полномочия закреплены уставом. Ей известно, что заявка по данным муниципальным контрактам, в уполномоченный орган была подана на размещение документации на электронном аукционе в первоначальном виде. Каких-либо указаний о согласовании и подписании первоначального проекта контракта ей глава не давал. Предыдущий начальник юридического отдела Н.М.А. говорила, что 15 муниципальных контрактов, которые были заключены, идут в разрез действующему законодательству, в части несоответствия размера авансирования. Строительство домов началось в 2020 году в рамках комплексного освоения незастроенных территорий, с «Интеграл-Т» был заключен договор о комплексном развитии незастроенных территорий. 17 муниципальных контрактов были заключены после принятия администрацией Яйского муниципального округа решения о приведении в соответствие объектов строительства, которые остались после расторжения договора о комплексном развитии территорий и применения недействительности сделок, данная закупка объявлялась с целью обеспечения жильем граждан, которым строительством на Новом городке предполагались квартиры. Она присутствовала на двух технических совещаниях, когда уже были риски, что вовремя дома сданы не будут, глава пошагово требовал от представителя застройщика расписать по срокам, когда с их стороны будет сделано, финансовые вопросы не обсуждались. Квартиры до настоящего времени в муниципальную собственность не переданы, администрацией Яйского МО были расторгнуты все 17 муниципальных контрактов в одностороннем порядке, они выставляли требования о возврате авансового платежа уплаченного по контрактам, в добровольном порядке в установленный срок не вернули, через Арбитражный суд высудили по всем муниципальным контрактам, до настоящего времени денежные средства от ООО «Интеграл-Т» на счет администрации не поступили в качестве возврата авансового платежа, сейчас в рамках процедуры банкротства требования администрации поставлены в 3 очередь. Объекты незавершенного строительства в муниципальную собственность администрации не переданы, они даже не зарегистрированы за застройщиком как объекты незавершенного строительства. Показатели по вводу жилья, до муниципалитетов доводится целенаправленно от губернатора каждому муниципальному образованию, в 2020, 2021, 2022 годах показатели Яйского муниципального округа выросли по сравнению с другими годами в 3 раза. Считает, что Мяленко руководствовался целью обеспечить жильем лиц, которые находятся на очередности по предоставлению жилых помещений и улучшения жилищных условий, предоставления квартир нуждающимся, в том числе обеспечить ввод жилья в эксплуатацию, не думает, что глава мог действовать из корыстных побуждений. Исковое заявление ими было подготовлено в связи с тем, что действиями ФИО1 в качестве главы Яйского муниципального округа были заключены 17 муниципальных контрактов, перечислено авансирование и по итогу реализации данных муниципальных контрактов бюджет Яйского муниципального округа потерпел убытки в размере суммы выплаченного аванса «Интеграл Т», так как со стороны «Интеграл Т» эти денежные средства не были возвращены в бюджет.

Также П.А.В. в судебном заседании пояснила, что возможно она говорила Мяленко о недопустимости заключения контрактов, Н.М.А. про это разговаривала, такие разговоры были среди работников администрации, которые владели информацией о заключении контрактов. Когда предполагалось заключение 15 контрактов на приобретение квартир, строительство которых осуществлял «Интеграл Т», это обсуждалось, на тот момент она являлась работником экономического отдела, не имела отношения к стройке, но эту информацию знала.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству защитника Крешталь О.Н. в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля П.А.В., которые она подтвердила в судебном заседании (т. 20 л.д. 16-25) следует, что в ее обязанности по проводимым аукционам входит составление муниципального контракта на основе представленной информации, либо проверка представленного проекта муниципального контракта в рамках 44-ФЗ. как проходили аукционы на заключение 17 муниципальных контрактов с ООО «Интеграл-Т» она пояснить не может, так как не работала в тот момент в должности начальника юридического отдела. Окончательное решение при формировании конкурсной документации принимает инициатор закупки, в данном случае заместитель главы МО по ЖКХ, правильность составления проверяет юридический отдел, они вносят свои правки, замечания и направляют инициатору закупки. В июле и августе 2022 г. проверкой муниципальных контрактов занималась она, в 2021 г. Н.М.А. Для обеспечения указанных 17 муниципальных контрактов была применена банковская гарантия. При проверке муниципальных контрактов № и №, условия об обеспечении были выставлены в соответствии с 44-ФЗ, при подписании муниципального контракта обеспечение она не проверяет. Почему в контрактах размер обеспечения стоит менее аванса пояснить не может. С должностными лицами ООО «Интеграл-Т» она не знакома, с К.А.В.2 знакома в рамках судебных разбирательств. По земельному участку, где осуществлялось строительство многоквартирных домов по ул. Новый городок заключен договор аренды в ООО «Арт-Сити» и передан ООО «Интеграл-Т» по договору уступки прав по аренде участка в феврале 2022 года, ход строительства контролировала государственная инспекция строительного надзора. Распорядителем денежных средств является администрация, распоряжения по перечислению денежных средств подписывает глава, каким образом ООО «Интеграл-Т» распорядился перечисленными администрацией Яйского МО денежными средствами ей неизвестно. По муниципальным контрактам между администрацией Яйского МО и ООО «Интеграл-Т» в рамках договора о комплексном освоении территории контракты были расторгнуты по решению Арбитражного суда Кемеровской области, авансовые платежи возвращены в полном объеме, по контрактам расторгнутым в 2023 г. ООО «Интеграл-Т» выставлены требования о возврате авансовых платежей. Ей известно, что проводились производственные совещания с представителями ООО «Интеграл-Т» по срокам строительства. Администрация Яйского МО не обращалась с целью возмещения по банковской гарантии, причину пояснить не сможет. Полагает, что ошибку по обеспечению заключенных муниципальных контрактов допустил инициатор закупки, но кто конкретно, пояснить не может.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля П.А.В., которые она подтвердила в судебном заседании (т. 20 л.д. 26-35) следует, что из 17 муниципальных контрактов, с ней согласовывались только проекты по муниципальным контрактам № и №, которые были предоставлены ей в электронном виде из отдела ЖКХ и строительства администрации Яйского МО по локальной сети в числе других документов по проведению аукционов. Она написала замечания к указанным проектам муниципальных контрактов, которые касались несоответствия требованиям 44-ФЗ в части несоответствия обеспечения исполнения контракта авансу, в проектах муниципальных контрактов данные сведения выделила желтым цветом и написала свои комментарии о недопустимости указанных условий, после чего пакет документов аукционной документации на заключение двух муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений с замечаниями вернула в отдел ЖКХ. В документах о согласовании ею проектов муниципальных контрактов она не расписывалась, листов согласования к проектам муниципальных контрактов не было предусмотрено. Ее замечания по указанным двум проектам муниципальных контрактов не были приняты во внимание, поскольку по результатам проведенных аукционов, победителем которых стало ООО «Интеграл-Т» были заключены муниципальные контракты № и № которые содержали условие об авансировании 90 % от суммы контракта с обеспечением исполнения в размере 1%, о чем она указывала в своих замечаниях. Ей известно, что ранее исполнявшая обязанности начальника юридического отдела Н.М.А. при согласовании с ней проектов муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, перед проведением аукционов обращала внимание и делала замечания на их несоответствие требованиям ст. 96 44-ФЗ в части обеспечения исполнения контракта, говорила о недопустимости таких условий, но ее ни кто не слушал, в том числе глава Яйского муниципального округа ФИО1, из-за чего Н.М.А. иногда плакала. Полагает, что на замечания Н.М.А. и ее аналогичные замечания ни кто не обращал внимание, так как до администрации Яйского МО было доведено много денег для ввода новых квадратных метров жилья, которые необходимо было освоить, а также необходимо снижать обязательства перед лицами, имеющими право на улучшение жилищных условий. На протяжении 2020-2022 г. Мяленко почти на всех совещаниях делал акцент на необходимость ввода в эксплуатацию квадратных метров жилья. Она сама, после назначения ее исполняющей обязанности начальника юридического отдела администрации Яйского МО, перед согласованием ею муниципальных контрактов № и № говорила ФИО1 о недопустимости заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений – квартир на условиях отсутствия обеспечения в размере 100 % суммы авансирования, она лично, обращала внимание ФИО1, что в противном случае это нарушает требования 44-ФЗ. На это Мяленко никак не отреагировал, выслушал ее молча, в ответ ничего не сказал. Она помнит, что в ноябре 2021 года, перед проведением аукционов на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, среди работников администрации между собой было бурное обсуждение больших рисков заключения муниципальных контрактов на таких условиях, нарушающих требования ст. 96 44-ФЗ,, который заключался в том, что застройщик мог не выполнить свои обязательства, не построить дома, не передать администрации квартиры, в результате чего администрации был бы причинен ущерб. Все понимали, что победителем на аукционах могло быть ООО «Интеграл-Т», которое не выполнило свои обязательства по заключенным с ним ранее в 2020 и 2021 г. муниципальным контрактам, которые были расторгнуты. Работникам администрации, и ей лично было понятно, что ООО «Интеграл-Т» не имеющая собственных средств не способна построить дома без дополнительных бюджетных средств. 

Дополнительно допрошенная в судебном заседании свидетель П.А.В. пояснила, что в период, когда она была начальником юридического отдела, Мяленко к административной ответственности за не исполнение соглашений в рамках которых предоставляются лимиты, не привлекался. В рамках приобретения жилых помещений, профильным отделом является отдел по ЖКХ и строительству и курирующий его заместитель главы по ЖКХ, связи и строительству, они готовили всю документацию для объявления аукциона на заключение муниципальных контрактов на строительство двух домов. Когда доводят лимиты, финансовое управление доводит их до администрации, как до распорядителя этих средств, в случае их не освоения, их могут отозвать, если не будет произведена контрактовка по этим лимитам, при этом глава, профильный зам, в компетенции которого разрешается вопрос, по которому доведены лимиты, дальше даются поручения. В муниципальных контрактах, если аванс по контракту превышает допустимые законодательством 30% и устанавливается в пределах допустимого: 50%, 60%, 90%, то обеспечение исполнения контракта должно быть приравнено к размеру авансирования, предусмотренного данным муниципальным контрактом. С ДД.ММ.ГГГГ года исполняла обязанности начальника юридического отдела, не была погружена во всю процедуру проверки, письменные докладные записки ни на имя главы, ни на имя уполномоченного органа не было заведено на тот период предоставлять, письменно не уведомляла. Когда она заступила на должность начальника юридического отдела уже подходили сроки, поэтому больше акцент был сделан на возможности исполнения этих контрактов. Разработкой проекта контрактов занимался отдел ЖКХ, указание установить в контрактах 90% аванс ей ни кто не давал, ей не известно, чтобы Мяленко давал какие-то поручения своим подчиненным по поводу установления размера гарантий в 1%. Глава подписывает заявку на проведение аукционов, уполномоченный орган на проведение закупок не подписанной главой, как руководителем органа заказчика не примет ее для размещения. Сама заявка содержит все обязательные условия, в том числе аванс и гарантии. Считает, что Мяленко знал он нарушении 44-ФЗ при заключении данных контрактов, так как глава, будучи руководителем органа заказчика, должен владеть информацией 44-ФЗ.

Свидетель Т.Н.Н. в судебном заседании пояснил, что в 2020 году он приезжал в составе ООО «Интеграл Т», его просили поучаствовать как юриста со стороны при рассмотрении вопроса о расселении из ветхого жилья, работником ООО «Интеграл Т» он не являлся. 2020-2021 г. он встречался с главой Яйского муниципального округа, один раз, когда был договор комплексного развития, второй раз в 2022 году в августе-сентябре, тогда был договор на инвестирование. В августе-сентябре 2022 года он приезжал с «Интеграл Т», была встреча с Мяленко, поговорили на повышенных тонах по поводу строительства, речь шла только о стройке, о недофинансировании, других обвинений не было ни с одной из сторон. Аукционную документацию для ООО «Интеграл Т» и проекты муниципальных контрактов он не готовил, какое либо участие вместе с работниками администрации Яйского муниципального округа в составе рабочей группы он не принимал, когда его привлекали первый и второй раз, контракты были уже заключены.

Свидетель Н.М.А. в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ занимала должность начальника юридического отдела в администрации Яйского муниципального района, в своей работе непосредственно подчинялась главе Яйского муниципального округа. Организация ООО «Интеграл-Т» была их застройщиком, осуществляла строительство многоквартирных домов. Она принимала участие в контрактной службе по рассмотрению заявок, проверяла проекты муниципальных контрактов, данные проекты и аукционную документацию готовил инициатор закупки - отдел ЖКХ, который возглавляла заместитель главы Ш.О.В. Как правило контракты они пересылали по сети в компьютере, проекты проверялись, каждый проверял свое направление, свои замечания выделял желтым цветом и возвращали в отдел ЖКХ, который устранял замечания, но повторно назад они не возвращались. В проекты муниципальных контрактов вносились корректировки в соответствии с 44 ФЗ, какие были нарушения сейчас не помнит, направили все обратно в отдел ЖКХ. С ООО «Интеграл Т» было заключено больше 15 контрактов, в рамках которых предусматривалось авансирование 90 %, предоставляли ли обеспечение ей не известно. Лично с главой Мяленко на тему того, что проекты муниципальных контрактов не соответствуют положениям 44-ФЗ она не общалась, контактировала с инициатором закупки Ш.О.В., она говорила, что все сделают. После того, как были заключены контракты, было выявлено, что были несоответствия. О том, что ее замечания не были учтены при заключении контрактов ей стало известно, после проведения аукциона, уже на момент строительства. С руководителем ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 встречались на стройке, не помнит, чтобы проводили с ним какие-то планерки при главе.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.М.А., которые она подтвердила в судебном заседании (т. 20 л.д. 154-160) следует, что в период с 2019 г. по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность начальника юридического отдела администрации Яйского МО, подчинялась непосредственно главе Яйского МО ФИО1 В составе контрактной службы она участвовала в рассмотрении заявок на проведение аукционов по заключению различных муниципальных контрактов, сама она и юридический отдел никогда не готовили проекты муниципальных контрактов, они готовились инициатором проведения закупок. По заключенным в 2021-2022 г. администрацией Яйского МО с ООО «Интеграл-Т» муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений – квартир, с ней согласовывались проекты данных муниципальных контрактов перед проведением аукционов, инициатором проведения аукционов выступал отдел ЖКХ и строительства, этим же отделом готовились проекты муниципальных контрактов, кто конкретно готовил, ей не известно. При согласовании проектов муниципальных контрактов она контактировала со Ш.О.В., как фактическим руководителем подразделения, являющегося инициатором закупки. Проекты муниципальных контрактов были ей представлены в электронном виде, через локальную сеть в числе пакета документов аукционной документации. Она написала свои замечания, касающиеся несоответствия требованиям ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, если аванс по муниципальным контрактам превышает 30 процентов начальной цены контракта, обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере аванса. Данные сведения и другие замечания в муниципальных контрактах она выделила желтым цветом, написала свои комментарии о недопустимости указанных условий, и пакеты документов аукционной документации, содержащие проекты муниципальных контрактов через локальную сеть вернула в отдел по ЖКХ и строительству Администрации Яйского МО, а также сообщила об этом Ш.О.В. Почему указанные ею замечания не были приняты во внимание, ей не известно. Содержание муниципальных контрактов перед размещением на электронной площадке перед проведением электронного аукциона и при последующем их заключении она не отслеживала, они ей не предоставлялись. Она расписывалась только в заявках на проведение аукционов после предоставления ей проектов муниципальных контрактов, после их проверки, при этом, своей подписью она подтверждала, что ею были проверены указанные проекты муниципальных контрактов, а не то, что они соответствуют требованиям закона. Она с главой ФИО1 по поводу несоответствия муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений требованиям 44-ФЗ не разговаривала, и не предупреждала его об этом, так как полагала достаточным доведение этой информации инициатору проведения аукционов при согласовании проектов муниципальных контрактов в числе аукционной документации. Обстоятельства подбора ООО «Интеграл-Т» в качестве потенциального застройщика ей не известны, она в этом участие не принимала.

Свидетель П.Е.В. в судебном заседании пояснила, что работала в администрации Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ года в должности консультанта советника экономического отдела, была уполномоченным органом по определению поставщиков. Все заказчики округа, это бюджетные учреждения, в том числе администрация, она размещала закупки, в своей работе непосредственно подчинялась Ж.М. ООО «Интеграл-Т» были участниками в закупках, инициатором закупок был отдел ЖКХ, от них приходили заявки, кто готовил проекты аукционной документации, проекты муниципальных контрактов она не знает. В ее обязанности входило проверка информации, которая нужна для размещения извещения, начальная цена контракта. Мяленко не давал ей каких-либо указаний поводу подготовки, размещения заявок. Она входила в контрактную службу, заявки для размещения аукционной документации к ней поступали от отдела ЖКХ по электронной почте, неотъемлемая часть к заявке это проект муниципального контракта, максимальная цена контракта и техническое задание. Проверять проект контракта, составлять проект контракта в ее обязанности не входит, контракты поступившие в период 2020-2022 годы она смотрела на соответствие заявки. Каждый работник контрактной службы выполнял свой объем работы и согласовывал его, подписывал заявку, потом подписывал руководитель, после этого заявка появлялась у нее.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля П.Е.В., в части проверки контрактов, которые она подтвердила в судебном заседании (т. 21 л.д. 4(последний абзац), л.д. 5 (первый абзац)) следует, что она сама не проверяет проекты муниципальных контрактов в числе аукционной документации на их соответствие 44-ФЗ, так как это не входит в ее обязанности. Аукционная документация на проведение закупок, победителем в которых в итоге было признано ООО «Интеграл-Т», содержание проектов муниципальных контрактов у нее не вызвало вопросов, в том числе отсутствие в них необходимого обеспечения в соответствии со ст. 96 44-ФЗ, так как это дело инициатора закупки.

Свидетель Ж.М. в судебном заседании пояснила, что от отдела ЖКХ ее отделом были приняты заявки, структуру, содержание, основные положения муниципальных контрактов готовит отдел ЖКХ. После проведения аукциона в единой информационной системе на электронной площадке, появились результаты, эти результаты выходят на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявок. Было отыграно 17 процедур аукционов, выиграл аукционы «Интеграл Т», с ним были заключены 17 муниципальных контрактов на инвестирование в строительство, администрация Яйского МО должна была приобрести готовые квартиры. Согласно данных контрактов, сумма аванса составила 115 млн. рублей, на сегодняшний день ей известно, что эти объекты - дома не построены, полагает, что подрядчику не хватило собственных средств. С руководителем ООО «Интеграл Т» К. она лично не общалась, ни каких документов с ним не подписывала, не вела никаких рабочих процессов. Когда они размещали данные контракты, когда размещали аукционы, ей не было известно о каких-либо допущенных нарушениях, она считала, что они все делают правильно. В ходе следствия ей стало известно, что имели место нарушения при заключении контрактов, а именно, обеспечение исполнения контракта не соответствует авансу. Говорил ли кто-то об этом Мяленко, что так не правильно, она не знает, о личной заинтересованности главы при заключении данных муниципальных контрактов ей ничего не известно. Н.М.А. была сотрудником ее отдела, который является уполномоченным органом, она конкретно размещала в единой информационной системе, на самом сайте «Закупки», где проходит аукцион, предоставленный ей пакет документов, а именно, заявка, техническое задание, проект муниципального контракта.

Свидетель Н.И.В. в судебном заседании пояснила, что ее функциональные обязанности заключались в организации работы экономического отдела, ее непосредственный руководитель Ж.М. На территории Яйского муниципального округа планировалось комплексное развитие территорий, застройка многоквартирных домов, однажды она была на совещании, представитель ООО «Интеграл Т» приглашал население, рассказывал, что будут строить дома, с К. она лично не знакома. Она является членом комиссии по закупкам, в ее должностные обязанности входит проверка заявок на соответствие законодательству, подготовкой аукционной документации, муниципальных контрактов она не занимается. В ее присутствии ни кто из членов комиссии не говорил о том, что аванс, который прописан в контракте превышает допустимые размеры.

Свидетель У.Н.М. в судебном заседании пояснила, что она работает в администрации Яйского муниципального округа начальником экономического отдела, является членом комиссии по закупкам, в ее должностные обязанности входит, проверка поступивших заявок на соответствие требованиям законодательства. На территории Яйского муниципального округа планировалось комплексное развитие территорий, застройка многоквартирных домов. Подготовкой аукционной документации, муниципальных контрактов она не занималась, сколько заключено муниципальных контрактов и на какую сумму ей не известно. В ее присутствии ни кто из членов комиссии не говорил о том, что аванс, который прописан в контракте, превышает допустимые размеры.

Свидетель С.А.В. в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в администрации Яйского муниципального округа главным специалистом, потом была переведена на должность консультанта советника по ЖКХ и строительству, далее была начальником отдела по ЖКХ и строительству. При осуществлении своей деятельности она непосредственно подчинялась заместителю главы по ЖКХ Ш.О.В. На электронных площадках они опубликовывали и прикрепляли авансовые документы, оплату производила бухгалтерия. На момент ее трудоустройства с ООО «Интеграл Т» были заключены контракты на покупку жилья путем инвестирования, в тот период, когда она работала, они делали дополнительные соглашения по данным контрактам. Дома планировалось построить в п.г.т. Яя, на ул. Новый Городок, однако их не достроили, подрядчик не выполнил свои контрактные обязательства. Приобретение квартир планировалось для детей - сирот и аварийное жилье. Проект муниципальных контрактов готовят юристы, также определяют размер аванса, их отдел готовил только техническую документацию, какие квартиры необходимо было приобрести. Инициатором проведения закупок являлся отдел по ЖКХ. Во исполнении данных муниципальных контрактов, глава администрации ей лично каких-либо поручений не давал. С чьих-то слов ей известно о том, что авансы, перечисленные ООО «Интеграл» превышали допустимую норму, но почему, она не вдавалась в подробности, кто давал указание по поводу сумм перевода авансов, ей не известно.

Свидетель К.О.В. в судебном заседании пояснила, что ранее она работала в Министерстве строительства Кузбасса, ООО «Интеграл Т» ей известен, как застройщик в Яйском муниципальном округе, они строили два жилых многоквартирных дома, должны они были построить в 2022 году, но строительство не было завершено. В силу своих служебных обязанностей она присутствовала от Министерства строительства Кузбасса на совещаниях 2-3 раза в год, со всеми муниципальными образованиями Кузбасса, говорили о рисках с их точки зрения не ввода жилых домов в установленные сроки в рамках строительства, именно о муниципалитете, именно об этих объектах. Среди критериев оценки деятельности глав муниципального образования есть показатели эффективности, которые утверждены нормативно-правовым актом, объем ввода жилья туда также входит.

Дополнительно допрошенная в судебном заседании свидетель К.О.В. пояснила, что проводились совещания, где говорилось о необходимости освоения денежных средств, обращались к главам муниципальных образований взять реализацию жилищной программы под личный контроль, это было зафиксировано в докладах заместителя министра строительства Кузбасса, обращали внимание, писали письма о необходимости соблюдения 44-ФЗ. Ей известно, что в ходе совещания с заместителем губернатора, Мяленко указывали на нарушения сроков строительства. В случае не освоения лимитов, возможно было привлечение глав к дисциплинарной ответственности со стороны губернатора. Заключение муниципальных контрактов на суммы менее 10 млн. рублей, это полностью решение заказчика, этот вопрос не регулируется с их соглашениями. В чате, в рабочем порядке заместителям глав был представлен один из контрактов какого-то муниципального образования, но как образец не направлялся, это не является требованием закона, они имели полное право переработать этот образец под себя, если есть какие-то нарушения по 44-ФЗ должны были внести соответствия. Заключение муниципальных контрактов, где была бы указана гарантия 1%, является грубым нарушением 44-ФЗ, при ней, губернатором не давалось никаких поручений о заключении муниципальных контрактов в нарушение 44-ФЗ.

Дополнительно допрошенная в судебном заседании свидетель К.О.В. пояснила, что мониторинг строительных площадок осуществлялся, в том числе и в Яе, по всей области 2-3 раза в год полный объезд всех строительных площадок. За время мониторинга по строительству в Яе, у них возникали вопросы по темпам строительства, видели риски по несвоевременному вводу по срокам заявленных в контрактах, недостаточное количество с их точки зрения рабочих на площадке, было мало техники, по информации она была арендованная. В период 2020-2022 г. селекторные совещания проводились в целом по области, регулярно освещались темы по своевременному освоению бюджета в рамках жилищных программ доведенных для всех муниципальных образований и ввода жилья. Исходя из тех темпов строительства всех домов, которые видели в ходе мониторинга, они проводили анализ и доводили эту информацию о том, что видны риски по несвоевременному завершению объекта. ООО «Интеграл-Т», как застройщики жилья на территории области они не выступали, у данного застройщика никакого опыта не было. Знал ли ФИО1 о том, что у «Интеграл-Т» нет опыта строительства ей не известно. На момент заключения контрактов, Министерству строительства не известно, с кем будет заключен контракт, в процессе заключения контрактов они не участвуют, заказчиком выступает муниципалитет самостоятельно. На совещаниях предупреждения, касающиеся «Интеграл-Т» были, когда уже шел процесс стройки, когда они выезжали с мониторингом, эти объекты выносились на слайдах, как в зоне риска, они показывали какой объект, какой адрес, подписывали застройщика, это все выносилось на общее обозрение. Она присутствовала при совещаниях губернатора, заместителя губернатора, в 2021, 2022 году, это было после того, как уже велась стройка. Руководство говорило о том, что есть риски по вводу, есть сомнения по ненадлежащему темпу строительства. Если есть риски по вводу, значит есть риски неисполнения обязательств, денежные средства доводились до муниципалитета и они должны были обеспечить своевременный ввод жилья. Областным руководством в качестве образца какие-либо контракты не направлялись.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля К.А.В.2 (т. 6 л.д. 18-28) следует, что он является генеральным директором ООО «Интеграл-Т», между данной организацией и администрацией Яйского МО были заключены муниципальные контракты, предметом которых является приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. Денежные средства полученные по заключенным муниципальным контрактам были направлены на приобретение строительных материалов для строительства объектов и осуществление деятельности организации. По заключенным муниципальным контрактам цена для исполнения обязательств по ним достаточна. Предварительные договоренности между администрацией Яйского МО и ООО «Интеграл-Т» в рамках заключенных муниципальных контрактов не имелись, денежные средства или иные материальные ценности кому либо из администрации Яйского МО он не передавал. Из должностных лиц администрации Яйского МО он контактирует с главой ФИО1, заместителем главы Ш.О.В. По факту израсходования бюджетных средств должностными лицами администрации Яйского МО на цели, не соответствующие условиям их получения определенным утвержденным бюджетом, т.е. нецелевого расходования бюджетных средств ему ничего не известно. Сумма оплаченных контрактов 115988655,75 рублей, задолженность администрации Яйского МО по заключенным муниципальным контрактам порядка 14000000 рублей.

Свидетель К.В.Н. в судебном заседании пояснил, что с момента создания «Интеграл Т», генеральным директором был К.А.В.2, ООО «Интеграл Т» осуществляло строительство домов в п.г.т. Яя, финансовой стороной в ООО «Интеграл-Т» занимался его старший сын К.А.В.2, а он занимался технической стороной, общался с главой Мяленко в период строительства только по техническим вопросам, со стороны администрации также контактировал с заместителем главы по ЖКХ и строительству Ш.О.В.. Из материалов его уголовного дела ему известно о том, что аванс был не доплачен в размере 15-16 млн. рублей. О каких-либо корыстных мотивах Мяленко ему не известно. В 2021 году были заключены контракты на 2 дома, когда они начали строительство, произошло увеличение цен в 3 раза, стоимость 1 м.кв. не была увеличена, физически не возможно было построить. При строительстве домов, оборотных средств было 216 млн. рублей, то есть 54 млн. рублей это были оборотные средства предприятия, остальные по контрактам, общая стоимость оценки на сегодняшний день, без проекта, демонтажных работ, без проведения подготовительного периода в рамках комплексного освоения 135 млн. рублей. По контрактам 2021 г. администрацией Яйского МО было перечислено около 115 млн. рублей, которые все были освоены. Арбитражным судом с ООО «Интеграл Т» по 17 муниципальным контрактам были приняты положительные решения в пользу Яйского муниципального округа. У организации ООО «Интеграл Т» основная масса наемная, часть технических средств была своя, в настоящее время организация находится в стадии ликвидации.

Дополнительно допрошенный в судебном заседании свидетель К.В.Н. пояснил, что из материалов дела и со слов его сына, ему известно, что контракты были подписаны главой Мяленко и генеральным директором ООО «Интеграл Т», всего 17 контрактов, обеспеченность контракта была 1%, авансовый платеж был заложен 90% от общей стоимости объекта строительства, более 130 млн. рублей, но оплата прошла только 115 млн. рублей. 

Свидетель К.А.В. в судебном заседании пояснил, что ООО «Интеграл Т» осуществляло строительство 2-х многоквартирных домов в п. Яя, он был начальником производственно-технического отдела, к договорам он отношения не имел, денежными средствами не управлял, занимался стройкой. Было возведено 3 этажа в одном доме и цокольный этаж во втором. Руководителем в ООО «Интеграл Т» был К.А.В.2, в настоящее время «Интеграл Т» находится в процедуре банкротства. Какую сумму администрация перечислила на счет «Интеграл Т» на строительство домов он не помнит, куда были потрачены денежные средства, поступившие от администрации точно не знает, думает, что на стройку.

Свидетель Д.Д.К. в судебном заседании пояснил, что примерно в 2021-2022 г. с ООО «Интеграл-Т» они заключили муниципальный контракт на аренду земли под застройку многоквартирных домов, было выдано разрешение на строительство, но дома не построили, только вырыли котлован и установили фундамент. Он контактировал со старшим и младшим К., они говорили, что у них есть собственные средства, потом выяснилось, что у них нет собственных средств. Внесение предоплаты за приобретение жилья или приобретение жилья путем инвестирования их контрактами не предусматривалось. Со стороны правительства Кузбасса производится оценка эффективности деятельности, как главы округа, когда идут строительные работы, ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, именно эффективное освоение денежных средств. Если по ряду причин не освоили денежные средства, то эти деньги оперативно перераспределяются на другие территории, это не очень хорошо для главы, если не освоены эти деньги, но в любом случае нарушать закон и осваивать не желательно, глава муниципалитета заинтересован в освоении выделенных бюджетных средств.

Свидетель Ю.В.В. в судебном заседании пояснил, что он работал главным специалистом сектора архитектуры и градостроительства администрации Яйского муниципального округа, непосредственно подчинялся заместителю главы Ш.О.В. и главе администрации. В его функциональные обязанности входила выдача разрешений на строительство. В 2020 году, когда он начал работать, строительство многоквартирных домов по адресу ул. Новый городок уже шло. Он выдавал разрешение на строительство ООО «Интеграл Т» в 2021 году, после предоставления руководителем ООО «Интеграл Т» необходимых документов. Он в рамках своих полномочий проверил представленные документы, они соответствовали требованиям закона, никаких нарушений не было выявлено, он выдал разрешение ООО «Интеграл Т» на строительство. Мяленко его не просил каким-то образом оказать содействие в подготовке этих документов. Разрешение на строительство впоследствии было отменено в связи с тем, что отсутствовала проектная документация на водоснабжение.

Свидетель В.М.А. в судебном заседании пояснила, что ООО «Интеграл Т» были застройщиками, строили два многоэтажных дома по ул. Новый городок, работали на основании контракта. С их стороны была только информация по проекту на строительный объект, выдача разрешения на строительство, по контрактам они никакой роли не играли, по заключению контрактов ей ничего не известно. На совещаниях говорили, что в рамках этих контрактов администрация Яйского округа должна была оплачивать 90% по контрактам на строительство. ООО « Интеграл Т» разрешение на строительство было два раза, одно разрешение было отменено специалистом из архитектуры Ю.В.В., потом она выдала другое, почему не достроили дома ей не известно. Ей давались указания выдать ООО «Интеграл-Т» разрешение на строительство, других указаний не было. Осенью 2021 года, вместе с Ю.В.В., Ш.О.В., с юристом, с главой она присутствовала на совещании по ВКС с министром по строительству ФИО2, были также оба К.. На этом совещании было сказано, что нужно отменять разрешение на строительство выданное ООО «Интеграл Т», у К. и Ш.О.В. была вспыльчивая реакция. С руководителем ООО «Интеграл Т» она лично не знакома, пару раз виделась на совещаниях. В момент совещаний у главы иногда были всплески агрессивных эмоций, при большом количестве людей мог нецензурно выразиться в сторону подчиненного, мог что-нибудь кинуть, например телефон в стену.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля В.М.А., в части дачи ФИО1 указаний Ю.В.В., которые она подтвердила в судебном заседании (т. 20 л.д. 61 (4-й абзац)) следует, что к моменту ее трудоустройства в администрацию Яйского муниципального округа, разрешения на строительство указанных домов ещё не было, то есть строительство жилых домов велось в нарушении действующего законодательства без разрешения на строительство. Потом данное разрешение на строительство было выдано Ю.В.В., который на тот момент работал главным специалистом сектора архитектуры и градостроительства администрации Яйского муниципального округа, поскольку она к тому времени работала около 1 месяца и у нее не закончился испытательный срок, соответственно не было право подписи. Для этого глава Яйского муниципального округа ФИО1 пригласил ее к себе кабинет, где у него уже находились К.А.В.2 и Ю.В.В. В ее присутствии ФИО1 дал устное указание Ю.В.В. выдать разрешение ООО «Интеграл-Т» на строительство вышеуказанных жилых домов.

Свидетель О.И.В. в судебном заседании пояснил, что он был трудоустроен в организацию ООО «Интеграл Т» главным инженером проекта, при строительстве 2-х многоквартирных домов в п.г.т. Яя он принимал участие в проектировании, касался только проектной документации, по остальной документации он не касался, финансовой стороной он не интересовался. Один раз он участвовал на совещании с главой Яйского МО ФИО1, он присутствовал вместе с заместителем К.В.Н. К. говорил, что будет строить, подробности он не помнит, администрация Яйского МО перечислила в адрес ООО «Интеграл Т» аванс около 100 млн. рублей, на тот период это была достаточная сумма для строительства 2-х домов, почему не достроены эти дома ему не известно. 

Свидетель Г.Е.А. в судебном заседании пояснил, что по объекту строительства многоквартирных жилых домов Микрорайон Новый городок, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Яйский муниципальный округ, 

<

...> осуществлялся региональный государственный строительный надзор, он был назначен инспектором, застройщиком по объектам выступал ООО «Интеграл Т», который также осуществлял строительство. Первоначально о данном объекте они узнали, когда ООО «Интеграл Т» осуществлял строительство в отсутствии разрешения на строительство. На данный момент надзор за строительством прекращен с 03.05.2023 г., было решение Арбитражного суда Кемеровской области, так как строительство не велось более года, то обязали застройщика осуществить консервацию объекта. Первая проверка была 23.12.2020 г., которая была согласована с прокуратурой, были выявлены нарушения застройщиком ООО «Интеграл Т», оно было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5.1, ч. 2 ст. 9.5.1 КоАП РФ, директор ООО «Интеграл Т» К.А.В.2 был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5.6 и ч.2 ст. 9.5 КоАП РФ, было выдано предписание об устранении указанных нарушений. Первое разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ было выдано сектором архитектуры и градостроительства администрации Яйского муниципального округа сроком действия до 29.03.2022 г. Данное разрешение на строительство было отменено, в дальнейшем было выдано новое разрешение на строительство, проверки продолжились, при проведении проверок присутствовал главный инженер К.В.Н., при проведении первой проверки присутствовали представители администрации, на строительной площадке с главой администрации не встречались. Предметом надзора является выдача разрешения на строительство, осуществление строительства в определенные сроки, выполнение требований по проектной документации, получение положительной оценки эксперта, проверка финансовой части и выполнение контрактов, сроков выполнения работ, в его обязанности не входит.

Свидетель С.В.И. в судебном заседании пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в администрации Яйского МО консультантом советником по жилищным вопросам отдела ЖКХ. Она занималась постановкой на учет и ведением по очередности по категориям: дети-сироты, аварийное жилье, социальная категория граждан, с контрактами она не работала. С ООО «Интеграл Т» были заключены контракты на приобретение 72-х квартир, путем инвестирования, администрация выплатила аванс более 100 миллионов рублей. Квартиры предназначались для социальной категории граждан, ветхое жилье и дети-сироты. Также она принимала участие в подготовке распоряжений на перечисление денежных средств, наименование платежа было: перечисление авансовых платежей. В последнюю очередь распоряжение подписывал глава. О какой-либо заинтересованности бывшего главы Мяленко в ООО «Интеграл Т» ей не известно.

Свидетель П.В.М. в судебном заседании пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ год он работал в отделе по ЖКХ и строительству главным специалистом, потом консультантом-советником, находился в подчинении у заместителя главы Ш.О.В. В 

<

...> началась стройка многоквартирных домов для обеспечения квартирами переселенцев из ветхого жилья, детей-сирот. Он готовил отчеты по ходу строительства, также, по распоряжению от руководителя – Ш.О.В. он готовил распоряжения о перечислении денежных средств, заявку на финансирование, заместитель главы согласовывал с бухгалтерией, фин. управлением, зам. главы, окончательно подписывал глава. Мяленко распоряжение ему не давал. Денежные средства перечислялись в объемах финансирования, суммы он не помнит, процент авансирования от заключенных контрактов был 90%.

Свидетель Д.Ю.В. в судебном заседании пояснила, что с 2006 года работает в финансовом управлении, к ним поступают заявки от главных распорядителей бюджетных средств, которыми являются администрация, управление образования, КУМИ. специалист смотрит заявку на превышение лимитов, если это областные средства, то поступали ли такие средства, они финансируют, делают расходное расписание, подписывают, отдают начальнику бюджетного отдела, дальше передают в бухгалтерию, они подписывают, передают руководителю, он подписывает и отправляет в казначейство. С контрактами она не работает. Лично ей, Мяленко каких-либо распоряжений не давал.

Свидетель Д.А.А. в судебном заседании пояснила, что работает в финансовом управлении с ДД.ММ.ГГГГ года, в своей работе она подчиняется своему руководителю С.Н.Н., в ее должностные обязанности входит заключение договоров от имени финансового управления, работает по 44 ФЗ, финансирование учреждений. Обязанности проверять муниципальные контракты, конкурсную документацию у нее нет, они проверяют по лицевому счету, есть ли лимиты, сумму заявки на соответствие. Решение об оплате принимает руководитель той организации, которую они финансируют. Заявки ей отдает начальник финансового отдела, затем она финансирует, глава администрации Мяленко каких-либо указаний ей не давал.

Свидетель И.С.В. в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ она работала главным специалистом бюджетного отдела в финансовом управлении Яйского МО, она формировала расходные расписания, занималась подготовкой проекта бюджета, подчинялась начальнику финансового управления С.Н.Н. и заместителю начальника Ш.Т.А.. Поступали целевые денежные средства на обеспечение жильем детей-сирот из областного бюджета. Каких либо финансовых документов, связанных с ООО «Интеграл Т» она не готовила, не проверяла, оплату не производила. По поводу строительства домов ей ничего не известно. Какие либо указания об оплате Мяленко ей не давал.

Свидетель С.Н.Н. в судебном заседании пояснила, что она работает в финансовом управлении ДД.ММ.ГГГГ года, непосредственно в своей работе подчиняется ДД.ММ.ГГГГ года главе администрации Яйского муниципального округа, по договору осуществляют техническое облуживание бюджета Яйского округа, финансируют только бюджетополучателей, таких как администрация МО, с подрядчиками на прямую они не работают. В бюджете как такового строительства не предусмотрено, денежные средства поступали на обеспечение жильем детей-сирот, на переселение из ветхого, аварийного жилья, на обеспечение жильем социальной категории граждан. По поводу заключенных муниципальных контрактах с ООО «Интеграл Т» ей ничего не известно, с контрактами и аукционной документацией она не работает, это не входит в ее полномочия, работает с заявками бюджетных организаций. Заявка от администрации приходит по электронной почте в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью главы администрации и главного бухгалтера. Мяленко ей никаких указаний по контрактам, в том числе, чтобы производить какие-то оплаты не давал, кто в администрации готовит проекты муниципальных контрактов, аукционную документацию, заявки ей не известно.

Свидетель С.А.П. в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ работала заместителем начальника отдела учета и отчетности администрации Яйского муниципального округа, исполняла обязанности начальника с ДД.ММ.ГГГГ года, с ДД.ММ.ГГГГ года начальник отдела. Она занималась закупками, по 44 ФЗ размещала исполнение муниципальных контрактов на электронной площадке, а именно, платежные поручения, акты выполненных работ. Она размещала платежное поручение на площадке по контракту с ООО «Интеграл Т», при ней было совершено два авансовых платежа по двум контрактам. Контроль содержания разделов муниципальных контрактов, объем финансирования в ее обязанности не входил, проекты документов готовил отдел ЖКХ, какую в этом роль играл юридический отдел она не знает. Как жителю п.г.т. Яя ей известно, что ООО «Интеграл Т» строили дома, финансирование было из областного бюджета. Администрацией в рамках муниципальных контрактов была произведена оплата авансирования на сумму 115 млн. рублей. Подписание кассовых заявок осуществлялось электронным документооборотом, электронной цифровой подписью, подписывали глава администрации и начальник отдела учета и отчетности. Электронная цифровая подпись главы находилась у начальника отдела учета и отчетности, сначала у К.Г.А., затем у нее, составляется распоряжение на совершение платежа, глава подписывает личной подписью на бумажном носителе распоряжение, после этого они делают заявку в финансовое управление на финансирование и подписывают электронной подписью главы. В период занимаемой должности, лично ей глава Мяленко каких-либо указаний подписать, разместить, не давал. 

Свидетель К.Г.А. в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала начальником отдела учета и отчетности администрации Яйского МО, с ООО «Интеграл Т» были заключены контракты на приобретение квартир путем инвестирования, было несколько контрактов, по этим контрактам администрация производила авансирование до 90%, по некоторым 50%. Она изучала контракты на предмет их содержания, смотрела только свою часть, что касается бухгалтерии, сроки, реквизиты. Они проверяли сумму цены контракта, порядок санкционирования позволял перечислять на строительство до 90%, распоряжение на бумажном носителе подписывала она, юристы, отдел ЖКХ и Мяленко. Электронной цифровой подписью подписывалась заявка на кассовый расход, электронные подписи находились у нее, так было удобнее перечислять деньги, поскольку Мяленко не всегда был на месте, он был в курсе всех переводов, поскольку он подписал распоряжение на бумажном носителе.

Свидетель Ш.Т.А. в судебном заседании пояснила, что работает начальником бюджетного отдела финансового управления администрации Яйского муниципального округа, по поводу строительства не может ничего пояснить, их работа заключается в финансировании на основании заявок от администрации, в соответствии с поступившими денежными средствами из областного бюджета в пределах лимита в соответствии с бюджетной росписью. В их обязанности входит проверить классификацию, есть ли на это лимиты и поступили ли деньги. Отношения к подготовке проектов конкурсной документации, муниципальных контрактов они не имеют. По контрактам они ничего не перечисляют, перечисляют в соответствии с заявкой, финансируют администрацию, например на переселение из ветхого жилья, конкретно ООО «Интеграл Т», оплата не производилась. Как жителю ей известно, что дома на 

<

адрес> городок не достроены, кто строил и почему они не достроены ей не известно.

Свидетель П.Д.А. в судебном заседании пояснил, что до февраля 2022 года работал специалистом по направлению бюджетных денежных средств в финансовом управлении администрации Яйского муниципального округа, в его документах организация ООО «Интеграл Т» не фигурировала, фамилия К. и ООО «Интеграл Т» ему известны только из СМИ, В вопросах заключения муниципальных контрактов он не участвовал.

Специалист М.А.И. в судебном заседании пояснил, что ранее он работал заместителем начальника главного контрольного управления Кузбасса, проверял законность заключения муниципальных контрактов в соответствии с 44-ФЗ. По муниципальным контрактом, которым предусмотрено 90% аванса, обеспечение должно быть не меньше аванса. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний специалиста М.А.И. (т. 22 л.д. 29-39), которые он подтвердил в судебном заседании следует, что при заключении контрактов №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ заказчиком нарушены положения ч. 1 ст. 422 ГК РФ, п. 1 ч. 6 ст. 96 ФЗ-44, поскольку установлены незаконные размеры обеспечения исполнения контракта, которые не соответствуют предусмотренному авансу и не обеспечивают возможности отсутствия причинения ущерба бюджету в тех случаях, когда исполнитель муниципального контракта не исполняет в полной мере (полностью) договорные обязательства. Также, в соответствие с «Законом о контрактной системе», каждый из указанных контрактов заключен по результатам отдельного электронного аукциона, для участия в котором участником аукциона (представителями ООО «Интеграл-Т») изготавливалась своя индивидуальная заявка, по результатам изучения которой подводились итоги аукциона и заключался муниципальный контракт. Наличие рынка первичного жилья свидетельствует о возможности администрации Яйского МО в лице главы Яйского МО ФИО1 приобрести жилые помещения, помимо ООО «Интеграл Т» у иных заинтересованных лиц, которые в соответствии с законодательством РФ могли стать исполнителями по указанным муниципальным контрактам. Пояснил, что обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать возможность отсутствия причинения ущерба бюджету в тех случаях, когда исполнители муниципальных контрактов не выполняют в полной мере договорные обязательства. В случае, когда обеспечение исполнения контракта не обеспечивает отсутствие причинения ущерба, такой муниципальный контракт не может быть заключен, а в случае заключения, должен быть расторгнут, так как наличие банковской гарантии является существенным условием, в соответствии с которым проводятся конкурсные процедуры на право заключения муниципальных контрактов, непосредственно заключение муниципальных контрактов и их исполнение. Бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму неисполненных обязательств, таким образом, действия главы Яйского МО ФИО1 при заключении указанных муниципальных контрактов без мер по обеспечению исполнения контракта в сумме эквивалентной авансовым платежам, а также действия по перечислению таких платежей в рамках указанных муниципальных контрактов осуществлялись в нарушение норм действующего законодательства.

Из протокола осмотра места происшествия от 25.12.2023 (т. 11, л.д.1-18) следует, что осмотрена строительная площадка объекта: «Строительство первой очереди двух многоквартирных жилых домов по адресу: Яйский район, п.г.т. Яя в границах ул. Авиационная – ул. Болотная - ул. Новый городок – ул. Гвардейская (микрорайон «Новый городок»)», и земельного участка, на котором располагается данный объект. В ходе осмотра установлено отсутствие на данном земельном участке завершенных строительством двух многоквартирных жилых домов, наличие объектов несовершенного строительства в виде построенной коробки трехэтажного 2 (двух) подъездного многоквартирного дома, без установленных дверных и оконных блоков, без покрытия пола, стены не оштукатурены, инженерные сети не смонтированы, крыша отсутствует) и возведённого фундамента второго дома. Территория строительной площадки огорожена деревянным забором с элементами колючей проволоки. Вход на строительную площадку закрыт, охрана отсутствует.

Постановлением следователя, расположенные на земельном участке муниципального образования «Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса», являющегося законным владельцем (собственником) данного земельного участка объекты: «Строительство первой очереди двух многоквартирных жилых домов по адресу: Яйский район, п.г.т. Яя в границах ул. Авиационная – ул. Болотная - ул. Новый городок – ул. Гвардейская (микрорайон «Новый городок»)»: жилой дом корпус № 1 (№1) и жилой дом корпус № 2 (№ 1/1) приобщены к материалам уголовного дела № в качестве вещественных доказательств и переданы на ответственное хранение муниципальному образованию «Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса» (т. №11, л.д.19-28).

Согласно выписки ЕГРН от 16.10.2023 (т. 9 л.д. 29-35), ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ принадлежат объекты недвижимости: земельный участок, кадастровый №, вид права – собственность, местоположение: 

<

адрес>, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ; здание нежилое, кадастровый №, вид права – собственность, местоположение: 

<

адрес>, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ; машино-место, кадастровый №, вид права – собственность, адрес: 

<

адрес>, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ; жилое помещение, кадастровый №, вид права – общая совместная собственность, адрес: 

<

адрес>, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, обременение – ипотека в силу закона.

Согласно справки следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 209), согласно данным, имеющимся в свободном доступе сети Интернет, средняя рыночная стоимость автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», 2014 г.в. составляет 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно справки следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 210), согласно данным, имеющимся в свободном доступе сети Интернет, средняя рыночная стоимость лодочного прицепа марки «МЗСА 81771С» 2023 года выпуска составляет 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно акта экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 194-210), рыночная стоимость: земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> составляет 

<

данные изъяты> рублей; нежилого здания (гаража), расположенного по адресу: 

<

адрес>, составляет 

<

данные изъяты> рубль; машино-места, расположенного по адресу: 

<

адрес>, составляет 

<

данные изъяты> рублей; жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: адрес 

<

адрес>, составляет 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно определения Центрального районного суда г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (т. 30 л.д. 213), в соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ на имущество, принадлежащее ФИО1 наложен арест: 

- автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», идентификационный номер (VIN): №, 2014 год выпуска, государственный регистрационный знак №, средней рыночной стоимостью согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей;

- прицеп к легковому автомобилю марки «МЗСА 81771С», идентификационный номер (VIN): №, 2023 года выпуска, государственный регистрационный знак №, средней рыночной стоимостью согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 70 +/- 3 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

- нежилое здание (гараж), кадастровый №, площадью 54,3 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рубль;

- машино-место, кадастровый №, площадью 15,10 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

- жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 42 кв.м., расположенная по адресу: адрес 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, в виде запрета распоряжаться данным имуществом, путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества;

- денежные средства в пределах 50000 рублей в части имеющихся и поступающих на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», в виде запрета пользоваться и распоряжаться данным имуществом в любой форме.

Согласно сообщения ПАО Сбербанк от 01.12.2023 (т. 30 л.д. 226-227), определение суда № частично исполнено, на сумму 15048,92 руб.

Согласно заключения эксперта от 04.07.2023 (т. 6 л.д. 40-86), на расчетный счет ООО «Интеграл-Т» в филиал ПАО «Банк Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило по муниципальным контрактам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на сумму 115988655,75 руб. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие по указанным муниципальным контрактам израсходованы в сумме не менее 76324894,36 руб. 

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 10.05.2024 (т. 11, л.д.210-229), осмотрены: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу - на 1 л., в соответствии с которым в адрес СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбасса предоставлены перечисленные в нем результаты оперативно-розыскной деятельности, включая оптический диск DVD-R диск (т. 9, л.д.38); постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ - на 1 л., согласно которому заместитель начальника Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу постановил направить в адрес СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу результаты оперативно-розыскной деятельности, включая оптический диск DVD-R диск, рег. № №/DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д.39); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ - на 1 л., согласно которому принято решение снять гриф «Секретно» с результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» - аудиозаписей, содержащихся на оптическом диске DVD-R диск, рег. № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д.40); меморандум с копий аудиозаписей, перенесенных на единый носитель полученный при проведении ОРМ «Наблюдение» (DVD-R диск, peг. № № от ДД.ММ.ГГГГ), рег. № от ДД.ММ.ГГГГ - на 8 л., с изложением содержания фонограмм (аудиозаписей), разговор с участием ФИО1, содержащихся на данном оптическом диске (т. 9, л.д.41-48); оптический диск DVD-R диск, рег. № № от ДД.ММ.ГГГГ, с фонограммами (аудиозаписями) разговоров с участием ФИО1, представленный в числе результатов оперативно-розыскной деятельности с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от ДД.ММ.ГГГГ)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, включая файл с наименованием «

<

данные изъяты>», содержащим аудиозапись (фонограмму), которая по своему содержанию соответствует записи «ДД.ММ.ГГГГ 13:10:01» с участием ФИО1 и Ш.О.В., содержание которой изложено в указанном меморандуме, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, включая фрагмент диалога между ФИО1 и Ш.О.В., подтверждающий осведомленность ФИО1 о получении Ш.О.В. кредита, в погашение которого часть денег платил К. Ан.В., а также осведомленность ФИО1 о ненадлежащем обеспечении заключенных с ООО «Интеграл-Т» муниципальных контрактов, из-за чего он больше переживает; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л., в соответствии с которым в адрес СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбасса предоставлены перечисленные в нем результаты оперативно-розыскной деятельности, включая оптический диск CD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д.151); постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ - на 1 л., согласно которому заместитель начальника Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу постановил направить в адрес следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбасса результаты оперативно-розыскной деятельности, включая оптический диск CD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 152); копия постановления Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, уч. №сс от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № № от ДД.ММ.ГГГГ - на 1 л., о разрешении проведения в отношении ФИО1 оперативно-розыскных мероприятий, включая «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 9, л.д. 153); постановление о рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ - на 1 л., согласно которому принято решение снять гриф «Секретно» с результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», содержащиеся на оптическом диске CD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 154); меморандум расшифровки аудиозаписей, разговоров, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий – «Прослушивание телефонных переговоров» содержащихся на CD-R диске рег. № от ДД.ММ.ГГГГ - на 3 л., рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, с изложением содержания телефонных разговоров ФИО1 (т. 9, л.д. 155-157); оптический диск CD-R, №/CD-R от ДД.ММ.ГГГГ, с фонограммами (аудиозаписями) телефонных разговоров с участием ФИО1, представленный в числе результатов оперативно-розыскной деятельности с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на 202-98-2023 от ДД.ММ.ГГГГ)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, включая файл с наименованием «

<

данные изъяты>», содержащий аудиозапись (фонограмму), по своему содержанию соответствующую записи «Разговор № 1» между Ш.О.В. и ФИО1, изложенной в меморандуме расшифровки аудиозаписей, разговоров, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий – «Прослушивание телефонных переговоров», рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, включая фрагмент диалога между ФИО1 и Ш.О.В., подтверждающий предварительную согласованную между ними позицию отрицать свою осведомленность относительно необходимости надлежащего обеспечения (банковской гарантии) по заключенным муниципальным контрактам.

Постановлением следователя (т. 11 л.д. 230-233), осмотренные материалы из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, представленные с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № и сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 12.05.2024 (т. 11, л.д. 234-238), осмотрены: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на № от ДД.ММ.ГГГГ)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – на 1 л., в соответствии с которым в адрес СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбасса предоставлены перечисленные в нем результаты оперативно-розыскной деятельности, включая акт выездной проверки администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 с оптическим диском из Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу, а также письмо (ответ на запрос) № от ДД.ММ.ГГГГ из межрайонной инспекции ФНС № 15 Кемеровской области – Кузбассу (т. 10, л.д. 8); постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ - на 1 л., согласно которому заместитель начальника Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу постановил направить в адрес следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбасса результаты оперативно-розыскной деятельности, включая акт выездной проверки администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 с оптическим диском из Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу, а также письмо (ответ на запрос) № от ДД.ММ.ГГГГ из межрайонной инспекции ФНС № 15 Кемеровской области – Кузбассу (т. 10, л.д. 9); копия запроса № 96/16714 от 16.10.2023 в адрес Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу – на 1 л., о предоставлении акта выездной проверки администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 в бумажном и в электронном виде (т. 10, л.д. 10); сопроводительное письмо (ответ на запрос) от 19.10.2023 № 39-20-11/11-8841 из Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу - на 1 л., о предоставлении акта выездной проверки администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 в бумажном и в электронном виде на оптическом диске (т. 10, л.д. 11); акт выездной проверки администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 - на 39 л., в соответствии с которым управлением Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу в период с 24.10.2022 по 05.12.2022 проведена выездная проверка использования средств администрацией Яйского муниципального округа за период с 01.01.2017 по 01.12.2022, в ходе которой в числе прочих нарушений выявлены факты заключения администрацией Яйского муниципального округа с ООО «Интеграл-Т» в проверяемый период муниципальных контрактов на приобретение жилья в рамках программы переселения из аварийного жилья: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, размер обеспечения исполнения которых в соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 96, учитывая предусмотренный условиями указанных муниципальных контрактов размер аванса – 90 % от цены контракта, должен был составлять 90 % от цены контракта, то есть соответствовать размеру аванса, а администрацией Яйского муниципального округа в лице главы администрации при проведении закупочных процедур и заключении контрактов в нарушение ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено обеспечение исполнения контрактов в меньшем размере, чем размер аванса – 1 % от цены контракта. В соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактов системе обеспечение исполнения контракта – это денежные средства или независимая гарантия, которые участник закупки (в отдельных случаях поставщик, подрядчик, исполнитель) предоставляет с целью гарантировать исполнение своих контрактных обязательств. Факт нарушения при определении размера обеспечения муниципальных контрактов создает риск невозврата бюджетных средств при неисполнении подрядчиком своих обязательств (т. 10, л.д. 12-50); оптический диск CD-R, уч. № 118/23 от 18.10.2023, представленный с указанным сопроводительным письмом (ответом на запрос) от 19.10.2023 № 39-20-11/11-8841 из Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу, с электронной версией акта выездной проверки Администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 - (пакет (конверт) № 14); копия запроса № 96/17075 от 19.10.2023 в адрес межрайонной инспекции ФНС № 15 Кемеровской области – Кузбассу - на 1 л., о предоставлении сведений о физических лицах, в отношении которых ООО «Интеграл-Т» предоставляло сведения о доходах за период с 2020 по 2022 годы (т. 10, л.д. 51); письмо (ответ на запрос) № 13-10/007794 от 19.10.2023 из межрайонной инспекции ФНС № 15 Кемеровской области – Кузбассу - на 2 л., со сведениями о незначительном количестве штатных работников - физических лиц, в отношении которых ООО «Интеграл-Т» предоставляло сведения о доходах за период с 2020 по 2022 годы (т. 10, л.д. 52-53).

Постановлением следователя (т. 11 л.д. 239-241), осмотренные материалы из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, представленные с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Из протокола выемки от 19.04.2024 (т 10, л.д. 255-261) следует, что у врио главы Яйского муниципального округа Р.Е., обнаружены, изъяты и упакованы подлинники аукционной документации на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) по заключенным между администрацией Яйского муниципального округа и ООО «Интеграл-Т» по 17 муниципальным контрактам.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 24.04.2024 (т 11, л.д.182-194) следует, что осмотрены документы, изъятые 19.04.2024 в ходе выемки у врио главы Яйского муниципального округа Р.Е.: 1) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №, идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 169,8 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ с приложением) – на 31 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

2) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 169,8 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ с приложением) - на 31 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

3) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 169,8 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ с приложением) - на 31 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

4) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 152,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ с приложением) - на 51 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

5) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 152,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ с приложением) - на 30 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»; 

6) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 152,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ с приложением) - на 37 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

7) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 152,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ с приложением) - на 30 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

8) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 128,5 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений» (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ с приложением) - на 30 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

9) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 162,46 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021 с приложением) - на 31 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

10) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 177,9 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021 с приложением) - на 31 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»; 

11) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 153,86 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021 с приложением) - на 31 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

12) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 161,7 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021 с приложением) - на 31 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

13) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 172,56 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021 с приложением) - на 30 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

14) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 173,8 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 08.11.2021 с приложением) - на 31 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

15) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 173,4 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 29.11.2021 с приложением) - на 49 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В.; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»;

16) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 137,0 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 24.06.2022 с приложением) - на 35 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка, и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона;

17) аукционная документация администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме аукцион №: идентификационный код закупки: №, на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенной квартиры), общей площадью 28,4 кв.м., путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа (с заявкой на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от 12.07.2022 с приложением) - на 33 л., содержит извещение о проведении электронного аукциона и иную документацию с приложением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа; согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/, и по результатам ее проведения в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее члена П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка, и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона.

Постановлением следователя (т. 11 л.д. 195-205), осмотренные документы, аукционной документации на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) по заключенным между администрацией Яйского муниципального округа и ООО «Интеграл-Т» 17 муниципальным контрактам, изъятые 19.04.2024 в ходе выемки у врио главы Яйского муниципального округа Р.Е. документы, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно протокола обыска от 19.09.2023 (т. 10, л.д. 97-104), в помещении кабинета главы администрации Яйского муниципального округа ФИО1, а также в кабинетах № 2, 28, 10, 14, 19 здания администрации Яйского муниципального округа, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе обыска обнаружены, изъяты и упакованы следующие предметы и документы. В кабинете главы администрации Яйского муниципального округа ФИО1, осмотрен его личный мобильный телефон, марки redmi Note 8 Pro в корпусе зелено-голубого цвета, который упакован в крафтовый пакет № 1. В кабинете №2 отдела ЖКХ и строительства Администрации Яйского м/о изъяты документы: дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах, совместно с сопроводительным письмом на 1 листе; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; Дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; дополнительное соглашение к муниципальному контракту № на 4 листах; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №34/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №35/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №36/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №37/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №38/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №39/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №40/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №41/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №42/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 11.05.2022 №43/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №44/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 24.05.2022 №45/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 07.12.2022 №73/22-ит; сопроводительное письмо на 1 листе от 13.09.2022 №68/22-ит; уведомления на 12 листах от 25.05.2022 от №46/22-ит до №57/22-ит; дополнительные соглашения к муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ от № до №, совместно с сопроводительным письмом, скрепленные канцелярской скрепкой на 14 листах; акт осмотра от 26.10.2022 на 2 листах в 2 экземплярах; справка о завершении контрольных действия от 05.112.2022 на 1 листе; акт выездной проверки от 05.12.2022 на 39 листах; сопроводительное письмо от 14.04.2022 № 1.6-05г/1215 на 1 листе; сопроводительное письмо от 29.05.2023 №14/23-ИТ на 1 листе; дополнительные соглашения без дат от № до № и от № до №, № и № в двух экземплярах; мультифора содержащая сопроводительные письма на 10 листах, акт осмотра от 21.02.2023 на 3 листах, акт осмотра от 31.01:2023 на 4 листах, акт осмотра от 24.01.2023 на 4 листах, акт осмотра от 17.01.2023 на 3 листах, акт осмотра от 10.01.2023 на 3 листах, заявления о внесении изменения в разрешение на строительство от 28.02.2023 на 3 листах, программа проведения проверок №5 от 28.11.2022 на 5 листах, протокол №1 от 20.10.2022 на 3 листах, протокол № 2 от 28.10.2022 на 2 листах, протокол №3 от 01.11.2022 на 2 листах; вышеперечисленные документы упакованы в полиэтиленовый пакет №2. В кабинете №28 отдела ЖКХ и строительства Администрации Яйского м/о изъяты документы: пакет документов в отношении муниципальной программы Комплексное развитие жилищного строительства Яйского м/о», с обложкой постановления от 12.02.2020 № 124 на 51 листе; договор № 07/20 о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства от 26.05.2020 на 19 листах; проект планировки территории № 07/20 за 2020 год на 8 листах; проект межевания территории, скрепленный канцелярской скобой на 96 листах; проект планировки комплексного освоения территории, в целях строительства на земельном участке, расположенном по адресу: территория п.г.т. Яя.. . ул. Новый Городок.... № 07/20, брошюрованный; положение о территориальном планировании за 2021 год, пронумерованное с двух оборотов листов, в общем на 51 листе с двух оборотов; дополнительное соглашение №3 от 21.08.2020 на 3 листах; переписка от 26.06.2020 на 3 листах; сопроводительное письмо от 09.07.2020 №Яя-ис-02-319 на 1 листе; графики строительства за период с 2020 года до 2027 года на 7 листах; сопроводительное письмо от 28.07.2020 №1.2-06г/2556 на 1 листе; сопроводительное письмо от 08.07.2020 №49/20-ИТ на 1 листе; приказ №3 от 27.05.2020 на 1 листе; сопроводительное письмо на 1 листе от 08.07.2020 №49/20-ИТ; сопроводительное письмо на 1 листе от 22.07.2020 №51/20-ИТ; сопроводительное письмо на 1 листе от 31.08.2020 № 59/20-ИТ; переписка с МУП ЯТО на 3 листах на 2020 год; разрешение №2 на право производства земляных работ на 1 листе в 2 экземплярах; переписка с ООО «Интеграл-Т» за 2020 год на 6 листах; техническое задание от 05.2020 на 1 листе с двух оборотов в 3 экземплярах; дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2020 на 1 листе; дополнительное соглашение № 2 от 29.05.2020 на 1 листе в 2 экземплярах; банковская гарантия от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; банковская гарантия от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; договор аренды земельного участка №001/20 от 26.05.2020 на 4 листах; акты осмотра строительной площадки №1-3, 5-12, каждый на 1 листе; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; письмо от 18.12.2020 №1.2-06г/4212 на 3 листах; требование №2 от 14.04.2022 на 2 листах; требование №1 от 14.04.2022 на 2 листах; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; лист с рукописным текстом к контракту № на 1 листе; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; техническое условие № на 1 листе; письмо Интеграл-Т на 4 листах; письмо от ДД.ММ.ГГГГ №.6-05г/336 на 2 листах; письмо от 02.02.2021 №-03/02-ИТ на 1 листе; письмо от 13.05.2021 №20/05-ИТ на 1 листе; письмо от 14.02.2022 №04/22-ИТ на 1 листе; справка приобретение жилых домов путем инвестирования в строительство на 1 листе; платежные поручения №; документы в скобе черной с пометкой расторгнутые» (содержание - муниципальные контракты) на 98 листах; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; дополнительное соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт проверки №04-15(Н)-20-01 на 4 листах; письмо на ФИО3 от 19.04.2021 на 10 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; письмо от 12.05.2021 № 18/05-ИТ на 1 листе; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо от С.Е. №473 на 1 листе; письмо от 04.02.2021 №1.6-05г/336 на 1 листе; постановление №751 от 28.07.2020 на 1 листе; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ в мультифоре; мультифора с документами с пометкой на листе «1» на 9 листах; банковская гарантия от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, указанные документы упакованы в полиэтиленовый пакет №, также изъят блок от компьютера DEXP (код №), упакован в полиэтиленовый пакет №4. В кабинете № 10 Администрации Яйского м/о, изъято: папка бело-красного цвета с подписью Интеграл-Т, в которой содержатся документы; градостроительный план № на 5 листах; градостроительный план № на 8 листах; градостроительный план № на 4 листах; градостроительный план № на 4 листах; градостроительный план № на 4 листах; градостроительный план № на 4 листах; градостроительный план № на 4 листах; градостроительный план № на 4 листах; мультифора с 5-ю скрепленным перечнем документов: заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка за 2022 год; уведомление о выявлении самовольной постройки от 13.10.2021 совестно с актом проверки от 13.10.2021 на 14 листах, всего на 15 листах; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; протоколы проверки информации, содержащейся в уведомлении о выявлении самовольной постройки от 11.11.2021 на 2 листах совместно с актами проверки от 10.11.2021 на 2 листах; заявления о внесении изменений от 18.02.2023 на 2 листах; программа проведения проверок №5 от 28.11.2022 на 5 листах; договор № 01/21 от 10.02.2022 на 4 листах; протокол публичных слушании от: 16.12.2021 на 2 листах; заключение о результатах проведения публичных слушаний от 17.12.2021 на 1 листе; решение о внесении изменений в решение Совета народных депутатов №79 от 23.12.2013 г. на 11 листах; решение от 06.12.2021 № 37-а «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов.. . от 23.12.2013 №79» на 13 листах; оповещение о начале публичных слушаний на 1 листе; заключение о результатах публичных слушаний от 09.08.2021 на 1 листе; сведения о проведении публичных слушаний на 8 листах; решение от 08.09.2021 № 43 на 3 листах; технический отчет «строительство теплотрассы в п.г.т. Яя от котельной 2Новая больница» до микрорайона «Новый городок» том №1 экз. №5 ООО «Интеграл-Т» на 71 листе; технический отчет «строительство 2-х (двух) многоквартирных жилых дома по адресу: 

<

...> (первая очередь)» том №1 экз. №5 на 69 листах; переписка с организациями в черной скобе на 68 листах; оптический диск с информацией об отчетах с отдела архитектуры, указанные документы и объект упакованы в полиэтиленовый пакет №5. В кабинете № 14-КУМИ Администрации Яйского м/о, изъято: договор аренды земельного участка №8/21 от 08.02.2021 совместно с платёжным поручением; договор аренды земельного участка №9/21 от 08.02.2021 совместно с платёжным поручением; договор аренды земельного участка №10/21 от 08.02.2021 совместно с платёжным поручением; договор аренды земельного участка №11/21 от 08.02.2021 совместно с платёжным поручением; договор аренды земельного участка №12/21 от 08.02.2021 совместно с платёжным поручением; договор аренды земельного участка №13/21 от 08.02.2021 совместно с платёжным поручением; договор аренды земельного участка №14/21 от 08.02.2021 совместное платёжным поручением; договор аренды земельного участка №15/21 от 08.02.2021 совместное платёжным поручением; договор аренды земельного участка №16/21 от 08.02.2021 совместно с платёжным поручением; договор аренды земельного участка №001/20 от 26.05.2020; договор аренды земельного участка № 47/20 от 25.11.2020; договор №01/21 о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 10.02.2022; короб желтого цвета с документами на ООО «Интеграл-Т»; оптический диск с отчетами на микрорайон Новый городок, сведения на который записаны с компьютера председателя КУМИ Администрации Яйского м/о, указанные документы и объект упакованы в полиэтиленовый пакет №6. В кабинете № 19 Администрации Яйского м/о, изъято: папка бордового цвета с надписью «Строительство, Новый городок 2021-2022», которая упакована в полиэтиленовый пакет №7. 

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 29.09.2023 (т. 11, л.д. 29-97), осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по 

<

адрес>, а именно копии: муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области-Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области-Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включа: платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области-Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области-Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области-Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области-Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области-Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения???, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений», с приложениями и документами к нему, включая счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, с приложениями и документами к нему, включая независимая гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенная квартира) гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, с приложениями и документами к нему, включая копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протокола обыска от 13.10.2023 (т. 10, л.д. 148-155), в помещении бухгалтерии, а также в кабинете главы администрации Яйского муниципального округа были в ходе обыска были изъяты: подлинники распоряжений о перечислении денежных средств по муниципальным контрактам, заключенным в период с 2020 по 2022 г. с ООО «Интеграл-Т» на приобретение квартир в строящихся домах; подлинники заявок на кассовый расход и расходные расписания администрации Яйского МО по данным муниципальным контрактам; платежные поручения по муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Интеграл-Т» на приобретение квартир в строящихся домах на 65 л., которые были прошиты и опечатаны. 

Согласно протокола обыска от 17.10.2023 (т. 10, л.д. 187-192) в помещении служебного кабинета заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству администрации Яйского муниципального округа по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Яйский муниципальный округ, 

<

...>, в ходе обыска обнаружены, изъяты и упакованы следующие документы: решение об избрании главы Яйского муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ; решение о вступлении главы Яйского муниципального округа в должность № от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал и копия); устав муниципального образования Яйский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса; решение о вступлении главы Яйского муниципального района в должность № от ДД.ММ.ГГГГ; копии писем от 16.09.2021 № 1.6-05г/2864, № 1.6-05г/2865, от 23.09.2021 № 1.6-05г/2936, от 18.10.2021 № 1.6-05г/3247; 3 подшивки с заявками на кассовый расход и платежные поручения за 2020, 2021, 2022 г. на 92 л., на 182 л., на 35 л.; подшивка с распоряжениями администрации Яйского муниципального округа о перечислении денежных средств за период с 2020 по 2022 г. на 20 л.; характеристика на ФИО1; подшивка с кадровыми документами на Ш.О.В. на 48 л.; 3 подшивки реестра расходных расписаний за 2020, 2021, 2022 г.г., которые были упакованы в полиэтиленовый пакет. 

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 13.05.2024 (т. 12, л.д.17-47), осмотрены документы, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес>, в том числе:

- муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области - Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области - Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области-Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области - Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области - Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области - Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 3 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области - Кузбасс для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения???, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений», с приложениями и документами к нему, включая счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с приложениями и документами к нему, включая платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, с приложениями и документами к нему, включая независимая гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения №1 от ДД.ММ.ГГГГ; муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенная квартира) гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, с приложениями и документами к нему, включая копия дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ. 

- документы, изъятые 17.10.2023 в помещении служебного кабинета заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес>, в том числе: заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжения Администрации Яйского муниципального округа «О перечислении денежных средств» №-р от ДД.ММ.ГГГГ (по муниципальным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), №-р от ДД.ММ.ГГГГ (по муниципальным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ), №-р от ДД.ММ.ГГГГ (по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ), №-р от ДД.ММ.ГГГГ (по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ), №-р от ДД.ММ.ГГГГ (по муниципальным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ), №-р от ДД.ММ.ГГГГ (по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ), №-р от ДД.ММ.ГГГГ; решение об избрании главы Яйского муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ; решение о вступлении главы Яйского муниципального округа в должность № от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал и копия); устав муниципального образования Яйский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса; решение о вступлении главы Яйского муниципального района в должность № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма от 16.09.2021 № 1.6-05г/2864 администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области в лице ФИО1 в адрес заместителя председателя правительства Кемеровской области – Кузбасса П.Е.; 

- платежные поручения, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес>: 

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 19, л.д.82-87);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.105-111);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.127-133);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.145-150);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.163-168);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.179-183);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.188-189);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.194-195);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.200-201);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.211-215);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.220-221);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.225-226);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.233-235);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.239-240);

платежные поручения по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.243-244);

платежное поручение по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.249);

платежное поручение по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.252). В ходе осмотра зафиксированы индивидуальные признаки осмотренных документов и содержащаяся в них информация, имеющая значение для уголовного дела.

Согласно протокола обыска от 19.09.2023 (т. 10, л.д. 89-94), в жилище К. Ал.В. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены, изъяты и упакованы: картонная коробка с надписью «SvetoCopy», содержащая документацию организации ООО «Интеграл-Т»; смартфон «Realme 5», принадлежащий К.А.В.2; смартфон «Realme С3», принадлежащий К.А.; картонная коробка от пылесоса, содержащая документы организации ООО «Интеграл-Т», ежедневники; персональный компьютер с системным блоком в корпусе «Zalman», который со слов К.А.В.2 до 2022 года использовался им для работы в ООО «Интеграл-Т»; ноутбук «Asus» модели FX 70611-Y7059 с зарядным устройством, в сумке. 

Согласно протокола обыска от 17.10.2023 (т. 10, л.д. 201-208), в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе обыска был изъят мобильный телефон «Tecno Spark» модель «Tecno BF7n», который был упакован в бумажный пакет и опечатан.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 30.01.2024 (т. 11, л.д.126-132) осмотрен мобильный телефон ФИО1 марки «Tecno Spark» модель «Tecno BF7n», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. В приложении обмена сообщениями «WhatsApp» имеются сообщения переписки ФИО1 с главой Юргинского муниципального округа Д.Д.К. (№) от 17.10.2022, из которых следует, что Мяленко пояснил ФИО4 о том, что план ввода Яйский округ провалил. Также Мяленко пояснил, что платил деньги в рамках инвестиционных договоров 90%, за два года 65млн., со стоимостью 1 м2 56 тыс. руб.

Согласно протокола обыска от 17.10.2023 (т. 10, л.д. 214-222), в служебном кабинете главы Яйского муниципального округа и в приемной, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в ходе обыска были обнаружены и изъяты различные документы, ноутбук марки «Dexp» модель «Aquilon O144», которые были упакованы и опечатаны.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 (т. 12 л.д. 60-208), в ходе осмотра осмотрены: предмет и документы, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес>; документы, изъятые 17.10.2023 в ходе обыска в служебном кабинете главы Яйского муниципального округа ФИО1 и в приемной к данному кабинету, расположенных по адресу: 

<

адрес>; документы, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в жилище К. Ал.В. по адресу: 

<

адрес>; документы, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в жилище К.В.Н. по адресу: 

<

адрес> документы, изъятые 12.10.2023 в ходе выемки у свидетеля Д.Д.К. в помещениях администрации Юргинского муниципального округа по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра зафиксированы индивидуальные признаки осмотренных предметов и документов, и содержащаяся в них информация, имеющая значение для уголовного дела.

Из решения Совета народных депутатов Яйского муниципального района № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 1) следует, что полномочия главы Яйского муниципального района ФИО1, избранного Советом народных депутатов Яйского муниципального района ДД.ММ.ГГГГ, начаты с ДД.ММ.ГГГГ.

Из решения Совета народных депутатов Яйского муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 15, л.д. 2) следует, что ФИО1 избран главой Яйского муниципального округа.

Из решения Совета народных депутатов Яйского муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 4) следует, что полномочия главы Яйского муниципального округа ФИО1, избранного Советом народных депутатов Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ, начаты с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно копии трудовой книжки ФИО1 (т. 13, л.д. 27-36), в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлся главой администрации Яйского муниципального района, после чего с ДД.ММ.ГГГГ избран главой Яйского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса.

Из решения Совета народных депутатов Яйского муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 176) следует, что принята отставка главы Яйского муниципального округа ФИО1 по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 177), на основании решения Совета народных депутатов Яйского муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО1 расторгнут трудовой договор по инициативе работника п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

В соответствии с уставом муниципального образования Яйский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса, зарегистрированный в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 23.03.2020 г. (т. 15 л.д. 5-70) ст. 33 Устава содержит полномочия главы Яйского муниципального округа ФИО1, в том числе: представлять Яйский муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени муниципального образования (пункт 1 часть 1 статьи 48); издавать в пределах своих полномочий правовые акты (пункт 3 часть 1 статьи 33); обеспечивать осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области – Кузбасса (пункт 5 часть 1 статьи 33); руководить деятельностью администрации Яйского муниципального округа (пункт 7 часть 1 статьи 33); от имени Яйского муниципального округа своими действиями осуществлять имущественные права и обязанности (пункт 12 часть 1 статьи 33); разрабатывать и вносить на рассмотрение Совета народных депутатов Яйского муниципального округа проект бюджета Яйского муниципального округа, программы и планы социального развития Яйского муниципального округа, организовывать их исполнение (пункт 13 часть 1 статьи 33); распоряжаться средствами администрации Яйского муниципального округа, подписывать финансовые документы (пункт 19 часть 1 статьи 33); заключать от имени администрации Яйского муниципального округа договоры, муниципальные контракты в пределах своей компетенции (пункт 21 часть 1 статьи 33).

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 15 л.д. 72-102) аукцион № на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9445040,10 руб., количество 169,8 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т»1

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 15 л.д. 103-121), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 9445040,10 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 контракта, что составляет 8500536,09 руб. (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы контракта, указанной в п. 3.1 контракта, что составляет 944504,01 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 94450,40 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 119), уточнены адреса и банковские реквизиты застройщика ООО «Интеграл-Т».

Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 118), приложение № 2 к муниципальному контракту изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, по адресу Кемеровская область-Кузбасс, 

<

...>, 6, 11, 12, 13.

Согласно дополнительного соглашения 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 117), уточнены п.п. 3.2.2 и п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта. 

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2598 от 14.08.2023 (т. 15 л.д. 120-121), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 6 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 15 л.д. 122-152) аукцион № на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9445040,10 руб., количество 169,8 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 15 л.д. 153-170), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 9445040,10 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 контракта, что составляет 8500536,09 руб. (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы контракта, указанной в п. 3.1 контракта, что составляет 944504,01 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 94450,40 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 168), уточнены адреса и банковские реквизиты застройщика ООО «Интеграл-Т».

Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 167), приложение № 2 к муниципальному контракту изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, по адресу Кемеровская область-Кузбасс, 

<

...>, 20, 23, 24, 25.

Согласно дополнительного соглашения 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 166), уточнены п.п. 3.2.2 и п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта. 

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2601 от 14.08.2023 (т. 15 л.д. 169-170), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 6 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 15 л.д. 171-201) аукцион № на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9445040,10 руб., количество 169,8 кв. м., размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 15 л.д. 202-221), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 9445040,10 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 контракта, что составляет 8500536,09 руб. (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы контракта, указанной в п. 3.1 контракта, что составляет 944504,01 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 94450,40 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://

<

адрес> участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 218), уточнены адреса и банковские реквизиты застройщика ООО «Интеграл-Т».

Из дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 217), приложения № 2 к муниципальному контракту следует, что оно изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, по адресу Кемеровская область-Кузбасс, 

<

...>, 32, 37, 38, 39.

Согласно дополнительного соглашения 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 219), уточнены п.п. 3.2.2 и п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта. 

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2602 от 14.08.2023 (т. 15 л.д. 169-170), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 6 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 16 л.д. 1-51) аукцион № на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. 

<

адрес> – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8482736,25 руб., количество 152,5 кв. м., аванс 90 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 16 л.д. 52-69), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 8482736,25 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 контракта, что составляет 7634462,63 руб. (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы контракта, указанной в п. 3.1 контракта, что составляет 848273,62 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 84827,36 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 65), уточнены адреса и банковские реквизиты застройщика ООО «Интеграл-Т».

Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 66), приложение № 2 к муниципальному контракту изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, по адресу Кемеровская область-Кузбасс, 

<

...>, 4, 5, 10.

Согласно дополнительного соглашения 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 67), уточнены п.п. 3.2.2 и п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта. 

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2606 от 15.08.2023 (т. 16 л.д. 68), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 5 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 16 л.д. 70-99) аукцион № на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8482736,25 руб., количество 152,5 кв. м., аванс 44,80 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 16 л.д. 100-119), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 8482736,25 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 5634462,63 руб. в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); авансовый платеж в размере 848273,62 руб. в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта); окончательный расчет в размере 2000000 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год (п. 3.2.3 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 84827,36 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 116), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором путем перечисления средств на расчетный счет застройщика в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 3800165,00 руб. в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 4682571,25 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта), а также уточнены адреса и банковские реквизиты застройщика ООО «Интеграл-Т».

Согласно дополнительного соглашения 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 115), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы контракта, указанной в п. 3.1 контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта).

Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 117), приложение № 2 к муниципальному контракту изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, по адресу Кемеровская область-Кузбасс, 

<

...>, 16, 18, 21.

Согласно дополнительного соглашения 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 114), уточнены п.п. 3.2.2 и п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта. 

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2604 от 14.08.2023 (т. 16 л.д. 118), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 5 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 16 л.д. 120-156) аукцион № на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8482736,25 руб., количество 152,5 кв. м., аванс 76,42 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 16 л.д. 157-176), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 8482736,25 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 3800165,00 руб. в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 4682571,25 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 84827,36 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 172), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором путем перечисления средств на расчетный счет застройщика в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 5634462,63 руб. в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); авансовый платеж в размере 848273,62 руб. в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта); окончательный расчет в размере 2000000 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год (п. 3.2.2 контракта), а также уточнены адреса и банковские реквизиты застройщика ООО «Интеграл-Т».

В силу дополнительного соглашения 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 171), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в сумме 7634461,63 руб., в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в сумме 848274,62 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта).

Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 173), приложение № 2 к муниципальному контракту изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, по адресу Кемеровская область-Кузбасс, 

<

...>, 24, 25, 19.

Из дополнительного соглашения 3 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 174) следует, что уточнены п.п. 3.2.2 и п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта. 

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2605 от 14.08.2023 (т. 16 л.д. 175-176), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 5 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 16 л.д. 177-206) аукцион № на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8482736,25 руб., количество 152,5 кв. м., аванс 65.17 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 16 л.д. 207-224), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения жилых прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 8482736,25 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере до 44,88 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); авансовый платеж в размере до 20,29 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта); окончательный расчет в размере до 34,83 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год (п. 3.2.3 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 84827,36 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 221), уточнены адреса и банковские реквизиты застройщика ООО «Интеграл-Т».

Согласно дополнительного соглашения 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 220), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере до 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере до 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта).

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 222), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в сумме 7634462,61 руб., в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в сумме 848273,64 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год (п. 3.2.2 контракта), а также уточнен п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2603 от 14.08.2023 (т. 16 л.д. 223-224), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 5 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 17 л.д. 1-30) аукцион № на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 7147748,25 руб., количество 128,5 кв. м., аванс 53,33 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 17 л.д. 31-48), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 7147748,25 руб., в том числе на 2021 год – 3811800,00 руб., на 2022 год – 3335948,25 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 53,33 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 46,67 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 46), изменен порядок оплаты контракта, а именно, авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта), а также уточнен п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта.

Согласно дополнительного соглашения № 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 45), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в сумме 3811800,00 руб., в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, авансовый платеж в сумме 2621173,43 руб., в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в сумме 714774,82 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи не более 7 рабочих дней с даты подписания инвестором в ЕИС документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год (п. 3.2.2 контракта) также уточнен п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2599 от 14.08.2023 (т. 17 л.д. 47-48), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 3 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 17 л.д. 49-79) аукцион № на приобретение 4 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9036756,27 руб., количество 162.46 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

В соответствии с муниципальным контрактом № с приложениями (т. 17 л.д. 80-96), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 9036756,27 руб., в том числе на 2021 год – 8133080,64 руб., на 2022 год – 903675,63 руб., бюджет Яйского муниципального округа. 

В силу п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www

<

адрес> участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 94), приложения № к муниципальному контракту соглашение изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, а именно, квартиры 15, 7, 1, 13.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа №.6-05г/2600 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 95-96), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 4 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 17 л.д. 97-127) аукцион № на приобретение 6 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9895598,55 руб., количество 177.9 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 17 л.д. 128-145), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 9895598,55 руб., в том числе на 2021 год – 9806038,69 руб., на 2022 год – 989559,86 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес> участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 143), изменен п. 3.1 контракта в части цены контракта, а именно, цена контракта составляет 9895598,55 руб., в том числе на 2021 год – 8906038 руб., на 2022 год – 989559,86 руб.

В силу дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 142), приложения № 2 к муниципальному контракту соглашение изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

<

...>, а именно, квартиры 27, 40, 28, 33, 34, 42.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/3066 от 27.09.2023 (т. 17 л.д. 144-145), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 6 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 17 л.д. 146-176) аукцион № на приобретение 4 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8558385,57 руб., количество 153.86 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 17 л.д. 177-192), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 8558385,57 руб., в том числе на 2021 год – 7702547,01 руб., на 2022 год – 855838,56 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/3167 от 05.10.2023 (т. 17 л.д. 191-192), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 4 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта №, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 17 л.д. 193-223) аукцион № на приобретение 4 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, идентификационный код закупки: № Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8994481,65 руб., количество 161.7 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 17 л.д. 224-239), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 8994481,65 руб., в том числе на 2021 год – 8095033,48 руб., на 2022 год – 899448,17 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/3378 от 25.10.2023 (т. 17 л.д. 238-239), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 4 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта №, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 18 л.д. 1-30) аукцион № на приобретение 6 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9598563,72 руб., количество 172,56 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 18 л.д. 31-47), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 9598563,72 руб., в том числе на 2021 год – 8638707,35 руб., на 2022 год – 959856,37 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 45), приложение № 2 к муниципальному контракту изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

<

...>, а именно, квартиры 18, 20, 27, 28, 29, 34.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2739 от 28.08.2023 (т. 18 л.д. 46-47), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 6 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта №, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 18 л.д. 48-78) аукцион № на приобретение 4 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9667538,10 руб., количество 173,8 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее членов Н.М.А., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т», и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 18 л.д. 79-97), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 9667538,10 руб., в том числе на 2021 год – 8700784,29 руб., на 2022 год – 966753,81 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 93-95), название муниципального контракта изменено на «приобретение в муниципальную собственность 4 благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ», также, изменения в п. 2.1 муниципального контракта, а именно, предметом контракта является приобретение в муниципальную собственность Яйского муниципального округа 4 благоустроенных квартир. Кроме того, внесены изменения в приложение № 1 к муниципальному контракту в части описания технического задания (объекта закупки), а также приложение № 2 к муниципальному контракту изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, а именно, квартиры 21, 1, 14, 10.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/3166 от 05.10.2023 (т. 18 л.д. 96-97), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 4 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта №, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 18 л.д. 98-146) аукцион № на приобретение 5 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9645288,30 руб., количество 173,4 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов Н.М.А., У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка - ООО «Интеграл-Т» и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона - ООО «Интеграл-Т».

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 18 л.д. 147-163), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 9645288,30 руб., в том числе на 2021 год – 8680759,47 руб., на 2022 год – 964528,83 руб., бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и подписания сторонами акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения 1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 161), название муниципального контракта изменено на «приобретение в муниципальную собственность 5 жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ».

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/3379 от 24.10.2023 (т. 18 л.д. 162-163), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 5 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта №, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 18 л.д. 164-198) аукцион № на приобретение 3 жилых помещений гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8159172,00 руб., количество 137 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М. и ее членов У.Н.М., П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка, и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона.

Согласно муниципального контракта № с приложениями (т. 18 л.д. 199-215), администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 8159172,00 руб. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, что составляет 7343257,80 руб., в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от общей суммы, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, что составляет 815917,20 руб., производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в срок, не более 7 рабочих дней с даты подписания инвестором в ЕИС документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 81591,72 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 213), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в сумме 7343254,80 руб., в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в сумме 815917,20 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания инвестором в ЕИС документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год (п. 3.2.2 контракта) также уточнен п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2597 от 15.08.2023 (т. 18 л.д. 214-215), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 3 квартир, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта №, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно аукционной документации администрации Яйского муниципального округа по аукциону в электронной форме (т. 19 л.д. 1-33) аукцион № на приобретение 1 жилого помещения гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, идентификационный код закупки: №. Документация содержит в себе заявку на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о проведении электронного аукциона, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект муниципального контракта с приложениями к нему, подготовлена администрацией Яйского муниципального округа, подписана ФИО1 и Ш.О.В. Согласно аукционной документации данной закупки она размещена администрацией Яйского муниципального округа в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/. Согласно извещения о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1691390,40 руб., количество 28.4 кв. м., аванс 90.00 %, размер обеспечения исполнения контракта 1.00 %, источник финансирования – бюджет Яйского муниципального округа. В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным аукционной комиссией в составе председателя Ж.М., заместителя председателя Н.И.В. и ее члена П.Е.В., аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка, и аукционной комиссией подтверждена возможность заключения муниципального контракта с единственным участником данного аукциона.

Из муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т. 19 л.д. 34-51) следует, что администрация Яйского муниципального округа в лице главы Яйского муниципального округа ФИО1 заключила контракт с ООО «Интеграл-Т» в лице генерального директора К.А.В.2 на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенной квартиры) гражданам, имеющим право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Яйского муниципального округа, путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. В соответствии п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 1691390,40 руб. В соответствии с п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в размере 90 % от цены контракта, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в размере 1522251,36 руб., в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в размере 10 % от цены контракта, указанной в п. 3.1 муниципального контракта, в размере 169139,04 руб., производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в срок, не более 7 рабочих дней с даты подписания инвестором в ЕИС документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.2 контракта). Согласно п. 4.1 контракта, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осуществлен застройщиком не позднее 01.10.2022 г. В соответствии с п. 8.1 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 % от цены контракта и составляет 16913,90 руб. Указанный муниципальный контракт подписан электронными подписями в информационной системе по адресу: http://www.

<

адрес>/ участником генеральным директором ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком главой Яйского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Из дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 49) следует, что приложение № к муниципальному контракту изложено в новой редакции, а именно, установлен перечень квартир, расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

<

...>, а именно, квартира № 35.

Согласно дополнительного соглашения № 2 к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 48), изменен порядок оплаты контракта, а именно, п. 3.2 контракта, оплата строительства объекта осуществляется инвестором (администрацией Яйского муниципального района) путем перечисления средств на расчетный счет застройщика (ООО «Интеграл-Т») в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии предельных объемов финансирования, в порядке: авансовый платеж в сумме 1522251,36 руб., в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (п. 3.2.1 контракта); окончательный расчет в сумме 169139,04 руб. производится после предоставления инвестору полученного застройщиком разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания инвестором в ЕИС документов о приемке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год – 1522251,36 руб., пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год – 169139,04 руб. (п. 3.2.2 контракта) также уточнен п. 13.1 контракта, в части сроков действия контракта.

В соответствии с решением администрации Яйского муниципального округа № 1.6-05г/2596 от 15.08.2023 (т. 18 л.д. 50-51), в связи с нарушением застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность 1 квартиры, предусмотренных п. 4.1 – 4.3 муниципального контракта №, инвестором принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно распоряжения Администрации Яйского муниципального округа №-р от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 52-53), в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального округа», администрации Яйского МО перечислить поступившие денежные средства в сумме 10634241 руб. согласно заключенным муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство, в том числе по муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ – 8133080,64 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 2501161,26 руб.

Согласно распоряжения Администрации Яйского муниципального округа №-р от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 54), в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального округа», администрации Яйского МО перечислить поступившие денежные средства в сумме 3811800 руб. согласно заключенному муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений путем инвестирования в строительство, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно распоряжения Администрации Яйского муниципального округа №-р от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 55-56), в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального округа», администрации Яйского МО перечислить поступившие денежные средства в сумме 8703025,88 руб. согласно заключенным муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство, в том числе по муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ – 4918530,44 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 3784495,44 руб.

Согласно распоряжения Администрации Яйского муниципального округа №-р от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 57), в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального округа», для обеспечения жилых прав детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, администрации Яйского МО перечислить денежные средства в сумме 4722520,08 руб. согласно заключенному муниципальному контракту на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно распоряжения Администрации Яйского муниципального округа №-р от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 58), в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального округа», для обеспечения жилыми помещениями граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2003 № 129 ОЗ, администрации Яйского МО перечислить денежные средства в сумме 2621173,43 руб. согласно заключенному муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно распоряжения Администрации Яйского муниципального округа №-р от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 59), в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального округа», администрации Яйского МО перечислить поступившие денежные средства в сумме 8865506,16 руб. согласно заключенным муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство, в том числе по муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ – 1522251,36 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 7343257,80 руб.

Согласно распоряжения Администрации Яйского муниципального округа №-р от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 60), в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального округа», администрации Яйского МО перечислить поступившие денежные средства в сумме 21513331,80 руб. согласно заключенным муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство, в том числе по муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ – 3778016,07 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 3778016,07 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 3778016,07 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 3393094,53 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 3393094,53 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 3393094,52 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 0,01 коп.

Согласно описи платежных поручений по муниципальным контрактам (т. 19, л.д. 64-67), общая сумма оплаты по муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Интеграл-Т» на приобретение квартир в строящихся домах составляет 115988655 рублей 75 копеек.

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 68-69), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 70-71), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 72-73), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 74-75), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 76-77), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 78-79), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 80-81), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3778016,07 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 8 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и и.о. начальника отдела учета и отчетности С.А.П..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 82), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 83), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 84), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 85), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 86), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 87), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 88), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3778016,07 руб., назначение платежа – аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 8 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 90-91), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 92-93), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 94-95), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 96-97), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 98-99), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 100-101), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 102-104), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3778016,07 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 9 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и и.о. начальника отдела учета и отчетности С.А.П..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 105), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 106), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 107), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 108), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 109), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 110), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 111), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3778016,07 руб., назначение платежа – аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 9 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 112-113), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 114-115), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 116-117), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 118-119), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 120-121), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 122-123), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 787086,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 124-126), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3778016,07 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. 61/2021 от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и и.о. начальника отдела учета и отчетности С.А.П..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 127), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 128), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 129), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 130), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 131), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 132), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 787086,67 руб., назначение платежа – аванс. платеж 8,3% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 133), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3778016,07 руб., назначение платежа – аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 10 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 134-135), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 136-137), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 138-139), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 140-141), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 142-143), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 143-144), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3393094,53 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и и.о. начальника отдела учета и отчетности С.А.П..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 145), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 146), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 147), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 148), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 149), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 150), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3393094,53 руб., назначение платежа – аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 151-152), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 153-154), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 155-156), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 157-158), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 159-160), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 848273,62 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 161-162), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3393094,53 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и и.о. начальника отдела учета и отчетности С.А.П..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 163), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 164), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 165), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 166), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 167), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 848273,62 руб., назначение платежа – аванс. платеж 10% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 168), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3393094,53 руб., назначение платежа – аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 12 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту 64/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 169-170), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3448959,39 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 40,66% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 15 от ДД.ММ.ГГГГ доп. сог. 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 171-172), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 264136,24 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 3,1% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 15 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 173-174), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 264136,24 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 3,1% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 15 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 175-176), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 264136,24 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 3,1% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 15 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 177-178), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3393094,52 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп согл. 2 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности С.А.П..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 179), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3448959,39 руб., назначение платежа – аванс. платеж 40,66% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 15 от ДД.ММ.ГГГГ доп. сог. 1 от 22.11.2021г.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 180), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 264136,24 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 3,1% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 15 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 181), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 264136,24 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 3,1% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 15 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 182), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 264136,24 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 3,1% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. ЯМО, 

<

...> мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 15 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 183), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3393094,52 руб., назначение платежа – аванс. платеж 40% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. в пгт Яя, мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 13 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп сог. 2 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 184-185), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3807052,03 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 44,88% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 16 от ДД.ММ.ГГГГ доп. сог. 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 186-187), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3827410,58 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 45,12% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 20 от ДД.ММ.ГГГГ доп. сог. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп. сог. 2 от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 188), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3807052,03 руб., назначение платежа - аванс. платеж 44,88% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 16 от ДД.ММ.ГГГГ доп. сог. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 189), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3827410,58 руб., назначение платежа - аванс. платеж 45,12% на приоб. в муниц. собств. жил. помещ. путем инвестир. в строит. объекта недвиж. мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 20 от ДД.ММ.ГГГГ доп. сог. 1 от ДД.ММ.ГГГГ доп. сог. 2 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 190-191), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3811800,00 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 53,33% на приоб. в муниц. собств. 3 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 24 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 192-193), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 2621173,43 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 36,67% на приоб. в муниц. собств. 3 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. б/н от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 05 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 194), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3811800,00 руб., назначение платежа - аванс. платеж 53,33% на приоб. в муниц. собств. 3 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 24 от 14.12.20210 г.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 195), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 2621173,43 руб., назначение платежа - аванс. платеж 36,67% на приоб. в муниц. собств. 3 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. б/н от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 05 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 196-197), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 7889088,22 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 87,3% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 21 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 198-199), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 243992,42 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 2,7% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 21 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 200), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 243992,42 руб., назначение платежа - аванс. платеж 2,7% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 21 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 201), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 7889088,22 руб., назначение платежа - аванс. платеж 87,3% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 21 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 202-203), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 2426126,45 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 24,5% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 22 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 204-206), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 75034,81 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 0,76% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 22 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 206), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 1737265,23 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 17,5% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 22 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 207-208), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 69206,38 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 0,7% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 22 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 209-210), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 4598405,82 рубля, назначение платежа - аванс. платеж 46,54% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 02 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. сог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 211), следует, что финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 2426126,45 руб., назначение платежа - аванс. платеж 2,4% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 22 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 212), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 75034,81 руб., назначение платежа - аванс. платеж 0,76% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 22 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 213), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 69206,38 руб., назначение платежа - аванс. платеж 0,7% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 22 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 213), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 1737265,23 руб., назначение платежа - аванс. платеж 17,5% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 22 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 215), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 4598405,82 руб., назначение платежа - аванс. платеж 46,54% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 02 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 216-217), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 6040147,09 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 70,6% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 23 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 218-219), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 186808,67 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 2,2% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 23 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 220), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 6040147,09 руб., назначение платежа - аванс. платеж 70,6% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 23 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 221), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 186808,67 руб., назначение платежа - аванс. платеж 2,2% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 23 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 222), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 5099539,23 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 56,7% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 20 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 223-224), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 157717,71 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 1,7% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 20 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 225), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 157717,71 руб., назначение платежа - аванс. платеж 1,7% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 20 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 226), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 5099539,23 руб., назначение платежа - аванс. платеж 56,7% на приоб. в муниц. собств. 4 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 20 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 227), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3920246,25 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 40,8% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 19 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 228-229), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 121244,73 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 1,3% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 19 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 230-232), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 3784495,44 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 39,4% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 01 от ДД.ММ.ГГГГ, доп. согл. б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 233), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 121244,73 руб., назначение платежа - аванс. платеж 1,3% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 19 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 234), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3920246,25 руб., назначение платежа - аванс. платеж 40,8% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 19 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 235), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 3784495,44 руб., назначение платежа - аванс. платеж 39,4% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 01 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 236), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 2308336,47 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 23,9% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. 92/2021 от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 18 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 237-238), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 144920,60 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 1,5% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 18 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 239), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 2308336,47 руб., назначение платежа - аванс. платеж 23,9% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 18 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 240), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 144920,60 руб., назначение платежа - аванс. платеж 1,5% на приоб. в муниц. собств. 6 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 18 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 241), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 5672697,61 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 58,8% на приоб. в муниц. собств. 5 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 25 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А.. 

Согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 242), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 175444,26 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 1,8% на приоб. в муниц. собств. 5 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 25 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. 40№. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и начальником отдела учета и отчетности К.Г.А.. 

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 243), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 5672697,61 руб., назначение платежа - аванс. платеж 58,8% на приоб. в муниц. собств. 5 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 25 от ДД.ММ.ГГГГ доп согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 244), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 175444,26 руб., назначение платежа - аванс. платеж 1,8% на приоб. в муниц. собств. 5 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 25 от ДД.ММ.ГГГГ доп согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 247-248), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 7343254,80 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 90% на приоб. в муниц. собств. 3 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 06 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и и.о. начальника отдела учета и отчетности С.А.П..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 249), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 7343254,80 руб., назначение платежа - аванс. платеж 90% на приоб. в муниц. собств. 3 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 06 от ДД.ММ.ГГГГ.

По муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 250-251), администрация Яйского МО направило в управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу заявку на перечисление за счет средств бюджета муниципального района, в размере 1522251,36 рублей, назначение платежа - аванс. платеж 90% на приоб. в муниц. собств. 1 жил. помещ. путем инвестир. в строит. многокварт. жил. дома мун. кон. № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 07 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ Контрагент получатель денежных средств – ООО «Интеграл-Т», в филиал ПАО «Банк УралСиб», р/с. №. Заявка подписана главой администрации Яйского МО ФИО1 и и.о. начальника отдела учета и отчетности С.А.П..

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 252), финансовое управление Яйского МО (Администрация Яйского МО) перечислило ООО «Интеграл-Т» денежные средства в сумме 1522251,36 руб., назначение платежа - аванс. платеж 90% на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома мун. кон. 29-2022 от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату 07 от ДД.ММ.ГГГГ доп. согл. 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.156), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 94450,40 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.157), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 94450,40 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.158), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 94450,40 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.159), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 84827,36 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.160), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 84827,36 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.161), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 84827,36 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.162), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, расположенного в п.г.т. Яя Кемеровской области на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 84827,36 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.163), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома который будет заключен на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 71477,48 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО Коммерческий банк «Модульбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.164), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, который будет заключен по итогам закупки, реестровый номер аукциона 0№, гарант (АО Коммерческий банк «Модульбанк») предоставляет бенефициару (администрация Яйского муниципального округа) безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала (ООО «Интеграл-Т») по контракту. Гарант обязуется по письменному требованию бенефициара выплатить бенефициару денежные средства в сумме, не превышающей 90367,56 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 2, 15 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО Коммерческий банк «Модульбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.165), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, который будет заключен по итогам закупки, реестровый номер аукциона 0№, гарант (АО Коммерческий банк «Модульбанк») предоставляет бенефициару (администрация Яйского муниципального округа) безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала (ООО «Интеграл-Т») по контракту. Гарант обязуется по письменному требованию бенефициара выплатить бенефициару денежные средства в сумме, не превышающей 98955,99 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 2, 15 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО «Экспобанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.166), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома который будет заключен на основании извещения о проведении электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №, гарант (АО «Экспобанк») обязуется на условиях настоящей гарантии по требованию бенефициара (администрация Яйского муниципального округа) уплатить бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем 85583,86 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 1.1, 1.2, 1.4 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО Коммерческий банк «Модульбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.167), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, который будет заключен по итогам закупки, реестровый номер аукциона 0№, гарант (АО Коммерческий банк «Модульбанк») предоставляет бенефициару (администрация Яйского муниципального округа) безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала (ООО «Интеграл-Т») по контракту. Гарант обязуется по письменному требованию бенефициара выплатить бенефициару денежные средства в сумме, не превышающей 89944,82 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 2, 15 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО Коммерческий банк «Модульбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.168), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, который будет заключен по итогам закупки, реестровый номер аукциона 0№, гарант (АО Коммерческий банк «Модульбанк») предоставляет бенефициару (администрация Яйского муниципального округа) безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала (ООО «Интеграл-Т») по контракту. Гарант обязуется по письменному требованию бенефициара выплатить бенефициару денежные средства в сумме, не превышающей 95985,64 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 2, 15 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО Коммерческий банк «Модульбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.169), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, который будет заключен по итогам закупки, реестровый номер аукциона 0№, гарант (АО Коммерческий банк «Модульбанк») предоставляет бенефициару (администрация Яйского муниципального округа) безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала (ООО «Интеграл-Т») по контракту. Гарант обязуется по письменному требованию бенефициара выплатить бенефициару денежные средства в сумме, не превышающей 96675,38 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 2, 15 банковской гарантии).

В соответствии с банковской гарантией АО Коммерческий банк «Модульбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.170), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, который будет заключен по итогам закупки, реестровый номер аукциона 0№, гарант (АО Коммерческий банк «Модульбанк») предоставляет бенефициару (администрация Яйского муниципального округа) безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала (ООО «Интеграл-Т») по контракту. Гарант обязуется по письменному требованию бенефициара выплатить бенефициару денежные средства в сумме, не превышающей 96452,88 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно (п.п. 2, 15 банковской гарантии).

В соответствии с независимой гарантией ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.171), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, который будет заключен по итогам закупки, номер извещения 0№, гарант (ПАО «Совкомбанк») обязуется на условиях настоящей гарантии выплатить бенефициару (администрация Яйского муниципального округа) по его требованию денежную сумму в пределах суммы 81591,72 руб. в случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В соответствии с независимой гарантией ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д.172), представленной в обеспечение исполнения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории Яйского муниципального округа, который будет заключен по итогам закупки, номер извещения 0№, гарант (ПАО «Совкомбанк») обязуется на условиях настоящей гарантии выплатить бенефициару (администрация Яйского муниципального округа) по его требованию денежную сумму в пределах суммы 16913,91 руб. в случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Интеграл-Т») своих обязательств по контракту. Гарантия вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19417/2023 от 17.01.2024 (т. 34 л.д. 120-122), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано неосновательное обогащение в размере 8500536,09 руб., перечисленное по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19076/2023 от 17.01.2024 (т. 34 л.д. 123-125), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано неосновательное обогащение в размере 7343254,80 руб., перечисленное по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19444/2023 от 26.01.2024 (т. 34 л.д. 126-128), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано неосновательное обогащение в размере 7634462,63 руб., перечисленное по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19463/2023 от 26.01.2024 (т. 34 л.д. 129-131), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано неосновательное обогащение в размере 7634462,61 руб., перечисленное по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19462/2023 от 29.01.2024 (т. 34 л.д. 132-134), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 7634462,63 руб. долга, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19424/2023 от 29.01.2024 (т. 34 л.д. 135-137), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 8500536,09 руб. долга, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19443/2023 от 26.01.2024 (т. 34 л.д. 138-140), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскана задолженность в размере 7634462,63 руб. по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19099/2023 от 29.01.2024 (т. 34 л.д. 141-143), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 7825986,42 руб. долга, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19411/2023 от 29.01.2024 (т. 34 л.д. 144-146), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 8500536,09 руб. долга, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19101/2023 от 29.01.2024 (т. 34 л.д. 147-149), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 6432973,43 руб. долга, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19151/2023 от 29.01.2024 (т. 34 л.д. 150-152), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскана задолженность в размере 1522251,36 руб. по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-24173/2023 от 29.03.2024 (т. 34 л.д. 156-158), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 2453257,07 руб. долга, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-24551/2023 от 08.04.2024 (т. 34 л.д. 159-161), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 5257256,94 руб. долга, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-24164/2023 от 11.04.2024 (т. 34 л.д. 162-163), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано неосновательное обогащение в размере 8906038,69 руб., перечисленное по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19100/2023 от 29.01.2024 (т. 34 л.д. 164-166), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 8133080,64 руб. долга, по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-24175/2023 от 22.03.2024 (т. 34 л.д. 167-169), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано неосновательное обогащение в размере 6226955,76 руб., перечисленное по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-24557/2023 от 03.05.2024 (т. 34 л.д. 170-172), исковые требования Администрации Яйского МО к ООО «Интеграл-Т» удовлетворены, с ООО «Интеграл-Т» взыскано неосновательное обогащение в размере 5848141,87 руб., перечисленное по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, согласно 17 решений суда, с ООО «Интеграл-Т» взыскано 115988655 рублей 75 копеек.

В соответствии с решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-19716/2023 от 18.03.2024 (т. 34 л.д. 153-155), ООО «Интеграл-Т» обязано выполнить консервацию объекта капитального строительства: строительство первой очереди двух многоквартирных жилых домов по адресу: Яйский район, п.г.т. Яя в границах ул. Авиационная – ул. Болотная - ул. Новый городок – ул. Гвардейская (микрорайон «Новый городок»), расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Яйский МО, 

<

...> в соответствии с правилами проведения консервации объекта капитального строительства, в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно распоряжения администрации Яйского муниципального округа № 139-р от 21.04.2020 с приложениями (т. 14 л.д. 5), создана контрактная служба администрации Яйского муниципального округа, утверждены ее состав и положение о контрактной службе, утверждено распределение обязанностей между работниками контрактной службы.

В соответствии с положением о контрактной службе администрации Яйского муниципального округа (т. 14 л.д. 6-12), положение устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Яйского муниципального округу (п. 1). В соответствии с п.п. 5 п. 14 указанного положения, контрактная служба разрабатывает проекты контрактов заказчика. В соответствии с п.п. 6 указанного положения, контрактная служба осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона.

Согласно письма администрации Яйского муниципального округа от 18.12.2023 (т. 14 л.д. 16-17), в состав контрактной службы администрации Яйского муниципального округа от отдела ЖКХ и строительству входили: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальник отдела ЖКХ и строительству Ш.О.В.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время – заместитель главы Яйского МО по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Ш.О.В. Проекты муниципальных контрактов были предоставлены в юридический отдел администрации Яйского муниципального округа в электронном виде в составе заявки к конкурсной документации по внутренней сети от отдела по ЖКХ и строительству. В должностных инструкциях сотрудников отдела по ЖКХ и строительству отсутствует информация по исполнению функции по подготовке проектов муниципальных контрактов. 

Из распоряжения главы Яйского муниципального округа от 09.03.2021 года следует, что в связи с кадровыми изменениями состав контрактной службы изменен- руководителем контрактной службы назначен ФИО1-глава округа, работники контрактной службы- Ж.М., Ш.О.В., Н.М.А., П.Е.В., С.А.П. (т.14 л.д.14)

Распоряжением главы округа от 18.04.2022 из состава контрактной службы выведена Н.М.А., введена П.А.В.-и.о.начальника юридического отдела (т.14 л.д 15).

Согласно должностной инструкции начальника юридического отдела администрации Яйского муниципального округа (т. 14 л.д. 20-21), утвержденной 20.01.2020 главой Яйского МО ФИО1, а также, должностной инструкции начальника юридического отдела администрации Яйского муниципального округа (т. 14 л.д. 24-25), утвержденной 01.09.2022 главой Яйского МО ФИО1, начальник юридического отдела проводит юридическую экспертизу контрактов, договоров и соглашений, заключаемых администрацией Яйского муниципального округа, подготавливает протоколы разногласий к указанным документам (п. 2.7 должностной инструкции). Также, в соответствии с п. 2.11 должностной инструкции, во исполнение постановления администрации Яйского муниципального района от 10.02.2015 № 234 «О внесении изменения в постановление администрации Яйского муниципального района от 26.12.2013 № 2487 «Об утверждении положения (регламента) о контрактной службе администрации Яйского муниципального района»» в том числе, выполняет работу при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – осуществляет экспертизу проектов контрактов, обеспечивает заключение контрактов. Согласно п. 3.3 должностной инструкции, начальник юридического отдела, в случае несоответствия действующему законодательству предоставляемых на подпись главе Яйского муниципального округа проектов документов, не визируя эти документы, дает заключение с предложением о законном порядке разрешения рассматриваемых вопросов.

Согласно должностной инструкции заместителя главы округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству (т. 14 л.д. 22-23) утвержденной 29.09.2021 главой Яйского МО ФИО1, заместитель главы округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству осуществляет контроль за ходом строительства и ремонта объектов социальной и производственной инфраструктуры, осуществляемых за счет средств бюджета округа (п. 2.19 должностной инструкции). В соответствии с п. 2.21 должностной инструкции, несет персональную ответственность за выполнение на территории округа мероприятий в рамках национальных проектов. Также, в соответствии с п. 2.28 должностной инструкции, несет ответственность за проведение внутренних экспертиз и приемки, предоставленных подрядчиком результатов выполненных работ по муниципальным контрактам, заказчиком которых является администрация Яйского муниципального округа.

В соответствии с письмом Министерства строительства Кузбасса от 22.04.2020 (т. 14 л.д. 33-34), заместителям глав муниципальных и городских округов, районов, курирующих вопросы строительства, направлена копия письма ФАС по вопросу приобретения жилых помещений в строящихся многоквартирных домах при расселении аварийного жилищного фонда. 

Согласно копии перечня поручений по итогам аппаратного совещания от 05.10.2020 № 233, (т. 14, л.д. 41), ФИО1 поставлена задача в срок до 09.11.2020 представить в Министерство строительства Кузбасса актуализированные графики ввода в 2020 году жилья на территориях Яйского муниципального округа, а также доложить о фактическом вводе жилья, что указывает на контроль за данными вопросами со стороны администрации Кемеровской области – Кузбасса.

Согласно копии письма от 03.03.2021 № 12-115 (т. 14. л.д. 42-47), правительство Кузбасса, в лице заместителя Губернатора Кузбасса О.Г.В.., направило в адрес глав муниципальных образований Кемеровской области письмо о необходимости принятия мер по обеспечению исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ при приобретении жилых помещений в строящихся домах, и соотнесении сроков действия банковских гарантий со сроками исполнения обязательств по муниципальным контрактам.

Согласно копии протокола поручений № 6 от 21.06.2021 утвержденного заместителем Губернатора Кузбасса (по строительству) (т. 14. л.д. 48), ФИО1 поставлена задача в срок до 05.07.2021 принять решение и доложить о варианте механизма завершения строительства многоквартирного жилого дома и реализации жилищных программ 2021 года.

Согласно данных селекторного совещания от 29.07.2021 ( т.14. л.д.49) зам. Губернатора О.Г.В.. посчитал необходимым ставить вопрос о снятии и перераспределении лимитов, выделенных в том числе, Яйскому муниципальному округу, сообщено, что в чат заместителей глав по строительству был направлен проект контракта инвестирования, предварительно согласованный с Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области. По информации казначейства, они планируют доработать этот проект, но пока каких –либо правок не поступило, проинформируют незамедлительно также в чате.

Согласно копии доклада заместителя губернатора Кузбасса (по строительству) (т. 14, л.д. 53-54) на аппаратном совещании Губернатора Кузбасса 09.08.2021 дана негативная оценка темпов ввода жилья в Яйском муниципальном округе, где квартиры должны быть представлены гражданам в рамках реализации федеральных программ, но по данным мониторинга Минстроя Кузбасса, многоквартирные дома не будут построены в текущем году.

Согласно копии перечня поручений Губернатора Кузбасса по итогам аппаратного совещания № 109 (т. 14, л.д. 57), ФИО1 поручено с 09.08.2021 и далее постоянно взять под контроль соблюдение сроков строительства жилья на территории муниципальных образований.

Согласно копии доклада заместителя губернатора Кузбасса (по строительству) на координационном штабе Губернатора Кузбасса от 19.08.2021 (т. 14, л.д.58-61) в данном докладе отмечено, что в Яйском округе два дома, строящиеся в рамках программы расселения аварийного жилья, в текущем году введены не будут. Причиной являются низкие темпы строительства, а также отсутствие контроля со стороны муниципалитета и нежеланием принимать управленческие решения. 

Согласно копии доклада ВКС от 22.09.2021 с главами муниципальных образований по вопросу «О реализации планового показателя ввода жилья в муниципальных образованиях Кузбасса в 2021 году» (т. 14, л.д.67-69), отмечено, что показатель ввода жилья является целевым при реализации регионального проекта «Жилье», а также показателем эффективности деятельности органов местного самоуправления, обращено внимание на то, что в Яйском округе темпы строительства отстают от заявленных ранее. 

Согласно копии перечня поручений первого заместителя Губернатора Кузбасса – председателя Правительства Кузбасса по итогам аппаратного совещания от 11.10.2021 № 146 (т. 14, л.д.76), ФИО1 поручено до 31.12.2021 обеспечить реализацию плановых показателей ввода жилья 2021 году.

Согласно копии доклада заместителя Губернатора Кузбасса (по строительству) на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, строительной отрасли Кузбасса и по цифровизации от 20.01.2022 по вопросу «Об итогах ввода жилья в Кузбассе в 2021 году. Строительство жилья, в том числе, для детей-сирот, в 2022 году» (т. 14, л.д. 78-82), отмечено, что ввод жилья – один из ключевых показателей реализации регионального национального проекта «Жилье и городская среда», с которым напрямую связана реализация государственных жилищных программ. Наибольшее отставание от плана показал Яйский муниципальный округ, глава ФИО1 – при плане 12 тысяч квадратных метров жилья, который был утвержден исходя из ранее представленных муниципалитетом планов строительства, введено только 25 %, - чуть более 3 тысяч квадратных метров.

Согласно копии письма от 10.06.2022 № 12-355 от заместителя губернатора Кузбасса (по строительству) в адрес главы Яйского муниципального округа от 10.06.2022 (т. 14, л.д. 87), в ходе выезда на площадку строительства двух многоквартирных жилых домов (микрорайон «Новый городок»), установлено, что темпы строительства объектов ставят под сомнение их ввод в эксплуатацию в текущем году, что может привести к нарушению жилищных прав граждан, невыполнение установленного плана по вводу жилья, влечет за собой риски срыва реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья по региону в целом и, как следствие, неисполнение Кузбассом национального проекта «Жилье и городская среда», ФИО1 поручено взять под личный контроль завершение строительства жилых домов и обеспечить их ввод в эксплуатацию не позднее 30.11.2022, представление гражданам жилых помещений – не позднее 31.12.2022. 

Согласно копии письма от 03.05.2023 из Министерства строительства Кузбасса (т. 14, л.д. 95-96), Юргинскому межрайонному прокурору сообщено, об отсутствии у ООО «Интеграл-Т» опыта застройщика в строительстве жилья, что может указывать на риск неэффективного либо нецелевого расходования средств бюджета, возможного нарушения прав граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями при поддержке государства. 

Согласно ответа на запрос администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса от 01.11.2023 №1.6-05г/3481 (т. 14, л.д. 126-152), между заказчиком - администрацией Яйского муниципального округа Кемеровской области и исполнителем – ООО «Интеграт-Т» в период с 16.09.2019 по 10.03.2020 заключались различные договора, на выполнение ООО «Интеграл-Т» для администрации Яйского муниципального округа различных проектных работ. 

Согласно ответа на запрос от 25.04.2024 №1.6-05г/1383 (т. 14, л.д. 168), администрация Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса уточнила даты размещения в сети Интернет на официальном сайте единой электронной информационной системы в сфере закупок http://

<

адрес>/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.

<

адрес>/, аукционной документации на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) по заключенным между администрацией Яйского муниципального округа и ООО «Интеграл-Т» 17 муниципальным контрактам. Так, по муниципальным контрактам: № (аукцион №), № (аукцион №), № (аукцион №) дата размещения - ДД.ММ.ГГГГ; № (аукцион №) даты размещения - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; № (аукцион №), № (аукцион №), № (аукцион №) дата размещения - ДД.ММ.ГГГГ; № (аукцион №), № (аукцион №), № (аукцион №), № (аукцион №), № (аукцион №), № (аукцион №), № (аукцион №) дата размещения - ДД.ММ.ГГГГ; № (аукцион №) дата размещения - ДД.ММ.ГГГГ; № (аукцион №) дата размещения - ДД.ММ.ГГГГ; № (аукцион №) дата размещения - ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ответа на запрос от 26.04.2024 № 39-10-11/11-4103 из УФК по Кемеровской области – Кузбасса (т. 14, л.д. 171-172), перечисление администрацией Яйского муниципального округа денежных средств на счет ООО «Интеграл-Т» по заключенным муниципальным контрактам осуществлялось с казначейского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ финансовому управлению Яйского муниципального округа в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через единый казначейский счет УФК по Кемеровской области – Кузбассу №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении Кемерово Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с ответом на запрос № 1.6-05г/1486 от 06.05.2024 (т. 14 л.д. 175-177) администрация Яйского муниципального округа предоставила заверенные скриншоты с электронной площадки РТС-тендер, в соответствии с которыми: заявка на участие в электронном аукционе № размещена ДД.ММ.ГГГГ в 19:50 МСК., участник закупки ООО «Интеграл-Т»; заявка на участие в электронном аукционе № размещена ДД.ММ.ГГГГ в 20:04 МСК., участник закупки ООО «Интеграл-Т». 

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 12.05.2024 (т. 12. л.д. 1-13), осмотрен электронный носитель (оптический диск) CD-R с информацией о соединениях абонентского номера № (ФИО1) за период времени с 29.11.2020 по 16.11.2023. С использованием ноутбука, открыто содержимое данного оптического диска: файлы «194866.xls», «194866_1.xls». В ходе просмотра указанных файлов, установлено наличие в представленной информации сведений о соединениях абонентского номера № (ФИО1) за период времени с 29.11.2020 по 16.11.2023, согласно которым установлено: наличие 5 соединений с абонентским номером № (Ш.О.В.), первым из которых является входящий звонок от ДД.ММ.ГГГГ в 8:36:49, последним несостоявшийся звонок от ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:26; наличие 3 соединений с абонентским номером № (К. Ан.В.), первым из которых является несостоявшийся вызов от ДД.ММ.ГГГГ в 10:28:06, последним исходящий звонок от ДД.ММ.ГГГГ в 16:55:49; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ абонент № (ФИО1) при выполнении всех соединений располагался в пределах действия базовых станций, расположенных на территории п.г.т. Яя Яйского района Кемеровской области – Кузбасса.

Согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы № 306-02/ССТЭ от 28.12.2023 (т. 29 л.д.3-93), стоимость выполненных строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство первой очереди двух многоквартирных домов по адресу: Яйский район, п.г.т. Яя в границах ул. Авиационная - ул. Болотная - ул. Новый городок - ул. Гвардейская (микрорайон «Новый Городок») - жилой дом корпус № 1 (№ 1) по состоянию на IV квартал 2021 года изложена в локальном сметном расчете № 02-01-86 (приложение № 1 к заключению эксперта) и составляет - 43281676 рублей. Общая стоимость выполненных строительно-монтажных работ на объекте - микрорайон «Новый Городок» - жилой дом корпус № 1 (№ 1) с учётом проведения подготовительных, а также затрат на временные здания и сооружения по состоянию на IV квартал 2021 года составляет (в т. ч. со стоимостью затрат на устройство ограждения): 44106573 рублей.

Согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы № 305-02/ССТЭ от 28.12.2023 (т. 29 л.д. 109-164), стоимость выполненных строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство первой очереди двух многоквартирных домов по адресу: Яйский район, п.г.т. Яя в границах ул. Авиационная - ул. Болотная - ул. Новый городок- ул. Гвардейская (микрорайон «Новый Городок») - жилой дом корпус № 2 (№ 1/1) по состоянию на IV квартал 2021 года изложена в локальном сметном расчете № 02-01-84 (приложение № 1 к заключению эксперта) и составляет: 9 717 359 рублей. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ на объекте: (микрорайон «Новый Городок») - жилой дом корпус № 2 (№ 1/1), с учётом затрат на временные здания и сооружения (ВЗС) по состоянию на IV квартал 2021 года, изложена в локальном сметном расчете № 02-01-85 (приложение № 2 к заключению эксперта) и составляет: 9 824 250 рублей, в т. ч. 104 794,80 рублей – стоимость ВЗС.

Согласно акта выездной проверки администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 (т. 10, л.д. 12-50), управлением Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу в период с 24.10.2022 по 05.12.2022 проведена выездная проверка использования средств администрацией Яйского муниципального округа за период с 01.01.2017 по 01.12.2022, в ходе которой в числе прочих нарушений выявлены факты заключения администрацией Яйского муниципального округа с ООО «Интеграл-Т» в проверяемый период муниципальных контрактов на приобретение жилья в рамках программы переселения из аварийного жилья: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, размер обеспечения исполнения которых в соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 96, учитывая предусмотренный условиями указанных муниципальных контрактов размер аванса – 90 % от цены контракта, должен был составлять 90 % от цены контракта, то есть соответствовать размеру аванса, а администрацией Яйского муниципального округа в лице главы администрации при проведении закупочных процедур и заключении контрактов в нарушение ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено обеспечение исполнения контрактов в меньшем размере, чем размер аванса – 1 % от цены контракта. Факт нарушения при определении размера обеспечения муниципальных контрактов создает риск невозврата бюджетных средств при неисполнении подрядчиком своих обязательств (страницы 51-55 акта).

Согласно ответа на запрос № 1.6-05г/3429 от 26.10.2023 (т. 13, л.д. 2-6), администрация Яйского муниципального округа предоставила сведения о распределении квартир в строящихся домах по адресу: п.г.т. Яя, ул. Авиационная – ул. Болотная - ул. Новый городок – ул. Гвардейская (микрорайон «Новый городок») по каждому из заключенных с ООО «Интеграл-Т» муниципальных контрактов.

Согласно ответа на запрос от 06.05.2024 № 1.6-05Г/1481 (т. 19, л.д. 63), администрация Яйского муниципального округа предоставила копию заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, произведена оплата по муниципальному контракту № на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3784495,44 руб. Распоряжения главы Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса «О перечислении денежных средств» по муниципальным контрактам № на общую сумму 6226955,76 руб., № на общую сумму 5257256,94 руб., № на общую сумму 2453257,07 руб., № были вынесены, но не сохранились.

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы №113-19/06-18/233-2023 от 30.10.2023 (т. 27, л.д. 15-67), на расчетный счет № ООО «Интеграл-Т» в филиале ПАО «Банк Уралсиб» поступили денежные средства по муниципальным контрактам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 115 988 655,75 рублей, в том числе в разбивке по муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 500 536,09 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8500536,09 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 500 536,09 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 634 462,63 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 634 462,63 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 634 462,61 рубль; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 634 462,63 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 6 432 973,43 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 133 080,64 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 906 038,69 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 6226955,76 рублей; № от 13.12.2021 - 5257 256,94 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 825 986,42 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 453 257,07 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 848 141,87 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 343 254,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1522251,36 рубля. Денежные средства, поступившие по указанным муниципальным контрактам на расчетный счет № ООО «Интеграл-Т» в филиале ПАО «Банк Уралсиб» на общую сумму 115 988 655,75 рублей, израсходованы, в том числе на цели, не связанные со строительством двух многоквартирных жилых домов по адресу: Яйский район, п.г.т. Яя в границах ул. Авиационная – ул. Болотная - ул. Новый городок – ул. Гвардейская (микрорайон «Новый городок»)». Возврат денежных средств, полученных ООО «Интеграл-Т» по указанным муниципальным контрактам, не усматривается. 

Согласно заключению дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы №113-19/06-18/76-2024 от 13.03.2024 (т. 27, л.д. 85-152), остаток денежных средств на счетах ООО «Интеграл-Т», составляет по состоянию: на 01.01.2020 - 67 553,26 рублей; на 28.07.2020 - 129 691,26 рублей; на 22.11.2021 - 369 167,87 рублей; на 29.09.2021 - 92408,37 рублей; на 01.10.2022 - 14 136 711,03 рубля; на 31.12.2022 - 1 086 518,61 рубль; 30.06.2023 - 2 388,06 рублей. На счета ООО «Интеграл-Т» за период с 01.01.2020 по 30.06.2023 поступило денежных средств на общую сумму 216 363 315,51 рубль. Со счетов ООО «Интеграл-Т» за период с 01.01.2020 по 30.06.2023 израсходовано денежных средств на общую сумму 216 428 480,71 рубль, в том числе на цели, не связанные со строительством двух многоквартирных жилых домов по адресу: Яйский район, п.г.т. Яя в границах ул. Авиационная – ул. Болотная - ул. Новый городок – ул. Гвардейская (микрорайон «Новый городок»)», включая оплату: 7 985 313 рублей - на выдачу заработной платы и выплату социального характера (при том, что на зачисление заработной платы потрачено 15 109 562,30 рублей); 291 387 рублей - на оплату компьютерной техники; 500 000 рублей - на оплату за автомобиль «Nissan Qashqai»; 262 789 рублей - на оплату размещения сюжета в Вести-Кузбасс; 167 934,80 рублей - на оплату офисной мебели; 450 000 рублей – перевод денежных средств на специальный счет; 2 860 100 рублей – перевод денежных средств на корпоративные нужды; 4 000 000 рублей - перечисление на депозитный счет; 1 150 000 рублей - перевод денежных средств для заработной платы сотрудникам РСУ «Новый Городок»; 5503000 рублей - перевод денежных средств между расчетными счетами; 150 000 рублей – оплата транспортных услуг г. Кемерово - г. Юрга; 105 511 рублей - оплата за полиграфические услуги; 684 000 рублей - задаток для участия в аукционе; 1500000 рублей - арендная плата по договору аренды земельного участка и другие расходы. Денежные средства, поступившие в период с 01.01.2020 по 30.06.2023 на счет ООО «Интеграл-Т» в ПАО «Банк Уралсиб»: №, по муниципальным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с администрацией Яйского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса в общей сумме 48 744 445,56 рублей, израсходованы, в том числе на цели, не связанные со строительством двух многоквартирных жилых домов по адресу: Яйский район, пгт.Яя в границах ул.Авиационная – ул.Болотная - ул.Новый городок – ул.Гвардейская (микрорайон «Новый городок»)», включая оплату: за автомобиль «Nissan Qashqai» - 233 263,72 рубля; перечисление на депозитный счет - 2 191 991,16 рублей; взнос учредителя в Уставный капитал ООО «Яйская школа Интеграл-Т» - 4839189,64 рублей, и другие расходы. На счет ООО «Интеграл-Т» в ПАО «Банк Уралсиб» № по муниципальным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с администрацией Яйского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, денежные средства не поступали. Денежные средства, поступившие в период с 01.01.202020 по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Интеграл-Т» в ПАО «Банк Уралсиб» № по муниципальным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с администрацией Яйского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, возращены источнику выплаты в общей сумме 48744445,56 рублей.

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 113-19/06-18/19-2024 от 23.01.2024 (т. 27, л.д. 170-216), на счет ООО «Интеграл-Т» № в ПАО «Банк Уралсиб» перечислены денежные средства от администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области по следующим муниципальным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 48744445,56 рублей. Со счета ООО «Интеграл-Т» № в ПАО «Банк Уралсиб» перечислены денежные средства (возврат денежных средств) в адрес администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса по указанным муниципальным контрактам на общую сумму 48 744 445,56 рублей. На счет ООО «Интеграл-Т» № в ПАО «Банк Уралсиб» перечислены денежные средства от администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области по следующим муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 115 988 655,75 рублей, в том числе по каждому из муниципальных контрактов: № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 500 536,09 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 500 536,09 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 500 536,09 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 634 462,63 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 634 462,63 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 634 462,63 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 634 462,61 рубль; № от ДД.ММ.ГГГГ - 6 432 973,43 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 133 080,64 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 906 038,69 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ- 6 226 955,76 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 257 256,94 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 825 986,42 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 453 257,07 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 848 141,87 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 343 254,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 522 251,36 рублей. Со счетов ООО «Интеграл-Т» №, № в ПАО «Банк Уралсиб» возврат денежных средств по заключенным между администрацией Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и ООО «Интеграл-Т» указанным муниципальным контрактам не осуществлялся.

Согласно письма финансового управления Яйского муниципального округа от 14.07.2025, уровень дотационности бюджета Яйского муниципального округа составил: 2020 г. – 85,8 %; 2021 г. – 75,0 %; 2022 г. – 80,9 %; 2023 г. – 77,1 %; 2024 г. – 77,3 %. 

В соответствии с письмом Администрации Яйского муниципального округа от 14.07.2025 по состоянию на 14.07.2025 денежные средства по исполнительным листам в счет погашения задолженности ООО «Интеграл-Т» на лицевой счет не поступали.

В соответствии с письмом Администрации Яйского муниципального округа от 14.07.2025 по состоянию на 14.07.2025 на балансе администрации Яйского МО незавершенное строительство домов по ул. Новый Городок не числится.

Приведенные доказательства собраны и исследованы в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, в связи с чем, могут быть положены в основу обвинительного приговора. 

Доказательств, опровергающих доказательства стороны обвинения, судом не получено. 

Оснований не доверять заключениям судебных экспертиз не имеется, поскольку они проведены квалифицированными экспертами, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Выводы экспертов последовательны и непротиворечивы.

Суд считает, что доказательства обвинения, а именно показания представителя потерпевшего Д.А., показания свидетелей П.А.В., Ш.О.В., Т.Н.Н., Н.М.А., П.Е.В., Ж.М., Н.И.В., У.Н.М., С.А.В., К.О.В., К.В.Н., К. Ал.В., Д.Д.К., Ю.В.В., В.М.А., О.И.В., Г.Е.А., С.В.И., П.В.М., Д.Ю.В., Д.А.А., И.С.В., С.Н.Н., С.А.П., К.Г.А., Ш.Т.А., П.Д.А., специалиста М.А.И., оглашенные показания свидетелей Ш.О.В., П.А.В., Н.М.А., П.Е.В., К. Ан.В., В.М.А.,специалиста М.А.И., которые были последовательны, а также письменные материалы дела, исследованные в судебном заседании, а именно: протоколы осмотра места происшествия; протоколы обыска; протоколы выемки; постановления о приобщении вещественных доказательств; заключения экспертов; распоряжения Администрации Яйского МО; решения Совета народных депутатов Яйского МО; аукционная документация администрации Яйского МО по аукциону в электронной форме на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости; муниципальные контракты администрации Яйского МО с ООО «Интеграл-Т» на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, с приложениями; дополнительные соглашения к муниципальным контрактам; решения администрации Яйского МО об одностороннем отказе от исполнения контракта; заявки на кассовый расход; платежные поручения; банковские гарантии; решения Арбитражного суда Кемеровской области; положение о контрактной службе администрации Яйского МО; копия устава муниципального образования Яйский муниципальный округ Кемеровской области; копия трудовой книжки ФИО1; должностные инструкции начальника юридического отдела администрации Яйского МО, заместителя главы округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству; копии писем Министерства строительства Кузбасса, правительства Кузбасса; копии протоколов поручений заместителя Губернатора Кузбасса; копия перечня поручений Губернатора Кузбасса по итогам аппаратного совещания; копия доклада заместителя губернатора Кузбасса (по строительству) на координационном штабе Губернатора Кузбасса; копия доклада ВКС от 22.09.2021 с главами муниципальных образований; копия письма заместителя губернатора Кузбасса (по строительству) в адрес главы Яйского МО от 10.06.2022; ответы на запрос администрации Яйского МО; ответ на запрос от 26.04.2024 из УФК по Кемеровской области – Кузбасса; заключения судебной строительно-технической экспертизы; заключения судебной бухгалтерской экспертизы; акт выездной проверки УФК по КО администрации Яйского МО округа от 05.12.2022, в своей совокупности с показаниями подсудимого ФИО1, дополняя друг друга, позволяют суду сделать вывод о доказанности вины подсудимого ФИО1

Суд не находит заслуживающими внимания доводы подсудимого ФИО1 и защитника Крешталь О.Н. о том, что к какой либо персональной ответственности, в том числе дисциплинарной за невыполнение плановых показателей ввода жилья, освоения лимитов, ФИО1 не привлекался, поскольку незаконные действия подсудимого были направлены на исключение возможности его привлечения к ответственности по указанным основаниям в будущем. Так, свидетель К.О.В. в судебном заседании пояснила, что в случае не освоения лимитов, возможно было привлечение глав к дисциплинарной ответственности со стороны губернатора. В ходе предварительного следствия свидетель Ш.О.В. поясняла, что им попадает за неосвоение доведенных до администрации лимитов денежных средств. Свидетель Д.Д.К. также пояснил в судебном заседании, что Правительством Кузбасса производится оценка эффективности деятельности как главы округа ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, а также эффективное освоение денежных средств. Не освоение денежных средств для главы не очень хорошо, глава муниципалитета заинтересован в освоении выделенных бюджетных средств, в любом случае нарушать закон и осваивать не желательно.

Пояснения ФИО1 о том, что он ни с К. Ан.В., ни с К.В.Н. в родстве, свойстве, в каких либо имущественных, корпоративных или иных отношениях не состоял никогда и не мог состоять, ФИО1 с ними не общался и не был знаком, суд считает надуманными и не свидетельствуют об отсутствии корыстной заинтересованности, как на то ссылалась в ходе судебного заседания защитник Крешталь О.Н.

В ходе рассмотрения дела установлено, что на момент подготовки аукционной документации ( начиная с 20.10.2021) подсудимый был лично знаком с К.А.Н., как до момента подготовки аукционной документации, так и на момент заключения муниципальных контрактов звонил К. на сотовый телефон, даже в ночное время (согласно представленной информации сведений о соединениях абонентского номера № (ФИО1) т. 12. л.д. 1-13), что свидетельствует о наличии корпоративных и иных отношений, кроме того, из показаний свидетеля Т.Н.Н., допрошенного в судебном заседании, следует, что в 2020 г. он приезжал в администрацию в составе ООО «Интеграл Т», от организации присутствовал руководитель - К.А.В.2, там же был ФИО1, он встречался с ним 2-3 раза, один раз, когда был договор комплексного развития территории подписывали, второй раз в августе - сентябре 2022 года. У суда нет оснований не доверять показаниям данного свидетеля, поскольку Т.Н.Н. не заинтересован в исходе дела, предупреждался за дачу заведомо ложных показаний.

Свидетель Ш.О.В., в ходе следствия также пояснила, что примерно в 2019-2020 г. руководитель компании ООО «Интеграл-Т» К.А.В.2 и К.В.Н. заинтересовались возможностью строительства жилья по муниципальным контрактам и в ходе неоднократных обсуждений с главой Яйского МО ФИО1 и с ее участием выразили готовность выступить застройщиком жилых домов в ходе комплексного развития территории Яйского МО, что также свидетельствует о том, что К.А.Н. и ФИО1 были знакомы до заключения муниципальных контрактов.

Опровергая доводы стороны обвинения, утверждая о невиновности подсудимого, защитник многократно ссылался на показания свидетеля Ш.О.В., которая дважды допрашивалась в ходе рассмотрения дела и показания которой оглашались в ходе судебного следствия, однако суд относится критически к показаниям данного свидетеля, считая их направленными на воспрепятствование истины, с целью избежания ответственности ФИО1, с которым она находилась в доверительных дружеских отношениях, что подтверждается справкой –меморандумом от 22.11.23, согласно которой Ш.О.В. и ФИО1 обращаются к друг другу на «ты», ФИО1 уведомлен о кредите, взятым Ш.О.В. для К.А.В.2, при этом ФИО1 допускает высказывания в нецензурной форме, высказывают озабоченность за обеспечение по муниципальным контрактам.

Кроме того, доводы Ш.О.В. о том, что ей, также как и ФИО1, не было известно о наличии нарушений ст.96 44-ФЗ до проведения казначейской проверки суд также считает надуманными и опровергаются показаниями свидетеля Н.М.А., пояснявшей как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания о том, что лично сообщала Ш.О.В. о наличии в проектах контрактов нарушений. Оснований не доверять показаниям данного свидетеля суд не усматривает, стороной защиты таковых не представлено.

Доводы защитника о том, что наличие корыстной заинтересованности подсудимого опровергается показаниями допрошенных свидетелей Ж.М., К.В.Н., пояснивших, что глава порядочный человек и корыстной заинтересованности у него не было, суд считает необоснованными, поскольку показания свидетелей в данной части являются их субъективным мнением оценки работы ФИО1

Доводы защитника Крешталь О.Н. и подсудимого ФИО1 о том, что подсудимый не знал об отсутствии у ООО «Интеграл-Т» достаточных средств для обеспечения исполнения муниципальных контрактов опровергаются оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля П.А.В., данными ею в ходе предварительного следствия, пояснившей, что в ноябре 2021 года, перед проведением аукционов на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, работники администрации понимали, что победителем на указанных аукционах могло быть ООО «Интеграл-Т», не выполнившее свои обязательства по заключенным с ним ранее в 2020 и 2021 г. муниципальным контрактам. Всем было понятно, что ООО «Интеграл-Т» не имеющее собственных средств не способно построить дома без дополнительных бюджетных средств. 

Доводы данного свидетеля подтверждаются имеющимся в материалах дела заключением судебной бухгалтерской экспертизы (т.27 л.д.85-152), согласно которой, за период с 28.07.2020 по 22.11.2021 на счетах ООО «Интеграл-Т» находились денежные средства от 129691.26 рублей до 369167.87 рублей, что свидетельствует о том, что достаточным количеством денежных средств для обеспечения исполнения муниципальных контрактов ООО действительно не располагало.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела свидетель К.О.В. пояснила, что с того времени, как в отчете показали эти дома, примерно с 2020 года регулярно 2-3 раза в год минимум проводился мониторинг, который включал в себя выезд рабочей группы на площадку с приглашением представителей муниципального образования, они обеспечивали наличие застройщика, осмотр объекта, анализ предоставляемой информации. Во время проведения мониторинга у них возникали вопросы по темпам строительства, видели риски по несвоевременному вводу по срокам заявленных в контрактах, недостаточное количество, с их точки зрения, рабочих на площадке (было 2-3 человека),техники было мало, по информации она была арендованная.Суд считает, что в данном случае, принимая во внимание участие представителей администрации в мониторинге, глава округа знал о фактическом положении дел на стройке, о финансовых возможностях ООО, несмотря на это, в дальнейшем заключил 17 муниципальных контрактов с «Интеграл-Т».

Таким образом, показаниями указанных свидетелей и материалами дела подтверждается финансовая несостоятельность ООО и осведомленность главы округа о финансовых возможностях ООО «Интеграл - Т» перед заключением муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность квартир. 

Доводы защитника об том, что ФИО1 не давал и не мог дать незаконных указаний подчиненным ему сотрудникам администрации (включая зам. главы Ш.О.В.) организовать проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений с условием нарушения 44-ФЗ «О контрактной системе закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» возможности авансирования в объеме более 30 % от цены контракта и обеспечения исполнения каждого контракта банковской гарантией 1% от его цены суд находит неубедительными. В судебном заседании установлено, что именно ФИО1 с 09.03.2021 года являлся руководителем контрактной службы администрации Яйского муниципального округа, а также работодателем Ш.О.В. и других сотрудников администрации, был авторитетным руководителеми для подчиненных, в связи с чем, все вопросы, касающиеся заключения муниципальных контрактов, не могли быть решены без учета его мнения. Кроме того, в соответствии с п. 3.2. должностной инструкции заместителя главы округа по ЖКХ, транспорту и строительству, утвержденной главой Яйского МО ФИО1 29.09.2021, заместитель главы округа (на момент утверждения Ш.О.В.), для выполнения своих функций обязан выполнять указания и распоряжения главы округа, в связи с чем касающиеся неясности и несоответствия должны быть доведены до сведения ФИО1. 

Кроме того, доводы защитника об том, что ФИО1 не было известно о каких-либо нарушениях 44-ФЗ в муниципальных контрактах до момента проведения казначейской проверки опровергаются показаниями свидетеля П.А.В., которая в суде пояснила, что от Н.М.А. ей было известно о недопустимости заключения муниципальных контрактов, на тот момент она являлась работником экономического отдела, не имела отношения к стройке, но эту информацию знала, также такие разговоры были среди работников администрации, которые владели информацией о заключении контрактов. 

Согласно оглашенных показаний свидетеля П.А.В., данных ей в ходе предварительного следствия, П.А.В. поясняла, что в ноябре 2021 года, перед проведением аукционов на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, между работниками администрации было бурное обсуждение больших рисков заключения муниципальных контрактов на условиях, нарушающих требования ст. 96 44-ФЗ.

Таким образом, показаниями свидетеля П.А.В. подтверждается осведомленность главы и иных сотрудников администрации о финансовых возможностях ООО «Интеграл - Т» перед заключением муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность квартир.

Доводы защитника об том, что никто не сообщал Мяленко о каких либо замечаниях в проектах муниципальных контрактов опровергаются оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля П.А.В. (т.20 л.д.31), пояснявшей, что она сама, перед согласованием ею муниципальных контрактов № и № говорила ФИО1 о недопустимости заключения указанных муниципальных контрактов на условиях отсутствия обеспечения в размере 100 % суммы авансирования, она лично, обращала внимание ФИО1, что это нарушает требования 44-ФЗ, на что Мяленко никак не реагировал, выслушал ее молча, в ответ ничего не сказал. У суда нет оснований не доверять показаниям данного свидетеля, предупрежденного об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. После оглашений показаний данного свидетеля П.А.В. их подтвердила, данное утверждение стороной защиты не опровергнуто, вопросов со стороны ФИО1 к свидетелю не последовало, при этом данных о наличии неприязненных отношений между свидетелем и подсудимым суду не представлено, ФИО1 в ходе рассмотрения дела опроверг наличие таковых. 

Свидетель Н.М.А. в ходе следствия пояснила, что она доводила о выявленных нарушениях до сведения Ш.О.В., как непосредственного инициатора закупки, выделила желтым цветом несоответствие и вернула проекты в ЖКХ. 

В ходе судебного заседания и П.А.В., и Н.М.А. пояснили, что первоначально данные показания в ходе следствия соответствуют действительности, в настоящее время они не могут точно дать пояснения по некоторым вопросам в связи с запамятованием.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в силу должностных инструкций, которыми при работе руководствовались П.А.В. и Н.М.А., именно указанные лица были обязаны осуществить юридическую экспертизу проектов контрактов и дать заключение с предложением о законном порядке разрешения рассматриваемых вопросов, учитывая, что оба свидетеля утверждали в ходе следствия и допроса в суде о том, что выделили выявленные в контрактах нарушения желтым цветом, написали свои комментарии о недопустимости указанных в проекте условий и возвратили проекты контрактов в отдел ЖКХ, у суда нет оснований считать данные показания надуманными, поскольку они последовательны и соответствовали на тот момент практике, имевшей место в администрации муниципального округа.

Доводы подсудимого о том, что он не давал распоряжение относительно проведения аукционов, что ему никто не давал проекты муниципальных контрактов для изучения и ознакомления, до него никто из юристов не доводил информацию о наличии в проектах несоответствия 44 ФЗ суд считает недостоверными, с целью уйти от ответственности.

Доводы защитника об том, что ФИО1 не предоставлялись аукционная документация с приложениями, он подписал только титульный лист к аукционной документации и лист заявки, не влияет на вывод суда о наличии в действиях ФИО1 состава преступления, поскольку он, являясь руководителем, в силу своих должностных полномочий был обязан проверять законность подписанных им документов. 

Доводы Крешталь О.Н. о том, что ФИО1 не давал указаний о перечислении денежных средств из бюджета на счет «Интеграл-Т», платежные документы подписал в силу своих обязанностей, не будучи осведомленным о каких либо нарушениях 44 ФЗ, суд во внимание не принимает, поскольку дача кому либо указаний о перечислении денежных средств в предъявленном обвинении ФИО1 не вменялась, при этом, суд учитывает, что именно ФИО1 были подписаны все документы о перечислении денежных средств, в результате чего указанные денежные средства в сумме 115988655.75 рублей перечислены ООО «Интеграл-Т».

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, ввиду того, что в ходе судебного заседания корыстная заинтересованность не нашла своего подтверждения, суд признает несостоятельными, поскольку они состоят в противоречии с разъяснениями, данными в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 19 от 16 октября 2009 года "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий", согласно которым под использованием лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ст. 285 УК РФ) судам следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения.

Исходя из разъяснений, данных в п. 16 указанного выше Пленума Верховного Суда РФ, как признаки субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, корыстная заинтересованность состоит в стремлении должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.); а иная личная заинтересованность - в стремлении должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

С момента признания ООО «Интеграл-Т» победителем аукциона у последнего возникло две самостоятельных обязанности - подписание проекта контракта и представление надлежащего обеспечения. При этом, неисполнение каждой из них являлось самостоятельным основанием для признания лица уклонившимся от заключения контракта. Таким образом, в случае соблюдения подсудимым требований, установленных п. 2 ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно, установления в проекте муниципального контракта размера обеспечения исполнения контракта в размере аванса, при отсутствии у ООО «Интеграл-Т» достаточных средств для обеспечения исполнения муниципальных контрактов, отсутствовали бы основания для заключения указанных муниципальных контрактов, однако, учитывая контроль по вопросу строительства жилья в округе, изложенных в перечне поручений по итогам аппаратного совещения от 05.10.2020 №233 ( т.14 л.д.41), согласно которого ФИО1 был обязан до 09.10.2020 и повторно до 09.11.2020 доложить о фактическом вводе жилья, копии протокола поручений( т.14 л.д.48) где перед ФИО1 была поставлена задача в срок до 05.07.2021 принять решение и доложить о варианте механизма завершения строительства многоквартирного дома и реализации жилищных программ 2021 года, копии перечня поручений Губернатора ( т.14 л.д.57) согласно которого ФИО1 поручено с 09.08.2021 года и далее постоянно взять под контроль соблюдение сроков строительства жилья и иных поручений руководства области, ФИО1, зная об отсутствии денежных средств, при этом принимая во внимание то обстоятельство, что ООО уже приступило к строительству домов, дал указание об организации проведения аукционов на условиях выгодных ООО «Интеграл-Т», что свидетельствует о наличии в его действиях корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением путем совершения неправомерных действий получить для ООО выгоду имущественного характера за счет расходования бюджетных средств Яйского муниципальногог округа, а также иной личной заинтересованности обусловленной стремлением извлечь для себя выгоду неимущественного характера, вызванным желанием повысить свой авторитет перед администрацией Кемеровской области - Кузбасса, зарекомендовать себя опытным и компетентным руководителем, соответствующим занимаемой должности и способным решать в установленные сроки поставленные задачи по поощрению жилищного строительства, созданию условий для осуществления права на жилище, предоставлению жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, для создания видимости надлежащего исполнения им своих служебных обязанностей по целевому и рациональному использованию лимитов финансирования на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство, а также средств бюджета Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, дал незаконные указания организовать проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов.

Кроме того, вопреки доводам ФИО1 о том, что в его действиях могла быть ст.293 УК РФ-халатность, не основаны на фактических обстоятельствах дела и нормах уголовного закона, поскольку умышленный характер действий ФИО1 вытекает из существа его действий, он осознавал, что указанные 17 муниципальных контрактов на приобретение жилья подготовлены с нарушениями ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, и понимал, что у него нет никаких законных оснований как для их подписания, так и перечисления подрядчику ООО «Интеграл-Т» денежных средств по ним. При этом ФИО1 действовал из корыстной и иной личной заинтересованности, желая повысить свой авторитет, показатели своей работы и избежать привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

На основании изложенного суд находит обоснованным вменение в вину ФИО1 совершение злоупотребления должностными полномочиями из корыстной и иной личной заинтересованности и вопреки доводов стороны защиты, не усматривает оснований для вынесения оправдательного приговора.

Суд считает вину подсудимого ФИО1 доказанной, а квалификацию, данную органом предварительного расследования его действиям – верной. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 285 УК РФ как злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий", под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения преступления в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.

В судебном заседании установлено, что в результате незаконных действий ФИО1 из бюджета Яйского муниципального округа ООО «Интеграл-Т» перечислены денежные средства в размере 115 988 655 рублей 75 копеек по муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений – квартир, однако ООО «Интеграл-Т» не осуществило в полном объеме строительство двух многоквартирных жилых домов, и не передало жилые помещения (благоустроенные квартиры) в указанных многоквартирных жилых домах в муниципальную собственность, то есть не исполнило свои обязательства по указанным муниципальным контрактам, не осуществило возврат Администрации денежных средств, полученных в качестве аванса по указанным муниципальным контрактам.

Вследствие незаконных действий ФИО1 и заключению муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений – квартир, был причинен значительный материальный ущерб, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства, выразившихся в причинении имущественного вреда администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области, в подрыве авторитета органов местного самоуправления Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, дискредитации должностных лиц данного муниципального образования в целом, повлекшее тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области в размере 115988655,75 рублей, принимая во внимание, что Яйский муниципальный округ является дотационным.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6 УК РФ, руководствуется принципом справедливости, а также ч.3 ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, какое влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО1 суд находит частичное признание вины подсудимым, выразившееся в признании фактов, касающихся подписания заявок и муниципальных контрактов, 

<

данные изъяты>, нуждающихся в помощи, наличие ведомственных наград, грамот и благодарностей, положительные характеристики по месту жительства и работы, занятие общественно-полезным трудом, привлечение к уголовной ответственности впервые, мнение представителя потерпевшего о снисхождении к подсудимому.

Иных смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств судом не установлено. 

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО1 не установлено.

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания ФИО1 суд не находит.

Вопреки доводов стороны защиты, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведения во время или после совершения преступления, позволяющих применить в отношении ФИО1 положения ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства как каждое в отдельности так и их совокупность существенно не уменьшают степень общественной опасности преступления, других оснований также не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания ФИО1 не имеется.

При назначении наказания суд принимает, в том числе, во внимание личность подсудимого ФИО1, учитывает, что он имеет семью, не работает, имеет постоянное место жительства, на учетах у нарколога, психиатра не состоит.

Суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно лишь при применении к нему наказания в виде лишения свободы, более того, санкцией статьи не предусмотрено иного вида наказания за указанное преступление. 

При этом суд, вопреки доводов стороны защиты, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого и иных обстоятельств, установленных по делу, не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ и назначения наказания условно, наличие смягчающих по делу обстоятельств, не возбуждение иных уголовных дел в отношении подсудимого, вопреки доводов защитника Крешталь О.Н., не может в полной мере свидетельствовать о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания им наказания, в связи с чем, суд убежден, что цели наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений в отношении ФИО1 могут быть достигнуты лишь при постоянном и строгом надзоре и контроле за ним в условиях исправительного учреждения при изоляции его от общества.

В качестве дополнительного наказания подсудимому, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и органах местного самоуправления, поскольку оно является обязательным и соответствует интересам общества, будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого. Оснований для освобождения подсудимого от дополнительного вида наказания судом не установлено.

Отбывать наказание ФИО1, в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, должен в исправительной колонии общего режима как мужчина, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавший лишение свободы.

В соответствии с требованиями ст.72 УК РФ, срок наказания следует исчислять со дня вступления данного приговора в законную силу, при этом в срок отбытия наказания ФИО1, следует зачесть срок его содержания под стражей с 17.10.2023 по 12.08.2024, а также с 24.07.2025 до дня вступления приговора суда в законную силу в соответствие с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в срок отбытия наказания ФИО1, следует зачесть срок его содержания под домашним арестом с 13.08.2024 по 30.04.2025 в соответствие с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании пункта 1.1 части 10 статьи 109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО1 под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных пунктом 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, в период с 01.05.2025 г. до 24.07.2025 из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с пунктом "б" части 3.1 статьи 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В силу части 4 ст.47 УК РФ, исчислять срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и органах местного самоуправления, следует с момента отбытия наказания в виде лишения свободы.

Суд считает необходимым, в целях исполнения настоящего приговора, меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу, взяв ФИО1 под стражу в зале суда.

Решая вопрос о заявленном администрацией Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса гражданском иске (том № 23, л.д.168-170) суд приходит следующему.

Представитель гражданского истца Д.А. в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Гражданский ответчик ФИО1 исковые требования гражданского истца не признал.

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1). Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2).

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» на муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными данным законом.

Статьей 277 ТК РФ предусмотрено, что руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

В соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Согласно пунктам 3 - 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника, в том числе в случаях: умышленного причинения ущерба, причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда.

Если вина должностных лиц органов местного самоуправления в причинении ущерба муниципальному образованию подтверждена в полном объеме вступившими в законную силу приговорами судов, то при рассмотрении гражданского иска в соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ эти обстоятельства презюмируются виновному лицу и не требуют доказывания.

Учитывая, что полная материальная ответственность руководителя организации за ущерб, причиненный организации, наступает в силу закона, работодатель вправе требовать возмещения ущерба в полном размере независимо от того, содержится ли в трудовом договоре с этим лицом условие о полной материальной ответственности (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ).

К числу таких оснований для привлечения работника к полной материальной ответственности относится совершение им преступных действий, установленных вступившим в законную силу приговором суда.

Таким образом, если в результате преступных действий должностных лиц органов местного самоуправления муниципальному образованию причинен материальный ущерб и факт совершения преступления и причиненного ущерба подтвержден вступившим в законную силу приговором суда, то указанные лица могут быть привлечены к полной материальной ответственности за вред, причиненный муниципальному образованию. При этом муниципальное образование в лице определенных уставом муниципального образования органов (представительных, исполнительных) выступает работодателем по отношению к данным должностным лицам.

Поскольку материальный ущерб гражданскому истцу – администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса в виде перечисленных авансовых платежей по муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство объекта недвижимости причинен в результате преступных действий подсудимого ФИО1,имеется прямая причинно-следственная связь между действиями подсудимого и наступлением ущерба, ответственность по возмещению причиненного материального ущерба необходимо возложить на подсудимого.

Исходя из изложенного, исковые требования гражданского истца – администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса в сумме 115 988 655 рублей 75 копеек в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда, суд считает необходимым удовлетворить полностью, поскольку указанная сумма является прямым ущербом, причиненным потерпевшему преступлением, на момент вынесения приговора подсудимым не возмещена, представленные расчеты иска подсудимым и защитником не оспорены, судом проверены и признаны правильными. 

То обстоятельство, что решениями Арбитражного суда Кемеровской области удовлетворены исковые требования администрации Яйского муниципального округа к ООО «Интеграл-Т», с ООО «Интеграл-Т» взыскано неосновательное обогащение по 17 муниципальным контрактам в размере 115988655 рублей 75 копеек, не свидетельствует о восстановлении нарушенных прав администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области либо о двойном взыскании ущерба, поскольку причинённый действиями ФИО1 ущерб администрации Яйского муниципального округа в размере 115988655,75 рублей в ином порядке, в том числе добровольном, не возмещался, на момент рассмотрения дела ущерб муниципальному образованию со стороны ООО «Интеграл-Т» не возмещен, ФИО1 должен нести материальную ответственность за причинённый вред, как виновное лицо.

Согласно п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ на имущество, принадлежащее ФИО1 наложен арест: 

- автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», идентификационный номер (VIN): №, 2014 год выпуска, государственный регистрационный знак №, средней рыночной стоимостью согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей;

- прицеп к легковому автомобилю марки «МЗСА 81771С», идентификационный номер (VIN): №, 2023 года выпуска, государственный регистрационный знак №, средней рыночной стоимостью согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 70 +/- 3 кв.м., расположенный по адресу

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

- нежилое здание (гараж), кадастровый №, площадью 54,3 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рубль;

- машино-место, кадастровый №, площадью 15,10 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

- жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 42 кв.м., расположенная по адресу: адрес 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

в виде запрета распоряжаться данным имуществом, путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества

- денежные средства в размере 15 048 рублей 92 копейки на счете ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» в виде запрета пользоваться и распоряжаться данным имуществом в любой форме.

Поскольку стоимость арестованного имущества соразмерна причиненному преступлением ущербу, в соответствии с разъяснениям содержащимся в п. 29 указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, арест на указанное имущество подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с требованиями п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вещественные доказательства: 

- материалы, представленные с сопроводительным письмом от 21.11.2023 №96/19068 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от 12.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (том №11, л.д.230-233); материалы, представленные с сопроводительным письмом от 13.03.2024 №96/3000 «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на 202-98-2023 от 13.12.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (том №11, л.д.230-233); материалы, представленные с сопроводительным письмом от 31.10.2023 №96/17793 «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на №202-100-2023 от 19.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (том №11, л.д.239-241); документы, аукционной документации на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) по заключенным между администрацией Яйского муниципального округа и ООО «Интеграл-Т» 17 муниципальным контрактам, изъятые 19.04.2024 в ходе выемки у врио главы Яйского муниципального округа Р.Е. (том №11, л.д.195-205); документы, изъятые 17.10.2023 в помещении служебного кабинета заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес>(том №12, л.д.48-59); платежные поручения по муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Интеграл-Т» на приобретение квартир в строящихся домах, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес> (том №12, л.д.48-59); 

документы, включающие муниципальные контракты, заключенные между администрацией Яйского муниципального округа и ООО «Интеграл-Т», изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес> - (том №12, л.д.48-59; пакет (конверт) №2); 

акт выездной проверки администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 - на 39 л., изъятый 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес> - (том №12, л.д.209-214; пакет (конверт) №8);

документы, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в кабинете № 10 администрации Яйского муниципального округа - (том №12, л.д.209-214; пакет (конверт) №9);

документация и ежедневники ООО «Интеграл-Т», изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес> - (том №12, л.д.209-214; пакет (конверт) №10);

документы, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа и в приемной к данному кабинету, расположенных по адресу: 

<

адрес> - (том №12, л.д.209-214; пакет (конверт) №11);

документы и ежедневники за 2023 год, изъятые 17.10.2023 в ходе обыска в служебном кабинете главы Яйского муниципального округа и в приемной к данному кабинету, расположенных по адресу: 

<

адрес> - (том №12, л.д.209-214; пакет (конверт) №12);

уведомление о возобновлении исполнения обязательства по договору от 25.10.2022 №69/22-ИТ в адрес Администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса от ООО «Интеграл-Т» - на 1 л., изъятое 19.09.2023 в ходе обыска в жилище К.В.Н. по адресу: 

<

адрес> - (том №12, л.д.209-214; пакет (конверт) № 13);

уведомления от 25.05.2022 от №46/22-ИТ до №57/22-ИТ из от ООО «Интеграл-Т» в адрес Администрации Яйского муниципального округа – на 12 л., изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа и в приемной к данному кабинету по адресу: 

<

адрес>, - (том №12, л.д.209-214; пакет (конверт) № 15);

электронный носитель (оптический диск) CD-R, представленный с сопроводительным письмом от 30.11.2023 №39-10-11/11-10016 из Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу - (том №30, л.д.171-172; пакет (конверт) №3); электронный носитель (оптический диск) CD-R с информацией о соединениях абонентского номера № (ФИО1) за период времени с 29.11.2020 по 16.11.2023, представленный оператором сотовой связи – ООО «Т2 Мобайл», с сопроводительным письмом № 194866 от 29.11.2023, на основании постановления Центрального районного суда г.Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ - (том №12, л.д.14-16; пакет (конверт) №4); оптический диск DVD-R диск, рег. № №R от 21.11.2023, представленный с сопроводительным письмом от 21.11.2023 №96/19068 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от 12.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу - (том №11, л.д.230-233; пакет (конверт) №5); оптический диск CD-R, №/CD-R от 12.12.2023, представленный с сопроводительным письмом от 13.03.2024 №96/3000 «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на 202-98-2023 от 13.12.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу - (том №11, л.д.230-233; пакет (конверт) №6); оптический диск «Mirex CD-R 48X/700Mb/80min», изъятый 19.09.2023 в ходе обыска в кабинете № 10 администрации Яйского муниципального округа - (том №12, л.д.209-214; пакет (конверт) №7); 

оптический диск CD-R, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на № от ДД.ММ.ГГГГ)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу - (том №11, л.д.239-241; пакет (конверт) № 14);

2 оптических диска с видеозаписями результата видеосъемки при проведении допроса свидетеля Ш.О.В. от 05.12.2023 - (пакет (конверт) №16);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями по счетам по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», на имя ФИО1 и Ш.О.В., представленный с письмом от ДД.ММ.ГГГГ № № из отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса г. Нижний Новгород Операционный центр ПАО «Сбербанк» - (пакет (конверт) №17);

электронный носитель (оптический диск) с документами из регистрационного дела ООО «Интеграл-Т», включая учредительные документы, а также с выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интеграл-Т» и ООО СЗ «Интеграл-Т», представленный с сопроводительным письмом от 02.11.2023 № 13-10/008186дсп из Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу», - (пакет (конверт) №18);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями по счетам ФИО1 и Ш.О.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от 09.11.2023 №Е01-23-01/87925 из АО «Россельхозбанк», - (пакет (конверт) №19);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями по счетам ФИО5, ФИО6 и ФИО5 за период с 01.09.2021 по 22.11.2023, представленный с сопроводительным письмом от 26.12.2023 №21040/У01 ПАО «БАНК УРАЛСИБ», - (пакет (конверт) №20);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями по счетам ООО «ИНТЕГРАЛ-Т» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от 11.12.2023 №19471/У01 из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», - (пакет (конверт) №21);

оптический диск CD-R, являющийся приложением к письму (ответу на запрос) из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» № Е01-23-01/84156 от 27.10.2023, со сведениями по счетам ФИО1, представленный в числе материалов с сопроводительным письмом от 21.11.2023 №96/19068 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от 12.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, - (пакет (конверт) №22);

оптический диск CD-R, являющийся приложением к письму (ответу на запрос) из ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями по счетам ФИО1, представленный в числе материалов с сопроводительным письмом от 21.11.2023 №96/19068 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от 12.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, - (пакет (конверт) №23);

электронный носитель информации (оптический диск CD-R диск, являющийся приложением к сопроводительному письму из МИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) со сведениями в отношении ООО «Интеграл-Т», представленный в числе материалов, поступивших с сопроводительным письмом от 11.09.2023 №96/14579 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, - (пакет (конверт) №24);

электронный носитель (оптический диск) CD-R со сведениями по счетам ООО «ИНТЕГРАЛ-Т» № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом № 19909/У01 от 01.09.2023 из ПАО «Банк Уралсиб», выделен 01.09.2023 в числе других материалов из уголовного дела №12201320071000228, - (пакет (конверт) №25);

электронный носитель (оптический диск), являющийся приложением к заключению эксперта №113-19/06-18/233-2023 от 30.10.2023 судебной бухгалтерской экспертизы, - (пакет (конверт) №26);

электронный носитель (оптический диск), являющийся приложением к заключению эксперта №113-19/06-18/76-2024 от 13.03.2024 дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы, - (пакет (конверт) №27);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями из ПАО «Банк Уралсиб» об операциях по счетам ООО «Интеграл-Т» (ИНН №) № и 40№, представленный с сопроводительным письмом от 01.09.2023 №12909/901, - (пакет (конверт) №28), хранящиеся при уголовном деле, в силу п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения дела;

- мобильный телефон Ш.О.В. марки «Samsung» модель «Galaxy A53 5G», изъятый 17.10.2023 в ходе обыска в жилище Ш.О.В. по адресу: 

<

адрес>, в силу п.6.ч.3 ст.81 УПК РФ, следует возвратить собственнику Ш.О.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и органах местного самоуправления на срок 2 года.

В соответствии с требованиями ст. 72 УК РФ, срок основного наказания исчислять со дня вступления данного приговора в законную силу.

Засчитать в срок отбытия основного наказания, время содержания ФИО1 под стражей по настоящему делу с 17.10.2023 по 12.08.2024, а также с 24.07.2025 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, а также время содержания ФИО1 под домашним арестом с 13.08.2024 по 30.04.2025 из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании пункта 1.1 части 10 статьи 109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО1 под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных пунктом 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, в период с 01.05.2025 г. до 24.07.2025 из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с пунктом "б" части 3.1 статьи 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с частью 4 ст.47 УК РФ назначенное ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и органах местного самоуправления исчислять с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу, взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Исковые требования администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, ИНН в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда 115 988 655 (сто пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 75 копеек. 

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1:

- автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», идентификационный номер (VIN): №, 2014 год выпуска, государственный регистрационный знак №, средней рыночной стоимостью согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей;

- прицеп к легковому автомобилю марки «МЗСА 81771С», идентификационный номер (VIN): №, 2023 года выпуска, государственный регистрационный знак №, средней рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

- земельный участок, кадастровый №, площадью 70 +/- 3 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

- нежилое здание (гараж), кадастровый №, площадью 54,3 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рубль;

- машино-место, кадастровый №, площадью 15,10 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

- жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 42 кв.м., расположенная по адресу: адрес 

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в виде запрета распоряжаться данным имуществом, путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества;

- денежные средства в размере 15 048 рублей 92 копейки на счете ФИО1 №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» в виде запрета пользоваться и распоряжаться данным имуществом в любой форме, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: - материалы, представленные с сопроводительным письмом от 21.11.2023 №№ «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от 12.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу ; материалы, представленные с сопроводительным письмом от 13.03.2024 №№ «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на 202-98-2023 от 13.12.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу ; материалы, представленные с сопроводительным письмом от 31.10.2023 №№ «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на №202-100-2023 от 19.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу; документы, аукционной документации на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) по заключенным между администрацией Яйского муниципального округа и ООО «Интеграл-Т» 17 муниципальным контрактам, изъятые 19.04.2024 в ходе выемки у врио главы Яйского муниципального округа Р.Е.; документы, изъятые 17.10.2023 в помещении служебного кабинета заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес>; платежные поручения по муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Интеграл-Т» на приобретение квартир в строящихся домах, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес> ; 

документы, включающие муниципальные контракты, заключенные между администрацией Яйского муниципального округа и ООО «Интеграл-Т», изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес> ( пакет (конверт) №2); 

акт выездной проверки администрации Яйского муниципального округа от 05.12.2022 - на 39 л., изъятый 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа по адресу: 

<

адрес> ( пакет (конверт) №8);

документы, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в кабинете № 10 администрации Яйского муниципального округа ( пакет (конверт) №9);

документация и ежедневники ООО «Интеграл-Т», изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес> ( пакет (конверт) №10);

документы, изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа и в приемной к данному кабинету, расположенных по адресу: 

<

адрес> (пакет (конверт) №11);

документы и ежедневники за 2023 год, изъятые 17.10.2023 в ходе обыска в служебном кабинете главы Яйского муниципального округа и в приемной к данному кабинету, расположенных по адресу: 

<

адрес> ( пакет (конверт) №12);

уведомление о возобновлении исполнения обязательства по договору от 25.10.2022 №69/22-ИТ в адрес Администрации Яйского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса от ООО «Интеграл-Т» - на 1 л., изъятое 19.09.2023 в ходе обыска в жилище К.В.Н. по адресу: 

<

адрес> (пакет (конверт) № 13);

уведомления от 25.05.2022 от №46/22-ИТ до №57/22-ИТ из от ООО «Интеграл-Т» в адрес Администрации Яйского муниципального округа – на 12 л., изъятые 19.09.2023 в ходе обыска в администрации Яйского муниципального округа и в приемной к данному кабинету по адресу: 

<

адрес> ( пакет (конверт) № 15);

электронный носитель (оптический диск) CD-R, представленный с сопроводительным письмом от 30.11.2023 №39-10-11/11-10016 из Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу - пакет (конверт) №; электронный носитель (оптический диск) CD-R с информацией о соединениях абонентского номера № (ФИО1) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный оператором сотовой связи – ООО «Т2 Мобайл», с сопроводительным письмом № 194866 от 29.11.2023, на основании постановления Центрального районного суда г.Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ; пакет (конверт) №); оптический диск DVD-R диск, рег. № № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от 12.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу ; пакет (конверт) №5); оптический диск CD-R, №/CD-R от ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на 202-98-2023 от 13.12.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу ; пакет (конверт) №6; оптический диск «Mirex CD-R 48X/700Mb/80min», изъятый 19.09.2023 в ходе обыска в кабинете № 10 администрации Яйского муниципального округа (пакет (конверт) №7); 

оптический диск CD-R, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности (на №202-100-2023 от 19.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу ( пакет (конверт) № 14);

2 оптических диска с видеозаписями результата видеосъемки при проведении допроса свидетеля Ш.О.В. от 05.12.2023 (пакет (конверт) №16;

электронный носитель (оптический диск) со сведениями по счетам по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», на имя ФИО1 и Ш.О.В., представленный с письмом от ДД.ММ.ГГГГ № № из отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса г. Нижний Новгород Операционный центр ПАО «Сбербанк» ( пакет (конверт) №);

электронный носитель (оптический диск) с документами из регистрационного дела ООО «Интеграл-Т», включая учредительные документы, а также с выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интеграл-Т» и ООО СЗ «Интеграл-Т», представленный с сопроводительным письмом от 02.11.2023 № 13-10/008186дсп из Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу» (пакет (конверт) №18);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями по счетам ФИО1 и Ш.О.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от 09.11.2023 №Е01-23-01/87925 из АО «Россельхозбанк» (пакет (конверт) №19);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями по счетам К. Ан.В., К.В.Н. и К. Ал.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от 26.12.2023 №21040/У01 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»(пакет (конверт) №20);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями по счетам ООО «ИНТЕГРАЛ-Т» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом от 11.12.2023 №19471/У01 из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (пакет (конверт) №21);

оптический диск CD-R, являющийся приложением к письму (ответу на запрос) из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» № Е01-23-01/84156 от 27.10.2023, со сведениями по счетам ФИО1, представленный в числе материалов с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от 12.10.2023)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу ( пакет (конверт) №22);

оптический диск CD-R, являющийся приложением к письму (ответу на запрос) из ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями по счетам ФИО1, представленный в числе материалов с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности» (на 202-98-2023 от ДД.ММ.ГГГГ)» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (пакет (конверт) №23);

электронный носитель информации (оптический диск CD-R диск, являющийся приложением к сопроводительному письму из МИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу № 08-14/006235дсп от 24.08.2023) со сведениями в отношении ООО «Интеграл-Т», представленный в числе материалов, поступивших с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № «О результатах оперативно-розыскной деятельности» из Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (пакет (конверт) №24);

электронный носитель (оптический диск) CD-R со сведениями по счетам ООО «ИНТЕГРАЛ-Т» № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный с сопроводительным письмом № 19909/У01 от 01.09.2023 из ПАО «Банк Уралсиб», выделен 01.09.2023 в числе других материалов из уголовного дела №12201320071000228 (пакет (конверт) №25);

электронный носитель (оптический диск), являющийся приложением к заключению эксперта №113-19/06-18/233-2023 от 30.10.2023 судебной бухгалтерской экспертизы ( пакет (конверт) №26);

электронный носитель (оптический диск), являющийся приложением к заключению эксперта №113-19/06-18/76-2024 от 13.03.2024 дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы (пакет (конверт) №27);

электронный носитель (оптический диск) со сведениями из ПАО «Банк Уралсиб» об операциях по счетам ООО «Интеграл-Т» (ИНН №) № и 40№, представленный с сопроводительным письмом от 01.09.2023 №12909/901 (пакет (конверт) №28), хранящиеся при уголовном деле подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- мобильный телефон Ш.О.В. марки «Samsung» модель «Galaxy A53 5G», изъятый 17.10.2023 в ходе обыска в жилище Ш.О.В. по адресу: 

<

адрес> возвратить собственнику- Ш.О.В..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей –в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции непосредственно, либо с использованием систем видеоконференцсвязи, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора, или по жалобам других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление. Осужденный также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, вправе отказаться от данного защитника, ходатайствовать перед судом о назначении другого защитника.

Председательствующий подпись

Копия верна.Судья Т.П. Гритчина