Дело №2-496/19

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

14 февраля 2019 г. г.Раменское

Раменский городской суд Московской области под председательством судьи Аладина Д.А.,

при секретаре Бабаковой К.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединению к электрическим сетям, неустойки, обязании выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, взыскании расходов по оплате госпошлины,

у с т а н о в и л:

АО «Мособлэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 со следующими требованиями:

- о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединению к электрическим сетям от 

<

дата> 

<

номер> в размере 5 079 руб. 88 коп.;

- обязании в течение 3 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия, предусмотренные п.11 Технических условий и п.8 договора, а именно: 1. Смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения. 2. От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения. Тип ЛЭП, трассу, марку и сечение определить проектом. 3. Разработку проектной документации в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. Проектом учесть требования Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> в части соблюдения максимальных значений коэффициента реактивной мощности. 4. В состав проекта включить раздел «качество электрической энергии», в котором выполнить технические решения, в том числе расчет суммарной установленной мощности искажающих электроприемников, с целью обеспечения в процессе эксплуатации показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013. 5. Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела Х «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии». Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 1.0 и выше. Рекомендуется установка статического (электронного) электросчетчика. На момент ввода эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией. Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5S и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительны клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока). 6. Средства и системы учета электрической энергии должны быть защищены от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению. 7. Предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величиы максимальной мощности. 8. Для повышения электро- и пожаробезопасности объекта рекомендуется на ввод установить устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок. 8. Для обеспечения надежной работы электрооборудования Заявителя, при присоединении от ВЛ, рекомендуется на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройств электроустановок. Присоединяемые энергопринимающие устройства должны обеспечивать электромагнитную совместимость присоединяемой установки с электрическими сетям) согласно ГОСТ 32144-2013. 9. В состав проекта включить раздел «Качество электрическойэнергии», в которой выполнить технические решения, в том числе расчет суммарной установленной мощности искажающих электроприемников с целью обеспечения в процессе эксплуатации показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013. 10. В проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражени электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами. 11. Направить в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, указанных в п.85 Правил. 12. Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией. 13. Получить разрешение органа федерального государственного энергетическог надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя. 14. Подписать акт об осуществления технологического присоединения; о взыскании расходов по уплате госпошлины 6400 руб.

В обоснование своих требований истец указал, что между АО «Мособлэнерго» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

<

номер> от 

<

дата>.. В соответствии с п.1. договора и Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» (приложение №1 к договору) сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями и оплатить выполнение сетевой организации мероприятий по технологическому присоединению. Согласно п.10.1 договора размер платы за технологическое присоединении к электрическим сетям составляет 5 567 руб. 20 коп.. По состоянию на 

<

дата>. истец готов осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ответчика, однако лишено возможности, ввиду неисполнения ответчиком возложенных на него обязательств по выполнению мероприятий, предусмотренных п.8 договора, п.11 технических условий и пп. г) п.7 правил. 

<

дата>. истец обратился к ответчику с претензией о выполнении мероприятий по технологическому присоединению и перечислению неустойки, однако ответчик добровольно претензию не удовлетворил. Согласно п.17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Срок нарушения исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению составил 365 дней (с 

<

дата>. по 

<

дата>.). Сумма неустойки по договору (п. 17) составляет 5 079,88 руб.(5 567 руб. х 0,25%х 365 дн.) 

В судебном заседании представитель истца АО «Мособлэнерго» ФИО2 поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Ответчик ФИО1, в судебное заседание явился, выразил несогласие с иском, просил в иске отказать по доводам письменных возражений.

Выслушав представителя истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.1 ст.26 ФЗ от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

номер> от 

<

дата>. сетевая организация принимает на себя обязательства присоединения энергопринимающих устройств ответчика ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения обьекта/ВРУ объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 30 кВт; категория надежности -3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15 кВт. 

Ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «земельный участок» 

<

номер>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 4 года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.6 договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений сиными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; не позднее 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу)напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. 

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п.1 ст.26 Закона №35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил №861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (п.1 ст.779 ГК РФ).

Согласно п.1 ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания.

Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений статей 1, 421 и 422 ГК РФ, может устанавливаться законодательством или соглашением сторон. В данном случае в соответствии с пунктом 16 Правил №861 и пунктом 11 договора сторонами фактически предусмотрено авансирование выполнения истцом работ ответчиком.

Статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Между тем, как указывает ответчик и не оспаривалось истцом, 

<

дата> ФИО1 обратился в АО «Мособлэнерго» с заявлением о расторжении договора.

Письмом от 

<

дата>. 

<

номер> ответчику был дан ответ о том, что мероприятия указанные в пункте 11 Технических условий им не выполнены и сумма по договору не подлежит возврату. 

Вместе с тем, в силу п. 15 договора, договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Поскольку, в соответствии с положениями п. 2 ст. 450.1 ГК РФ договор об осуществлении технологического присоединению к электрическим сетям, заключенный с ответчиком, считается расторгнутым с 

<

дата>г. в связи с односторонним отказом ФИО1 от исполнения договора, постольку у ответчика отсутствуют обязательства перед истцом, по проведению мероприятий по технологическому присоединению.

Рассматривая вопрос о взыскании с ФИО1 неустойки по договору об осуществлении технологического присоединению к электрическим сетям от 

<

дата>. 

<

номер> в размере 5 079 руб. 88 коп. суд приходит к следующему.

Неустойка, определение которой содержится в п.1 ст.330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

Указанная в подп. «в» п.16 Правил №861 неустойка установлена за нарушение одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Из материалов дела следует, что по состоянию на 

<

дата>. ответчик не выполнил обязательства, предусмотренные п.8 договора, а также п.11 Технических условий. 

<

дата>. истец обратился к ответчику с претензией о выполнении мероприятий по технологическому присоединению и перечислению неустойки, однако ответчик добровольно претензию не удовлетворил. 

Согласно п.17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Согласно п.10.1 договора размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации составляет 5 567,48 руб., в т.ч. НДС 849,20 руб.. Срок нарушения исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению составил 561 дней (с 

<

дата>. по 

<

дата>.), но расчет неустойки истцом произведен за 365 дней, с учетом п.17 договора. Сумма неустойки по договору (п. 17) составляет 5 079,88 руб.(5 567 руб. х 0,25%х 365 дн.).

Поскольку нарушения срока исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика имело место быть, при том, что ответчик с заявлением о расторжении договора обратился в адрес истца только 

<

дата>., суд полагает, что требования истца в данной части подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с требованиями ст.98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины, пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 400 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковое требование АО «Мособлэнерго» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Мособлэнерго» неустойку по договору об осуществлении технологического присоединению к электрическим сетям от 

<

дата>. 

<

номер> в размере 5 079 руб. 88 коп. и расходы по оплате госпошлины 400 руб.

В удовлетворении требований АО «Мособлэнерго» об обязании ФИО1 в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия, предусмотренные п.11 Технических условий и п.8 договора - отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Раменский городской суд путем подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

В окончательной форме решение изготовлено 01.03.2019г.

Судья: