Дело № 2-4310/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Кемерово в составе 

председательствующего судьи Язовой М.А.,

при секретаре Руфиной Н.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Кемерово

12 октября 2018 года

гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Альянс» о взыскании денежных средств по договору подряда, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Сибирский Альянс» о взыскании денежных средств по договору подряда.

Свои требования мотивирует тем, что **.**.**** между ООО «Сибирский Альянс» (Подрядчиком), с одной стороны, и ФИО1 (Заказчиком), с другой стороны, заключен Договор подряда строительства жилого дома по адресу: ..., согласно условиям которого Подрядчик обязуется в предусмотренный Договором срок построить индивидуальный жилой дом и после подписания акта на выполненные работы объекта строительства передать Заказчику объект строительства, а Заказчик обязуется оплатить Подрядчику обусловленную Договором стоимость объекта строительства и принять его.

Согласно п. 2.2. дата начала строительных работ: **.**.****. Дата окончания строительных работ: **.**.****. Работы проводятся двумя этапами: первый этап – с **.**.****., второй этап – с **.**.****. Виды работ и сроки выполнения каждого этапа указаны в приложении ### к договору подряда, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

В соответствии с п. 5.1. Договора подряда строительства жилого дома, цена Договора на момент его заключения составляет 7 000 000 рублей, которая уплачивается двумя этапами: 3 500 000 руб. - в день подписания договора, 3 500 000 руб. - **.**.****. НДС не облагается.

Согласно п. 5.2 Договора оплата по Договору может изменяться от первоначальной его цены, указанной в п. 5.1, в связи с удорожанием стоимости работ, производством дополнительных работ, возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договор (абзац 2 пункт 6 статьи 709 ГК РФ).

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в технической документации работы, установивший необходимость проведения дополнительных работ, и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику (п. 5.3).

Со стороны истца, как Заказчика, обязательства по Договору подряда строительства жилого дома от **.**.**** исполнены в полном объеме, денежные средства переданы в соответствии с условиями Договора, предусмотренными п. 5.1 Договора, в общей сумме 7 000 000 рублей: **.**.****. - 3 500 000 руб. и **.**.****. - 3 500 000 руб.

Согласно условиям Договора Подрядчик обязуется:

- использовать денежные средства, полученные от Заказчика, по целевому назначению - строительство объекта строительства, указанного в п. 1.2 Договора (п.3.1.1),

- построить объект строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (3.1.2),

- в случае, если строительство (создание) объекта строительства не может быть завершено в предусмотренный Договором срок, не позднее, чем за 2 (две) недели до истечения указанного срока направить Заказчику соответствующую информацию и предложение об изменении Договора (п.3.1.5).

В нарушение п.п. 1.2., 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 Договора подряда строительства жилого дома **.**.**** Подрядчик не исполнил свои обязательства и не осуществил постройку индивидуального жилого дома по адресу: ....

На неоднократные просьбы выполнить работы в сроки, указанные в договоре (п. 2.2), ему обещали все исполнить. Однако до настоящего времени сроки, предусмотренные договором, истекли, дом на участке не построен, тогда как им полностью оплачены денежные средства на его строительство.

Со стороны Подрядчика никакой информации и предложений об изменении сроков строительства дома в соответствии с п. 3.1.5 Договора в адрес Заказчика не поступало.

**.**.**** истцом Подрядчику была вручена претензия, в которой указано на односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в соответствии со ст. 717 ГК РФ, а также требование о возврате уплаченной им денежной суммы в размере 7 000 000 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 372 150, 67 рублей за период с **.**.**** (день, следующий за днем передачи денежных средств) по **.**.**** (день предъявления претензии).

Однако ответа на претензию истец не получил до настоящего времени и деньги ответчиком истцу не возвращены.

Поскольку условиями Договора не предусмотрен размер неустойки за нарушение исполнения обязательств по Договору, считает, что имеются основания в соответствии со ст. 395 ГК РФ для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на уплаченную Заказчиком денежную сумму по договору 7 000 000 рублей за период с **.**.**** (день, следующий за днем передачи денежных средств), до дня предъявления искового заявления в суд - **.**.**** в размере 818760, 26 рублей. 

Согласно ч. 3 ст. 395 ГК РФ считает, что с ответчика ООО «Сибирский Альянс» в его пользу подлежат взысканию проценты на сумму долга 7000000 рублей за период со дня, следующего за днем вынесения решения суда до момента фактического исполнения решения суда по настоящему делу по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Также считает, что с ответчика в соответствии со ст. 98 ГПК РФ в его пользу подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины при подаче в суд искового заявления в размере 5000 рублей.

В связи с изложенным истец просил суд взыскать с ответчика в его пользу денежную сумму в размере 7 000 000 руб., уплаченную по Договору подряда строительства жилого дома от **.**.****, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с **.**.**** по **.**.**** по ключевой ставке Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, на сумму 7 000 000 руб. в размере 818760, 26 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период со дня, следующего за днем вынесения решения суда до момента фактического исполнения решения суда по настоящему делу по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды, судебные расходы в виде оплаченной госпошлины в размере 5000 рублей.

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые требования, просит суд взыскать с ответчика в его пользу денежную сумму в размере 7 000 000 руб., уплаченную по Договору подряда строительства жилого дома от **.**.****, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с **.**.**** по **.**.**** по ключевой ставке Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, на сумму 7 000 000 рублей в размере 913164,37 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период со дня, следующего за днем вынесения решения суда до момента фактического исполнения решения суда по настоящему делу по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды, судебные расходы в виде оплаченной госпошлины в размере 47293,80 руб.

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель истца ФИО2, действующая по доверенности от **.**.**** на удовлетворении исковых требований настаивала.

Представитель ответчика ООО «Сибирский Альянс» ФИО3 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил суду отзыв на исковое заявление, где не оспаривал нарушение ООО «Сибирский Альянс» условий договора подряда, указал, что в настоящее время ответчик готов исполнить условия договора подряда и выстроить дом.

С учётом мнения представителя истца, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца, представителя ответчика.

Суд, заслушав представителя истца, изучив письменные материалы дела, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Пункты 1, 2 ст. 708 ГК РФ предусматривают, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии ст. 405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения, однако, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, и он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В силу п. 3 ст. 708 ГК РФ указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Судом установлено, что **.**.**** между ООО «Сибирский Альянс» (Подрядчиком), с одной стороны, и ФИО1 (Заказчиком), с другой стороны, заключен Договор подряда строительства жилого дома по адресу: ... Согласно п. 1.2 договора Подрядчик обязуется в предусмотренный Договором срок построить индивидуальный жилой дом и после подписания акта на выполненные работы объекта строительства передать Заказчику объект строительства, а Заказчик обязуется оплатить Подрядчику обусловленную Договором стоимость объекта строительства и принять его (л.д. 9-12). 

В соответствии с п. 2.2. договора подряда дата начала строительных работ **.**.****. Дата окончания строительных работ **.**.****. Работы проводятся двумя этапами: первый этап – с **.**.****., второй этап - с **.**.**** **.**.****. Виды работ и сроки выполнения каждого этапа указаны в приложении ### к договору подряда, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (л.д. 9).

В соответствии с п. 5.1. Договора подряда строительства жилого дома, цена Договора на момент его заключения составляет 7 000 000 руб., которая уплачивается двумя этапами: 3 500 000 руб. - в день подписания договора, 3500 000 руб. - **.**.****. НДС не облагается (л.д. 10).

Согласно п. 5.2 Договора оплата по Договору может изменяться от первоначальной его цены, указанной в п. 5.1, в связи с удорожанием стоимости работ, производством дополнительных работ, возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договор (абзац 2 пункт 6 статьи 709 ГК РФ) (л.д. 10).

В силу п. 5.3 Договора подряда подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в технической документации работы, установивший необходимость проведения дополнительных работ, и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику.

Со стороны истца, как Заказчика, обязательства по Договору подряда строительства жилого дома от **.**.**** исполнены в полном объеме, денежные средства переданы в соответствии с условиями Договора, предусмотренными п. 5.1 Договора, в общей сумме 7 000 000 руб.: **.**.****. - 3500000 руб. и **.**.****. - 3500000 руб., что подтверждается квитанцией ### от **.**.****., квитанцией ### от **.**.****. (л.д. 15).

Согласно п.3.1 Договора подряда Подрядчик обязуется:

- использовать денежные средства, полученные от Заказчика, по целевому назначению - строительство объекта строительства, указанного в п. 1.2 Договора,

- построить объект строительства в соответствии с проектно-сметной документацией,

- в случае, если строительство (создание) объекта строительства не может быть завершено в предусмотренный Договором срок, не позднее, чем за 2 (две) недели до истечения указанного срока направить Заказчику соответствующую информацию и предложение об изменении Договора (л.д. 9).

В нарушение п.п. 1.2., 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 Договора подряда строительства жилого дома от **.**.**** Подрядчик не исполнил свои обязательства и не осуществил постройку индивидуального жилого дома по адресу: .... Доказательств обратного ответчиком не представлено.

**.**.**** ответчиком получена претензия, в которой истцом указано на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии со ст. 717 ГК РФ, а также требование о возврате уплаченной денежной суммы в размере 7 000 000 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 372 150, 67 руб. за период с **.**.**** (день, следующий за днем передачи денежных средств) по **.**.**** (день предъявления претензии) (л.д. 16-19).

Однако ответа на претензию ответчик не представил, денежные средства истцу не возвратил.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком ООО «Сибирский Альянс» согласно ст. 56 ГПК РФ на момент рассмотрения дела суду не представлено достоверных и допустимых доказательств строительства индивидуального жилого дома, возврата денежных средств в размере 7 000000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма в размере 7000000 руб.

Также подлежат удовлетворению требования ФИО1 о взыскании с ООО «Сибирский Альянс» процентов за пользование чужими денежными средствами.

На основании п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Определяя размер процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих взысканию с ответчика в пользу истца, суд, проверив представленный истцом расчет, считает его правильным.

- за период с **.**.****. в размере 59452,05 руб. (3500000 руб. (размер платежа) х 10% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 62 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 26178,08 руб. (3500000 руб. (размер платежа) х 9,75% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 28 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 14958,90 руб. (7000000 руб. (размер платежа) х 9,75% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 8 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 85150,68 руб. (7000000 руб. (размер платежа) х 9,25% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 48 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 157068,49 руб. (7000 000 руб. (размер платежа) х 9% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 91 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 68465,75руб. (7000000 руб. (размер платежа) х 8,50% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 42 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 77527,40 руб. (7000000 руб. (размер платежа) х 8,25% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 49 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 83232,88 руб. (7000000 руб. (размер платежа) х 7,75% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 56 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 60410,96 руб. (7000000 руб. (размер платежа) х 7,50% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 42 (период просрочки));

- за период с **.**.****. в размере 243321,92 руб. (7000 000 руб. (размер платежа) х 7,25% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 175 (период просрочки));

- за период с **.**.**** в размере 37397,26 руб. (7000000 руб. (размер платежа) х 7,50% (процентная ставка ЦБ РФ) / 365 (количество дней в году) х 26 (период просрочки)).

Иного расчета, опровергающего представленный истцом расчет, ответчиком не представлен.

Таким образом, с ООО «Сибирский Альянс» в пользу ФИО1 подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с **.**.**** по **.**.****. в размере 913164,37руб. (59 452,05 руб. + 26178,08 руб. + 14958,90 руб. + 85150,68 руб. + 157068,49 руб. + 68465,75руб. + 77527,40 + 83232,88 руб. + 60410,96 руб. + 243321,92 + 37397,26 руб.).

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

С учетом изложенного, подлежат удовлетворению требования истца и о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с 13.10.2018г. по день оплаты задолженности включительно.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Поскольку требования истца удовлетворены, подлежат удовлетворению требования истца о возврате госпошлины, оплаченной при подаче искового заявления в размере 47293,80 руб., что подтверждается чеком-ордером от **.**.****. на сумму 5000 руб. (л.д. 2), чеком-ордером от **.**.****. на сумму 42293,80 руб. (л.д. 31).

При цене иска в размере 7913164,37 руб. (7 000000 руб. + 913164,37 руб.) подлежит оплате госпошлина в размере 47765,82 руб. ((7 913 164,37 руб. – 1000 000 руб. х 0,5% + 13 200 руб.). Поскольку истцом произведена оплата госпошлины не в полном размере, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 472,02 руб. (47765,82 руб. – 47293,80 руб.).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 193-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Альянс» в пользу ФИО1 денежные средства в размере 7 000000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с **.**.****. в размере 913164,37 рубля, расходы по оплате госпошлины в размере 47293,80 рубля, а всего: 7960458 (семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 17 копеек.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Альянс» в пользу ФИО1 проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с 13.10.2018г. до полной оплаты денежной суммы в размере 7 000 0000 (семь миллионов) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Альянс» в доход местного бюджета госпошлину в размере 472 (четыреста семьдесят два) рубля 02 копейки.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца с момента изготовления решения в мотивированной форме.

В мотивированной форме решение изготовлено 16.10.2018г.

Судья Язова М.А.