Дело № 2-30/2024 (2-809/2023) 

УИД 75RS0013-01-2023-002304-47 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 января 2024 г. п.Карымское 

Карымский районный суд Забайкальского края в составе: 

председательствующего судьи Базаржаповой А.Б.,

при секретаре Полторановой Е.О. 

с участием:

помощника прокурора Карымского района Забайкальского края Быстрова Д.С., истца ФИО1, представителя ответчика ПАО «Россети Сибирь - «Читаэнерго» по доверенности ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Карымского района Забайкальского края в защиту интересов ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Карымского района Забайкальского края обратился в суд с исковым заявлением в защиту интересов ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь», ссылаясь на следующее. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.7500.4320.22, объектами которого являются энергопринимающие устройства, расположенные по адресу: 

<

адрес>, пгт.Карымское, 

<

адрес>, участок №. ДД.ММ.ГГГГ заказчиком исполнена обязанность по оплате технологического присоединения. Условия, необходимые для технологического присоединения к электрическим сетям, заказчиком соблюдены в полном объеме. Ответчиком в рамках заключенного договора обязанность по осуществлению присоединения энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не исполнена, что повлекло нарушение прав заказчика. Просил обязать ответчика исполнить обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика – ФИО1, расположенных по адресу: 

<

адрес>, пгт. Карымское, 

<

адрес>, участок №, к электрическим сетям в рамках договора №.7500.4320.22, взыскать с ПАО «Россети Сибирь» неустойку 0,25 % за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 31 800 руб. (л.д. 4-7).

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> ФИО4, истец ФИО1 исковые требования поддержали, уменьшили требования в части размера неустойки, просили взыскать неустойку в размере 14 000 руб., а также установить срок для исполнения обязанности по технологическому присоединению в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, просили исковые требования удовлетворить с учетом уточнений. Истец ФИО1 также пояснил, что часть соседей по 

<

адрес>, присоединены к электрическим сетям.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» по доверенности ФИО5, принимавшая участие в судебном заседании по видеоконференц-связи при содействии Ингодинского районного суда 

<

адрес>, поддержала доводы, изложенные в письменном отзыве, указала, что ответчик не отказывается от исполнения возложенной обязанности, однако реальный срок для исполнения будет составлять один год, необходимы большие финансовые затраты для исполнения договора, просила снизить размер неустойки до 4 602,74 руб.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила № 861).

В соответствии с пунктом 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличия технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу ст. 309 и п. 1 ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.7500.4320.22, объектами которого являются энергопринимающие устройства, расположенные по адресу: 

<

адрес>, пгт.Карымское, 

<

адрес>, участок №, кадастровый №.

Земельный участок по данному адресу представлен ФИО1 на праве аренды по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с администрацией городского поселения «Карымское», для индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с пунктом 5 указанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (пункт 21 договора). 

Согласно пункту 17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размер платы за каждый день просрочки. 

Истцом осуществлена плата за технологическое присоединение ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 999,99 руб., что подтверждается кассовым чеком (л.д. 27).

Таким образом, технологическое присоединение должно было быть выполнено ПАО «Россети Сибирь» в срок по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района в адрес ответчика внесено представление об устранении нарушений законодательства об электроэнергетике с требованием произвести технологическое присоединение участка ФИО1 к электрическим сетям. 

На момент рассмотрения дела технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца не выполнено что сторонами не оспаривалось.

Согласно расчету истца размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 14 000 руб.

Расчет неустойки судом признается верным, ответчиком не оспаривается.

Оценив представленные доказательства в совокупности, учитывая нарушение со стороны ответчика договорных обязательств, суд находит требования прокурора о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности осуществить технологическое присоединение и взыскании неустойки обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Размер неустойки представляется соразмерным нарушенному обязательству и оснований для ее снижения по статье 333 ГК РФ суд не усматривает.

С учетом ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, требований разумности, справедливости и выполнимости, суд устанавливает срок по исполнению заявленной истцом обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заказчика в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ссылки ответчика на отсутствие финансовой возможности осуществить технологическое присоединение являются несостоятельными и не освобождают ответчика от исполнения возложенной на него законом и договором обязанности.

С учетом положений пп.3 п.1 ст.333.19 Налогового кодекса РФ в соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход муниципального района «

<

адрес>» государственная пошлина в размере 6 560 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заказчика – ФИО1, расположенных по адресу: 

<

адрес>, пгт. Карымское, 

<

адрес>, участок №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора №.7500.4320.22 в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт: серия № №) неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 14 000 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» государственную пошлину в доход муниципального района «Карымский район» в сумме 6 560 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Карымский районный суд Забайкальского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья А.Б. Базаржапова

Решение в окончательной форме принято 17.01.2024.