Дело № 2-.../2019 г. 

Р Е Ш Е Н И Е

 Именем Российской Федерации 

ДД.ММ.ГГГГ

Приокский районный суд города Нижнего Новгорода в составе:

председательствующего судьи: Кшнякиной Е.И. 

при секретаре: Яцкевич Т.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску публичного акционерного общества «М» к Шадяну А.Г. о взыскании неустойки, судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л :

ПАО «М»обратилось в суд с иском к ответчику с вышеуказанными требованиями.

В обоснование иска ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «М» и Шадян А.Г. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ..., по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТП, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность - 50 кВт,

категория надежности - 3,

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 6 кВ.

Ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1 договора).

Подлежащие выполнению мероприятия, необходимые для присоединения объекта истца к энергоустановкам сетевой организации, определены в технических условиях №... от ДД.ММ.ГГГГ., являющихся неотъемлемой частью и приложением к договору.

Согласно п. 10 технических условий Заявитель (Ответчик) должен осуществить: разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами (п. 10.1); строительство ТП 6/0,4 кВ согласно проекта, на вводе 6 кВ установить вентильные разрядники или ОПН, комплект ПК 6 согласно таблице уставок, тип ТП и мощность трансформатора определить проектом (п. 10.2); строительство ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенного ТП до токоприемников согласно проекта, в случае принятия воздушного варианта ЛЭП опоры принять типа СВ 95 2с IY, провод СИП, сечение определить проектом (п. 10.3); монтаж заземляющего устройства ТП согласно требований норм ПУЭ (п. 10.4); установку узла расчетного учета электрической энергии и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности, требования к узлу расчетного учета электрической энергии: в ТП на вводе вторичного напряжения трансформатора установить электронный счетчик прямого включения, класса точности 2,0 и выше, обеспечивающий запись и хранение сведений об электропотреблении, профиле мощности и передачу результатов измерений через интерфейс связи(п. 10.5); после проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченным представителям ПО «К» филиала «Н» ПАО «М» для осмотра.

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения данного договора.

Согласно п.8 договора ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в установленные договором сроки ответчик не выполнил.

Согласно п. 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

В адрес ответчика были направлены претензии № ... от ДД.ММ.ГГГГ., ... от ДД.ММ.ГГГГ. с просьбой оплатить неустойку по Договору в добровольном порядке, которые оставлены им без ответа.

Поскольку переговоры между Шадян А.Г. и ПАО «М» оказались безрезультатными, неустойка ответчиком не оплачена, ПАО «М» вынуждено обратиться в суд за защитой своих прав.

Основывая свои требования на нормах закона ст. 309, 310 ГК РФ, истец просит суд взыскать с Шадян А.Г. в пользу ПАО «М» неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения в размере ... рублей ... копеек, уплаченную государственную пошлину в размере ... рублей ... копеек (л.д. ...).

В судебном заседании представитель истца Докучаева О.В., действующая по доверенности (л.д. ...), иск поддержала.

Ответчик Шадян А.Г. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом (л.д. ...).

Представитель ответчика Лаврухина Н.В., действующая по доверенности (л.д. ...), иск признала частично, не оспаривала нарушение ответчиком сроков выполнения технических условий, просила применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер взыскиваемой неустойки.

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав представленные по делу письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст. 401 Гражданского Кодекса РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

В соответствии со ст. 416 Гражданского Кодекса РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.

Согласно ст. 26 ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Пунктом 1 статьи 329 ГК Российской Федерации установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с подпунктом "в" пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, установлено, что одним из существенных условий договора является положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между ПАО «М» и Шадяном А,Г. заключен договор № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с условиями которого сетевая организация (ПАО «М») принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ( по заявке заявителя № ... от ДД.ММ.ГГГГ.) ТП, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 50 (кВт); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт; категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение б (кВ); а заявитель (Шадян А.Г.) обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 1) (л.д. ...).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения:Уличного освещения, которое будет располагаться 

<

адрес>, кадастровый номер: ... (п. 2).

Точка присоединения определена и указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) (п. 3). 

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении 1. Срок действия технических условий составляет два годасо дня заключения настоящего договора (п. 4).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (п. 5).

Сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору? в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю (п. 6).

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (п. 7).

Заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения (п. 8).

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий» (п. 9).

Стороны согласовали, что общая стоимость услуг по настоящему договору определяется по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015г. № 50/55 и составляет ... руб. (п. 10).

В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки (п. 17).

В соответствии с Техническими условиями № ... от ДД.ММ.ГГГГ. на технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «К» филиала Н» ПАО «М» (Приложение № 1 к договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ.) сетевая организация осуществляет: проецирование и строительство участка ВЛ - 6 кВ от отпайки на ТП № 88 ЛЭП - 603 ПС «Федяково» до границ земельного участка заявителя. Точку подключения изыскать на стадии проектирования. Опоры принять железобетонные типа СВ-110. Марку, сечение провода определить проектом (п. 9).

Заявитель осуществляет:

10.1. Разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами.

10.2. Строительство ТП 6/0,4 кВ согласно проекта. На вводе 6кВ установить вентильные разрядники или ОПН, комплект ПК 6 согласно таблице уставок. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом.

10.3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенного ТП до токоприемников согласно проекта. В случае принятия воздушного варианта ЛЭП опоры принять типа СВ 95 2с IY, провод СИП, сечение определить проектом.

10.4. Монтаж заземляющего устройства ТП согласно требований норм ПУЭ.

10.5. Установку узла расчетного учета электрической энергии и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности.

Требования к узлу расчетного учета электрической энергии: В ТП на вводе вторичного напряжения трансформатора установить электронный счетчик прямого включения, класса точности 2,0 и выше, обеспечивающий запись и хранение сведений об электропотреблении* профиле мощности и передачу результатов измерений через интерфейс связи.

10.6. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю ПО «К» филиала «Н» ПАО «М» для осмотра (п. 10).

Срок действия настоящих технических условий составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения (п. 11) (л.д. ...).

ДД.ММ.ГГГГ. стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ., изменив редакцию п. 8 и 9.1 Технических условий № ... от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...).

ДД.ММ.ГГГГ Шадян А.Г. обратился к истцу с заявлением о продлении срока действия Технических условий № ... от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. ...).

ДД.ММ.ГГГГ Шадян А.Г. обратился к истцу с заявлением о продлении срока мероприятий по технологическому присоединению по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ. сроком на 6 месяцев (л.д. ...), на что истцом в адрес ответчика был направлен отказ (л.д. ...).

ДД.ММ.ГГГГ. стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ., установив срок действия Технических условий один год со дня заключения дополнительного соглашения № 1 (л.д. ...).

Во исполнение условий заключенного сторонами договора № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ. ПАО «М» заключило с ООО «С» договор подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ. на строительство ВЛ-6 кВ от отп. на ТП-88 Л-603 ПС Федяково, 0,8 км по направлению на запад от п. Ждановский (л.д. ...).

Работы подрядчиком выполнены и приняты (л.д. ...).

Таким образом, сетевая организация выполнила обязательства по договору, ДД.ММ.ГГГГ. истец уведомил ответчика о выполнении технических условий № ... от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...).

ДД.ММ.ГГГГ. инженером ПТС Фроловым А.В. и ответчиком Шадяном А.В. составлен перечень замечаний, выявленных в ходе проведения осмотра ЭУ по адресу: 

<

адрес>, кад. номер ... по уведомлению о выполнении ТУ № ... от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...).

Ответчиком в материалы дела представлен договор подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ. на проведение электромонтажных работ, заключенный с ИП Вилявиным Е.М. (л.д. ...), а также рабочий проект ООО «Э» «Строительство ВЛЗ-6 кВ и СТП 63/6/0,4 кВ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кад. номер ...» (л.д. ...).

Между тем, данные договор подряда заключен ответчиком, а рабочий проект строительства ВЛЗ-6 кВ и СТП 63/6/0,4 кВ разработан по поручению ответчика за пределами сроков, установленных договором № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ. и Техническими условиями № ... от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, ответчик нарушил сроки исполнения обязательств по договору № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ. ПАО «М» направило в адрес ответчика претензию о выплате неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению (л.д. ...), а также об оплате задолженности по договору (л.д. ...).

ДД.ММ.ГГГГ. в ответ на обращение Шадяна А.Г. истец вновь потребовал уплаты неустойки (л.д. ...).

Данные требования ответчиком не исполнены до настоящего времени.

Согласно расчета, представленного суду истцом, размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. составляет ... руб. (л.д. ...).

Расчет судом проверен и признан верным, ответчиком не оспаривался.

При указанных обстоятельствах, поскольку в ходе судебного разбирательства нашел подтверждение факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ., требования истца о взыскании неустойки являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Между тем, ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера взыскиваемой неустойки.

Статьей 330 ГК Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21 декабря 2000 года N 263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств направлена против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть по существу - на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в пункте 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что исключает для истца возможность неосновательного обогащения за счет ответчика путем взыскания неустойки в завышенном размере.

Исходя из вышеизложенного, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Аналогичная позиция изложена Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 24 июня 2009 года N 11-П, в соответствии с которой в силу статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации исходящее из принципа справедливости конституционное требование соразмерности установления правовой ответственности предполагает в качестве общего правила ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Следуя принципу разумности и справедливости, учитывая несоразмерность заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушенного обязательства, обстоятельства дела, суд полагает возможным в порядке ст.333 ГК РФ снизить сумму неустойки до ... рублей.

Согласно п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении:

требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ).

В силу ст.ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу АО «М» подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в сумме ... руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Иск публичного акционерного общества «М» удовлетворить частично.

Взыскать с Шадяна А.Г. пользу публичного акционерного общества «М» неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере ... рублей; расходы по оплате государственной пошлины в сумме ... руб. ... коп.

В остальной части иска о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям публичному акционерному обществу «М», - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда в течение месяца через Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода.

Судья: Е.И.Кшнякина