Дело № ......

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

 05 августа 2025 года адрес

Щербинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Капустиной Г.В., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-... по иску ......... к адрес о взыскании неустойки по договору о подключении, компенсации морального вреда, штрафа, 

УСТАНОВИЛ:

... ... обратился в суд с иском к адрес, с учетом уточненных требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, о взыскании неустойки за период с ... г. в размере сумма, компенсации морального вреда в размере сумма, штрафа в размере 50% от взысканной судом суммы.

В обоснование исковых требований указав, что между сторонами 09.04.2024 г. был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № ... в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) жилого дома по адресу: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес фио во исполнение обязательств по договору произведена оплата в размере сумма. Однако ответчик принятые на себя обязательства до настоящего времени не исполнил, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском.

Истец ... ... в судебное заседание не явился, о дате и времени извещен надлежащим образом, обеспечил явку представителя по доверенности фио, который в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика адрес по доверенности фио в судебном заседании против удовлетворения искового заявления возражал, просил отказать на основании письменного отзыва, пояснил, что нарушения со стороны ответчика отсутствуют.

Представитель третьего лица Управления ФАС по адрес в судебное заседание не явился, о дате и времени извещен надлежащим образом.

В соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судом рассмотрено дело при данной явке.

Суд, выслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. (п. 1)

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. (п. 2)

Согласно ст. 18 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» поставки марка автомобиля проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок марка автомобиля и правилами пользования марка автомобиля в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами.

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила), согласно которых исполнителем признается газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства.

Под фактическим присоединением понимается комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением пуска марка автомобиля на объекты заявителя.

Согласно п. 3 указанных Правил, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия);

б) выдача технических условий;

в) направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее соответственно - договор о подключении, заявка о подключении (технологическом присоединении);

г) заключение договора о подключении;

д) выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении;

е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);

ж) составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

В силу п. 100 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;

б) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Согласно п. 13 Правил № 549 отсутствие у заявителя газопровода, входящего в состав внутридомового газового оборудования, присоединенного к газораспределительной сети, и газоиспользующего оборудования, отвечающих установленным для таких газопровода и оборудования техническим требованиям, является основанием для отказа от заключения договора поставки.

Газопровод заявителя, в свою очередь, является сетью газопотребления. Получение коммунального ресурса возможно только при наличии такой сети, что соответствует положениям части 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой поставка энергии возможна только через надлежаще присоединенную сеть.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 09.04.2024 г. между ...ым ... и адрес заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № ... согласно условиям которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес, кадастровый номер 77:17:0140207:890 к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес, земельный адрес, кадастровый номер 77:17:0140207:885, и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации – обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 2 договора подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1 (далее - технические условия), и перечнем мероприятий (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора (до 22.08.2024 г.).

Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения). В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

Согласно адрес условия № 48-17-9896-24 от 09.04.2024 г. срок действия настоящих технических условий соответствует сроку выполнения мероприятий по договору о подключении (технологическом присоединении).

В силу п. 10 договора в день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска марка автомобиля) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п. 11 договора (в редакции дополнительного соглашения №2 от 19.03.2025 г.) размер платы за подключение (технологическое присоединение), за исключением случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с решением Департамента экономической политики и развития адрес - Приказ «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «МОСГАЗ» на 2024 год» от 13.11.2023 № ДИР-ТР-129/23 и Приказ «Об установлении на 2024 год стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «МОСГАЗ» внутри границ земельного участка заявителя» от 25.12.2023 № ДИР-ТР-391/23 и составляет сумма, в том числе НДС 20% - сумма, а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета марка автомобиля.

Пунктом 12 договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 19.03.2025 г.) предусмотрено, что внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: сумма, в том числе НДС 20% - сумма, вносится не позднее 18.04.2024 г.; сумма, в том числе НДС 20% - сумма, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

фио обязательства по оплате исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанцией об оплате от 17.04.2024 г. на сумму сумма, квитанцией об оплате от 24.04.2025 г. на сумму сумма.

Согласно п. 4 договора исполнитель обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору; обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации); направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях, предусмотренных приложением № 1 к настоящему договору); направить заявителю документы и сведения, представленные в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в целях установления платы по индивидуальному проекту, в случае поступления обращения заявителя; осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску марка автомобиля не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора не позднее 20 рабочих дней до дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре; осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее, чем за 15 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); уведомить заявителя о направлении заявления об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 5 рабочих дней со дня его направления (в случае осуществления подключения (технологического присоединения) по индивидуальному проекту); направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней со дня получения от заявителя соответствующего запроса. Такая информация может быть направлена заявителю любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя); согласовать с собственником земельного участка строительство сети газораспределения, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сети газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сети газораспределения, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сети газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка); в случае поступления в соответствии пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признания утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета марка автомобиля и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета марка автомобиля; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении); нести эксплуатационную ответственность в соответствии с актом о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п. 5 договора исполнитель вправе: участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения в случае, если заявитель не обращался к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ своего земельного участка; по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней до дня подключения, определенного настоящим договором, продлить срок действия технических условий, но не более чем на половину срока, определенного настоящим договором, при невыполнении заявителем технических условий в согласованные в настоящем договоре сроки и соблюдении исполнителем требований, указанных в пункте 58 Правил; при нарушении заявителем сроков исполнения возложенных на него обязательств по осуществлению присоединения (технологического присоединения) требовать неустойку в размере, определенном настоящим договором; при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), за исключением мероприятий по мониторингу и фактическому присоединению, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

В силу п. 6 договора заявитель обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя; осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; в случае поступления в соответствии пунктом 12 Правил обращения заявителя к исполнителю обеспечить доступ к объекту капитального строительства для определения размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя и (или) за проектирование сети газопотребления, и (или) за строительство газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости по установке прибора учета марка автомобиля, и (или) стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) стоимости газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости прибора учета марка автомобиля; обеспечить разработку проектной документации сети газопотребления (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) от точки (точек) подключения (технологическое присоединение) до газоиспользующего оборудования в соответствии с техническими условиями; при проведении мониторинга выполнения заявителем технических условий представить исполнителю экземпляр проектной документации сети газопотребления (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации), которая включает в себя сведения об инженерном оборудовании, в сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; в случае внесения изменений в проектную документацию сети газопотребления, влекущих изменение указанного в технических условиях максимального часового расхода марка автомобиля, в срок, установленный настоящим договором, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода марка автомобиля не может превышать величину, указанную в технических условиях); в соответствии с проектной документацией (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном настоящим договором; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий; внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором; подписать акт о готовности и день его составления исполнителем; нести имущественную и эксплуатационную ответственность в соответствии с актом о подключении (технологическом присоединении); в случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту при отказе заявителя от подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения после разработки и проведения экспертизы проектной документации компенсировать исполнителю фактически понесенные им подтвержденные расходы, связанные с разработкой и проведением экспертизы проектной документации, но не более размера указанных расходов, отраженного в настоящем договоре; заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки марка автомобиля после подписания акта о готовности.

В силу п. 22 договора мониторинг выполнения заявителем технических условий проводится исполнителем в отношении каждых технических условий, выданных заявителю, при условии, что срок их действия не истек.

Согласно пп. «а», «б» п. 25 договора порядок проведения мониторинга выполнения заявителем технических условий включает следующие мероприятия: подача заявителем уведомления о выполнении технических условий с приложением документов в соответствии с пунктом 26 настоящего договора; проверка исполнителем документов, поданных заявителем вместе с уведомлением о выполнении технических условий.

В соответствии с п. 26 договора для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее 20 дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) представляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных пунктом 95 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (в случае, если это предусмотрено техническим регламентом), а также копии сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

В соответствии с п.п. 27, 28 договора по результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий исполнитель составляет акт о готовности. Акт о готовности составляется и подписывается заявителем и исполнителем непосредственно в день проведения осмотра.

13.09.2024 г. истец направил в адрес ответчика акт от 04.09.2024 г. № 1149 о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов, а также документы на газоиспользующее оборудование.

19.09.2024 г., 29.10.2024 г. и 22.02.2025 г. истец предоставил ответчику доступ к объекту.

03.10.2024 г. истец направил в адрес ответчика заявку (оферту) для заключения договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) с приложением документов.

Между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2024 г. к договору, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля увеличен до 205 дней со дня заключения настоящего договора.

31.10.2024 г. ответчиком в адрес истца направлено письмо о направлении двух экземпляров договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, однако 03.01.2025 г. по истечении срока хранения отправление возвращено ответчику.

01.12.2024 г. истец направил ответчику досудебную претензию с требованием выплатить неустойку в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору, компенсации морального вреда.

13.12.2024 г. исполнение части внутри площадки было передано ответчиком подрядной организации ООО «Моссети» с целью выполнения строительства в январе 2025 года. 

17.01.2025 г. сотрудник ООО «Моссети» связался с истцом для согласования даты и время выполнения строительно-монтажных работ по номеру телефона, указанного в эскизе. Истец в рамках телефонного разговора отказался предоставить допуск, мотивируя тем, что договор заключен с адрес и доступ на территорию подрядной организация, не предоставит. 28.01.2025 г. получена информация о выполнении строительно-монтажных работ на объекте заявителя силами адрес. В период с 28.01.2025 г. по 04.08.2025 г. в работу заявитель ... ... не поступал (письмо ООО «Моссети»).

27.01.2025 г. истец получил от ответчика подписанный договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) № 2024091631.

31.01.2025 г. истец подписал договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) №2024091631 и направил его в адрес ответчика.

Между сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 от 19.03.2025 г. к договору, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля увеличен до 387 дней со дня заключения настоящего договора.

19.03.2025 г. между истцом и ответчиком подписан акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

27.03.2025 г. истец направил в адрес ответчика запрос с просьбой сообщить дату и время выезда для осуществления ответчиком мероприятий по фактическому подключению. 

03.04.2025 г. ответчиком в адрес истца направлено письмо, что осуществление мероприятия по фактическому подключению возможно только после представления истцом договора поставки марка автомобиля.

16.04.2025 г. истец уведомил ответчика о заключении договора поставки марка автомобиля № ... с ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

19.04.2025 г. сторонами был подписан акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон № 1/9896 в котором истец указал, что имеются претензии. 

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по адрес от 12.02.2025 г. о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 077/04/9.21-17156/2024 ответчик признан виновным в нарушении пунктов 52, 54, 72 Правил подключения.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по адрес от 24.06.2025 г. прекращено производство по делу об административном правонарушении № 077/04/9.21-6593/2025. Должностное лицо пришло к выводу об отсутствии события и состава административного правонарушения в действиях адрес.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ судопроизводство в РФ осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, при этом в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основания своих требований и возражений.

Положениями п. 1 ст. 55 ГПК РФ установлено, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В соответствии с п. 15 договора, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные настоящим договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску марка автомобиля не позднее установленного настоящим договором дня подключения, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы в соответствии с настоящим договором и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить заявителю уведомление с требованием внести 100 процентов платы, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в настоящий договор и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с п. 22 договора, мониторинг выполнения заявителем технических условий проводится исполнителем в отношении каждых технических условий, выданных заявителю, при условии, что срок их действия не истек.

Пунктом 3 Правил, устанавливающим порядок осуществления подключения, в отношении мероприятий внутри границ земельного участка заявителя предусмотрено составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 к Правилам.

Акт о готовности может быть подписан при условии надлежащего исполнения заявителем принятых им обязательств по выполнению мероприятий по подключению, предусмотренных техническими условии, по результатам проведенного мониторинга (пункты 27-29 Договора).

В соответствии с п. 79 Правил, акт о подключении, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, составляется сторонами после проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В силу пп. «в» п. 72 Правил, действия по подключению не могут быть осуществлены ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте «г» пункта 71 Правил.

Как установлено судом, со стороны истца необходимые обязательства, без которых невозможно завершение процедуры подключения к сети газораспределения, в период первоначально установленного срока действия Технических условий не выполнены, уведомление о выполнении технических условий в адрес ответчика не направлялось.

Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов, а также документы на газоиспользующее оборудование направлены истцом в адрес ответчика 13.09.2024 г., то есть по истечении срока действия технических условий № 48-17-9896-24 от 09.04.2024 г.

фио не было обеспечено соблюдение требования п. 26 договора об уведомлении о выполнении технических условий не позднее 20 дней до даты подключения, что не позволяло осуществить проведение необходимых мероприятий в установленный срок.

В силу п. 14 Правил поставки марка автомобиля не предоставляет право на подключение к сети газораспределения без договора поставки марка автомобиля и не может трактоваться в качестве нормы, позволяющей заявителю производить несанкционированный отбор марка автомобиля.

Вместе с тем указанный пункт определяет лишь момент, с которого договор поставки марка автомобиля будет считаться заключенным (момент первичного фактического подключения), в случае если он не был оформлен до фактической подачи марка автомобиля. Приведенные положения направлены на устранение последствий возможного злоупотребления правом и исключение неосновательного обогащения со стороны потребителя марка автомобиля.

Следовательно, момент возникновения обязательств для потребителя по договору поставки марка автомобиля императивно определен и наступает не позднее даты подписания акта о подключении.

Мероприятия и обязательства сторон, предусмотренные Правилами подключения, осуществляются в рамках срока действия соответствующего договора при реализации процедуры подключения.

По причине неисполнения истцом встречных обязательств (п. 25 договора, пп. «б» п. 71 Правил), а именно несвоевременного представления акта первичного обследования дымохода и вентканалов, выполненного специализированной организацией, сторонами было подписано дополнительное соглашение, согласно которому срок новый выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуску марка автомобиля составляет 205 дней со дня заключения договора, то есть до 31.10.2024 г. включительно (п. 3 Договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 17.10.2024 г.), впоследствии сторонами было подписано новое дополнительное соглашение, согласно которому срок составляет 387 дней со дня заключения договора, то есть до 01.05.2025 г. включительно (п. 3 Договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 19.03.2025 г.).

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности. Наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности процесса (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ), стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ), и принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий.

Поскольку истцом не представлено доказательств в обоснование своих исковых требований, не доказан факт нарушения ответчиком, как условий договора, так и установленных сроков присоединения и пуска марка автомобиля, а ответчик напротив представил доказательства, опровергающие доводы истца, изложенные в иске, при этом 24.06.2025 г. производство по делу об административном правонарушении № 077/04/9.21-6593/2025 в отношении адрес прекращено в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, что подтверждается Постановлением Московского УФАС России, то суд приходит к выводу о том, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований истца в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ...а ... (...паспортные данные......) к адрес (ОГРН ...) о взыскании неустойки по договору о подключении, компенсации морального вреда, штрафа, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Щербинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ... 2025 года

 Судья Г.В. Капустина