РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

16 октября 2025 года адрес

Лефортовский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Игониной О.Л.,

при помощнике судьи адресА.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-7057/2025 (УИД 77RS0014-02-2025-008725-63) по иску адрес к ФИО1 о внесении изменений в договор о технологическом присоединении,

УСТАНОВИЛ:

Истец адрес обратился в суд с иском к ФИО1 о внесении изменений в договор о технологическом присоединении.

В обоснование иска указал, что в соответствии с требованиями Правил подключения на основании заявки фио в целях газификации объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: г.адрес, адрес «Дубрава», уч. 15, кад. № 50-22:0030301:301, между адрес и ФИО1 заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № 05/2762-Д20985-22 от 30.06.2022 года. Договор заключен по типовой форме, предусмотренной Правилами подключения. В соответствии с пунктом 1 Договора в рамках догазификации исполнитель (Истец) обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю (ответчику), намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547). Согласно пункту 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску марка автомобиля составляет 1 год со дня заключения Договора. Пунктом 121 Правил подключения предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем. Актуальная редакция программы социальной газификации включает в себя мероприятия по догазификации, в том числе принадлежащего ответчику домовладения, включенного в Раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации» в Приложении к Программе (позиция № 30992). Согласно позиции Пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к Разделу 2 Приложения к Программе Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года» в редакции постановления Правительства адрес от 07.07.2025 № 784-ПП срок окончания выполнения указанных мероприятий запланирован на 31.12.2029. Изменения в Программу были внесены в связи с согласованием ООО «Газпром газификация» новых редакций сводного и пообъектного планов-графиков догазификации, сформированных исходя из установленного ПАО «Газпром» лимита финансирования мероприятий по социальной газификации на текущий год. Выполнение мероприятий по догазификации домовладения ответчику возможно не ранее срока, установленного в новой редакции программы социальной газификации (31.12.2029), поскольку для осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования домовладения требуется строительство газораспределительной сети и соответствующее финансирование. Финансирование исполнения программы социальной газификации осуществляется в рамках Договора № Ф-05-204/2021 от 27.12.2021, заключенного между адрес и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации). 20.12.2024 года ответчику было направлено предложение № 778/50 заключить дополнительное соглашение к договору об изменении срока исполнения мероприятий по договору, которое оставлено без удовлетворения. Ввиду уклонения ответчика от внесения изменений в договор в части сроков выполнения работ по догазификации, у истца отсутствует возможности исполнения договора в срок, указанный в п.3 договора, что влечет за собой нарушение прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности истца. Основываясь на изложенном, истец просит внести изменения в Договор от 30.06.2022 № 05/2762-Д20985-22 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между адрес и ФИО1, а именно: изложить первый абзац пункта 3 Договора от 30.06.2022 № 05/2762-Д20985-22 в следующей редакции: «3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску марка автомобиля не позднее 31.12.2029», изложить пункт 6 Технических условий № Д20985-64-Д/159, являющихся Приложением к Договору от 30.06.2022 № 05/2762-Д20985-22 в следующей редакции: «6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2029.», в пункте 8 Технических условий № Д20985-64-Д/159, являющихся Приложением к Договору от 30.06.2022 № 05/2762-Д20985-22 слова «до 31.10.2022» заменить словами «до 31.12.2029», изложить пункт 14 технических условий № Д20985-64-Д/159, являющихся Приложением к Договору от 30.06.2022 № 05/2762-Д20985-22 в следующей редакции: «14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2029», а также взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма

Представитель истца адрес по доверенности фио в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании заявленные требования не признал по основаниям письменных возражений. 

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные сторонами доказательства, приходит к следующему. 

Судом установлено и следует из материалов дела, что в соответствии с требованиями Правил подключения на основании заявки фио в целях газификации объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: г.адрес, адрес «Дубрава», уч. 15, кад. № 50-22:0030301:301, между адрес и ФИО1 заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № 05/2762-Д20985-22 от 30.06.2022 года. 

Договор заключен по типовой форме, предусмотренной Правилами подключения. 

В соответствии с пунктом 1 Договора в рамках догазификации исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547). 

Согласно пункту 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску марка автомобиля составляет 1 год со дня заключения Договора. 

Пунктом 121 Правил подключения предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем. 

Актуальная редакция программы социальной газификации включает в себя мероприятия по догазификации, в том числе принадлежащего ответчику домовладения, включенного в Раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации» в Приложении к Программе (позиция № 30992). 

Согласно позиции Пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к Разделу 2 Приложения к Программе Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года» в редакции постановления Правительства адрес от 07.07.2025 № 784-ПП срок окончания выполнения указанных мероприятий запланирован на 31.12.2029. 

Изменения в Программу были внесены в связи с согласованием ООО «Газпром газификация» новых редакций сводного и пообъектного планов-графиков догазификации, сформированных исходя из установленного ПАО «Газпром» лимита финансирования мероприятий по социальной газификации на текущий год. 

Финансирование исполнения программы социальной газификации осуществляется в рамках Договора № Ф-05-204/2021 от 27.12.2021, заключенного между адрес и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации).

Истец указывает, что выполнение мероприятий по догазификации домовладения ответчику возможно не ранее срока, установленного в новой редакции программы социальной газификации (31.12.2029), поскольку для осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования домовладения требуется строительство газораспределительной сети и соответствующее финансирование. Уклонения ответчика от внесения изменений в договор в части сроков выполнения работ по догазификации, у истца отсутствует возможности исполнения договора в срок, указанный в п.3 договора, что влечет за собой нарушение прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности истца.

20.12.2024 года ответчику было направлено предложение № 778/50 заключить дополнительное соглашение к договору об изменении срока исполнения мероприятий по договору, которое оставлено без удовлетворения. 

Также судом установлено, что решением Лефортовского районного суда адрес от 03.11.2023 года на адрес возложена обязанность выполнить работы по договору № 05/2762-Д20985-22, заключенному 30.06.2022 года между адрес и ФИО1 в течение 30 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу. В удовлетворении встречного иска адрес о признании договора недействительным отказано.  

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 02.06.2025 года решение Лефортовского районного суда адрес от 03.11.2023 года оставлено без изменения.

Решение вступило в законную силу 02.06.2025 года. 

Согласно части 2 статьи 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Указанное выше решение суда имеет преюдициальное значение при разрешении настоящего спора. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей адрес.

На основании ст.ст. 420, 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.  

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

В силу положений ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Давая оценку представленным сторонами доказательствам, суд приходит к выводу о том, что адрес не представлено доказательств наличия обстоятельств, являющихся основанием для изменения условий договора в судебном порядке.

При этом суд учитывает, что вступившим в законную силу решением Лефортовского районного суда адрес на адрес возложена обязанность выполнить работы по договору № 05/2762-Д20985-22, заключенному 30.06.2022 года между адрес и ФИО1 в течение 30 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу, в связи с чем, основания для внесения в договор изменений, касающихся сроков исполнения обязательств, отсутствуют.

Таким образом, оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований иску адрес (ИНН 

<

***>) к ФИО1 (паспортные данные......) о внесении изменений в договор о технологическом присоединении - отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Лефортовский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 17 декабря 2025 года.

 Судья О.Л. Игонина