УИД 34RS0008-01-2025-004304-25

Дело № 2-2059/2025

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Волгоград 03 июня 2025 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи – Артеменко И.С,,

при секретаре судебного заседания Джанаевой Д.М.,

с участием представителя истца ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» - ФИО1, действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волгограде гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» к ФИО2 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании понесенных затрат, судебных расходов, 

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании понесенных затрат, судебных расходов.

В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ПАО «Россети Юг» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения №.... 

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВЛ-10, ТПА 2607 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., кадастровый №..., а ответчик обязался оплатить расходы по технологическому присоединению, согласно условиям настоящего договора.

Согласно п. 2.1.1. Договора ТП сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору и осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору.

Согласно п. 2.3.2. Договора ТП заявитель обязуется надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по настоящему Договору, в том числе указанные в разделе 3 настоящего Договора обязательства по оплате технологического присоединения и выполнении своих мероприятий по осуществлению технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями.

В силу п. 16 Правил технологического присоединения существенным условием договора об осуществлении технологического присоединения является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В соответствии с п. 7 технических условий №... от ДД.ММ.ГГГГ, являющихся неотъемлемой частью Договора ТП, точкой присоединения является опора №... BJI-10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ «Молзавод».

Согласно п. 10.1. технических условий, сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:

10.1.1. Выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями Постановлены Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Установку приборов учета электроэнергии выполнить в соответствии с пунктом Хо19 типовых технических решений, утвержденных приказом ПАО «Россети Юг» от ДД.ММ.ГГГГ №... «Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии ».

Мероприятия по технологическому присоединению со стороны сетевой организацией выполнены в полном объеме, что подтверждается, в том числе, Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ № Влг1/11141/2011. Кроме того, в письме от ДД.ММ.ГГГГ № ВлгЭ/8000/4442 сетевая компания повторно сообщала о выполнении мероприятий.

Заявителю в свою очередь, согласно техническим условиям (пункт 11), необходимо осуществить:

11.1.1. Увеличение мощности Заявителя осуществить по существующей схеме электроснабжения. Запроектировать и выполнить реконструкцию существующей ТП А. 2607 с заменой трансформатора на трансформатор расчетной мощности.

Однако, вышеуказанные мероприятия со стороны заявителя исполнены не были.

В настоящий момент срок действия технических условий истек.

В связи с невыполнением Ответчиком обязательств по Договору ТП сетевая организация направила в адрес Ответчика посредством почтовой связи письмо от ДД.ММ.ГГГГ № ВлгЭ/8000/4442 с приложением соглашения о расторжении Договора ТП, что подтверждается реестром почтовых отправлении.

Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ. договора в случае расторжения, одностороннего отказа от исполнения Договоре заявитель обязуется компенсировать Сетевой организации понесенные расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, в том числе, но не ограничиваясь, связанные с подготовкой и выдачей Сетевой организации Технических условий Заявителю. Возмещение расходов производится Заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов с актом фактически понесенные расходов, независимо от факта подписания указанного акта Заявителем.

Размер понесенных Сетевой организацией расходов, в целях их возмещения Заявителем рассчитывается Сетевой организацией в одностороннем порядке, в том числе по выбору Сетевой организации может быть осуществлен полностью либо в части с применением утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированной тарифной ставки С1 (ее составляющей отношении отдельного мероприятия) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам. 

Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

Согласно пп. «а» п. 18 Правил ТП мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором.

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... были установлены стандартизированные тарифные ставки для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области для постоянной и временной схемы электроснабжения.

В соответствии с Приложением №... стандартизированная тарифная ставка на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю определено в размере 3 689,85 руб., что с учетом НДС 20% составляет 4 427,82 руб. 

Сетевая организация исполнила взятые на себя обязательства и в соответствии с пунктом 5 Договора ТП выдала Заявителю Технические условия.

Также Истцом понесены затраты капитального характера (установка прибора учета электрической энергии) в размере 565 601,10 руб. (467 644,40 руб. с добавлением НДС 20%), что подтверждается актом о приемке Выполненных строительных работ хозяйственным способом от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, сетевая организация, подготовив и выдав Ответчику технические условия, а также понесла определенные производственные издержки, которые не компенсированы до настоящего времени, уменьшают имущественную базу истца, являются для него убытками.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенный между ПАО «Россети Юг» и ФИО2; взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «Россети Юг» фактически понесенные затраты по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №... в размере 565 601,10 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 24000 руб.

Представитель истца ПАО «Россети Юг» в лице филиала - «Волгоградэнерго» - ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебном заседании настаивала на удовлетворении заявленных требований, просила иск удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела по существу извещен своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомлен. Ходатайств об отложении судебного заседания, а также возражений, относительно заявленных исковых требований не представлено. 

Часть 1 ст. 20 ГК РФ, предусматривает, что местом жительства признается то место, где гражданин проживает постоянно или преимущественно, положения ст. 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» предусматривают, что граждане РФ обязаны регистрироваться по месту жительства в пределах РФ. Осуществляя регистрацию проживания по тому или иному месту жительства, гражданин подтверждает свое волеизъявление на постоянное или преимущественное проживание по адресу регистрации и принимает на себя обязанность получения судебных извещений по этому адресу.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от ДД.ММ.ГГГГ №...-О-О, статья 167 ГПК Российской Федерации предусматривает обязанность суда отложить разбирательство дела в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, а также в случае неявки лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания, при признании причин их неявки уважительными. Уважительность причин неявки определяется судом на основании анализа фактических обстоятельств, поскольку предусмотреть все причины неявки, которые могут быть отнесены к числу уважительных, в виде исчерпывающего перечня в законе не представляется возможным. Данное полномочие суда, как и закрепленное статьей 118 ГПК Российской Федерации право суда считать лицо в упомянутом в ней случае надлежаще извещенным вытекают из принципа самостоятельности и независимости судебной власти; лишение суда этих полномочий приводило бы к невозможности выполнения стоящих перед ним задач по руководству процессом.

В силу положений п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по смыслу п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. При этом необходимо учитывать, что гражданин несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным выше, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

С учётом указанного, неполучение ответчиком поступившей к нему корреспонденции, не может свидетельствовать о нарушении его процессуального права.

Исходя из изложенного, принимая во внимание то, что реализация участниками гражданского процесса своих прав не должна нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон, право истца на своевременное рассмотрение дела, суд с учётом мнения представителя истца, положений ст.167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в порядке заочного производства в соответствии со ст. 233 ГПК РФ, в отсутствии не явившегося ответчика. 

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела в их совокупности, дав правовую оценку доводам сторон, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Договор технологического присоединения может быть расторгнут или прекращен по инициативе сетевой организации (исполнителя) в связи с нарушением условий договора со стороны заявителя (заказчика), что возможно как в судебном порядке по правилам подпункта 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ, так и во внесудебном порядке путем заявления сетевой организацией одностороннего отказа от исполнения договора по статье 450.1 ГК РФ в случае, если это право предусмотрено договором.

В силу пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Договор может быть расторгнут судом при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (пункт 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае расторжения договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила присоединения) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... в соответствии со статьями 21 и 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ПАО «Россети Юг» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения №.... 

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВЛ-10, ТПА 2607 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., кадастровый №..., а ответчик обязался оплатить расходы по технологическому присоединению, согласно условиям настоящего договора.

Согласно п. 2.1.1. Договора ТП сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору и осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору.

Согласно п. 2.3.2. Договора ТП заявитель обязуется надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по настоящему Договору, в том числе указанные в разделе 3 настоящего Договора обязательства по оплате технологического присоединения и выполнении своих мероприятий по осуществлению технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями.

В силу п. 16 Правил технологического присоединения существенным условием договора об осуществлении технологического присоединения является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В соответствии с п. 7 технических условий №... от ДД.ММ.ГГГГ, являющихся неотъемлемой частью Договора ТП, точкой присоединения является опора №... BJI-10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ «Молзавод».

Согласно п. 10.1. технических условий, сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:

10.1.1. Выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями Постановлены Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Установку приборов учета электроэнергии выполнить в соответствии с пунктом Хо19 типовых технических решений, утвержденных приказом ПАО «Россети Юг» от ДД.ММ.ГГГГ №... «Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии ».

Мероприятия по технологическому присоединению со стороны сетевой организацией выполнены в полном объеме, что подтверждается, в том числе, Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ № Влг1/11141/2011. Кроме того, в письме от ДД.ММ.ГГГГ № ВлгЭ/8000/4442 сетевая компания повторно сообщала о выполнении мероприятий.

Заявителю в свою очередь, согласно техническим условиям (пункт 11), необходимо осуществить:

11.1.1. Увеличение мощности Заявителя осуществить по существующей схеме электроснабжения. Запроектировать и выполнить реконструкцию существующей ТП А. 2607 с заменой трансформатора на трансформатор расчетной мощности.

Однако, вышеуказанные мероприятия со стороны заявителя исполнены не были.

В настоящий момент срок действия технических условий истек.

В связи с невыполнением Ответчиком обязательств по Договору ТП сетевая организация направила в адрес Ответчика посредством почтовой связи письмо от ДД.ММ.ГГГГ № ВлгЭ/8000/4442 с приложением соглашения о расторжении Договора ТП, что подтверждается реестром почтовых отправлении.

Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ. договора в случае расторжения, одностороннего отказа от исполнения Договоре заявитель обязуется компенсировать Сетевой организации понесенные расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, в том числе, но не ограничиваясь, связанные с подготовкой и выдачей Сетевой организации Технических условий Заявителю. Возмещение расходов производится Заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов с актом фактически понесенные расходов, независимо от факта подписания указанного акта Заявителем.

Размер понесенных Сетевой организацией расходов, в целях их возмещения Заявителем рассчитывается Сетевой организацией в одностороннем порядке, в том числе по выбору Сетевой организации может быть осуществлен полностью либо в части с применением утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированной тарифной ставки С1 (ее составляющей отношении отдельного мероприятия) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам. 

Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

Согласно пп. «а» п. 18 Правил ТП мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором.

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... были установлены стандартизированные тарифные ставки для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области для постоянной и временной схемы электроснабжения.

В соответствии с Приложением №... стандартизированная тарифная ставка на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю определено в размере 3 689,85 руб., что с учетом НДС 20% составляет 4 427,82 руб. 

Сетевая организация исполнила взятые на себя обязательства и в соответствии с пунктом 5 Договора ТП выдала Заявителю Технические условия.

Таким образом, сетевая организация, подготовив и выдав Ответчику технические условия, а также понесла определенные производственные издержки, которые не компенсированы до настоящего времени, уменьшают имущественную базу истца, являются для него убытками.

В соответствии с п. 16 Договора ТП нарушение заявителем установленного срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев, при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Из пп. 16.5-16.6 Правил ТП следует, что если заявитель нарушил срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению па 12 и более месяцев (либо этапа работ, если техническими условиями предусмотрена работа по этапам) при условии выполнения работ сетевой организацией, то сетевая организация вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора.

Критерии, по которым определяется нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установлены в пункте 16.6 Правил ТП, а именно:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра Э11У после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства но внесению платы за технологическое присоединение.

Обязанность доказывать существование факта искажения данных потребления мощности лежит на истце, как на лице, заявляющем соответствующие требования (статья 56) Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, оценив представленные доказательства в соответствии с ст. 67 ГПК РФ, установил, что ответчик не исполнил своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, руководствуясь п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", п. 6, 7, 11, 16 (5), 16 (6), 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, приходит к выводам о том, что такое поведение ответчика является существенным нарушением договора, влекущим его расторжение.

Учитывая обстоятельства дела, вышеизложенные положения закона, суд считает, что поскольку ответчиком не исполняются существенные обязательства по договору в виде выполнения мероприятий, установленных заключенным договором, исковые требования истца о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным с ФИО2 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Поскольку Истцом понесены затраты капитального характера (установка прибора учета электрической энергии) в размере 565 601,10 руб. (467 644,40 руб. с добавлением НДС 20%), что подтверждается актом о приемке Выполненных строительных работ хозяйственным способом от ДД.ММ.ГГГГ, данные понесенные затраты подлежат взысканию с ФИО2 в размере 565 601,10 руб.

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Поскольку истцом, при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в размере 24000 рублей, что подтверждается платежным поручением, суд считает необходимым взыскать ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 24000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233 - 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» к ФИО2 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании понесенных затрат, судебных расходов - удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ПАО «Россети Юг» (ИНН 

<

***>) и ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии №... №...).

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии №... №...) в пользу ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» (ИНН 

<

***>) фактически понесенные затраты по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №... в размере 565 601,10 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 24000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированный текст решения суда составлен 19.06.2025. 

Судья И.С.Артеменко