З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

18.02.2020г Красногорский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Кавериной О.В.

при секретаре ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 предъявил к ФИО2 иск о защите прав потребителя. В обоснование требований представитель указывает, что 02.08.2019г между сторонами заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязался выполнить ремонт квартиры по адресу: 

<

адрес>, срок проведения работ с 02.08.2019г по 08.09.2019г. Заказчик оплачивает работы поэтапно, задаток в размере 30% стоимости работ производится в день заключения договора, окончательный платеж производится в день подписания конечного акта о приеме работ. Общая стоимость работ составила 280 000 руб.

Первый платеж произведен истцом 02.09.2019г в размере 114 000 руб, что подтверждается распиской. Второй платеж произведен 13.08.2019г в размере 60 000 руб путем перечисления на принадлежащую ответчику карту 5536 9137 7892 2423 Тинькофф блек, третий платеж от имени истца 29.08.2019г в размере 20 000 руб произвела теща истца ФИО4, четвертый платеж произведен 06.09.2019г в размере 2 000 руб путем перечисления на принадлежащую ответчику карту 5536 9137 7892 2423 Тинькофф блек. Таким образом, в счет стоимости работ истцом уплачено 200 000 руб.

До настоящего времени работы ответчиком не произведены, акт сдачи работ не подписан, на претензии истца ФИО2 не реагирует.

Пунктами 4.1.3, 4.1.7 договора подряда предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение срока работ в размере 1% в день от общей суммы договора в случае задержки свыше 1-ого календарного дня от устновленных сроков. В случае одностороннего расторжения подрядчиком договора и (или отказа) от выполнения некоторых видов работ не по вине заказчика, подрядчик выплачивает неустойку в размере 25% стоимости не произведенных работ. Неустойка по состоянию за период с 09.09.2019г по 18.02.2020г составит 456 400 руб за просрочку работ и 70 000 руб -25% от стоимости работ 280 000 руб, всего 526400 руб. 

Просит расторгнуть договор подряда №.09, заключенный 02.08.2019г между сторонами, взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства 206 000 руб, неустойку за период с 09.09.2019г по 18.02.2020г 526 400 руб, компенсацию морального вреда 50 000 руб, расходы по оформлению доверенности 1500 руб.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен, о причинах неявки суду не сообщил, отзыв по существу иска не представил, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, постановить по делу заочное решение.

Выслушав объяснения представителя истца, показания свидетеля, изучив материалы дела, исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению. 

В соответствии со ст.ст. 307-309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнении его обязанности. 

Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно кредитором в том. что имеет право от нее требовать. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах этого периода. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства (ст.314 ГК РФ). 

В силу ст.ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. 

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (ст.450 ГК РФ).

Согласно ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу ст.720, 721 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (ст.730 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что 02.08.2019г между сторонами заключен договор подряда, по условиям которого ФИО2 обязался выполнить ремонт квартиры по адресу: 

<

адрес>, срок проведения работ с 02.08.2019г по 08.09.2019г. Заказчик оплачивает работы поэтапно, задаток в размере 30% стоимости работ производится в день заключения договора, окончательный платеж производится в день подписания конечного акта о приеме работ. Общая стоимость работ составила 280 000 руб.

02.09.2019г ФИО1 произвел платеж в размере 114 000 руб, что подтверждается распиской, 13.08.2019г произвел платеж в размере 60 000 руб путем перечисления на принадлежащую ответчику карту 5536 9137 7892 2423 Тинькофф блек, 06.09.2019г произвел платеж в размере 20 000 руб путем перечисления на принадлежащую ответчику карту 5536 9137 7892 2423 Тинькофф блек.

Также 29.08.2019г денежные средства в размере 20 000 руб переданы ответчику от имени истца ФИО4

Допрошенная в судебном заседании 21.01.2019г ФИО4 пояснила, что ФИО1 – муж ее дочери, ФИО2 выполнял для ФИО1 ремонтные работы. В счет оплаты работ деньги перечислялись ответчику в том числе картой, лично она, свидетель, по просьбе ФИО1 передавала ФИО2 20 000 руб, расписку не взяла. Не возражает против взыскания указанных денежных средств 20 000 руб в пользу истца. Пояснила также, что ремонт ответчиком закончен не был.

Таким образом, в счет оплаты работ истец передал ответчику 200 000 руб.

До настоящего времени работы ответчиком не произведены, акт сдачи работ не подписан, на претензии истца ФИО2 не реагирует.

Согласно ст.ст.27-29 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Учитывая право истца отказаться от исполнения договора в связи с нарушением сроков выполнения работ, договор следует расторнуть, взыскав с ответчика уплаченные по договору денежные средства 200 000 руб.

До настоящего времени работы ответчиком не произведены, акт сдачи работ не подписан, на претензии истца ФИО2 не реагирует.

Пунктами 4.1.3, 4.1.7 договора подряда предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение срока работ в размере 1% в день от общей суммы договора в случае задержки свыше 1-ого календарного дня от установленных сроков. В случае одностороннего расторжения подрядчиком договора и (или отказа) от выполнения некоторых видов работ не по вине заказчика, подрядчик выплачивает неустойку в размере 25% стоимости не произведенных работ. Неустойка по состоянию за период с 09.09.2019г по 18.02.2020г составит 456 400 руб за просрочку работ и 70 000 руб -25% от стоимости работ 280 000 руб, всего 526 400 руб, указанная сумма также подлежит взысканию с ответчика.

Ст.ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В счет компенсации морального вреда с ответчика следует взыскать 10 000 руб, а в соответствии со ст.ст.94, 98 ГПК РФ – расходы по оформлению доверенности 1500 руб.

В удовлетворении остальной части требований следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.233-227 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда №.09, заключенный 02.08.2019г между ФИО1 и ФИО2.

Взыскать со ФИО2 в пользу ФИО1 уплаченные по договору денежные средства 200 000 руб, неустойку за период с 09.09.2019г по 18.02.2020г 526 400 руб, компенсацию морального вреда 10 000 руб, расходы по оформлению доверенности 1500 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Ответчик вправе подать в Красногорский городской суд заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня получения им копии заочного решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Судья: О.В. Каверина