Дело № 2-505/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 мая 2018 года г. Калининград

Центральный районный суд г.Калининграда в составе:

председательствующего судьи Ивановой И.А.,

при секретаре Мамедовой Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Янтарьэнерго» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд, указывая, что является собственником жилого дома с кадастровым №, расположенного по 

<

 адрес > 

<

 Дата > на основании дополнительного соглашения № к нему перешли все права и обязанности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого 

<

 адрес >, заключенному 

<

 Дата > предыдущим собственником Д.Е.А. и АО «Янтарьэнерго». Согласно п. 1 Договора ответчик принял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЭУ от ЩУ новый, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть 

<

 Дата > Ответчик принятые на себя обязательства по договору не исполнил, в связи с чем он (истец) лишен возможности вселиться в дом, выполнять ремонт. Письмами от 

<

 Дата >, 

<

 Дата >, 

<

 Дата > и 

<

 Дата > ответчик в одностороннем порядке указал, что планируемый срок завершения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения переносится. В связи с указанными обстоятельствами просил обязать АО «Янтарньэнерго» исполнить договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 

<

 Дата >, в соответствии с которым выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома, расположенного по 

<

 адрес > к электрическим сетям согласно договору № об осуществлении технологического присоединения от 

<

 Дата > и техническим условиям № от 

<

 Дата > в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебное заседание ФИО1 не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, поддержав доводы, изложенные в письменном отзыве, а также указала, что АО «Янтарьэнерго» не отказывается от своих обязательств, исполнило свои обязательства перед истцом в полном объеме, о чем уведомило истца письмом от 

<

 Дата >, от истца уведомление об исполнении своей части технических условий поступило в адрес АО «Янтарьэнерго» только 

<

 Дата >, сотрудниками АО «Янтарьэнерго» был составлен акт допуска прибора учета истца в эксплуатацию, дано предписание на заключение договора энергоснабжения. Без указанного договора, фактическое присоединение не осуществляется, поскольку энергоснабжающая организация выставляет потребителю задолженность за безучетное потребление электроэнергии. В настоящее время со стороны АО «Янтарьэнерго» подготовлены все необходимые документы для осуществления фактического технологического присоединения. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ст.ст.309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с положениями ч.1,ч.3 ст.328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

В соответствии с ч.1 ст.408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Пунктом 2 Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 09.06.2010) предусмотрено осуществление технологического присоединения на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. 

Согласно п. 16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению. 

В соответствии с п.п. «б» п.16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств.... срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать шести месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 указанных Правил в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно п. 16.3 указанных Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. 

В соответствии с п.п.д п.18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заказчика к электрическим сетям возможно только после выполнения заказчиком своих обязательств по договору и техническим условиям.

Судом установлено, что ФИО1 с 

<

 Дата > на праве собственности принадлежит жилой дом с кадастровым №, расположенный по 

<

 адрес >, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра права на недвижимое имущество. 

Из материалов дела также следует, что 

<

 Дата > между Д.Е.А. и АО "Янтарьэнерго" заключен договор № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома, расположенного 

<

 адрес > (кад. №).

В соответствии с п. 1 договора ОАО "Янтарьэнерго" обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ЩВУ объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, 

- категория надежности – третья, 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, 

- точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям, располагается на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором будет располагаться присоединяемый объект заявителя. 

В соответствии с п.5 договора, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. 

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора в размере 550 рублей, выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией. 

Заявитель также обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора в размере 550 руб., выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией. 

Д.Е.А. выданы технические условия №, в соответствии с которыми на заявителя возложена обязанность произвести монтаж электросети от точки присоединения (через ЩВУ) до ВРУ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности, на вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцептеля в соответствии с расчетной мощностью, установить приборы учета для расчетов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.

Согласно п. 10 технических условий, сетевая организация в целях присоединения нового заявителя обязалась от опоры № до опоры № (уточнить при проектировании) ВЛ 15-153 заменить существующих провод А-70 на провод АС-95, построить трансформаторную подстанцию (ТП) – 15/0,4 кВ с трансформатором потребной мощности, от опоры № (уточнить при проектировании) ВЛ 15-153 до ТП-2 по п.10.2 построить ЛЭП 15кВ сечением токопроводящих жил не менее 120 кв.м. (протяженность 1,8 км по ТЗ №. СЭРС.2013/ЗЭС-24) Опоры ж.б. район по ветру -4, по гололеду -2. Присоединение выполнить через отключающий пункт, от ТП-2 по п. 10.2 до участка застройки заявителя построить ВЛИ 0,4 кВ сечением токопроводящих жил не менее 70 кв.м. (протяженность 410 м).

Точка присоединения к электрической сети зажим провода на опоре № (уточнить при подключении) ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-2 15/04 кВ (новая). Точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО «Янтарьэнерго».

Судом также установлено, что 

<

 Дата > между АО «Янтарьэнерго» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение к договору № от 

<

 Дата >, согласно которому в связи с переходом к ФИО1 прав на указанный в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объект (жилой дом, расположенный по 

<

 адрес > стороны пришли к соглашению о переходе всех прав и обязанностей по договору от 

<

 Дата > к Заявителю – ФИО1 Пункт 5 договора № от 

<

 Дата > изложен в новой редакции в соответствии с которой, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения дополнительного соглашения № к договору, то есть до 

<

 Дата > 

Из ответа АО «Янтарьэнерго» от 

<

 Дата > следует, что в целях исполнения обязательств по договору от 

<

 Дата > № АО «Янтарьэнерго» по первому титулу: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-153, ВЛИ 0,4кВ в 

<

 адрес >, черта 

<

 адрес >» первый пусковой комплекс первого этапа» разработано и утверждено техническое задание. В настоящее время по результатам объединенных конкурентных процедур договор подряда с ООО «Электромонтаж-СП» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ находится на стадии заключения. Планируемые срок завершения мероприятий по договору – II квартал 2018 г. 

<

 Дата > между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № к договору об осуществлении технологического присоединения, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения дополнительного соглашения № к Договору, то есть до 

<

 Дата >.

В соответствии с положениями п.85 раздела IX указанных Правил, введенного в действие Постановлением Правительства РФ от 

<

 Дата > №, для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

После получения уведомления и необходимой документации, подтверждающей выполнение технических условий, сетевая организация в соответствии с п.87 указанных Правил рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя. По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заказчика к электрическим сетям возможно только после выполнения заказчиком своих обязательств по договору и техническим условиям.

Пункт 8 Договора, заключенного между истцом и ответчиком также предусматривает исполнение обязанностей заявителем, необходимых для осуществления технологического присоединения, в том числе:

- по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- уведомление сетевой организации о выполнении технических условий;

- принятие сетевой организацией участия в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

При этом, пункт 11 Технических условий предусматривает конкретные обязанности на стороне истца, необходимые для осуществления технологического присоединения.

Таким образом, из вышеуказанных доказательств следует, что выполнение сетевой организацией АО «Янтарьэнерго» своих обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям возможно только при условии выполнения заявителем обязательств, предусмотренных п.8 Договора и п.11 Технических условий.

Из материалов дела следует, что ФИО1 уведомил АО "Янтарьэнерго" о выполнении ими своей части технических условий только 

<

 Дата >.

Сотрудниками АО «Янтарьэнерго» проведена проверка и осмотр присоединяемой установки заявителя к электрическим сетям, по результатам которой составлен акт № о допуске в эксплуатацию прибора учета, согласно которому счетчик расчетный прибор пригоден для коммерческих расчетов, выдано предписание заключить договор на энергоснабжение.

В соответствии с п. 89 Правил, при выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации, представляемой в сетевую организацию, сетевая организация по завершении осмотра электроустановок составляет и передает заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю.

Как следует из пояснений представителя ответчика, истец до настоящего времени не предоставил в сетевую организацию договор на энергоснабжение, в связи с чем фактическое технологическое присоединение не осуществлено, однако со стороны АО «Янтарьэнерго» все мероприятия по технологическому присоединению выполнены, а также в настоящее время подготовлены акт о выполнении технических условий. Осуществление фактического присоединения в отсутствие договора энергоснабжения приведет к взысканию с истца задолженности за безучетное потребление электроэнергии. При предоставлении истцом недостающих документов АО «Янтарьэнерго» сразу же будет осуществлено фактическое технологическое присоединения.

Учитывая вышеизложенное, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 23 мая 2018 года.

Судья И.А. Иванова