УИД №

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кораблино Рязанской области ДД.ММ.ГГГГ

Кораблинский районный суд Рязанской области в составе судьи Васильевой В.Н.,

при секретаре Кормилицыной Е.В.,

с участием представителя истца – старшего помощника прокурора Кораблинского района Рязанской области Демкиной О.А.,

представителя ответчика – МКП «КТЭС» ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску прокурора Кораблинского района Рязанской области в интересах неопределённого круга лиц к МКП «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области, администрации муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области об обязании обеспечить проведение капитального ремонта тепловых сетей г. Кораблино (в порядке ст. 45 ГПК РФ), 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кораблинского района Рязанской области в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с названным иском к ответчикам, указав, что прокуратурой района по поручению прокуратуры области проведена проверка по информации Приокского Управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ о наличии у МКП «КТЭС» риска невыполнения плана замены изношенных тепловых сетей. Проверкой установлено, что у в оперативном управлении МКП «КТЭС» находятся сети теплоснабжения г.Кораблино протяжённостью 

<

данные изъяты> м. В соответствии с Планом замены тепловых сетей 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ годы в ДД.ММ.ГГГГ году подлежали замене ветхие тепловые сети протяжённостью 

<

данные изъяты> погонных метров. Комиссией, образованной на основании распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.№, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №.190-0ФЗ «О теплоснабжении» проведена документарная проверка МО – Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области, по результатам которой сделан вывод о его неготовности к отопительному периоду ДД.ММ.ГГГГ г.г. в связи с невыполнением МКП «КТЭС» в полном объёме Плана замены ветхих тепловых сетей (из 4,405 км, предусмотренных Планом, фактически заменено 

<

данные изъяты> км). Ветхое состояние тепловых сетей в отопительный сезон может повлечь перерывы в подаче теплоснабжения жителей 

<

адрес>, возникновению чрезвычайных ситуаций, что в условиях низких температур воздуха ведёт к возникновению реальной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. Выполнение работ по капитальному ремонту вышеуказанных тепловых сетей может быть обеспечено как за счёт собственных средств МКП «КТЭС», так и за счёт бюджетных средств учредителя – МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области. На основании изложенного с учётом уточнения просил обязать ответчиков обеспечить в срок до ДД.ММ.ГГГГ проведение капитального ремонта тепловых сетей 

<

адрес> протяжённостью 

<

данные изъяты> погонных метров, из которых:

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм.

В ходе производства по делу к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Приокское Управление Ростехнадзора.

В судебном заседании представитель истца – старший помощник прокурора Кораблинского района Рязанской области Демкина О.А. иск поддержала в полном объёме с учётом уточнения по изложенным в нём основаниям.

Представитель ответчика – администрации МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области ФИО2 в судебном заседании иск прокурора не признал, возражал против его удовлетворения, указав, что доказательств, свидетельствующих о том, что состояние тепловых сетей не позволяет осуществлять бесперебойное теплоснабжение жилых домов в состоянии, пригодном для предоставления населению коммунальной услуги надлежащего качества, труба не пригодна к эксплуатации и не выдержит тепловых нагрузок, а также того, что МКП «КТЭС» не исполняет своих полномочий по теплоснабжению, не представлено. Фактов прорывов либо сбоев в эксплуатации тепловой сети не установлено. Кроме того, в плане замены тепловых сетей г. Кораблино на ДД.ММ.ГГГГ г.г. есть примечание, в котором указано – при наличии необходимого количества денежных средств. Просил в иске отказать в полном объёме.

Представитель ответчика – МКП «КТЭС» ФИО1 в судебном заседании против удовлетворения иска прокурора с учётом уточнения не возражала, пояснила, что времени, остающегося с момента вступления решения суда в законную силу до начала отопительного сезона слишком мало для того, чтобы полностью выполнить ремонт теплосетей, указанных в иске.

Представитель третьего лица – Приокское управление Ростехнадзора в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом, причину неявки не сообщил.

В силу ст. 167 ГПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Выслушав пояснения участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

На основании п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особо общественное значение.

В соответствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Предъявление настоящего иска в интересах неопределённого круга лиц обусловлено необходимостью защитить права и интересы жителей 

<

адрес> (теплоснабжение которых осуществляется от централизованных сетей теплоснабжения 

<

адрес>) на бесперебойное теплоснабжение в отопительный сезон. 

В судебном заседании установлено, сторонами не оспаривалось и подтверждается материалами дела, что в оперативном управлении МКП «Кораблинские тепловые и электрические сети» МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области (МКП «КТЭС») находятся сооружения гидротехнические – сети теплоснабжения г. Кораблино, год ввода в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГ, протяжённостью 

<

данные изъяты> м, собственником которых является МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области от ДД.ММ.ГГГГ.

Прокуратурой Кораблинского района по поручению прокуратуры области проведена проверка по информации Приокского управления Ростехнадзора о наличии у МКП «Кораблинские тепловые и электрические сети» риска невыполнения плана замены изношенных тепловых сетей.

В соответствии с Планом замены тепловых сетей г. Кораблино на ДД.ММ.ГГГГ г.г., подписанным директором МКП «КТЭС» ФИО6 и согласованным с заместителем главы администрации МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области ФИО7, в ДД.ММ.ГГГГ году подлежали замене ветхие тепловые сети протяжённостью 

<

данные изъяты> погонных метров, в том числе:

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- ввод на уч.корпус 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до дома по 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм.

Проведённая прокуратурой района проверка показала, что комиссией, образованной на основании распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №№о «О создании комиссии по оценке готовности муниципальных образований 

<

адрес> к отопительному периоду», ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена документарная проверка готовности к отопительному периоду поселений МО – Кораблинский муниципальный район 

<

данные изъяты> области, по результатам которой сделан вывод о его неготовности к отопительному периоду ДД.ММ.ГГГГ г.г. в связи с невыполнением МКП «КТЭС» в полном объёме плана замены ветхих тепловых сетей (из 4,105 км, предусмотренных Планом, фактически заменено – 

<

данные изъяты> км), что подтверждается актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

Из представленной в прокуратуру района информации МКП «КТЭС» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в состав 

<

данные изъяты> км тепловых сетей включено 

<

данные изъяты> погонных метров (от 

<

адрес> до 

<

адрес> по 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм) тепловых сетей, отремонтированных по указанному плану на ДД.ММ.ГГГГ год и 

<

данные изъяты> погонный метр тепловых сетей, отремонтированных вне данного плана.

Таким образом, МКП «КТЭС» перед началом отопительного сезона ДД.ММ.ГГГГ г.г. не обеспечило выполнение работ по замене ветхих тепловых сетей г. Кораблино протяжённостью 

<

данные изъяты> погонных метров.

Судом установлено, что в период рассмотрения иска прокурора судом МКП «КТЭС» проводились ремонтные работы в соответствии с указанным Планом, а именно:

- трубопровод от 

<

адрес> до 

<

адрес> – частично заменён участок теплотрассы протяжённостью 

<

данные изъяты> пм;

- участок от 

<

адрес> до 

<

адрес> протяжённостью 

<

данные изъяты> пм заменён в ДД.ММ.ГГГГ году;

- трубопровод от 

<

адрес> до дома по 

<

адрес>, 3 полностью заменён в количестве 

<

данные изъяты> пм в ДД.ММ.ГГГГ году;

- трубопровод от 

<

адрес> до 

<

адрес> заменён в количестве 

<

данные изъяты> пм в ДД.ММ.ГГГГ году.

По заказу МКП «КТЭС» ООО «ЭКСПЕРТ 62» проведено техническое диагностирование участка трубопровода тепловой сети 

<

адрес> – 

<

адрес> протяжённостью 

<

данные изъяты> м. Согласно выводам экспертов в отчёте от ДД.ММ.ГГГГ № данный участок находится в работоспособном состоянии, необходимость проведения капитального ремонта не установлена. 

Согласно акту № разграничения балансовой принадлежности от ДД.ММ.ГГГГ ввод на уч.корпус Агротехникума – 

<

данные изъяты> пм – трубопровод находится на балансе у ОГБПОУ 2Ряжский колледж имени Героя Советского Союза ФИО3».

Согласно акту разграничения балансовой принадлежности от ДД.ММ.ГГГГ тепловые сета от 

<

адрес> до РОВД – 

<

данные изъяты> пм – трубопровод находится на балансе МО МВД России «Кораблинский».

Таким образом, на момент рассмотрения дела требуется проведение капитального ремонта тепловых сетей 

<

адрес> протяжённостью 

<

данные изъяты> погонных метров, из которых:

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм.

Обращаясь с названным иском, прокурор указал, что ветхое состояние тепловых сетей в отопительный сезон может повлечь перерывы в подаче теплоснабжения жителей г. Кораблино, возникновению чрезвычайных ситуаций что, в условиях низких температур воздуха ведёт к возникновению реальной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

Разрешая заявленные требования, суд учитывает следующее.

Статьёй 210 Гражданского кодекса РФ установлено, что собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно ч. 1 ст. 296 ГК РФ учреждение и казённое предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Согласно ч. 4.2 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении». 

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций (ч. 1 ст. 1). 

К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях согласно ст. 6 указанного ФЗ относятся, в том числе: 

- организация обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду; 

- в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации; 

- утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

В силу ст. 20 ФЗ №190-ФЗ проверке готовности к отопительному периоду подлежат, в том числе муниципальные образования, теплоснабжающие организации и теплосетевые организации.

Проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду и расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. 

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны, в частности: организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей; обеспечивать качество теплоносителей; обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения; обеспечить надёжное теплоснабжение потребителей.

Пунктом 2.7.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115, установлено, что при эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем организации.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды тепловых энергоустановок необходимо составлять годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации (п. 2.7.3 указанных Правил).

Согласно п. 4.12.25 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, для контроля за состоянием оборудования тепловых сетей и режимом их работы регулярно по графику должен производиться обход теплопроводов и тепловых пунктов.

Из пункта 4.12.41 данных Правил следует, что ремонт тепловых сетей должен производиться в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных опрессовок.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, должна выполнять работы, направленные на повышение уровня эксплуатации, надёжности, безопасности и эффективности работы оборудования и сетей, уменьшение потерь тепловой энергии и теплоносителя, затрат электроэнергии при транспорте и распределении тепловой энергии.

В соответствии с п. 6.2.25 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115, при текущей эксплуатации тепловых сетей необходимо, в частности, поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт, выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие.

Согласно п. 7.1 Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утверждённой Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 №285, в каждой организации должен быть организован плановый ремонт оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений. 

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов подразделяется на:

текущий ремонт, к которому относятся работы по систематическому и своевременному предохранению отдельных элементов оборудования и конструкций тепловой сети от преждевременного износа путём проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений;

капитальный ремонт, в процессе которого восстанавливается изношенное оборудование и конструкции или они заменяются новыми, имеющими более высокие технологические характеристики, улучшающими эксплуатационные качества сети.

Продолжительность ремонтных циклов магистральных тепловых сетей при подземной и надземной прокладке между текущим и очередным ремонтом составляет 12 месяцев, ремонтный цикл – 16 лет.

Пунктом 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, установлено, что в целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору должны быть проверены выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

Как установлено судом, капитальный ремонт вышеуказанных тепловых сетей г. Кораблино, введённых в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ году, ответчиками проводился частично, сведений о проведении капитального ремонта предыдущим собственником в материалы дела не представлено.

Сеть тепловая магистральная (код ОКОФ: 220.41.20.20.713) согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», относится к 5-й амортизационной группе основных средств. Максимальный срок полезного использования 5-й амортизационной группы — 120 месяцев (10 лет).

То есть тепловые сети г. Кораблино, введённые в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ году, имеют стопроцентный износ.

В силу п. 2.1 Устава МКП «КТЭС» целями предприятия являются удовлетворение социально значимых общественных потребностей, повышение качества предоставляемых населению города Кораблино жилищно-коммунальных услуг и получение прибыли в сфере производства и (или) услуг: выработка тепловой энергии с последующей реализацией потребителям и транспортировка электричества. Предметом деятельности предприятия являются выполнение работ, производство продукции, оказание услуг в сфере теплоснабжения и электроснабжения.

В соответствии с п.п. 7, 8 п. 2.2 Устава МКП «КТЭС» для достижения указанных целей предприятие осуществляет ремонт и эксплуатацию тепловых сетей; замена изношенного (включая монтаж), ремонт и обслуживание отопительного оборудования, арматуры отопления и горячего водоснабжения. 

Согласно п.п. 1.4, 1.5, 3.3 Устава МКП «КТЭС» учредителем предприятия является МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области. Источниками формирования имущества предприятия, в том числе финансовых ресурсов, являются:

- средства, выделяемые целевым назначением из местного бюджета согласно утверждённой схеме доходов и расходов;

- доходы, полученные от выполнения работ, услуг, реализации продукции, а также от других видов хозяйственной, финансовой и внешнеэкономической деятельности, разрешенных настоящим Уставом;

- заёмные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций, получение которых согласовано и зарегистрировано в установленном порядке;

- амортизированные отчисления;

- капитальные вложения и дотации из бюджета;

- целевое бюджетное финансирование;

- дивиденды (доходы), получаемые от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует предприятие;

- добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и граждан;

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Таким образом, выполнение работ по капитальному ремонту вышеуказанных тепловых сетей, может быть обеспечено как за счёт собственных средств МКП «КТЭС», так и за счёт бюджетных средств учредителя – МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области.

Доводы ответчика – администрации о том, что доказательств, свидетельствующих о том, что состояние тепловых сетей не позволяет осуществлять бесперебойное теплоснабжение жилых домов в состоянии, пригодном для предоставления населению коммунальной услуги надлежащего качества, труба не пригодна к эксплуатации и не выдержит тепловых нагрузок, а также того, что МКП «КТЭС» не исполняет своих полномочий по теплоснабжению, не представлено, фактов прорывов либо сбоев в эксплуатации тепловой сети не установлено, а также в плане замены тепловых сетей г. Кораблино на ДД.ММ.ГГГГ г.г. указано, что замена производится при наличии необходимого количества денежных средств, являются несостоятельными, поскольку тепловые сети г. Кораблино, эксплуатируемые более 50 лет без проведения капитального ремонта, являются аварийными и сами по себе несут угрозу жизни и здоровью граждан. Комиссия Кораблинского района, которая выдала МКП «КТЭС» паспорт готовности к отопительному сезону ДД.ММ.ГГГГ г.г., не имела в своём составе квалифицированных специалистов и не располагала иными данными, кроме результатов опрессовок. Иных результатов анализа выявленных дефектов, повреждений по результатам обследования комиссия Кораблинского района не имела. Поэтому совершенно обоснованно Приокское Управление Ростехнадзора сделало вывод о неготовности тепловых сетей г. Кораблино к отопительному периоду ДД.ММ.ГГГГ г.г. 

Данными о проведённых ранее капитальных ремонтах спорных участков тепловых сетей суд также не располагает, ответчиками таких сведений не представлено.

При таких обстоятельствах, непроведение капитального ремонта спорных участков тепловых сетей г. Кораблино может повлечь ухудшение их состояния в отопительный сезон, что приведёт к перебоям в подаче теплоснабжения жителей г. Кораблино и возникновению чрезвычайных ситуаций, что будет являться реальной угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, в связи с чем исковые требования прокурора являются полностью обоснованными и подлежат удовлетворению.

При этом суд полагает возможным установить срок для выполнения ответчиками вышеуказанных действий – до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Иск прокурора Кораблинского района Рязанской области – удовлетворить.

Обязать МКП «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области и администрацию муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области в срок до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить проведение капитального ремонта тепловых сетей г. Кораблино Рязанской области, протяжённостью 

<

данные изъяты> погонных метров, из которых: 

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм;

- от 

<

адрес> до 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> пм.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Рязанского областного суда через Кораблинский районный суд Рязанской области в течение месяца со дня принятия мотивированного решения. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Судья В.Н. Васильева