Гражданское дело № 2-1063/2020

УИД 47RS0005-01-2019-006906-08

город Выборг 26 мая 2020 года 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Выборгский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Киселевой С.Н.

при секретаре Коженковой А.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Публичного акционерного общества «Ленэнерго» к ФИО1 о взыскании неустойки и расходов по оплате государственной пошлины,

УСТАНОВИЛ:

истец обратился в Выборгский городской суд Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании неустойки и расходов по оплате государственной пошлины.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 25 ноября 2016 года между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1 заключен Договор № ОД-ВЭС-23006-16/34536-Э-16, согласно которому истец обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) ответчика к электрическим сетям, а ответчик - оплатить технологическое присоединение в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

В соответствии с п. 1 Договора технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ в пределах заявленной мощности потребления 15 кВт по третьей категории надежности, для электроснабжения строящегося дачного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: 

<

адрес>

Пунктом 8 Договора установлена обязанность ответчика исполнить надлежащим образом, в определенный договором срок, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего Договора, то есть до 25 мая 2017 года.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 313-п и составляет 550 руб., включая НДС 18% 83,90 руб..

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов за технологическое присоединения считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 Договора).

Обязанность ответчика по внесению платежа в установленный договором срок исполнена в полном объеме.

Истцом были в полном объеме исполнены обязательства, возложенные на истца Техническими условиями по Договору и необходимые для осуществления технологического присоединения объекта ответчика, в связи с чем, в адрес ответчика направлено соответствующее уведомление от 26 июня 2017 года № ВЭС/031/4338/28.

Нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика наступает с 26 мая 2017 года.

Поскольку сведения о готовности энергопринимающих устройств ответчика отсутствовали, в соответствии со ст. 450.1, ст. 453 ГК РФ, в адрес ответчика направлена претензия № ВЭС/031/286/161 от 22 января 2018 года с требованием об уплате начисленной неустойки за просрочку исполнения обязательств по технологическому присоединению.

28 июня 2019 года в адрес ответчика повторно направлена претензия № ВЭС/031/4130 с требованием об уплате начисленной неустойки за просрочку исполнения обязательств по технологическому присоединению.

Требования, изложенные в претензиях, ответчик не исполнил. Ответа на претензии не поступило.

Подпунктом «в» п.16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила ТП), и п. 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Просрочка ответчика за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению наступает с 26 мая 2017 года по 03 декабря 2019 года и составляет 922 дня.

Размер неустойки по образовавшейся задолженности по состоянию на 03 декабря 2019 года составляет 25 355 руб.: 922 (количество дней просрочки) *0,05* 550 руб. (общий размер платы за ТП) = 25 355 руб..

С учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п. 17 Договора общий размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки и составляет 10 037руб. 50 коп..

Расчет неустойки в соответствие с п. 17 Договора:

5%*550,00*365 = 10 037,50 рублей, где

5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%)

550,00 - размер платы по Договору (руб.)

365 - количество дней просрочки (с учетом ограничения, установленного п. 17 Договора - 1 год).

Таким образом, размер неустойки по Договору за год просрочки составляет 10 037 руб. 50 коп..

Истец просит суд взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Ленэнерго» неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 коп. и расходы по оплате госпошлины в размере 6 587руб. 50 коп..

Истец, будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явился, об отложении слушания дела не просил. Суд на основании ст. 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик требования не признал.

Суд, выслушав ответчика, исследовав материалы дела, находит требования истца подлежащими удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, 25 ноября 2016 года между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1 заключен Договор № ОД-ВЭС-23006-16/34536-Э-16, согласно которому истец обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) ответчика к электрическим сетям, а ответчик - оплатить технологическое присоединение в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

В соответствии с п. 1 Договора технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ в пределах заявленной мощности потребления 15 кВт по третьей категории надежности, для электроснабжения строящегося дачного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: 

<

адрес>.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность ответчика исполнить надлежащим образом, в определенный договором срок, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего Договора, то есть до 25 мая 2017 года.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 313-п и составляет 550 руб., включая НДС 18% 83,90 руб..

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов за технологическое присоединения считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 Договора).

Из п. 17 договора следует возможность начисления неустойки как за нарушение сроков выполнения обязательств по организации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, так и за нарушение сроков внесения платы за технологическое присоединение, поскольку данные условия являются обязательными для сторон. 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861. 

Также указанными Правилами распределена обязанность по исполнению мероприятий осуществления технологического присоединения.

Обязательства ответчика, изложенные в пункте 8 договора, не исполнены.

Подпунктом «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила ТП), и п. 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сумма взыскиваемой истцом неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств по организации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения в размере 10 037 руб. 50 коп. рассчитана исходя из размера платы по договору (550 руб.), 5% размера неустойки за каждый день просрочки (%), 365 - количество дней просрочки (с учетом ограничения, установленного п.п. «в» п. 16 Правил ТП и п. 17 Договора), периода ненадлежащего исполнения обязательства (с 26 мая 2017 года по 03 декабря 2019 года) и является правильной.

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (п. 1 ст. 98 ГПК РФ).

Истцом при подаче заявления была произведена оплата госпошлины в размере 6 587 руб. 50 коп., что подтверждается платежным поручением № 13440 от 09 декабря 2019 года.

Определением Выборгского городского суда Ленинградской области от 26 мая 2020 года производство по иску Публичного акционерного общества «Ленэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и взыскании убытков в связи с добровольным удовлетворением требований истца.

Учитывая, что требования истца подлежат удовлетворению, часть требований исполнена ответчиком добровольно, то и государственная пошлина подлежит взысканию в размере 6 587 руб. 50 коп.

Основываясь на изложенном и руководствуясь ст. ст. 194, 196-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Публичного акционерного общества «Ленэнерго» к ФИО1 о взыскании неустойки и расходов по оплате государственной пошлины удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Ленэнерго» неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 руб. 50 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 587 руб. 50 коп., а всего 16 625 руб..

На решение суда в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме может быть подана апелляционная жалоба в Ленинградский областной суд через Выборгский городской суд Ленинградской области.

Председательствующий подпись

Мотивированное решение изготовлено 02 июня 2020 года.

Председательствующий подпись

Копия верна

Судья Выборгского городского суда С.Н. Киселева

Секретарь А.И. Коженкова

Подлинный документ находится в гражданском деле № 2-1063 за 2020 год в Выборгском городском суде Ленинградской области.

На _________________________решение не вступило в законную силу.

Судья Выборгского городского суда С.Н. Киселева

Секретарь А.И. Коженкова