ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 января 2019 года Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Номогоевой З.К., при секретаре Даржаевой А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «МРСК Сибири» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МРСК Сибири» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки. Исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Сибири» и ФИО1 был заключен договор №.0300.4157.16 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с условиями заключенного договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, Кабанский р, 

<

адрес>. Кадастровый номер земельного участка № в точке присоединения, определенной техническими условиями, в соответствии со следующими характеристиками:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт;

категория надежности третья;

класс напряжения электрических сетей, на котором осуществляется технологическое присоединение 0, 23 кВ.

Обязанности по оплате мероприятий по технологическому присоединению стороны согласовали в разделе 3 Договора.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Республиканской службы по тарифам № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 550,00 руб. за 1 кВт, в т.н. НДС 18% в сумме 83,90 руб.

Согласно п.8 Договора ФИО1 (Заявитель) принял на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях, уведомить ПАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) о выполнении технических условий.

Так же Заявитель обязуется уведомить сетевую организацию после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организации и др.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

Заявитель свои обязанности по настоящему Договору не исполнил, Сетевую организацию о невыполнении им технических условий не уведомлял, с просьбой о продлении срока не обращался.

П. 16 Договора предусмотрено, что «нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда».

П. 17 Договора предусматривает, что «Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты».

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий составляет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 10 037,50 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес заявителя направлено уведомление № сор 1.2/13/314 от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении обязательств со стороны заявителя с просьбой при отсутствии необходимости подключения подписать соглашение о расторжении, направленное вместе с уведомлением. ДД.ММ.ГГГГ в адрес заявителя направлена претензия № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой оплаты неустойки, выполнения мероприятий, либо в случае отсутствия необходимости осуществления технологического присоединения направить заявление о расторжении.

Истцом подготовлены, согласованы и разработаны технические условия. Ответчиком же обязательства по договору не исполнены. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В судебном заседании представитель истца ФИО2 по доверенности, поддержал исковые требования в полном объеме.

В судебное заседание ответчик ФИО1 в суд не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, что подтверждается судебным извещением. Суд с согласия представителя истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства по правилам гл. 22 ГПК РФ, о чем судом вынесено определение.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Сибири» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) был заключен договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с условиями заключенного договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, Кабанский р, 

<

адрес>. Кадастровый номер земельного участка № в точке присоединения, определенной техническими условиями, в соответствии со следующими характеристиками:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт;

категория надежности третья;

класс напряжения электрических сетей, на котором осуществляется технологическое присоединение 0, 23 кВ.

Обязанности по оплате мероприятий по технологическому присоединению стороны согласовали в разделе 3 Договора.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Республиканской службы по тарифам № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 550,00 руб. за 1 кВт, в т.н. НДС 18% в сумме 83,90 руб.

В п.11 Договора указан порядок перечисления денежных средств на счет исполнителя. 

Согласно п.8 Договора ФИО1 (Заявитель) принял на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях, уведомить ПАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) о выполнении технических условий.

Так же Заявитель обязуется уведомить сетевую организацию после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организации и др.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

Заявитель свои обязанности по настоящему Договору не исполнил, Сетевую организацию о невыполнении им технических условий не уведомлял, с просьбой о продлении срока не обращался.

П. 16 Договора предусмотрено, что «нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда».

ДД.ММ.ГГГГ в адрес заявителя направлено уведомление № сор 1№ от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении обязательств со стороны заявителя с просьбой при отсутствии необходимости подключения подписать соглашение о расторжении, направленное вместе с уведомлением, что подтверждается материалами дела.

Таким образом, требования истца о расторжении договора являются обоснованными и подлежат удовлетворению, поскольку ответчиком нарушены существенные условия договора №.№ от ДД.ММ.ГГГГ 

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

П. 17 Договора предусматривает, что «сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты».

Истцом заявлена к взысканию неустойка за нарушение срока выполнения мероприятий размер которой составляет 10 037,50 руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в пользу истца госпошлина в размере 3 401 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198,235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «МРСК Сибири» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании денежных средств удовлетворить. 

Расторгнуть договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «МРСК Сибири» и ФИО1. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «МРСК «Сибири» неустойку в размере 10 037,50 руб., госпошлину в размере 3 401 руб., итого: 13 438,50 руб. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме, а ответчик вправе подать заявление об отмене заочного решения в Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение семи дней с момента получения копии заочного решения. 

Судья Номогоева З.К. 

Верно: Судья Номогоева З.К. 

Секретарь Даржаева А.И. 

Подлинник решения (определения) находится в Октябрьском районном суде 

<

адрес> и подшит в гражданское дело (материал) № ____________.