Дело № 2-2143/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 июня 2021 года г. Астрахань

Советский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Марисова И.А..,

при ведении протокола помощником судьи Кулушевой А.О..,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Юг» в лице филиала (ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») к ФИО1 о расторжении договора и взыскании судебных расходов, 

у с т а н о в и л:

ПАО «Россети Юг» в лице филиала (ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора и взыскании судебных расходов, указав в заявлении, что сетевой организацией и ФИО1, заключен договор от 

<

дата> 

<

номер> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ПАО «Россети Юг» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих объектов электросетевого хозяйства. По условиям заключенного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения договора. Согласно пункту 6 договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, выполнив технологическое присоединение до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. Пунктом 8 договора предусмотрено, что заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, а также после выполнения мероприятий направить уведомление в сетевую организацию о выполнении технических условий. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Вместе с тем, в установленные договором сроки, в адрес истца вышеуказанного уведомления не поступило. Со ссылкой на невыполнение в установленный срок мероприятий по технологическому присоединению ответчику было направлено соглашение о расторжении договора, в связи с несоблюдением заявителем срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором. В добровольном порядке указанные требования истца ФИО1 не выполнены, соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не подписано. В связи с чем, просили суд расторгнуть договор от 

<

дата> 

<

номер> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «Россети Юг» и ФИО1, взыскать с ответчика в пользу ПАО «Россети Юг» сумму расходов по оплате государственной пошлины.

Представитель истца ПАО «Россети Юг» в лице филиала (ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») действующая на основании доверенности 

<

ФИО>4 исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Ответчик 

<

ФИО>8 и ее представитель действующий в порядке ст. 53 ГПК РФ 

<

ФИО>5 в удовлетворении иска просили отказать.

Представитель третьего лица СНТ «Мечта» - председатель 

<

ФИО>6, просила суд в удовлетворении иска отказать. 

Суд, исследовав материалы дела выслушав стороны, приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм, положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 

<

дата> № 35-ФЗ технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия. Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами, при участии уполномоченного органа государственной власти.

В пункте 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителем электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> (далее-Правила), предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил, к которым, в том числе, относятся: мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Исходя из положений пункта 16 Правил, технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю (подпункт «а»).

Заявитель при исполнении договора обязан выполнить необходимые технические мероприятия в своей части и внести установленную плату.

Как установлено в судебном заседании, что между ПАО «Россети Юг» (в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») и ФИО1 заключен договор от 

<

дата> 

<

номер> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с условиями договора ПАО «Россети Юг» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с условиями договора, пункты 3 и 4, точка присоединения указана в технических условиях. Технические условия являются неотъемлемой частью договора.. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 6 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, выполнив технологическое присоединение до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии с пунктом 8 договора, ответчик обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, а также после выполнения мероприятий направить уведомление в сетевую организации о выполнении технических условий.

Пунктом 14 договора предусмотрено, что он может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

Согласно приложения 

<

номер> к договору от 

<

дата> 

<

номер> – технические условия, определена точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения; проектируемая на границе земельного участка заявителя ВЛИ-0Ю38 кВ, проектируемой КТП 6/0,4 кВ, отходящая линия 

<

номер>,52. Сетевая организация осуществляет следующие мероприятия4 установка КТП 6/0,4 кВ, тип и мощность силового трансформатора определить проектом В сеть 6 кВ КТП 6/0,4 кВ включить отпайкой от ближащей опоры ВЛ-6 кВ Ф 52 ПС Судостроительная. Марку, сечения и трассу прокладки ВЛ-6кВ выбрать проектом. Построить ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП :/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя. Осуществить фактическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата. Подключение объекта выполнить от проектируемой на границе земельного участка заявителя ВЛИ-0,38 кВ, проектируемой КТП 6/04 кВ на границе земельного участка заявителя.

Как установлено в судебном заседании, данные мероприятия Истцом, в установленный договором срок п. 5 договора выполнены не были. В нарушение ст. 56 ГПК доказательств невозможности выполнения мероприятий суду не представлено.

<

дата> в адрес Ответчика направлены изменения к техническим условиям к договору от 

<

дата> 

<

номер>. Которые предусматривают: точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ТП 581 ВЛ-68 РП-2, владелец СТ «Мечта». Отходящая линия 

<

номер>. Подключение объекта выполнить от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 581 ВЛ-68 РП-2, владелец СТ «Мечта».

<

дата> в адрес Истца направлены возражения Ответчика об изменении технических условий. 

<

дата> в адрес Ответчика направленно соглашение о расторжении договора от 

<

дата> 

<

номер>, в связи с несоблюдением заявителем срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, а так же с указанием на то, что со стороны сетевой организации все мероприятия были выполнены. 

огласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

В соответствии с пунктом 16 (5) Правил нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Изменение в одностороннем порядке условий договора технологического присоединения к электрическим сетям ни законом, ни иным правовым актом не предусмотрена.

Согласно положений ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной.

Доказательств существенного нарушения договора со стороны Ответчика не представлено, учитывая, что Истец не наделен правом на односторонне изменение договора, между сторонами действовали технические условия в редакции согласованной при подписании договора от 

<

дата> 

<

номер>, доказательств нарушение условий которых, со стороны Ответчика, суду не представлено. 

В соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В силу п. 2 данной статьи, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным п. 4 этой статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ).

Истцом в нарушение ст. 56 ГПК не представлено доказательств совокупности условий предусмотренных п. 2 ст. 451 ГК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-197 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

Исковые требования ПАО «Россети Юг» в лице филиала (ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») к ФИО1 о расторжении договора и взыскании судебных расходов, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, через районный суд, принявший решение.

Мотивированный текст решения изготовлен 28 июня 2021 года.

Судья И.А. Марисов