УИД: 58RS0027-01-2025-006170-95

Дело №2-339/2026 (2-3568/2025)

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 января 2026 г. г. Пенза

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Бычковой Н.Н.,

при секретаре Львовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с вышеназванным исковым заявлением к ответчику ИП ФИО2, указав, 30.05.2023 между ними был заключен Договор подряда, предметом которого являлось выполнение подрядчиком (ответчиком) работ по строительству дачного домика, за что заказчик обязался выплатить 561 000 рублей. Несмотря на то что 12.06.2023истцом был выплачен аванс в размере 200 000 рублей, ответчик не исполнил договорные обязанности в установленный тридцатидневный срок. Истец неоднократно пытался связаться с ответчиком и понудить его к выполнению работ, но безрезультатно. Вследствие длительной просрочки выполнения договорных обязанностей со стороны подрядчика исполнение потеряло для заказчика интерес. 27.08.2025 истец обратился к ответчику с письмом, в котором уведомил последнего о расторжении Договора подряда от 30.05.2023 и потребовал возвратить полученный им аванс. Какой-либо реакции на претензию истец не получил до настоящего времени. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Просит признать заключенный между истцом и ответчиком Договор подряда от 30.05.2023 расторгнутым. Взыскать с ответчика в пользу истца оплаченный аванс по Договору подряда от 30.05.2023 в размере 20 000 рублей; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения работ в размере 200 000 рублей; взыскать с ответчика в пользу истца штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в ползу истца.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно, надлежащим образом.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно, надлежащим образом.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из положений п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно п.п. 1 и 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (п. 2 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (пункт 1).

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2).

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (пункт 3).

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п.п. 1, 3 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии с п. 1 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 2 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Согласно п. 2 ст. 731 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса (ст. 735 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, ФИО2 с 18.04.2024 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (...).

Основным видом деятельности являются работы по сборке и монтажу сборных конструкций (ОКВЭД 43.99.7).

Дополнительном видом деятельности являются предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД 01.61), деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая (ОКВЭД 01.63), производство прочих отделочных и завершающих работ (ОКВЭД 43.39).

30.05.2023 между ФИО2 (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению или строительству: строительных бытовок, дачных домиков, постов охраны, модульных зданий. Подрядчик обязуется передать права на указанные объекты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и опалить его. (п.1.1 договора).

Начало выполнение работ: с момента внесения суммы аванса в соответствии с п.3.3 настоящего договора. Окончание выполнения работ: 30 рабочих дней с момента начала выполнения работ (п.1.3 -1.4 договора).

Согласно п. 3.1 договора стоимость работ, выполняемой по настоящему договору, включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, и составляет 561 000 рублей.

В соответствии п. 3.2 Подрядчик вправе требовать увеличение стоимости, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

В силу п. 3.3 договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере не менее 120 000 рублей от общей цены договора. При внесении предоплаты в размере 20 % окончательный расчет производится после передачи результатов работы Заказчику. Заказчик оплачивает выполненные работы в день подписания Сторонами акта выполненных работ.

Как указано в п. 4.1 договора приемка выполненных работ по настоящему договору оформляется актом приема-передачи выполненных работ, по месту нахождения Подрядчика Иное может быть согласовано сторонами отдельно.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода. Качество выполненной работы должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям. (п.5.1 – 5.2 договора).

Согласно п.6.1 договора Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В силу п.8.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

В соответствии с п.8.3 договора за нарушение сроков выполнения работы, установленных п.1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размер 0,01% от стоимости выполненных работ.

За нарушение срока оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1% т суммы долга за каждый день просрочки (п.8.4 договора).

Согласно расписке, содержащейся в договоре подряда от 30.05.2023, ФИО2 12.06.2023 г. взял сумму у ФИО1 в размере 200 000 рублей на строительные материалы.

Таким образом, общая сумма оплаченных истцом по подговору денежных средств составила 200 000 руб.

В связи с неисполнением Подрядчиком условий договора, выраженном в отсутствии результата работ в установленное время, истец уведомил ответчика о расторжении договора подряда от 30.05.2023 и возврате полученного аванса в размере 200 000 рублей, что подтверждается представленной в материалы дела копией уведомления от 27.08.2025 г.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором (РПО) № 30.09.2025 г. срок хранения истек, выслано обратно отправителю.

Как следует из искового заявления, на момент расторжения договора подрядчиком не выполнены работы по договору подряда от 30.05.2023 в полном объеме.

В соответствии со ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Как указано в абз. 5 п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с п. 4 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 5 ст. 23.1, п. 6 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, ст. 1098 ГК РФ).

Исходя из имеющихся доказательств, принимая во внимание, что ответчиком в предусмотренный договором подряда срок работы выполнены не были, что дало истцу право отказаться от исполнения договора, учитывая, что истцом переданы ответчику денежные средства в размере 200 000 руб., ответчиком работы не выполнены, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании с ответчика в пользу истца суммы в размере 200 000 руб.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Расчет задолженности по неустойки, представленный истцом, ответчиком ИП ФИО2 не оспорен, судом признается верным. Доказательств отсутствия задолженности по рассматриваемому договору ответчиком, в порядке ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено.

Ходатайство о снижении неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ИП ФИО2 не заявлялось.

Поскольку в материалах гражданского дела отсутствуют доказательства, подтверждающие исполнение ответчиком договора подряда от 30.05.2023 года, исходя из того, что доказательств исполнения договора не представлено, а также доказательств, понесенных ответчиком фактических расходов последним представлено не было, при этом, денежные средства (аванс) не возвращены, суд приходит к выводу о том, что договор подряда от 30.05.2023 г., расторгнут ФИО1 в одностороннем порядке. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию аванс по договору подряда от 30.05.2023 в размере 200 000 рублей, неустойка за просрочку выполнения работ в размере 200 000 рублей.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

По указанным основаниям с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 200 000 руб., из расчета: (200 000 руб. + 200 000 руб.) * 50%.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

По смыслу пп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождаются истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации размер подлежащей взысканию с ответчика в доход местного бюджета государственной пошлины в данном случае составляет 12 500 руб. (исходя из удовлетворенной части исковых требований в размере 400 000 руб.).

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 235,237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителей удовлетворить.

Признать договор подряда от 30 мая 2023 года, заключенный между ФИО1 и ФИО2, расторгнутым.

Взыскать с ИП ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №) в пользу ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №) денежные средства в размере 200 000 руб., неустойку в размере 200 000 руб., штраф в размере 200 000 руб.

Взыскать с ИП ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №) государственную пошлину в доход бюджета г.Пензы в размере 12 500 руб.

Решение может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Октябрьский районный суд г. Пензы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 03 февраля 2026 года.

Судья