Дело № 2 - 168(1)\2020

64RS0034-01-2019-001944-31

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28.01.2020г. п. Дубки

Саратовский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Передреевой Т.Е.,

при секретаре Ведерине А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее ПАО «МРСК Волги») в лице филиала «Пензаэнерго» к ФИО1 о взыскании неустойки, убытков

установил:

истец обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании неустойки в размере 3456 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; сумму расходов, фактически понесенных истцом во исполнение своих обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению в размере 121654,58 руб., судебные расходы.

В обоснование требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ. между истцом и ответчиком был заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электрооборудования нежилого здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, Вычелайский сельсовет, на сумму 550 руб. в точке присоединения - вновь построенная отпаечная 

<

данные изъяты> № мощностью 

<

данные изъяты> в размере максимальной мощности энергопринимающих устройств 

<

данные изъяты> по 3 категории надежности 

<

данные изъяты> классу напряжения электрических сетей. Ответчиком оплата в размере 550 руб. произведена. Во исполнение условий договора и дополнительных соглашений к нему истец выполнил мероприятия по созданию технической возможности к присоединению, фактические затраты оставили 121654,58 руб.. Однако ответчиком условия по технологическому присоединению не выполняются, в связи с чем истец вынужден обратиться в суд.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям изложенным в иске, и просила их удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не известил, ходатайства об отложении слушания дела от него не поступило.

Учитывая надлежащее извещение ответчика, согласие представителя истца, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Заслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ. между ПАО "МРСК Волги" в лице филиала «Пензаэнерго» и ФИО1 заключен договор N № об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электрооборудования нежилого здания, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 715 кВт; категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 (кВ). 

Заявитель обязуется оплатить расходы за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

В силу п. 1.3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, Вычелайский сельсовет.

Согласно п. 1.4 договора точка присоединения - вновь построенная отпаечная 

<

данные изъяты> № мощностью 

<

данные изъяты>, подключенная к 

<

данные изъяты> № «

<

данные изъяты> «

<

адрес>» указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором будут располагаться присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п. 1.5 договора).

Пунктом 1.6 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.

В соответствии с разделом 2 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) указанного в п. 2.1.2 настоящего договора, с соблюдением срока, установленного пунктом 1.6 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Заявитель при этом обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к энергетическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности энергоснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников энергоснабжения.

Дополнительными соглашениями к договору №, №, № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлевался по соглашению сторон до ДД.ММ.ГГГГ., до ДД.ММ.ГГГГ

Пунктом 12 Технических условий предусмотрено, что срок их действия составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Судом также установлено, что ПАО "МРСК Волги" в лице филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» фактически выполнило мероприятия, необходимые для подключения объекта в точке присоединения, и уведомило об этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ..

При этом ФИО1 не были исполнены в полном объеме мероприятия, предусмотренные договором технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ. и Техническими условиями от ДД.ММ.ГГГГ..

ДД.ММ.ГГГГ. ПАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго" направило в адрес ФИО1 претензию № № об истечении срока исполнения мероприятий по договору от ДД.ММ.ГГГГ., о невыполнении в срок мероприятий по осуществлению технологического присоединения, выплате неустойки. Ответчику было предложено уведомить об исполнении принятых на себя обязательств либо расторгнуть договор и выплатить фактически понесенные расходы.

Согласно акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от ДД.ММ.ГГГГ. стоимость принимаемых основных фондов составила 103097,10 руб., сумма НДС 18557,48 руб. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 (далее - Правила N 861).

В силу п. 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 16 Правил N 861 предусмотрено, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям должен содержать существенные условия, в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Согласно п. 16.3 Правил N 861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу пп. "г" п. 18 названных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

В соответствии с п. 16.5 Правил N 861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства и приведенные нормы материального права, суд приходит выводу о расторжении заключенного между сторонами договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ в связи с существенным нарушением ФИО1 условий договора, поскольку невыполнение заказчиком технических условий влечет невозможность осуществить фактическое присоединение объекта заказчика к сетям сетевой организации, и взыскании с ответчика неустойки в размере 3456 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; суммы расходов, фактически понесенных истцом во исполнение своих обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению в размере 121654,58 руб.

Согласно ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 3702 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 -199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Пензаэнерго» к ФИО1 о взыскании неустойки, убытков удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Пензаэнерго» неустойку в размере 3456 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; убытки в размере 121654 руб. 58 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 3702 руб..

Решение в окончательной форме изготовлено 04.02.2020г.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Т.Е.Передреева