47RS0011-01-2025-002259-50 

Дело № 2-4441/2025 

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Ломоносов 30октября 2025 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Амелькович Е.С.,

при секретаре Плехановой О.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Ленэнерго» к ФИО1 о взыскании денежных средств, 

У С Т А Н О В И Л :

ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Истец) обратилось в суд с иском к ФИО1 (далее – Ответчик) о взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований истец указал, что между ним и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 29.06.2021 № ОД-ЮЭС-020932-21033780-Э-21. Ответчик надлежащим образом не исполнил обязательства по оплате и нарушил сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны. В адрес ответчика была направлена досудебная претензия, обязательства добровольно не исполнены.

Представитель истца по доверенности ФИО2 в суд явилась, просила удовлетворить иск в полном объеме. 

Ответчик в суд не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом путем размещения информации на сайте суда, а также направления повестки по адресу регистрации по месту жительства (ШПИ № почтовое отправление вернулось за истечением срока хранения 24.09.2025).

В силу ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

При таких обстоятельствах суд определил возможным рассмотрение дела в отсутствие сторон в порядке заочного производства, предусмотренного главой 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу положений п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила технологического присоединения).

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иными лицами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 (далее – Правила технологического присоединения), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п.12.1, 14 (физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно) и п.34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 18 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

Судом установлено и следует из материалов дела, между ПАО «Россети Ленэнерго» (сетевая организация) и ФИО1 (Заявитель) 29.06.2021 заключен договор об осуществлении технологического присоединения № ОД-ЮЭС№Э-21 (далее – Договор) к электрическим сетям энергопринимающего устройства Ответчика «магазин», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №.

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения.

Согласно п.8 Договора Заявитель (Ответчик) обязан был исполнить надлежащим образом в определенный Договором срок мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка и оплатить расходы на технологическое присоединение.

Пунктом 5 Договора первоначальный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был установлен в 12 месяцев со дня заключения Договора. Впоследствии Дополнительным соглашением от 22.12.2022 срок выполнения мероприятий был изменен, и окончательный срок их выполнения Ответчиком был установлен до 30.03.2023.

В соответствии с п. 10, 11 Договора, размер платы за технологическое присоединение составил 198 360 рублей 00 копеек, включая НДС 20% (33 060 руб. 00 коп.). График платежей по Договору был следующим:

1 платеж (10%) – 19 836,00 руб. в течение 15 дней с даты заключения договора (срок до 14.07.2021);

2 платеж (30%) – 59 508,00 руб. в течение 60 дней с даты заключения договора (срок до 28.08.2021);

3 платеж (20%) – 39 672,00 руб. в течение 180 дней с даты заключения договора (срок до 26.12.2021);

4 платеж (30%) – 59 508,00 руб. в течение 15 дней со дня фактического присоединения (срок до 23.06.2023);

5 платеж (10%) – 19 836,00 руб. в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении (срок до 23.06.2023).

Фактически ответчиком произведены оплаты: 

29.06.2021 – 19 836,00 руб. (1 платеж);

14.07.2021 – 59 508,00 руб. (2 платеж);

08.12.2021 – 39 672,00 руб. (3 платеж);

08.11.2023 – 59 508,00 руб. (4 платеж).

Пятый платеж в размере 19 836,00 руб. ответчиком не произведен, в связи с чем на момент обращения в суд образовалась задолженность по Договору в указанной сумме.

Акт об осуществлении технологического присоединения № 58352 был подписан 08.06.2023.

В соответствии с п. 18 Договора и пп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП), в случае нарушения Заявителем сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, последний обязан уплатить сетевой организации неустойку в размере 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки. Совокупный размер неустойки не может превышать размер, определенный за год просрочки.

Поскольку Ответчик должен был выполнить свои мероприятия до 30.03.2023, а Акт о технологическом присоединении был подписан 08.06.2023, период просрочки выполнения мероприятий ответчиком составил 70 дней (с 31.03.2023 по 08.06.2023).

Истцом произведен расчет неустойки:70 дн. * 0,0025 * 198 360,00 руб. = 34 713,00 руб., расчет проверен и принят судом, ответчиком не оспорен.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

С учетом требований состязательности, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Часть 2 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных обязанностей. 

Ответчик в судебное заседание не явилась, не использовала своего права по предоставлению доказательств в обоснование возможных возражений по делу, в том числе доказательств, опровергающих доводы истца, тем самым приняла на себя риск соответствующих процессуальных последствий.

При таком положении, поскольку доказательств исполнения обязательства по оплате оказанных услуг ответчиком не представлено, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований и взысканию с ответчика в пользу истца суммы задолженности по договору о технологическом присоединении в размере 19836 рублей., а также неустойку за просрочку выполнения мероприятий по договору за период с 30.03.2023 по 08.06.2023 в размере 34713 руб.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В обоснование заявленных требований истцом представлен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на за период с 23.06.2023 по 16.01.2025 в размере 7393,94 руб. 

Ответчик расчет Истца в части периода начисления процентов и их размера не оспаривал.

При таком положении, руководствуясь ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, в силу которой суд принимает решение по заявленным истцом требованиям, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7393,94 руб.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

При обращении в суд с настоящим иском ПАО «Россети Ленэнерго» уплачена государственная пошлина в размере 4000 руб., что подтверждается материалами дела.

Руководствуясь статьями 194 -199, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ПАО «Россети Ленэнерго» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, 

<

данные изъяты>, в пользу ПАО «Россети Ленэнерго» (№) задолженность по договору о технологическом присоединении в размере 19836 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23.06.2023 по 16.01.2023 в размере 7 393 руб. 94 коп., неустойку за период с 30.03.2023 по 08.06.2023 в размере 34 713 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 руб. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение суда изготовлено в окончательной форме 28.11.2025

Судья Е.С. Амелькович 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>