Дело № 2-1240/2023 (59RS0025-01-2023-001024-62)

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Краснокамск 23.08.2023

Краснокамский городской суд Пермского края в составе председательствующего судьи Щербаковой А.В., 

при секретаре Карповой К. А.,

с участием представителя истца прокурора г.Краснокамска ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Краснокамского городского суда гражданское дело по иску прокурора г.Краснокамска к НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», ООО УК «Пермтрансжелезобетон», администрации Краснокамского городского округа о возложении обязанности совершить определенные действия,

Установил:

прокурор г.Краснокамска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском о возложении обязанности совершить определенные действия.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой г.Краснокамска в рамках осуществления надзорных мероприятий по соблюдению требований законодательства при организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установлено что на территории Краснокамского городского округа расположен многоквартирный дом № по 

<

адрес>. Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п, утверждена Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы. Согласно перечню к указанной программе, многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Краснокамский городской округ, 1967 года постройки, по состоянию на 2014 год имел величину износа 43%, в связи с чем, были определены плановые периоды проведения капитального ремонта в доме: на 2018-2020 годы – комплексное обследование, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, а также системы холодного и горячего водоснабжения. НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в установленные региональной программой сроки работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, а также системы холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которые должны были быть проведены в период 2018-2020 годы, не провел. С учетом изложенного, в силу требований действующего законодательства на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» возлагается обязанность по проведению капитального ремонта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснокамский городской округ. Деятельность по управлению указанным многоквартирным домом осуществляет ООО УК «Пермтрансжелезобетон» на основании договора управления многоквартирным домом от 22.04.2022 № В связи с тем, что НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» длительное время не принимаются действенные и эффективные меры по своевременной реализации региональной Программы в части проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, а также системы холодного и горячего водоснабжения), расположенном по адресу: 

<

адрес>, жизнь и здоровье граждан, проживающих в вышеуказанном доме, а также других граждан, посещающих данный дом, подвергаются опасности, что в свою очередь влечет нарушения прав граждан, а также создает препятствия управляющей организации в осуществлении обязательств по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Представитель истца в судебном заседании на иске настаивала в полном объеме, просила удовлетворить исковые требования. Также суду пояснила, не смотря на то, что по документам, представленным ответчиком, согласно отчету работы были открыты 25.05.2023, прокуратурой г.Краснокамска в рамках подготовки дела был осуществлен выезд, и на месте установлено, что по состоянию 18.08.2023 работы не проведены, и не выполняются. Начаты работы были по теплоснабжению, по водоотведению работы не начаты. Относительно теплоснабжения, представитель истца пояснил, что обрезаны радиаторы, стояки, повешены радиаторы, но не подключены, трубы не сварены. Подрядной организации не было на месте обнаружено. С учетом сроков указанных в договоре до 30.08.2023, работы не выполнены, не завершены. С 15 сентября начинается отопительный сезон, дом к отопительному сезону не готов. Также приобщила к материалам дела копию акта осмотра. 

Ответчик НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя, с исковыми требованиями не согласились, указали, что во исполнение региональной программы капитального ремонта Фондом ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № на выполнение работ по капитальному ремонту с ООО «Промград». Соглавно условий договора п.4.2.2 окончание выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ. таким образом, со стороны Фонда приняты все необходимые меры и исполнены обязанности в соответствии с действующим законодательством по организации и проведении капитального ремонта в МКД № по 

<

адрес>. 

Представитель ответчика администрации Краснокамского городского округа в судебное заседание не явился, просили рассмотреть дело в отсутствие своего представителя, в суд направили отзыв на исковое заявление, согласно которому, они согласны с исковым заявлением прокурора г.Краснокамска, считают обоснованным обращение в суд, просили удовлетворить иск.

Представитель ответчика ООО УК «Пермтрансжелезобетон» в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении судебного заседания не заявлял.

Третье лицо Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края в судебное заседание представителя не направило, извещено надлежащим образом. В письменных возражениях, просило в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, включен в Региональную программу с плановым проведением работ. Полагает, что требование о соблюдении законодательства не является способом защиты, обеспечивающим восстановление нарушенного права, поскольку соблюдение закона является обязанностью всех граждан и организаций Российской Федерации. Обязанности регионального оператора установлены в силу закона. Полагает, что определение состава комиссии по приемке является производственной деятельностью регионального оператора. Суд не вправе вмешиваться в осуществление юридическим лицом хозяйственной (производственной) деятельности в силу п. 1 ст. 1 ГК РФ (л.д. 33-34).

Заслушав пояснения представителя истца, приняв во внимание позицию сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу. 

В силу ч.6.1 ст.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе: организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Согласно ч.10.1 ст.12 ЖК РФ к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений относится, в том числе методическое обеспечение установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с ч.8.3 ст.13 ЖК РФ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений относится, в то числе определение порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

На основании ч.1 ст.166 ЖК РФ перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.

Как указано в ч.1 ст.168 ЖК РФ региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта), контроля своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Согласно ч.6 ст.178 ЖК РФ субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах.

В соответствии с ч.1 ст.182 ЖК РФ региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, за счет иных не запрещенных законом средств.

Обязанности регионального оператора в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены ч. 2 ст. 182 ЖК РФ.

Согласно п.5 ч.2 ст.182 ЖК РФ региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан, в том числе осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, и (или) органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с ч.6 ст.182 ЖК РФ региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

В силу ч.2 ст.190 ЖК РФ основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи). Такой акт приемки должен быть подписан, в том числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с положениями ст.21 Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» (далее по тексту - Закон от 11.03.2014 года № 304-ПК) региональным оператором на территории Пермского края является некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

На основании положений, указанным в ст.22 Закона от 11.03.2014 № 304-ПК предметом деятельности регионального оператора является обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, в том числе финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Основными целями деятельности регионального оператора являются организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.

Функциями регионального оператора являются, в том числе осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; контроль за целевым использованием средств фонда капитального ремонта, приостановление финансирования в случае выявления нецелевого использования средств фонда капитального ремонта.

В соответствии с положениям ст. 24 Закона от 11.03.2014 № 304-ПК региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации.

Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 №288-п утверждена региональная Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы.

Судом установлено и следует из материалов дела, договором № от ДД.ММ.ГГГГ, утверждено управление многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес>, согласно которому, осуществление управления многоквартирным домом приходится управляющей компанией ООО «УК «Пермтрансжелезобетон» (л.д. 15-24).

В соответствии с п.3.1 вышеуказанного договора управляющая организация приняла на себя обязательство обеспечивать предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту, капитальному ремонту общего имущества собственников в многоквартирном доме в зависимости от фактического состояния общего имущества (л.д. 15).

Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 №288-п утверждена региональная Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, определены следующие плановые периоды проведения капитального ремонта в многоквартирном доме: 2018-2020 годы – комплексное обследование технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; ремонт внутридомовых инженерных систем (система теплоснабжения); ремонт крыши (л.д. 8-14).

До настоящего времени НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» свои обязательства по проведению капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (системы теплоснабжения, водоснабжения) многоквартирного дома № по 

<

адрес> не выполнил, что подтверждается материалами дела, и ответчиком не оспаривается. Установленные сроки проведения работ не переносились, доказательств обратного суду не представлено.

Администрацией Краснокамского городского округа 16.03.2023 было направлено письмо прокурору г.Краснокамска, а также генеральному директору НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», где указано, что меры по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по адресу: 

<

адрес> так и не приняты (л.д. 25). 

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о нарушении прав и законных интересов жителей многоквартирного дома и о наличии угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

Сроки, установленные Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края для проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (системы теплоснабжения, водоснабжения) многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, нарушены.

Обязанность по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме законодательством возложена на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных прокурором исковых требований и наличии оснований для возложения на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обязанности по проведению работ внутридомовых инженерных систем (системы теплоснабжения, водоснабжения) многоквартирного дома № по 

<

адрес>, обязанности осуществлять контроль качества и сроков оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обязанности обеспечить приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> посредством создания соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

Разрешая вопрос о длительности срока, который необходимо предоставить ответчику НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» для выполнения возложенной на него обязанности, учитывая сложность и объем работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем (системы теплоснабжения, водоснабжения) многоквартирного дома, учитывая возражения ответчика, суд считает необходимым и достаточным предоставить ответчику срок продолжительностью шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

В целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме региональный оператор обязан, в частности, привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации и заключить с ними от своего имени соответствующие договоры; контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации; осуществить приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ (пункты 3, 4, 5 ч. 2 ст.182 ЖК РФ).

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором перед собственниками своих обязательств, предусмотренных законом, установлена ч. 5 ст. 178 и ч. 1 ст. 188 ЖК РФ. Частью 6 ст. 182 ЖК РФ установлена ответственность регионального оператора за действия привлеченного им для осуществления капитального ремонта подрядчика. В соответствии с положениями данной нормы региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

Ненадлежащее состояние общего имущества в многоквартирном доме (внутридомовых инженерных систем (системы теплоснабжения, водоснабжения)) приводит к нарушению жилищных прав неопределенного круга лиц, проживающих в многоквартирном доме и создает препятствия управляющей организации в осуществлении обязательств по договору на оказание услуг и/или выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Судом установлено, что на протяжении нескольких лет (с 2018 года) НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» меры по обеспечению капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (системы теплоснабжения, водоснабжения) многоквартирного дома № по 

<

адрес> своевременно не принимал, работы до настоящего времени не выполнены.

Кроме того, суд принимает во внимание, что администрацией Краснокамского городского округа был составлен акт осмотра от 18.08.2023 согласно которому, комиссия в составе консультанта сектора жилищного фонда Управления развития коммунальной инфраструктура и жилищно-коммунального хозяйства ФИО3, консультант сектора коммунальной инфраструктуры Управления развития коммунальной инфраструктура и жилищно-коммунального хозяйства ФИО4, в присутствии заместителя прокурора 

<

адрес> ФИО5, старшего прокурора ФИО2, директора управляющей организации ООО «УК «Пермтрансжелезобетон» ФИО6, собственника квартиры № МКД № по 

<

адрес>, выявили:

- подрядной организацией ООО «Промград» демонтирована лежанка отопления частично. Общедомовые стояки демонтированы частично. Трубы отопления (лежанка) уложены, но не установлены. Радиаторы отопления находятся в жилых помещениях (не установлены), не закреплены и не подцеплены к стоякам отопления. На момент проверки представителя подрядной организации отсутствовали. Со слов управляющей организации в последний раз сотрудники подрядной организации были 12.08.2023. По информации директора ООО «УК «Пермтрансжелезобетон» работы по капитальному ремонту выполнены на 30 %. Существует опасность срыва сроков выполнения работ (до 30.08.2023), а также срыва захождения в отопительный период.

Таким образом, истец представил достаточные доказательства того, что в настоящее время Фондом как организацией, осуществляющую контроль за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме не проведена должным образом проверка работ и качества выполненных работ, подрядчиком ООО «Промград» также не осуществлены работы по капитальному ремонту, что способствует срыву сроков для проведения работ, в связи с этим, существует опасность для здоровья граждан, проживающих в вышеуказанном доме, а также других граждан, посещающих данный дом, они подвергаются опасности, что в свою очередь влечет нарушение прав граждан, а также создает препятствия управляющей организации в осуществлении обязательств по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Доводы ответчика и третьего лица о том, что требование о соблюдении законодательства не является способом защиты, обеспечивающим восстановление нарушенного права, так как соблюдение закона является обязанностью всех граждан и организаций Российской Федерации, суд находит не состоятельными.

В силу абз.8 ст.12 ГК РФ одним из способов защиты нарушенных гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Заявленные в интересах неопределенного круга лиц требования прокурора направлены на понуждение ответчика в судебном порядке исполнить возложенные на него законом обязанности по проведению капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (системы теплоснабжения, водоснабжения) многоквартирного дома № расположенного в 

<

адрес>, по выполнению в установленные сроки необходимых действий и по восстановлению прав граждан – жителей вышеуказанного многоквартирного дома и граждан, посещающих указанный многоквартирный дом.

Прокурором избран предусмотренный законом способ защиты прав и интересов неопределенного круга лиц. Непринятие данных мер нарушает права граждан на проживание в жилом помещении, соответствующем нормативным требованиям, на благоприятные безопасные условия жизни.

Суд считает не состоятельным довод третьего лица о превышении судом полномочий в части определения состава комиссии, создаваемой для приемки работ по капитальному ремонту.

Исполнителями программы являются: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», органы местного самоуправления муниципальных образований, собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации и др.

Обеспечение участия в принятии выполненных работ представителя органа исполнительной власти субъекта РФ, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов, необходимо с целью исключения фактов приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ненадлежащего качества и, как следствие, возмещения убытков, причиненных в результате некачественного оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту.

ООО УК «Пермтрансжелезобетон» и администрация Краснокамского городского округа в удовлетворении исковых требований не возражали.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора г.Краснокамска в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-198,199 ГПК РФ, суд

Решил:

исковые требования прокурора г.Краснокамска – удовлетворить.

Возложить обязанность на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, а также системы холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Возложить обязанность на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края» обеспечить приемку выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, а также системы холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в составе соответствующей комиссии. 

Возложить обязанность на ООО УК «Пермтрансжелезобетон» принять участие в приемке выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, а также системы холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермского крае».

Возложить обязанность на администрацию Краснокамского городского округа принять участие в приемке выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, а также системы холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермского крае».

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Краснокамский городской суд Пермского края в течение 1 месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Щербакова А.В.