23RS0036-01-2025-010441-96

Дело №2-325/2026

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Краснодар 22 января 2026 года

Октябрьский районный суд г.Краснодара в составе: председательствующего Балина М.В., при секретаре судебного заседания Онищенко Т.М., с участием представителя истца ФИО1 по доверенности ФИО2, представителя ответчика АО «Краснодаргоргаз» по доверенности ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» об обязании и возмещении судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратился в суд с заявлением к АО «Краснодаргоргаз» об обязании и возмещении судебных расходов.

В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Краснодаргоргаз» в лице директора по технологическому присоединению ФИО4, действующей на основании доверенности № Д/2022/49 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО1 заключен договор № 149315-Т.П.(т) «О подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Согласно предмету договора АО «Краснодаргоргаз» принимает на себя обязательства по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства нежилого здания к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного объекта с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

Согласно п.3 Договора №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, при этом срок выполнения мероприятий по подключению(технологическому присоединению) и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 102 883 рублей 03 копейки (сто две тысячи восемьсот восемьдесят три рубля три копейки), в том числе НДС 17 147 рублей 17 копеек (семнадцать тысяч сто сорок семь рублей семнадцать копеек).

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 %платы, что составляет 51 441 рубля 52 копейки (пятьдесят одна тысяча четыреста сорок один рубль пятьдесят две копейки), в том числе НДС 8 573 рублей 59 копеек (восемь тысяч пятьсот семьдесят три рубля пятьдесят девять копеек), вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора; 35 % платы, что составляет 36 006 рублей 06 копеек (тридцать шесть тысяч шесть рублей шесть копеек), в том числе НДС 6 001 рублей 51 копеек (шесть тысяч один рубли пятьдесят одна копейка), вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, в объеме, определенном в договоре; 15 % платы, что составляет 15 432 рублей 45 копеек (пятнадцать тысяч четыреста тридцать два рубля сорок пять копеек), в том числе НДС 2 572 рубля 07 копеек (две тысяч пятьсот семьдесят два рубля семь копеек), вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Истец оплатил согласно договору сумму в размере 51 441 рублей 52 копейки (пятьдесят одна тысяча четыреста сорок один рубль пятьдесят две копейки), а сетевая организация так и не приступила к исполнению обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, в объеме, определенном в договоре.

Согласно п.3 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии-Департамента цен и тарифов 

<

адрес> №-газ от ДД.ММ.ГГГГ, №-газ от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением платы за поставку газоиспользующего оборудования и (или) поставку прибора учета газа), №-газ от ДД.ММ.ГГГГ и составляет: 102 883 рубля 03 копейки (сто две тысячи восемьсот восемьдесят три рубля три копейки).

Заявитель оплатил сумму в размере 51 441 рубля 52 копейки (пятьдесят одна тысяча четыреста сорок один рубль пятьдесят две копейки). В соответствии с п.18 Договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора за каждый день просрочки.

Обязательство АО «Краснодаргоргаз» по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства должны были быть выполнены до ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, на момент подачи искового заявления нарушение срока осуществления мероприятий составляет 755 дней.

В результате чего с учетом уточненных требований истец просит взыскать с АО «Краснодаргоргаз», ИНН: 

<

***>, КПП: 23090100 в пользу ФИО1 неустойку за нарушение договорных обязательств, выразившиеся в нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению в размере 48 396,20 рублей, сумму в размере 20 000 рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда, штраф в размере 50% от взысканной судом суммы; обязать АО «Краснодаргоргаз», ИНН: 

<

***>, КПП: 230901001 в течение месяца выполнить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства нежилого здания к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного объекта, взыскать с АО «Краснодаргоргаз», ИНН: 

<

***>, КПП: 230901001 расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

Представитель истца в судебном заседании просил удовлетворить иск в полном объеме с учетом заявления об уточнении исковых требований.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении исковых требований, в случае удовлетворения требований истца, применить статью 333 ГК РФ, уменьшив размер неустойки.

Выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, суд, считает исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с п.59 Правил №, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В соответствии с п.60 Правил №, по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). Согласно п.81 Правил №, договора о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз» заключен договор №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

Срок исполнения обязательств по Договору №-Т.П.(т) о подключении (технолическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения составлял от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 2 статьи 1 ГК РФ, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В ходе выполнения мероприятий в рамках договора №-Т.П.(с), заключенного между ФИО1, Обществом и Единым оператором газификации или региональным оператором газификации Обществом подготовлены и выданы технические условия от ДД.ММ.ГГГГ №ТУ (Д)/1002-09/2023/521.

Пунктом 3 Технический условий установлено, что газифицируемым объектом капитального строительства является нежилое помещение площадью 61.1 кв.м., и расположенное по адресу: 

<

адрес>А.

Пунктом 4 Технических условий определено, что величина максимального часового расхода газа подключаемого газоиспользующего оборудования составляет 1,75 м3/час.

ДД.ММ.ГГГГ истец обратился с заявлением о внесение изменений в Технические условия в связи с увеличением мощности часового расхода газа с 1,75 м3/час до 5м3/час.

В подпункте «в» пункта 74 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в договоре о подключении максимального часового расхода газа, заявитель обязан в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях.

В силу пункта 35 договора №-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что любые изменения, вносимые в настоящий договор, действительны лишь при условии их оформления в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа) в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, подписанного сторонами, и составляют его неотъемлемую часть.

После обращения истца о внесение изменений в Технические условия в раздел об объеме часового расхода газа, Общество предложило истцу подписать дополнительное соглашение с соответствующими изменениями, а также для продления срока по договору, поскольку в силу статьи 425 и 453 ГК РФ заключение дополнительного соглашения не предусматривается по договору с истекшим сроком.

На вышеуказанное предложение Обществом получен отказ.

Таким образом, без заключения дополнительного соглашения на внесение соответствующих изменений в договор, АО «Краснодаргоргаз» не может осуществить подключение объекта капитального строительства истца по условиям, указанным в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку условия договора не были изменены в этой части.

Рассматривая требования истца на оплату неустойки в размере 40 077,44 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд приходит к следующему.

Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) был продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 2 дополнительного соглашения установлено, что стороны распространяют действие настоящего соглашения с момента заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения №-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что данное требование о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно и не подлежит удовлетворению.

Расчет неустойки необходимо производить с ДД.ММ.ГГГГ.

Так, согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Условие об ответственности сторон, установленное пунктом ДД.ММ.ГГГГ15-Т.П.(т) соответствует условию, содержащемуся в подпункте «и» пункта 52 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила №).

Вместе с тем, условие об ответственности за нарушение обязательств, на момент подписания Договора было императивно установлено Правилами №, сама форма договора о подключении является типовой, соответственно, данное условие не может быть изменено по воле сторон в части изменения вида либо размера ответственности.

Как разъяснено в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее - Постановление Пленума №), если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров. Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Таким образом, расчет неустойки следует производить на основании подпункта «и» пункта 52 Правил №, а также пункта 18 Договора, а именно применять размер неустойки, определенный как 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения Договора о подключении.

В соответствии с Правилами №, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 74 предусмотрено, что Заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

Внесение платы заявителем осуществляется в следующем порядке: 50% платы, что составляет 51 441 руб. 52 коп., в том числе НДС 8 573 руб. 59 коп. вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 35 % платы, что составляет 36 009 руб. 06 коп., в том числе НДС 6 001 руб. 51 коп. вносится в течение 11 дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «А» пункта 72 Правил, в объеме, определённом в настоящем договоре; 15 % платы, что составляет 15 432 руб. 45 коп., в том числе НДС 2 572 руб. 07 коп., вносится в течение 11 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Учитывая фактические обстоятельства спора, суд полагает правильным удовлетворить требование истца о взыскании неустойки по договору за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчет которой производить в следующем порядке: 51 441 рубль 52 копейки (сумма первого платежа по договору) * 0,014 процент неустойки по договору * 7,5% (ставка ЦБ на дату заключения договора) * 846 (дни просрочки) = 45 695, 50 рублей.

Согласно ст.15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам и защите прав потребителей», при решении судом вопроса и компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Суд с учетом принципа разумности и справедливости считает необходимым снизить размер заявленной истцом компенсации морального вреда до 10 000 рублей.

В то же время, согласно ч.6 ст.13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п.46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, подлежащей взысканию. Принимая во внимание явную несоразмерность суммы штрафа последствиям нарушения обязательства, исходя из принципа разумности и справедливости, суд, применяя положения ст.333 ГК РФ, считает возможным уменьшить размер взыскиваемого в пользу истца штрафа до 10 000 рублей.

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к исполнению договора, взысканию неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, являются обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 - удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН: 

<

***>, КПП: 23090100) в пользу ФИО1 неустойку за нарушение договорных обязательств в размере 45 695, 50 рублей, моральный вред в размере 10 000 рублей, штраф в размере 10 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

Обязать АО «Краснодаргоргаз», ИНН: 

<

***>, КПП: 230901001 в течение 60 суток выполнить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства нежилого здания к сети газораспределения по адресу 

<

адрес>А.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1 - отказать.

Решение суда может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья: подпись.

Копия верна.

Судья

Решение изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.