Дело № 2-1739/2020 г. Выборг

УИД 47RS0005-01-2020-001059-08

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 сентября 2020 года.

Выборгский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Вериго Н. Б.,

при секретаре Саидовой Х. К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества " Россети Ленэнерго" к ФИО1 о взыскании неустойки, 

установил:

Публичное акционерное общество " Россети Ленэнерго" (ранее ПАО «Ленэнерго») первоначально обратилось в Выборгский городской суд Ленинградской области с исковым заявлением к ФИО1 о расторжении договора о технологическом присоединении к электрическим сетям, взыскании неустойки, убытков, просило: расторгнуть Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.02.2018 № ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18, заключенный между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1; взыскать с ФИО1, Дата года рождения, уроженкой 

<

данные изъяты>, паспорт 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, в пользу ПАО «Ленэнерго» неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек; убытки в размере 4 080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, расходы по оплате госпошлины в размере 6 565 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что 06.02.2018 между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1 заключен Договор №ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «жилой дом», расположенного по адресу: 

<

адрес>

Договор заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность Заявителя исполнить надлежащим образом, в определённый Договором срок, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 06.08.2018.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 №648-п и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 83,90 рубля.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора, то есть до 19.02.2018.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов за технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 Договора).

Обязанность Ответчика по оплате расходов за технологическое присоединение исполнена полностью.

17.10.2018 в адрес Ответчика направлен проект Дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения мероприятий по Договору № ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18 от 06.02.2018 об осуществлении технологического присоединения электроустановок на 6 месяцев. 22.10.2018 письмо получено Ответчиком, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №. Подписанный экземпляр проекта Дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения мероприятий по Договору № ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18 от 06.02.2018 об осуществлении технологического присоединения электроустановок в адрес ПАО «Ленэнерго» Ответчик не направил.

Сетевой организацией в полном объеме исполнены обязательства по обеспечению технической возможности осуществления технологического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям, что подтверждается Уведомлением от 30.11.2018 №ВЭС/031/8390/28.

Нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя наступает с 06.08.2018.

Поскольку сведения о готовности энергопринимающих устройств Заявителя отсутствовали, в соответствии со ст.450.1, ст.453 ГК РФ, в адрес Ответчика направлена претензия №ВЭС/031/1023/40 от 21.02.2019 с предложением о расторжении Договора в случае невыполнения обязательств по Договору и требованием об уплате начисленной неустойки за просрочку исполнения обязательств.

В ответ на претензию 14.03.2019 от Заявителя поступило письмо о несогласии с предъявленными требованиями.

Уведомление об исполнении технических условий со стороны Заявителя на настоящий момент в адрес ПАО «Ленэнерго» не поступило.

Просрочка Заявителя за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению наступает с 07.08.2018 по 07.02.2020 и составляет 550 дней.

Размер неустойки по образовавшейся задолженности по состоянию на 07.02.2020 составляет 15 125, 00 рублей, согласно предложенному ниже расчету: 550 (кол-во дней просрочки) *0,05* 550, 00 руб. (общий размер платы за ТП) = 15 125, 00 рублей.

С учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п. 17 Договора общий размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки и составляет 10 037, 50 рублей.

Расчет неустойки в соответствие с п. 17 Договора: 5%*550.00*365 = 10 037.50рублей, где 5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%); 550 - размер платы по Договору (руб.), 365 - количество дней просрочки (с учетом ограничения, установленного п. 17 Договора - 1 год).

Таким образом, размер неустойки по Договору за год просрочки составляет 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек.

Согласно абз.2 п. 17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым п. 17, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

3. Согласно п. 16(5) Правил ТП, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В соответствие с п. 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем в случае не направления в адрес сетевой организации уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомления об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Пункт 18 Правил ТП предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий сетевой организацией и заявителем, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.

Договор между Истцом и Ответчиком был заключен 06.02.2018, обязательства по выполнению технических условий должны быть исполнены в соответствии с Договором до 06.08.2018.

Просрочка заявителя в исполнении мероприятий составляет более 12 месяцев.

Таким образом, неисполнение Ответчиком обязательств, предусмотренных п.8 Договора является основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации.

В соответствии с условиями Договора, он может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Приложением № 2 к Приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 г. N 648-п «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности», ставка для расчета платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю составляет 272 руб. за каждый кВт, без учёта НДС.

Присоединяемая мощность по Договору: 15 кВт, 272 руб. х 15 кВт = 4 080 руб.

Таким образом, сумма убытков, понесённых Истцом при исполнении Договора, составляет 4 080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.

Ни в установленный срок, ни на момент подачи искового заявления Ответчиком не исполнены обязательства по выполнению Технических условий со стороны ответчика и перечислению неустойки на расчетный счет ПАО «Ленэнерго».

Неисполнение Ответчиком обязательств нарушает законные права истца и является основанием для защиты нарушенных прав в судебном порядке.

Представитель истца ПАО «Россети Ленэнерго» надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, в заявлении, адресованном суду, от требований в части расторжения Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.02.2018 № ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18, заключенный между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1 и взыскания убытков, отказалась, в связи с исполнением ответчиком обязательств по Договору № ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18 от 06.02.2018, что подтверждается Актом об осуществлении технологического присоединения №342374 от 07.09.2020, отказ от иска принят судом, о чем 29.09.2020 вынесено определение, требования в части взыскания с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек; расходов по уплате госпошлины в размере 6 565 рублей, поддержала, также просила рассмотреть дело в её отсутствие, требования удовлетворить.

Ответчик надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, возражений не представила. 

Суд, исследовав доказательства, приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что 06.02.2018 между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1 заключен Договор №ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «жилой дом», расположенного по адресу: 

<

адрес>

Договор заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность Заявителя исполнить надлежащим образом, в определённый Договором срок, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 06.08.2018.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 №648-п и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 83,90 рубля.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора, то есть до 19.02.2018.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов за технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 Договора).

Обязанность Ответчика по оплате расходов за технологическое присоединение исполнена полностью.

17.10.2018 в адрес Ответчика направлен проект Дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения мероприятий по Договору № ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18 от 06.02.2018 об осуществлении технологического присоединения электроустановок на 6 месяцев. 22.10.2018 письмо получено Ответчиком, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №. Подписанный экземпляр проекта Дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения мероприятий по Договору № ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18 от 06.02.2018 об осуществлении технологического присоединения электроустановок в адрес ПАО «Ленэнерго» Ответчик не направил.

Сетевой организацией в полном объеме исполнены обязательства по обеспечению технической возможности осуществления технологического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям, что подтверждается Уведомлением от 30.11.2018 №ВЭС/031/8390/28.

Нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя наступает с 06.08.2018.

Поскольку сведения о готовности энергопринимающих устройств Заявителя отсутствовали, в соответствии со ст.450.1, ст.453 ГК РФ, в адрес Ответчика направлена претензия №ВЭС/031/1023/40 от 21.02.2019 с предложением о расторжении Договора в случае невыполнения обязательств по Договору и требованием об уплате начисленной неустойки за просрочку исполнения обязательств.

В ответ на претензию 14.03.2019 от Заявителя поступило письмо о несогласии с предъявленными требованиями.

Уведомление об исполнении технических условий со стороны Заявителя на настоящий момент в адрес ПАО «Ленэнерго» не поступило.

Просрочка Заявителя за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению наступает с 07.08.2018 по 07.02.2020 и составляет 550 дней.

Размер неустойки по образовавшейся задолженности по состоянию на 07.02.2020 составляет 15 125, 00 рублей, согласно предложенному ниже расчету: 550 (кол-во дней просрочки) *0,05* 550, 00 руб. (общий размер платы за ТП) = 15 125, 00 рублей.

С учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п. 17 Договора общий размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки и составляет 10 037, 50 рублей.

Расчет неустойки в соответствие с п. 17 Договора: 5%*550.00*365 = 10 037.50рублей, где 5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%); 550 - размер платы по Договору (руб.), 365 - количество дней просрочки (с учетом ограничения, установленного п. 17 Договора - 1 год).

Таким образом, размер неустойки по Договору за год просрочки составляет 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек.

Согласно абз.2 п.17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым п.17, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Договор между Истцом и Ответчиком был заключен 06.02.2018, обязательства по выполнению технических условий должны быть исполнены в соответствии с Договором до 06.08.2018.

Просрочка заявителя в исполнении мероприятий составляет более 12 месяцев.

Также из материалов дела следует, что ответчиком исполнены обязательства по Договору № ОД-ВЭС-3896-18/4574-Э-18 от 06.02.2018, что подтверждается Актом об осуществлении технологического присоединения №342374 от 07.09.2020.

Вместе с тем, судом установлено, что ответчиком не исполнены обязательства по перечислению неустойки на расчетный счет ПАО «Россети Ленэнерго».

Указанные обстоятельства подтверждены материалами дела, ответчиком не опровергнуты.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований или возражений по делу.

Доказательств, опровергающих установленные судом обстоятельства, ответчиком суду не представлено, в ходе рассмотрения дела не добыто.

Учитывая, что в настоящее время у ответчика имеется задолженность по оплате неустойки, требования истца основаны на законе и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования публичного акционерного общества " Россети Ленэнерго" к ФИО1 о взыскании неустойки, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, № года рождения, уроженкой 

<

данные изъяты> паспорт 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, в пользу ПАО «Ленэнерго» неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек; расходы по оплате госпошлины в размере 6 565 рублей, а всего взыскать –16 602, 50 рублей (шестнадцать тысяч шестьсот два рубля 50 копеек).

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме в Ленинградский областной суд через Выборгский городской суд.

Судья Н. Б. Вериго

47RS0005-01-2020-001059-08

Подлинный документ находится в производстве Выборгского городского суда Ленинградской области, подшит в деле №