Дело №2-839/2025 (№2-2962/2024)

24RS0004-01-2024-003197-09

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 марта 2025 года пгт. Березовка Березовского района

Красноярского края 

Березовский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего Царегородцевой М.А., 

при секретаре Юшковой А.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя. Требования мотивировала тем, что 

<

дата> между ним и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №.2400.14228.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта «Гараж», расположенной по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, м. р-н. Березовский, г.п.

<

адрес>, пгт.Березовка, гаражный массив «Красноярский ПМК», бокс 86с, кадастровый №. В соответствии с п.5 названного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 

<

дата> сетевая организация обязана была его исполнить. Однако до настоящего времени ответчиком не осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. 

В этой связи просит суд:

Возложить обязанность на ПАО «Россети Сибирь» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу, в соответствии с договором №.2400.14228.22 от 

<

дата> осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта «Гараж», расположенной по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, м. р-н. Березовский, г.п.

<

адрес>, пгт.Березовка, гаражный массив «Красноярский ПМК», бокс 86с, кадастровый №;

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в его пользу компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в его пользу неустойку за просрочку исполнения обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору №.2400.14228.22 от 

<

дата> в размере 0,25% от 660 рублей за каждый день просрочки, начиная с 

<

дата> по день фактического осуществления технологического присоединения. 

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен своевременно, надлежащим образом, письменным заявлением просил о рассмотрении дела в своё отсутствие. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещены своевременно, должным образом, представили письменный отзыв на исковое заявление, в котором просили в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. 

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 

<

дата> №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В силу п. 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п. 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Как установлено судом, что 

<

дата> ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор №.2400.14228.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 1 указанного выше договора ПАО «Россети Сибирь» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «Гараж», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 0,22 кВт;

- категория надежности 3;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего договора. 

Из п. 2 указанного выше договора следует, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Гараж», расположенного по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, м. р-н. Березовский, г.п.

<

адрес>, пгт.Березовка, гаражный массив «Красноярский ПМК», бокс 86с.

На основании п. 3 указанного выше договора, точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты. 

Также в соответствии с п. 4 указанного выше договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляется 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5 указанного выше договора). 

В соответствии с п. 6 договора ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательства: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, указанного в технических условий, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

Пунктом 8 договора на заявителя возложена обязанность: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации; надлежащим образом исполнять обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение. 

Кроме того, в соответствии с условиями указанного выше договора ФИО1 обязался оплатить услуги ответчика в размере 660 рублей, в том числе НДС в размере 110 рублей.

Из технических условий, являющихся приложением к договору от 

<

дата> №.2400.14228.22, следует, что ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательства: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

<

дата> №, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № ТУ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, способ прокладки, марку и сечение провода определит проектом; определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВ от Л-1 ТП-42-4-3; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> №.

В силу п. 11 технических условий, заявитель осуществляет: ввод от РУ 0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности); разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; при разработке проектной документации согласовать её со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством; после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии. 

<

дата> от ФИО1 в адрес ПАО «Россети Сибирь» поступило заявление об одностороннем расторжении договора от 

<

дата> №.2400.14228.22 по причине утраты заинтересованности в его исполнении, так как заявителем неправильно определены параметры запрошенного энергоснабжения. В связи с чем исполнение вышеуказанного договора прекращено, в адрес истца направлен проект соглашения о расторжении договора. 

Суд, учитывая добровольный отказ истца от исполнения договора от 

<

дата> №.2400.14228.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта «Гараж», расположенной по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, м. р-н. Березовский, г.п.

<

адрес>, пгт.Березовка, гаражный массив «Красноярский ПМК», бокс 86с, принятие данного отказа сетевой организацией, считает необходимым отказать ФИО1 в удовлетворении исковых требований об исполнении расторгнутого им договора. 

Учитывая незаконность основного требования, производные требования о взыскании штрафных санкций и компенсации морального вреда также удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

р е ш и л:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Березовский районный суд Красноярского края в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья М.А.Царегородцева

Копия верна:

Мотивированное решение изготовлено 

<

дата>.